Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

«08» июля 2022 года

Дело № А12-10521/2022

Резолютивная часть принята 17 июня 2022 года

Полный текст изготовлен 08 июля 2022 года в связи с поступлением апелляционной жалобы от ответчика.

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Поповой Т.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства, без вызова сторон, дело по иску Управления Судебного департамента в Волгоградской области (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Кибернетика» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании по государственному контракту №117 от 20.04.2021 неустойки  в размере 10 000 руб. 

Исследовав материалы дела, суд

установил:

20 апреля 2021 года на основании итогов аукциона в электронной форме  между Управлением Судебного департамента в Волгоградской области (Управление, истец) и ООО «Кибернетика» (Общество, ответчик) заключен государственный контракт №117 на оказание услуг по заправке, техническому обслуживанию и текущему ремонту кондиционеров бытовых (сплит-систем) в соответствии с требованиями технического задания (приложением № 1), являющегося неотъемлемой частью государственного контракта.

Цена государственного контракта составила 900 000 рублей (п. 6.1 государственного контракта).

По условиям п. 1.1, 2.1, 2.2 государственного контракта от 20.04.2021 года №117 ООО «Кибернетика» обязалось оказывать услуги в сроки, указанные в техническом задании с момента заключения государственного контракта до 01.10.2021 года.

Утвержденным и согласованным сторонами графиком на выполнение технического обслуживания установлены сроки технического обслуживания по каждому объекту.

             Истец указывает, что ООО «Кибернетика» в установленный графиком срок не выполнено техническое обслуживание объектов заказчика:

Нехаевский районный суд Волгоградской области (срок - с 12 по 24 мая 2021);

Калачевский районный суд Волгоградской области (срок - с 11 по 18 мая 2021);

Даниловский районный суд Волгоградской области (срок - с 18 по 21 мая 2021);

Ольховский районный суд Волгоградской области (срок - с 27 апреля по 17 мая

2021);

Кумылженский районный суд Волгоградской области (срок - с 19 мая по 28 мая

2021);

Волжский городской суд Волгоградской области (срок - с 7 июня по 15 июня

2021);

Октябрьский районный суд Волгоградской области (срок - с 28 мая по 18 июня

2021);

Алексеевский районный суд Волгоградской области (срок - с 25 мая по 08 июня

2021);

Тракторозаводский районный суд г. Волгограда (срок - с 03 июня 2021 по 17 июня 2021);

Волгоградский гарнизонный военный суд (срок - с 20 мая 2021 по 18 июня

2021);

Красноармейский районный суд г. Волгограда (срок - с 09 июня 2021 по 18 июня 2021);

Городищенский районный суд Волгоградской области (срок - с 29 апреля 2021 по 12 мая 2021);

Чернышковский районный суд Волгоградской области (срок - с 31 мая 2021 по 9 июня 2021);

Клетский районный суд Волгоградской области (срок - с 02 по 09 июня 2021).

            Также истец указывает, что ООО «Кибернетика» в установленный заявкой от 05.07.2021 №4073 и пунктом 2 технического задания срок - до 09.07.2021 не выполнен текущий ремонт сплит-системы в Алексеевском районном суде Волгоградской области.

В силу пункта 9.5 государственного контракта от 20.04.2021 года №117 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей.

В связи с ненадлежащим исполнением ООО «Кибернетика» обязательств по государственному контракту Управлением начислена сумма неустойки, которая составила 10 000 рублей, в том числе сумма неустойки (штрафа) по п. 9.5 государственного контракта в размере 5 000 рублей - за невыполнение в установленный графиком срок технического обслуживания объектов заказчика и сумма неустойки (штрафа) в размере 5 000 рублей  за невыполнение в установленный срок  текущего ремонта сплит-системы в Алексеевском районном суде Волгоградской области.

Данные обстоятельства подтверждаются предоставленными в материалы дела письмами районных судов Волгоградской области

Управлением выставлены претензии об уплате неустойки - от 29.06.2021  и от 02.08.2021 с требованием уплатить неустойку в срок до 15.08.2021 года.

Доказательств  оплаты требований и возражения по существу заявленных требований

не представлено.

Ответчик извещался  по  адресу государственной регистрации. Корреспонденция суда возвратилась с отметкой органа почтовой связи об истечении срока хранения. 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167 - 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кибернетика» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Управления Судебного департамента в Волгоградской области (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 10 000 руб. по государственному контракту №117 от 20.04.2021.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кибернетика» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

  Судья                                                                                    Т.В. Попова