73_9778226 

Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-95231/19

17 июня 2020 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.С. Гузеевой, при  ведении протокола помощником судьи Макаровой Е.А., рассмотрев в судебном  заседании дело по исковому заявлению ООО "НОВЫЙ ВЕК - ИНЖИНИРИНГ" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Комитету градостроительства Администрации  Наро-Фоминского городского округа Московской области (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о признании,  

при участии сторон согласно протоколу судебного заседания от 17.06.2020, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Внести изменения в пункт 3.2 муниципального контракта №  0148300062719000080-19 от 03 июня 2019 года на выполнение работ по капитальному  ремонту МАДОУ детский сад комбинированного вида № 20, Московская область,  Наро-Фоминский городской округ, 

<

...>, изложив  его в следующей редакции: "3.2. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств  составляет: начало работ: 03 июня 2019 года, окончание работ: 27 ноября 2019 года  включительно.", а также внести соответствующие изменения в части сроков  исполнения Контракта в Приложение № 3 к контракту "Календарный план (График  выполнения работ)".  

Взыскать с Комитета градостроительства Администрации Наро-Фоминского  городского округа Московской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу ООО "НОВЫЙ ВЕК - ИНЖИНИРИНГ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 6000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. государственной пошлины по иску.  

Возвратить ООО "НОВЫЙ ВЕК - ИНЖИНИРИНГ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 7 938 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной по  платежному поручению № 142 от 16.03.2020.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный  апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его  принятия если не подана апелляционная жалоба.  

Судья О.С. Гузеева