РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-18095/23-110-144

г. Москва

26 июня 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 19 июня 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 26 июня 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью  "КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ" (129347, ГОРОД МОСКВА, ХОЛМОГОРСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 2, КОРПУС 3, Э 1 ПОМ XV К 15 ОФ 50, ОГРН: 1187746610457) к обществу с ограниченной ответственностью  "АРХСТРОЙГРУПП" (141052, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., МЫТИЩИ Г.О., МЫТИЩИ Г., ТРОИЦЕ-СЕЛЬЦО Д., НОВОЛУГОВАЯ УЛ., СТР. 2, ОГРН: 1077746331772) о взыскании 1 325 688 руб.,

 

при участии:

от истца – Антипова И.В. по дов.  от 16.01.2023,

от ответчика- Гуцуленко А.В. по дов. от 23.12.2021 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью  "КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью  "АРХСТРОЙГРУПП" о взыскании 1 262 560 руб. задолженности по договору от 18.01.2021 №12-СТУ/20, 63 128 руб. неустойки.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между ООО «АрхСтройГрупп» (далее – Заказчик, Истец) и ООО «Комплексное Проектирование» (далее – Исполнитель, Ответчик) был заключен Договор № 12-СТУ/20 от 18.01.2021 на разработку специальных технических условий в отношении объекта: «Строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Реконструкция домовладения и новое строительство здания ГлавУпДК при МИД России для размещения инопредставительств», расположенного по адресу: г. Москва, Померанцев переулок, д.8, стр.1,2» (далее - Договор).

В силу п. 2.1. Договора Цена его Работ составляет 3 525 120,00 руб. (Три миллиона пятьсот двадцать пять тысяч сто двадцать рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% 587520 руб. (Пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек), в соответствии с Сметой (Приложение 4). Заказчик производит авансовый платеж в размере 50 % от Цены Работ, указанной в п.2.1. Договора, что составляет 1 762 560,00 руб. (Один миллион семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% 293 760,00 руб. (Двести девяносто три тысячи семьсот шестьдесят рублей 00 копеек), в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выставления счета Исполнителем (п. 2.1.1. Договора).

19.02.2021 Заказчиком Исполнителю оплачен аванс в сумме 1 762 560,00 руб. (платежное поручение № 396 от 19.02.2021).

14.07.2021 между Исполнителем и Заказчиком подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ на сумму 3 525 120,00 руб. (Три миллиона пятьсот двадцать пять тысяч сто двадцать рублей 00 копеек).

Согласно п. 2.3. Договора окончательный расчет за выполненные Работы по Договору производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета на сумму, согласно п.2.1.2 Договора, в течение 35 (Тридцати пяти) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ. Следовательно, обязанность по оплате выполненных Исполнителем работ наступила для Заказчика 01.09.2021.

02.11.2021 Заказчиком Исполнителю оплачены выполненные работы в сумме 300 000,00 руб. (платежное поручение № 4536 от 02.11.2021), а 29.12.2021 – в сумме 200 000,00 руб. (платежное поручение № 5258 от 29.12.2021).

Оплата выполненных Исполнителем работ на сумму 1 262 560,00 руб. (Один миллион двести шестьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек) до настоящего времени Заказчиком не произведена.

В соответствии со ст. 762 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Пунктом 1 статьи 310 ГК РФ закреплена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннего изменения его условий, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу п. 4.5 Договора в случае нарушения Заказчиком срока оплаты, Заказчик оплачивает пени в размере 1/720 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от суммы задолженности.

Истцом произведен расчет пени за просрочку оплаты Ответчиком выполненных Истцом работ по состоянию на 17.01.2023:

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

1 262 560,00

01.09.2021

Новая задолженность на 1 262 560,00 руб.

1 262 560,00

01.09.2021

12.09.2021

12

6.5

1 262 560,00 ? 12 ? 1/720 ? 6.5%

1 367,77 р.

1 262 560,00

13.09.2021

24.10.2021

42

6.75

1 262 560,00 ? 42 ? 1/720 ? 6.75%

4 971,33 р.

1 262 560,00

25.10.2021

19.12.2021

56

7.5

1 262 560,00 ? 56 ? 1/720 ? 7.5%

7 364,93 р.

1 262 560,00

20.12.2021

13.02.2022

56

8.5

1 262 560,00 ? 56 ? 1/720 ? 8.5%

8 346,92 р.

1 262 560,00

14.02.2022

27.02.2022

14

9.5

1 262 560,00 ? 14 ? 1/720 ? 9.5%

2 332,23 р.

1 262 560,00

28.02.2022

10.04.2022

42

20

1 262 560,00 ? 42 ? 1/720 ? 20%

14 729,87 р.

1 262 560,00

11.04.2022

03.05.2022

23

17

1 262 560,00 ? 23 ? 1/720 ? 17%

6 856,40 р.

1 262 560,00

04.05.2022

26.05.2022

23

14

1 262 560,00 ? 23 ? 1/720 ? 14%

5 646,45 р.

1 262 560,00

27.05.2022

13.06.2022

18

11

1 262 560,00 ? 18 ? 1/720 ? 11%

3 472,04 р.

1 262 560,00

14.06.2022

24.07.2022

41

9.5

1 262 560,00 ? 41 ? 1/720 ? 9.5%

6 830,10 р.

1 262 560,00

25.07.2022

18.09.2022

56

8

1 262 560,00 ? 56 ? 1/720 ? 8%

7 855,93 р.

1 262 560,00

19.09.2022

17.01.2023

121

7.5

1 262 560,00 ? 121 ? 1/720 ? 7.5%

15 913,52 р.

Сумма основного долга: 1 262 560,00 руб.

Сумма неустойки: 85 687,49 руб.

Размер пени ограничен п. 4.5. Договора в 5 % от суммы задолженности, что составляет 63 128,00 руб.

Между тем, согласно п. 1.3. Договора сроки выполнения отдельных этапов Работ, в том числе сопровождения специальных технических условий при их утверждении в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства развития Российской Федерации, определяются графиком выполнения Работ (Приложение 2).

Датой начала работ по Этапу 1 ? Договора считается дата передачи исходной документации определённой Перечнем исходной документации для разработки СТУ (Приложение №3) Исполнителю (п. 3.1. Договора).

Датой начала работ по Этапу 2 Договора считается дата поступления денежных средств (аванс) от Заказчика на расчётный счет Исполнителя (п. 3.2. Договора).

Датой начала работ по этапу 3 считается дата согласования СТУ с Заказчиком или дата оплаты Заказчиком Работ по Этапу 1 в адрес Исполнителя в зависимости от того, что произойдёт позднее (п. 3.3. Договора).

В силу Графика выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) длительность выполнения работ составляет - 45 (сорок пять) календарных дней с в соответствии с графиком проведения научно-технических советов при Минстрое РФ. При этом,

разработка специальных технических условий - 7 календарных дней с даты оплатыаванса;

сопровождение проекта специальных технических условий в Министерстве строительства и ЖКХ РФ

30 календарных дней с момента утверждения Заказчиком СТУ в соответствии с графиком проведения научно-технических советов при Минстрое РФ.

Таким образом, Стороны согласовали, что сроки выполнения работ зависят от работы органа государственной власти - Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства развития Российской Федерации.

19.02.2021 Ответчиком был оплачен аванс в сумме 1 762 560,00 руб. платежным поручением № 396.

20.02.2021 разработанные Истцом СТУ были направлены Ответчику на согласование (на адрес электронной почты: ostrankov@asg-pro.ru)

04.03.2021 от Ответчика были получены согласованные СТУ.

12.04.2021 ПАО «МОЭК» (заказчик Ответчика) выдал Истцу доверенность № 108 с полномочиями: направлении на рассмотрение и согласование в Минстрое России СТУ по Объекту. На основании указанной доверенности Истец направил СТУ на согласование в Минстрой РФ.

14.05.2021 от Минстроя РФ получены замечания письмом исх. № 19535-АШОЗ.

26.05.2021 СТУ повторно направлены Истцом на согласование в Минстрой РФ (письмо ПАО «МОЭК» от 19.05.2021 исх. № 3 1 -01 -03-1327/21).

11.06.2021 получено согласование Минстроя РФ по разработанным Истом СТУ (письмо исх. № 24249-АЛ/03).

В соответствии с 2.1. договора цена работ составляет 3 525 120 руб.

Заказчик 20.02.2021 п/п №396 перечислил исполнителю аванс в размере 1 762 560 руб.

Работы на сумму 3 525 120 руб. были выполнены исполнителем и переданы заказчику 14.07.2021 о чем стороны подписали акт №19.

Таким образом, просрочки составила 3 дня с 12.07.2021 по 14.07.2021.

Следовательно, пени за просрочку оплаты Ответчиком выполненных Истцом работ составляют 52 552,64 руб., о зачете которых было заявлено  ответчиком. Оснований для применения 333  ГНК РФ не имеется.

При указанных обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст.   110, 123, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью  "АРХСТРОЙГРУПП" (ОГРН: 1077746331772)  в пользу  общества с ограниченной ответственностью  "КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ" (ОГРН: 1187746610457)  1 262 560  руб. задолженности, 52 552 руб. 4 коп. неустойки, 26 048 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

 

Судья:

А.В. Мищенко