68/2022-41322(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А13-2600/2022

город Вологда

14 апреля 2022 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области  

р е ш и л:

внести в муниципальный контракт от 09.11.2021 № 16-06-03/350-2021 на  выполнение работ по капитальному ремонту на объекте капитального  строительства: МБДОУ «Детский сад № 122» (ул. Олимпийская, 27),  заключенный между муниципальным казенным учреждением «Управление  капитального строительства и ремонтов» и обществом с ограниченной  ответственностью «ШАМС-Строй» изменение, изложив пункт 3.1 контракта в  следующей редакции:  

«3.1. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта. 

Окончание выполнения работ по Контракту: 30 июня 2022 года.».  

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

Судья А.А. Фадеева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 12.04.2022 8:20:00

Кому выдана Фадеева Анастасия Александровна