Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город Москва

Дело № А40-50719/2022

26-288

14 июля 2022 года

резолютивная часть решения объявлена 28 июня 2022 года

полный текст решения изготовлен 14 июля 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Нечипоренко Н.В. (единолично),

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Муксимовым Э.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(123317, ГОРОД МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2, ОГРН: 1047796323123, Дата присвоения ОГРН: 06.05.2004, ИНН: 7705596339)

к ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АКСИОМА-СЕРВИС"

(194100, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАНТЕМИРОВСКАЯ УЛИЦА, 5, 9, ЛИТ. Б, ОГРН: 1037804017415, Дата присвоения ОГРН: 03.01.2003, ИНН: 7802000978)

о взыскании 13 742 485,97 руб. 

при участии:

от истца: Берулин А.Н, удостоверение, доверенность от 17.12.2021г., диплом о высшем юридическом образовании 

от ответчика: Филиппов Д.Н., паспорт, доверенность от 06.07.2021г, диплом о высшем юридическом образовании

УСТАНОВИЛ:

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АКСИОМА-СЕРВИС" о взыскании субсидии, предоставленной по соглашению № 020-11-2018-945 от 13.12.2018 г. в размере 11 854 895 руб., процентов в размере 1 887 590,97 руб.

Истец исковые требования поддержал.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ, представленные доказательства, выслушав доводы представителя истца и ответчика, суд полагает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению, исходя из следующего.

Как указывает истец в обоснование иска, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1048 утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации производства медицинских изделий в рамках подпрограммы «Развитие производства медицинских изделий» государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы» (далее - Правила).

13.12.2018 Минпромторг России (далее - Министерство) и ЗАО «Аксиома-Сервис» (далее - Получатель) в соответствии с Правилами заключили соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации производства медицинских изделий №020-11-2018-945 (далее -Соглашение).

Согласно п. 1.1.1. Соглашения, субсидия предоставляется из федерального бюджета в целях возмещения части затрат Получателя, связанных с реализацией проекта «Модернизация высокотехнологичного производства медицинских изделий: оборудования и инструментария высокого класса для эндовидеохирургии и видеоэндоскопии» (далее - проект).

Согласно п. 2.1 Соглашения, с учетом дополнительного соглашения от 26.04.2019 № 020-11-2018-945/1, истцом была перечислена ответчику субсидия на сумму 11 854 895 руб., что подтверждается платежными поручениями 24.12.2018 № 792071 и от 21.05.2019 № 357728.

В соответствии с п. 4.3.7. Соглашения Получатель обязуется обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство в соответствии с Соглашением.

Согласно п. 4.1.6 Соглашения, Министерство осуществляет контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, в том числе в части достоверности представляемых Получателем в соответствии с Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок.

В ходе проверки, проведенной ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отношении ответчика установлен факт представления Получателем в адрес Министерства подложных документов с целью получения субсидии, о чем было сообщено истцу письмом от 16.10.2020 № 8/31083.

Письмами от 29.10.2020 № 81881/19, от 14.01.2021 № 942/19 Министерство запросило у ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области информацию о сумме субсидии, полученной по подложным документам, и документы, подтверждающие получение субсидии.

Письмом от 02.07.2021 № 8/22570 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что генеральный директор ЗАО «Аксиома-Сервис» предоставил для получения субсидии перечень документов, куда, помимо прочего, были включены копии договоров - № П2601-18/1 от 26.01.2018, № 3001-01/ТО от 31.01.2018, № 1-А от 01.02.2018, а также первичных учетных документов (акты сдачи-приемки выполненных работ, платежные поручения, счета), подтверждающих осуществление затрат Получателем и содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о якобы понесенных затратах на общую сумму 11 099 200 руб., 50 % от которой составляет 5 549 600 руб., которые на основании Соглашения были перечислены истцом на расчетный счет ответчика.

В соответствии с п. 4.1.7 Соглашения, в случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, в том числе указания в документах, представленных Получателем недостоверных сведений, Министерство направляет Получателю требование об обеспечении возврата субсидии в федеральный бюджет.

При этом согласно п. 5.2.1 Соглашения Получатель обязан возвратить соответствующие денежные средства в доход федерального бюджета в течение 10 рабочих дней со дня получения настоящего требования Министерства.

Письмом от 05.07.2021 № 55775/19 истец направил ответчику требование о возврате субсидии в доход федерального бюджета в размере 11 854 895 руб., а также процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ за период, начиная с даты предоставления субсидии, в доход федерального бюджета, с решением о расторжении Соглашения в одностороннем внесудебном порядке.

Письмом от 11.08.2021 № АС-108/21 ответчик выразил несогласие с требованиями, изложенными в письме истца от 05.07.2021 № 55775/19, что и послужило основанием для обращения истца с иском в суд.

Возражая против иска, ответчик указывает, что в 2018 году ЗАО «Аксиома-Сервис» было принято решение модернизировать линейку выпускаемого компанией медицинского оборудования в рамках проекта «Модернизация высокотехнологичного производства медицинских изделий: оборудования и инструментарий высокого класса для эндовидеохирургии и эндоскопии» (далее - Проект).

В настоящее время в рамках этого Проекта ответчиком разрабатывается (модернизируется) и выпускается следующее медицинское оборудование:

1) Система видеогастроскопическая «АКСИ»;

2) Система видеоколоноскопическая «АКСИ»;

3) Система видеоэндоскопическая для жесткой эндоскопии «АКСИ»;

4) Аппарат электрохирургический ЭХВЧ – «АКСИ», с режимом авто-стоп, авто-старт, с принадлежностями;

5)Инсуффлятор электронный для гибкой и жесткой эндоскопии ИН-«АКСИ», с подачей 40 л/мин;

6) Инструменты эндоскопические «АКСИ». Модульный монополярный и биполярный инструментарий, инструменты доступа, инструменты для экспозиции и экстракции, для санации, пунктирования и контрастирования, принадлежности для соединения тканей (Ассортимент более 200 шт.);

7) Промывочное устройство.

С целью реализации Проекта ЗАО «Аксиома-Сервис» был разработан бизнес-план, включающий следующие этапы для каждого изделия:

1) Разработка дизайна будущего медицинского изделия. Выполняется штатными дизайнерами организации или по договору аутсорсинга;

2) Разработка конструкторской документации. Выполняется штатными конструкторами организации или по договору аутсорсинга;

3) Выпуск опытных образцов. В начале необходимо приобрести материалы и комплектующие, затем с использованием станков токарных, фрезерных, эрозионных изготовить детали. В процессе производства опытных деталей необходимо изготовить или приобрести оснастки (технологическая совокупность средств, предназначенная для установки заготовки на станок) и пресс-формы (устройство для получения изделий различной конфигурации из различных материалов под действием давления, создаваемые литьевой машиной). После изготовления деталей их собирают в готовое изделие;

4) Отработка технологических процессов. Происходит после выпуска опытной партии с целью поиска наиболее оптимального технологического процесса производства;

5) Выпуск установочной серии. Производства установочной партии (от 3 шт.) происходит на том же производственном участке, что и опытные образцы, но с учетом отработанных технологических процессов;

6) Проведение технических и токсикологических испытаний. Эти испытания готовых образцов проводят специализированные лицензированные организации с целью подтверждения безопасности и соответствия ГОСТам медицинского изделия и в случае успешных результатов оформляются протоколом;

7) Проведение клинических испытаний. Проводятся в лечебных учреждениях строго после успешных клинических испытаний и токсикологических исследований;

8) Проведение испытаний медицинских изделий РОСЗДРАВНАДЗОРОМ. Для реализации Проекта, в том числе, был увеличен штат организации более чем в 2 раза с 20 человек в 2017 году до 41 (из них: создано 7 высокотехнологичных рабочих мест) в 2018 году, увеличены производственные площади более чем на 2000 кв.м. и т д.

Проекты по организации производства или модернизации медицинских изделий частично субсидируются из бюджета РФ. Государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013 – 2020 годы» утверждена Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 № 1048 и опубликована на сайте Минпромторга России. Целью указанной программы являлось развитие производства инновационных лекарственных средств и медицинских изделий. 

ЗАО «Аксиома-Сервис» соответствовала всем требованиям, указанным в постановлении, и в результате рассмотрения поданной Обществом заявки между Минпромторгом России и ЗАО «Аксиома-Сервис» было заключено соглашение о предоставлении субсидии № 020-11-2018-945 от 13.12.2018 и доп. соглашение к нему от 09.04.2019 (далее Соглашение), согласно которому была перечислена субсидия:

В 2018 году – 5 158 020,00 руб. были получены как 50 % от фактически осуществленных затрат по следующим договорам:

Договор субаренды № П2601-18/1 от 26.01.2018 с ООО «УК ТЕРРА».

Это производственное помещение площадью 582 кв. метра с ежемесячной арендной платой 756 600 руб. Согласно этому договору арендодатель передал помещение вместе с промышленным оборудованием (16 единиц промышленного оборудования) – токарными станками, фрезерными станками, шлифовальным, компрессорным и другим оборудованием. Фактически это подготовленный токарный и шлифовальный участок. Этим и обусловлена высокая стоимость аренды за это помещение. В арендованном помещении осуществлялась токарная обработка и шлифовка заготовок для опытных образцов и установочной серии деталей для медицинских изделий по проекту.

Согласно этому договору арендодатель передал помещение вместе с промышленным оборудованием:

- токарный центр Viper – 15L – 1 шт;

- токарный автомат с ЧПУ NT17/NP17 – 1 шт;

- компрессор ВКЕ10Е - 1 шт;

- фрезерный станок с ЧПУ ГФ2171С65 -  2 шт;

- токарный автомат с ЧПУ ЛФ260 - 2 шт;

- токарный центр  R-10 - 2 шт;

- токарный центр  T-4 – 3 шт;

- токарный центр  RR-20 – 1 шт;

- центрово шлифовальный станок 3Е-180В - 1 шт;

- плоско шлифовальный станок Прага - 1 шт;

- плоско шлифовальный станок SPC-20b -1 шт;

- заточной станок 3А64 – 1 шт;

- заточной станок RITZ1955T – 1 шт.

Фактически это подготовленный токарный, фрезерный и шлифовальный участок. В этом помещение осуществлялась токарная обработка и шлифовка заготовок для опытных образцов и установочной серии деталей для медицинских изделий по проекту. Это помещение эксплуатировалось как производственный цех ЗАО «Аксиома-Сервис» весь 2018 год и с января по август 2019 года. В нем ежедневно трудились не менее 10 работников ЗАО «Аксиома-Сервис», которые в рамках расследования уголовного дела подтвердили размещение в этом здании производства ЗАО «Аксиома-Сервис».

Возмещено – 1 891 500 рублей.

Договор субаренды № П2601-18/2 от 26.01.2018 с ООО «УК ТЕРРА».

Производственное помещение площадью 1 469 кв. м (без оборудования) с ежемесячной арендной платой 734 720 руб., что составляет 500 руб. за кв.м в месяц. В этом помещение расположен фрезерный участок - 500 кв. м, эрозионный участок - 250 кв.м., участок сборки инструментов – 300 кв.м, участок сборки приборов - 250 кв.м, участок контроля - 150 кв.м.

В этом помещении производится фрезерная и эрозионная обработка деталей и сборка опытных образцов и установочной серии мед изделий по проекту.

Возмещено – 2 571 520 рублей.

Договор на сервисное и техническое обслуживание оборудования №30010-01/ТО, с ежемесячной суммой 120 000 руб. с ООО «Комэнд Сервис».

В рамках этого договора ООО «Комэнд Сервис» производило замену расходных материалов, мелкий ремонт, замену масла и др. работу для обеспечения работоспособности более 16 единиц промышленного оборудования:

- Компрессор BRAVO-4000;

- Станок координатно-расточной;

- Станок кругло-шлифовальный ЛЗ-369Ф1;

- Станок универсально-заточной 3В642;

-  Станок плоско шлифовальный мод. 451;

- Станок токарно-револьверный;

- Станок токарно-револьверный;

- Станок фрезерный FUW-250;

- Компрессорная установка С-416М;

- Автомат токарный R-32;

- Станок вертикально-фрезерный с ЧПУ мод. ГФ2171С65;

- Бензорезчик STIHL TS 510;

- Печь муфельная с программируемым терморегулятором ПМ-14М;

- Станок ленточно-отрезной ручной мод. ARG 220 Plus.

ООО «Комэнд Сервис» осуществляло текущее обслуживание оборудования как своими силами, так и с привлечением третьих лиц.

Возмещено – 300 000 рублей.

Договор на юридическое обслуживание №1-А от 01.02.2018 с ООО «Евротраст».

В целях выполнения Проекта ЗАО «Аксиома-Сервис» была необходима юридическая поддержка, которая, в том числе, заключалась в составлении проектов договоров, экспертизе договоров с контрагентами, анализе действующих нормативно-правовых актах, связанного с выполнением проекта и т.д. За указанные услуги ЗАО «Аксиома-Сервис» оплачивало ежемесячную плату в размере 70 000 в месяц.

Возмещено 245 000 рублей.

Договор на оказания услуг № МКА-297.17 от 01.02.2018 с ООО «МКА».

Договор на участие в Общероссийском форуме, на котором были представлены рекламные материалы и образец Аппарата электрохирургический ЭХВЧ – «АКСИ», с режимом авто-стоп, авто-старт, и Инсуффлятор электронный для гибкой и жесткой эндоскопии ИН-«АКСИ», с подачей 40 л/мин. С целью подготовки рынка для дальнейшей реализации товара, создаваемого в рамках проекта.

Возмещено 150 000 рублей.

В 2019 году – 6 696 875,00 руб. были получены как 50 % от фактически осуществленных затрат по следующим договорам:

Договор субаренды №П2601-18/1 от 26.01.2018 с ООО «УК ТЕРРА». Производственное помещение площадью 582 кв. м метра с ежемесячной арендной платой 756 600 руб. Необходимость аренды данного помещения описана выше.

Возмещено 2 648 100 рублей.

Договор субаренды №П2601-18/2 от 26.01.2018 с ООО «УК ТЕРРА». Производственное помещение площадью 1 469 кв. м (без оборудования) с ежемесячной арендной платой 734 720 руб. Что составляет 500 руб. за кв.м в месяц. Необходимость аренды данного помещения описана выше.

Возмещено 1 836 800 рублей.

Договор на сервисное и техническое обслуживание оборудования №30010-01/ТО, с ежемесячной суммой 120 000 руб. с ООО «Комэндсервис». Целесообразность этих расходов в целях реализации проекта описана выше.

Возмещено 360 000 рублей.

Договор на оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования от 01.12.2018 с ИП Грушовец.

В рамках этого договора ИП Грушовец производил мелкий ремонт, замену масла, СОЖа и др. работу для обеспечения работоспособности более 15 единиц промышленного оборудования, которые не входили в договор с ООО «Комэнсервис». Это промышленное оборудование используется для достижений цели Проект – изготовления деталей для опытных образцов и установочной серии.

Возмещено – 88 650 рублей.

Договор на юридическое обслуживание №1-А от 01.02.2018 с ООО «Евротраст» с ежемесячной платой в размере 70 000 руб. Целесообразность этих расходов в целях реализации проекта описана выше.

Возмещено – 105 000 рублей.

Договор № МКА-0002806 от 10.02.2019 с ООО «МКА».

Договор на участие в мероприятии «Стандарты и качество в хирургии грыж», на котором были представлены рекламные материалы и описание на инструменты эндоскопические АКСИ (зажимы монополярные и троакары). С целью подготовки рынка для дальнейшей реализации товара, создаваемого в рамках проекта.

Возмещено 25 000 рублей.

Договор на оказания услуг № 17 от 09.01.2019 с ООО «РОНДО».

Договор на участие в межрегиональной научно-практической конференции «Инновационные технологии в хирургии и урологии», на котором были представлены рекламные материалы, образцы и описание на Аппарат электрохирургический ЭХВЧ – «АКСИ», с режимом авто-стоп, авто-старт, и Инсуффлятор электронный для гибкой и жесткой эндоскопии ИН-«АКСИ», с подачей 40 л/мин, инструменты эндоскопические АКСИ (зажимы моноплярные и троакары). С целью подготовки рынка для дальнейшей реализации товара создаваемого в рамках проекта.

Возмещено 50 000 рублей.

Договор № 2018-11-173700-GUA-PM от 30.11.2018 с ООО «ПРОММАШ ТЕСТ».

Согласно действующему законодательству в случае создания новых рабочих мест необходимо провести их оценку, что и было сделано в рамках данного договора.

Возмещено 33 825 рублей.

Договор от 05.06.2018 с ООО «Акси-МАСТЕР» на проектирование оснастки и разработку пресс-форм.

В рамках выполнения проекта для выпуска установочной серии эндоскопических инструментов АКСИ (монополярных и биполярных) необходимо было спроектировать оснастку и разработать пресс-форму для маховика рукоятки.

Возмещено 700 000 рублей.

Договор поставки №О/18-09-1 от 10.09.2018 с ООО «ЭЛМЕД».

Согласно этому договору были приобретены пресс-формы, необходимые для отливки силиконовых колец и манжет, необходимых для создания опытной партии и установочной серии эндоскопических инструментов АКСИ- инструментов доступа.

Возмещено – 457 500 рублей.

Договор №Д/18-04-01 от 16.04.2018 с ООО «Акси-МАСТЕР» на разработку дизайн макета.

В рамках этого договора был разработан дизайн пластиковой педали для ЭХВЧ. Педаль является принадлежностью Аппарат электрохирургический ЭХВЧ – «АКСИ», с режимом авто-стоп, авто-старт.

Возмещено – 130 000 рублей.

Договор поставки №А/18-06-01 от 05.06.2018 с ООО «Акси-МАСТЕР.

В рамках этого договора были поставлены светопроводящие жгуты, необходимые для производства опытных образцов, установочной серии и отработки тех. процессов  систем видеогастроскопической и видеоколноскопической АКСИ.

Возмещено – 262 000 рублей.

Кроме того, ответчик указывает, что выводы органа предварительного расследования о подложном характере предоставленной в Минпромторг России документации, фиктивности соответствующих договоров, своего подтверждения в ходе следствия не нашли.

Также ответчик отмечает, что сами по себе письма ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступившие в Минпромторг России в рамках уголовного дела, а равно и факт его возбуждения не могут являться безусловными и надлежащими доказательствами, устанавливающим недобросовестность ответчика ЗАО «Аксиома-Сервис», а подлежат оценке судом в совокупности с иными представленными по делу доказательствами (статья 71 АПК РФ). При этом необходимо отметить, что до настоящего времени приговор судом не вынесен. Иных доказательств в нарушение статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено.

Предоставленная ЗАО «Аксиома-Сервис» субсидия использована по целевому назначению на реализацию Проекта, поскольку достигнуты предусмотренные Соглашением результаты Проекта.

В соответствии с п. 2 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации производства медицинских изделий в рамках подпрограммы «Развитие производства медицинских изделий» государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015г. № 1048 (далее - Правила 1048) субсидии предоставляются в целях стимулирования инвестиционной активности российских организаций для создания, расширения и модернизации производства медицинских изделий и способствуют достижению следующих целевых показателей подпрограммы «Развитие производства медицинских изделий» государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы:

а) доля медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления (в денежном выражении);

б) создание и (или) модернизация высокопроизводительных рабочих мест в медицинской промышленности (накопленным итогом);

в) реализация отраслевого плана мероприятий по импортозамещению в отрасли медицинской промышленности Российской Федерации.

Планом-графиком реализации проекта, являющемся Приложением №1 к Соглашению, а также Итогами реализации проекта, являющимся Приложением №7 к Соглашению, предусмотрены аналогичные целевые показатели.

- создание высокопроизводительных рабочих мест.

Указанные выше результаты проекта, для реализации которого и была предоставлена субсидия, достигнуты ЗАО «Аксиома-Сервис».

Также с опережением плана-графика реализации проекта проведены технические, токсикологические, клинические испытания медицинского изделий, процедура государственной регистрации изделий. Результатом выполняемых работ являются разработанные технические условия ТУ 9444-040-27507632-2009 «Инсуффлктор электронный ИН-32-01-«АКСИ».

В феврале 2020 года получено регистрационное удостоверение: № ФСР 2010/07027 от 06.02.2020 «Инсуффлятор электронный для гибкой и жесткой эндоскопии ИН-«АКСИ» с подачей 40 л/мин по ТУ 9444-040-27507632-2009».

В настоящее время проект, рассчитанный на 6 лет, находится в стадии реализации, а План-график и показатели эффективности выполнения проекта в рамках Соглашения с Минпромторг России выполняются в полном объеме, статус всех показателей проекта за 2019, 2020, 2021 год «выполнен», а показатель по сумме продаж перевыполнен.

Отклоняя доводы ответчика, суд учитывает, что утверждение ответчика о достижении предусмотренных Соглашением результатов проекта противоречит представленным в материалы дела доказательствам, поскольку согласно справке о ходе достижения плановых значений показателей (индикаторов) эффективности реализации проекта, направленной ответчиком в адрес истца в составе отчетных документов за 2021 год, у ответчика имеется отставание в выполнении плана-графика и исполнении контрольных событий с 2020 года. (письмо от 31.03.2022 № АС-132/22).

Положениями статей 307-310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Таким образом, субсидия, предоставленная по соглашению № 020-11-2018-945 от 13.12.2018 г. в размере 11 854 895 руб., подлежит взысканию в пользу истца.

В силу пункта 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Истец начислил ответчику проценты за период с 24.12.2018 г. по 02.02.2022 г. в размере 1 887 590,97 руб.

Расчет истца судом проверен, арифметически и методологически выполнен верно.

Следовательно, требование о взыскании процентов является обоснованным.

Остальные доводы отзыва ответчика суд исследовал, оценил и не принимает ко вниманию в силу их малозначительности и безосновательности, а также в связи с тем, что по мнению суда, они не могут повлиять на результат его рассмотрения.

Расходы по уплате государственной пошлины относятся судом на ответчика на основании статьи 110 АПК РФ и подлежат взысканию в доход федерального бюджета, поскольку истец освобожден от ее уплаты.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 8, 12, 307, 308, 309, 310, 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 65, 71, 110, 167, 170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АКСИОМА-СЕРВИС" (ИНН: 7802000978) в пользу МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИНН: 7705596339) субсидию, предоставленную по соглашению № 020-11-2018-945 от 13.12.2018 г. в размере 11 854 895 руб., проценты в размере 1 887 590,97 руб.

Взыскать с ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АКСИОМА-СЕРВИС" (ИНН: 7802000978) в доход федерального бюджета Российской Федерации госпошлину в размере 91 712 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

Н.В. Нечипоренко