ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-335525/19-67-1668

г. Москва

15 июня 2020 г.

Резолютивная часть решения оглашена 10 июня 2020 г.

Полный тест решения изготовлен 15 июня 2020 г.                                                                   

Арбитражный суд в составе:                                                                                                                                                    

Судья В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола секретарём с/з ФИО1, 

рассмотрев в предварительном судебном заседании в зале 10011

дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Строй Консалтинг" (117279, Москва город, улица МиклухоМаклая, дом 34, офис 2, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.03.2015, ИНН: 

<

***>) к Акционерному обществу "Прогресс" (107031, Москва город, улица Неглинная, 14, 1А, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.10.2012, ИНН: 

<

***>) о взыскании 80 782 744,30 руб.

при участии: 

от истца: ФИО2 по дов. от 13.12.2019; диплом; 

от ответчика: ФИО3 по дов. от 04.08.2019; диплом;

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Строй Консалтинг" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Акционерному обществу "Прогресс" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору от 04.12.2017 №2017-Р-02 в размере  75 787 367 руб. 78 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере  4 995 376 руб. 52 коп.

Заявленные требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных работ.

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик не возражал против удовлетворения заявленных требований.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, на основании следующего.

Как усматривается из материалов дела, 04 декабря 2017г.  Истец и Ответчик  заключили договор №2017-Р-02 на выполнение ремонтных и реставрационных работ в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс Сандуновских бань с торговым домом ФИО4 и жилыми квартирами Арх. Б.В. Фрейденберг, 1894-1897гг. Номерные бани, жилые квартиры. Адрес: 

<

...>».

Стоимость работ по указанному договору складывается из стоимости работ, согласованных сторонами в Локальной смете.

Вышеназванный договор, по правовым признакам, является договором строительного подряда и регулируется нормами материального права, содержащимися в параграфах 1, 3 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729, 740 - 757).

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

А) 15 января 2018г. Истец и Ответчик заключили дополнительное соглашение к договору строительного подряда на выполнение ремонтных и реставрационных работ от 04.12.2017г. № 2017-Р-02 на осуществление реставрационных  работ фасадов Объекта, принадлежащего Заказчику, расположенном по адресу: 

<

...>.

06 февраля 2019г. дополнительным соглашением № Н-2 стороны увеличили стоимость работ до 51 248 613руб. 32

Выполнение указанных работ в полном объеме и без замечаний подтверждается подписанием сторонами Справками о стоимости выполненных работ №1 от 13.07.2018г., №2 от 30.04.2019г. и Актами о приемке выполненных работ №1 от 13.07.2018г., №2 от 30.04.2019г.

В соответствии с п.3 доп.соглашения оплата работ проводится в безналичном порядке одним из нижеперечисленных способов:

- в течение 5 рабочих дней с момента получения Заказчиком счета на оплату;

- в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) на весь объем Работ,  Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3), предоставления Подрядчиком Счета – фактуры, на основании выставленного Счета на оплату.

16 июля 2018г. между сторонами было подписано соглашение о зачете встречных обязательств на сумму 32 163 652руб. 05коп.

Окончательный Акт о приемке выполненных работ был подписан сторонами 30.04.2019г., соответственно, оплата выполненных работ должна была быть осуществлена не позднее 07 мая 2019г., однако сумма задолженности в размере 19 084 961руб. 27коп. не оплачена до настоящего времени.

Б) 16 января 2018г. стороны заключили дополнительное соглашение №3 к договору строительного подряда на выполнение ремонтных и реставрационных работ от 04.12.2017г. № 2017-Р-02, предметом соглашения являлось осуществление работ по монтажу металлической кровли в осях 5-13/Ж-Р (без стеклянной кровли) на объекте заказчика, расположенном по адресу: 

<

...>.

Стоимость работ составляла 20 342 255руб. 33коп.

Выполнение указанных работ в полном объеме и без замечаний подтверждается подписанием сторонами Справок о стоимости выполненных работ №1 от 19.10.2018г. и №1 от 15.02.2019г., Актов о приемке выполненных работ №1 от 19.10.2019г. и №1 от 15.02.2019г.

В соответствии с п.3 доп.соглашения оплата работ проводится в безналичном порядке одним из нижеперечисленных способов:

- в течение 5 рабочих дней с момента получения Заказчиком счета на оплату;

- в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) на весь объем Работ,  Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3), предоставления Подрядчиком Счета – фактуры, на основании выставленного Счета на оплату.

Однако по состоянию на сегодняшнюю дату, за Ответчиком числится задолженность за выполненные работы в сумме 7 149 841руб. 43коп.

Окончательный Акт о приемке выполненных работ был подписан сторонами 15.02.2019г., соответственно, оплата выполненных работ должна была быть осуществлена не позднее 22 февраля 2019г. 

В) 16 января 2018г. стороны заключили дополнительное соглашение № 4 к договору строительного подряда на выполнение ремонтных и реставрационных работ от 04.12.2017г. № 2017-Р-02, предметом соглашения являлось осуществление работ по ремонту помещений 2 этажа в осях Г-Т/1-13 на объекте заказчика, расположенном по адресу: 

<

...>.

Стоимость работ составляла 16 330 382руб. 45 коп.

Выполнение указанных работ в полном объеме и без замечаний подтверждается подписанием сторонами Справки о стоимости выполненных работ №1 от 31.08.2018г. и Акта о приемке выполненных работ №1 от 31.08.2018г. 

В соответствии с п.3 доп.соглашения оплата работ проводится в безналичном порядке одним из нижеперечисленных способов:

- в течение 5 рабочих дней с момента получения Заказчиком счета на оплату;

- в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) на весь объем Работ,  Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3), предоставления Подрядчиком Счета – фактуры, на основании выставленного Счета на оплату.

Таким образом, оплата выполненных работ должна была быть осуществлена не позднее 07 сентября 2018г.

Однако по состоянию на сегодняшнюю дату, работы не оплачены в полном объеме, за Ответчиком числится задолженность за выполненные работы в сумме 16 330 382руб. 45коп.

Г)  16 января 2018г. стороны заключили дополнительное соглашение №5 к договору строительного подряда на выполнение ремонтных и реставрационных работ от 04.12.2017г. № 2017-Р-02, предметом соглашения являлось осуществление работ по устройству кровли в осях Г-Т/1-6 на объекте заказчика, расположенном по адресу: 

<

...>.

Стоимость работ составляла 19 024 086руб. 64 коп.

Выполнение указанных работ в полном объеме и без замечаний подтверждается подписанием сторонами Справки о стоимости выполненных работ №1 от 17.09.2018г. и Акта о приемке выполненных работ №1 от 17.09.2018г. 

В соответствии с п.3 доп.соглашения оплата работ проводится в безналичном порядке одним из нижеперечисленных способов:

- в течение 5 рабочих дней с момента получения Заказчиком счета на оплату;

- в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) на весь объем Работ,  Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3), предоставления Подрядчиком Счета – фактуры, на основании выставленного Счета на оплату.

Таким образом, оплата выполненных работ должна была быть осуществлена не позднее 24 сентября 2018г.

Однако по состоянию на сегодняшнюю дату, работы не оплачены в полном объеме, за Ответчиком числится задолженность за выполненные работы в сумме 5 939 321руб. 31коп.

Д)  16 января  2018г. стороны заключили дополнительное соглашение №6 к договору строительного подряда на выполнение ремонтных и реставрационных работ от 04.12.2017г. № 2017-Р-02, предметом соглашения являлось осуществление работ по воссозданию лепного декора фасада на объекте заказчика, расположенном по адресу: 

<

...>.

Стоимость работ составляла 12 277 557руб. 30 коп.

Выполнение указанных работ в полном объеме и без замечаний подтверждается подписанием сторонами Справки о стоимости выполненных работ №1 от 14.05.2019г. и Акта о приемке выполненных работ №1 от 14.05.2019г. 

В соответствии с п.3 доп.соглашения оплата работ проводится в безналичном порядке одним из нижеперечисленных способов:

- в течение 5 рабочих дней с момента получения Заказчиком счета на оплату;

- в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) на весь объем Работ,  Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3), предоставления Подрядчиком Счета – фактуры, на основании выставленного Счета на оплату.

Таким образом, оплата выполненных работ должна была быть осуществлена не позднее 21 мая 2019г.

Однако по состоянию на сегодняшнюю дату, работы не оплачены в полном объеме, за Ответчиком числится задолженность за выполненные работы в сумме 2 683 267руб. 19коп.

Е) 16 января  2018г. стороны заключили дополнительное соглашение №7 к договору строительного подряда на выполнение ремонтных и реставрационных работ от 04.12.2017г. № 2017-Р-02, предметом соглашения являлось осуществление работ по ремонту помещений 1 этажа в осях Г-Т/1-13, ремонт лестниц в осях С-Т/1-2 и в осях Ж/3-5 на объекте заказчика, расположенном по адресу: 

<

...>.

Стоимость работ составляла 14 308 938руб. 57 коп.

Выполнение указанных работ в полном объеме и без замечаний подтверждается подписанием сторонами Справки о стоимости выполненных работ №1 от 31.08.2018г. и Акта о приемке выполненных работ №1 от 31.08.2018г. 

В соответствии с п.3 доп.соглашения оплата работ проводится в безналичном порядке одним из нижеперечисленных способов:

- в течение 5 рабочих дней с момента получения Заказчиком счета на оплату;

- в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) на весь объем Работ,  Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3), предоставления Подрядчиком Счета – фактуры, на основании выставленного Счета на оплату.

Таким образом, оплата выполненных работ должна была быть осуществлена не позднее 07 сентября 2018г.

Однако по состоянию на сегодняшнюю дату, работы не оплачены в полном объеме, за Ответчиком числится задолженность за выполненные работы в сумме 4 292 681руб. 57коп.

Ж) 20 июля  2018г. стороны заключили дополнительное соглашение №8 к договору строительного подряда на выполнение ремонтных и реставрационных работ от 04.12.2017г. № 2017-Р-02, предметом соглашения являлось осуществление работ по ремонту помещений 3 этажа в осях Г-Т/1-13 на объекте заказчика, расположенном по адресу: 

<

...>.

Стоимость работ составляла 13 756 412руб. 07 коп.

Выполнение указанных работ в полном объеме и без замечаний подтверждается подписанием сторонами Справки о стоимости выполненных работ №1 от 17.09.2018г. и Акта о приемке выполненных работ №1 от 17.09.2018г. 

В соответствии с п.3 доп.соглашения оплата работ проводится в безналичном порядке одним из нижеперечисленных способов:

- в течение 5 рабочих дней с момента получения Заказчиком счета на оплату;

- в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) на весь объем Работ,  Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3), предоставления Подрядчиком Счета – фактуры, на основании выставленного Счета на оплату.

Таким образом, оплата выполненных работ должна была быть осуществлена не позднее 24 сентября 2019г.

Однако по состоянию на сегодняшнюю дату, работы не оплачены в полном объеме, за Ответчиком числится задолженность за выполненные работы в сумме 13 756 412руб.07 коп.

З) 01 августа 2018г. стороны заключили дополнительное соглашение №10 к договору строительного подряда на выполнение ремонтных и реставрационных работ от 04.12.2017г. № 2017-Р-02, предметом соглашения являлось осуществление работ по установке оконных блоков на объекте заказчика, расположенном по адресу: 

<

...>.

Стоимость работ составляла 7 941 461руб.45коп.

Выполнение указанных работ в полном объеме и без замечаний подтверждается подписанием сторонами Справок о стоимости выполненных работ №1 от 19.10.2018г., №2 от 15.02.2019г.  и Актов о приемке выполненных работ №2 от 06.12.2018г. и №2 от 15.02.2019г.

В соответствии с п.3 доп.соглашения оплата работ проводится в безналичном порядке одним из нижеперечисленных способов:

- в течение 5 рабочих дней с момента получения Заказчиком счета на оплату;

- в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) на весь объем Работ,  Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3), предоставления Подрядчиком Счета – фактуры, на основании выставленного Счета на оплату.

Таким образом, оплата выполненных работ должна была быть осуществлена не позднее 22 февраля 2019г.

Однако по состоянию на сегодняшнюю дату, работы не оплачены в полном объеме, за Ответчиком числится задолженность за выполненные работы в сумме 2 382 438руб. 43 коп.

И) 28 августа  2018г. стороны заключили дополнительное соглашение №11 к договору строительного подряда на выполнение ремонтных и реставрационных работ от 04.12.2017г. № 2017-Р-02, предметом соглашения являлось осуществление работ по ремонту лифтовой шахты на объекте заказчика, расположенном по адресу: 

<

...>.

Стоимость работ составляла 532 301руб. 71 коп.

Выполнение указанных работ в полном объеме и без замечаний подтверждается подписанием сторонами Справки о стоимости выполненных работ №1 от 26.11.2018г. и Акта о приемке выполненных работ №1 от 26.11.2018г. 

В соответствии с п.3 доп.соглашения оплата работ проводится в безналичном порядке одним из нижеперечисленных способов:

- в течение 5 рабочих дней с момента получения Заказчиком счета на оплату;

- в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) на весь объем Работ,  Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3), предоставления Подрядчиком Счета – фактуры, на основании выставленного Счета на оплату.

Таким образом, оплата выполненных работ должна была быть осуществлена не позднее 03 декабря 2018г.

Однако по состоянию на сегодняшнюю дату, работы не оплачены в полном объеме, за Ответчиком числится задолженность за выполненные работы в сумме 532 301руб.71коп.

К) 28 августа  2018г. стороны заключили дополнительное соглашение №12 к договору строительного подряда на выполнение ремонтных и реставрационных работ от 04.12.2017г. № 2017-Р-02, предметом соглашения являлось осуществление работ по устройству стеклянной кровли Мавританского дворика(кровля в осях 6-13/К-Р) и двух зенитных фонарей (в осях Т-Г/1-5) на объекте заказчика, расположенном по адресу: 

<

...>.

Стоимость работ составляла 12 707 978руб. 41 коп.

Выполнение указанных работ в полном объеме и без замечаний подтверждается подписанием сторонами Справки о стоимости выполненных работ №1 от 15.02.2019г. и Акта о приемке выполненных работ №1 от 15.02.2019г. 

В соответствии с п.3 доп.соглашения оплата работ проводится в безналичном порядке одним из нижеперечисленных способов:

- в течение 5 рабочих дней с момента получения Заказчиком счета на оплату;

- в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) на весь объем Работ,  Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3), предоставления Подрядчиком Счета – фактуры, на основании выставленного Счета на оплату.

Таким образом, оплата выполненных работ должна была быть осуществлена не позднее 22 февраля 2019г.

Однако по состоянию на сегодняшнюю дату, работы не оплачены в полном объеме, за Ответчиком числится задолженность за выполненные работы в сумме 2 041 595руб.71коп.

Л) 01 октября  2018г. стороны заключили дополнительное соглашение №15 к договору строительного подряда на выполнение ремонтных и реставрационных работ от 04.12.2017г. № 2017-Р-02, предметом соглашения являлось осуществление работ по устройству кабинетов и санузлов на 1-4 этажах на объекте заказчика, расположенном по адресу: 

<

...>.

Стоимость работ составляла 1 047 208руб.41 коп.

Выполнение указанных работ в полном объеме и без замечаний подтверждается подписанием сторонами Справки о стоимости выполненных работ №1 от 26.10.2018г. и Акта о приемке выполненных работ №1 от 26.10.2018г. 

В соответствии с п.3 доп.соглашения оплата работ проводится в безналичном порядке одним из нижеперечисленных способов:

- в течение 5 рабочих дней с момента получения Заказчиком счета на оплату;

- в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) на весь объем Работ,  Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3), предоставления Подрядчиком Счета – фактуры, на основании выставленного Счета на оплату.

Таким образом, оплата выполненных работ должна была быть осуществлена не позднее 02 ноября 2018г.

Однако по состоянию на сегодняшнюю дату, работы не оплачены в полном объеме, за Ответчиком числится задолженность за выполненные работы в сумме 1 047 208руб.41коп.

М) 14 декабря  2018г. стороны заключили дополнительное соглашение №17 к договору строительного подряда на выполнение ремонтных и реставрационных работ от 04.12.2017г. № 2017-Р-02, предметом соглашения являлось осуществление работ по замене оконных блоков в Мавританском дворике, расположенном на объекте заказчика, расположенном по адресу: 

<

...>.

Стоимость работ составляла 562 961руб. 86 коп.

Выполнение указанных работ в полном объеме и без замечаний подтверждается подписанием сторонами Справки о стоимости выполненных работ №1 от 15.02.2019г. и Акта о приемке выполненных работ №1 от 15.02.2019г. 

В соответствии с п.3 доп.соглашения оплата работ проводится в безналичном порядке одним из нижеперечисленных способов:

- в течение 5 рабочих дней с момента получения Заказчиком счета на оплату;

- в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) на весь объем Работ,  Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3), предоставления Подрядчиком Счета – фактуры, на основании выставленного Счета на оплату.

Таким образом, оплата выполненных работ должна была быть осуществлена не позднее 22 февраля 2019г.

Однако по состоянию на сегодняшнюю дату, работы не оплачены в полном объеме, за Ответчиком числится задолженность за выполненные работы в сумме 112 592руб. 38коп.

Н) 09 января  2019г. стороны заключили дополнительное соглашение №19 к договору строительного подряда на выполнение ремонтных и реставрационных работ от 04.12.2017г. № 2017-Р-02, предметом соглашения являлось осуществление работ по накрытию лепных изделий по фасадам металлическими отливами, расположенных на объекте заказчика, расположенном по адресу: 

<

...>.

Стоимость работ составляла 529 967руб.31 коп.

Выполнение указанных работ в полном объеме и без замечаний подтверждается подписанием сторонами Справки о стоимости выполненных работ №1 от 15.02.2019г. и Акта о приемке выполненных работ №1 от 15.02.2019г. 

В соответствии с п.3 доп.соглашения оплата работ проводится в безналичном порядке одним из нижеперечисленных способов:

- в течение 5 рабочих дней с момента получения Заказчиком счета на оплату;

- в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) на весь объем Работ,  Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3), предоставления Подрядчиком Счета – фактуры, на основании выставленного Счета на оплату.

Таким образом, оплата выполненных работ должна была быть осуществлена не позднее 22 февраля 2019г.

Однако по состоянию на сегодняшнюю дату, работы не оплачены в полном объеме, за Ответчиком числится задолженность за выполненные работы в сумме 105 993руб.47коп.

О) 14 марта  2019г. стороны заключили дополнительное соглашение №20 к договору строительного подряда на выполнение ремонтных и реставрационных работ от 04.12.2017г. № 2017-Р-02, предметом соглашения являлось осуществление работ по устройству железобетонных лестниц в осях С-Т/1-2 на объекте заказчика, расположенном по адресу: 

<

...>.

Стоимость работ составляла 628 370руб.38 коп.

Выполнение указанных работ в полном объеме и без замечаний подтверждается подписанием сторонами Справки о стоимости выполненных работ №1 от 12.04.2019г. и Акта о приемке выполненных работ №1 от 12.04.2019г. 

В соответствии с п.3 доп.соглашения оплата работ проводится в безналичном порядке одним из нижеперечисленных способов:

- в течение 5 рабочих дней с момента получения Заказчиком счета на оплату;

- в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) на весь объем Работ,  Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3), предоставления Подрядчиком Счета – фактуры, на основании выставленного Счета на оплату.

Таким образом, оплата выполненных работ должна была быть осуществлена не позднее 19 апреля 2019г.

Однако по состоянию на сегодняшнюю дату, работы не оплачены в полном объеме, за Ответчиком числится задолженность за выполненные работы в сумме 628 370руб 38коп.

08 октября 2019г. Истец направил в адрес Ответчика претензию № 3 с требованием об оплате суммы задолженности и пени. 11 октября 2019г. Ответчик направил в адрес Истца письмо о том, что с суммой долга и пени согласен, однако оплатить сумму задолженности не представляется возможным  ввиду финансовых затруднений.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - информационное письмо №51).

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Пунктом 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа.

Определением от 04 февраля 2020 года суд истребовал у истца: согласно п. 6.10 Договора следующие документы: акты освидетельствования скрытых Работ; паспорта и сертификаты на используемые материалы; журнал ведения Работ; сопроводительные документы согласно СНиП; списки работников, выполнявших работы на объекте, списки техники, используемой при выполнении работ, с подтверждающими документами; журнал учета работ (форма КС-6А). Данный журнал ведет исполнитель работ по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ; Проектно-сметную и техническую документацию на выполнение работ, получение или приобретение материалов для выполнения работ, дефектные ведомости и другие документы, которые позволили бы убедиться в реальности выполнения работ. У ответчика: карточку счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» по истцу за заявленный в иске период, оборотно-сальдовые ведомости по истцу за заявленный в иске.

Запрашиваемые судом документы были представлены сторонами и приобщены к материалам дела.

С учетом изложенного, истец доказал факт наличия у ответчика задолженности представленными в материалы дела доказательствами, требование о взыскании задолженности по договору от 04.12.2017 №2017-Р-02 в размере 75 787 367 руб. 78 коп. признается судом обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки в размере 4 995 376 руб. 52 коп. 

Согласно положениям пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Представленный истцом расчет подлежащих взысканию процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 4 995 376 руб. 52 коп., составленный исходя из действующей в соответствующие периоды ключевой ставки Банка России, а также период их начисления и размер, проверен судом, является правильным и не оспорен по существу ответчиком.

С учетом изложенного, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 4 995 376 руб. 52 коп.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с Акционерного общества "Прогресс" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Строй Консалтинг" задолженности по договору от 04.12.2017 №2017-Р-02 в размере  75 787 367 (семьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч триста шестьдесят семь) руб. 78коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере  4 995 376 (четыре миллиона девятьсот девяносто пять тысяч триста семьдесят шесть) руб. 52 коп., а так же расходы по уплате госпошлины в размере 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:                                                                                                              В.Г. Джиоев