132/2023-89168(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;  

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-7105/2022

город Саратов

03 апреля 2023 года

Руководствуясь статьями 167-170,176-180,181 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,   

РЕШИЛ:

Заявленные исковые требования ООО УК "Жилфондсервис", г.Саратов удовлетворить.  

 Обязать Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в  Саратовской области, г.Саратов, ОГРН 

<

***> в течение трех месяцев с даты  вступления решения суда в законную силу за свой счет обеспечить устранение недостатков  выполненных работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого дома,  расположенного по адресу: 

<

...>, путем:  

1) исправления проектной документации в соответствии с нормативными  требованиям, с внесением в проектную документацию:  

обосновывающего расчета (в том числе элементов водосточный системы),  подтверждающего технологическую возможность реализации принятых проектных решений  при осуществлении капитального ремонта.  

-Указание значения уклонов в местах установки водосточных воронок.  -Указание кабельной система против обледенения.  

-Указание системы листво - или гравиеуловителей для защиты водостоков от засорения.  

2) проведения необходимых работ по устранению недостатков проведенного  капитального ремонта кровли дома по адресу 

<

...> в соответствии с  исправленной проектной документации, действующими нормативными требованиями.  ГОСТами. СНИПами, а именно:  

-Прикрепить стойки ограждения способом, указанным в проектной документации с  использованием резиновых прокладок.  

-Обеспечить прилегание конструкции кровельного покрытия к стойкам ограждения в  соответствии с проектной документации, обеспечить герметичность кровельного покрытия.  

-Обеспечить угол наклона горизонтальных желобов водосточной системы стекания воды с  кровли в воронки наружной восточной система.  

-Обеспечить установку системы листво-или гравиеуловителей.  -Обеспечить установку кабельной системы против обледенения.  

-Обеспечить примыкание кровельного материала с вентшахтами надлежащим образом,  устранить негерметичность соединений, надлежащим образом закрепить металлическую  прижимную планку.  

-Обеспечить установку лотков, обеспечивающие переливание воды с горизонтальных  желобов в водосточные воронки.  

-Обеспечить надлежащее крепление водосточных труб к фасаду здания. Обеспечить  установку труб к фасаду здания-отвесно, с отступом от стены на 120 мм и крепление к стене  

через 12000 мм штыри с ухватами. Трубы должны навешиваться отвесно, отступать от стены на  120 мм и прикрепляться к стене через 1200 мм штырями с ухватами.  

 Взыскать с Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в  Саратовской области, г.Саратов, ОГРН 

<

***> в пользу ООО УК «Жилфондсервис»,  г.Саратов, ОГРН 

<

***> расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000  рублей, расходы на проведение судебной экспертизы в размере 80000руб.  

 Взыскать с Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в  Саратовской области, г.Саратов, ОГРН 

<

***> в пользу ООО УК «Жилфондсервис»,  г.Саратов, ОГРН 

<

***> в случае неисполнения судебного акта в установленный срок  неустойку в размере 200руб. за каждый день неисполнения судебного акта по дату его  исполнения.  

 Выдать исполнительный лист. 

 Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через суд, вынесший решение, в апелляционном  порядке в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Поволжского округа, в течение  двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную силу. 

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в  соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 28.01.2022 2:16:52

 Кому выдана ФИО1