Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А58-7212/2020

24 декабря 2020 года

город Якутск

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Васильевой А.Б. рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению  акционерного общества  "Дальневосточная распределительная сетевая компания" филиал "Южно-Якутские электрические сети" (ИНН 2801108200, ОГРН 1052800111308) к акционерному обществу "Акционерная компания "Железные дороги Якутии" (ИНН 1435073060, ОГРН 1021401044500) о взыскании 3 174 руб. 91 коп.,

без вызова сторон, 

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество  "Дальневосточная распределительная сетевая компания" филиал "Южно-Якутские электрические сети" обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением к акционерному обществу "Акционерная компания "Железные дороги Якутии" о взыскании 3 174 руб. 91 коп. неустойки за период с 16.12.2019 по 09.06.2020 за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.08.2019 № 2019/Ю 579.

Определением арбитражного суда от 22 октября 2020 года исковое заявление принято к производству, дело назначено к рассмотрению в порядке упрощённого производства без вызова лиц, участвующих в деле (сторон), в соответствии со статьёй 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Лицам, участвующим в деле (сторонам), предложено в срок не позднее 16 ноября 2020 года представить доказательства, на которых они основывают свои требования, ответчику – представить отзыв на иск. Лицам, участвующим в деле (сторонам), установлен срок для обмена дополнительными документами, содержащими объяснения по существу исковых требований и возражений в обоснование своей позиции, и представления их в суд в срок не позднее 08 декабря 2020 года.

Информация о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства опубликована на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 23.10.2020.

В соответствии с частью 5 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судья рассматривает дело в порядке упрощенного производства без вызова сторон. 

Лица, участвующие в деле, рассматриваемом в порядке упрощенного производства, извещены о начавшемся судебном процессе надлежащим образом по правилам статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что подтверждается материалами дела.

Дело рассмотрено по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке упрощённого производства в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчиком представлен отзыв на исковое заявление.

От истца поступило ходатайство о приобщении документов во исполнение определения суда, возражение на отзыв ответчика.

Представленные документы приобщены к материалам дела на основании статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

15.12.2020 арбитражным судом вынесено решение по настоящему делу в виде резолютивной части, которое размещено на официальном сайте Арбитражного суда Республике Саха (Якутия) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 16.12.2020. 

17 декабря 2020 года от ответчика поступило заявление о составлении мотивированного решения.

В соответствии с частью 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

При рассмотрении настоящего дела судом установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

Как следует из материалов дела, 07 августа 2019 года между АО «ДРСК» (сетевая организация) и АО «АК «Железные дороги Якутии» (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 2019/Ю 579, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта заявителя – многоквартирного жилого дома с офисным этажом, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 60 кВт;

- категория надежности: 3 категория – 60 кВт;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ,

заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

В соответствии с пунктом 5 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет четыре месяца со дня заключения настоящего договора.

Согласно пункту 8 заявитель обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях п. 11 (Приложение А);

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной).

В пункте 11 Технических условий (Приложение А) согласованы мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка.

Пунктом 10 договора предусмотрено, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением № 219 от 26.12.2018г. Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) и составляет 15 678 рублей 56 копеек (Пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 56 копеек), в том числе НДС 2 613 рублей 09 копеек (Две тысячи шестьсот тринадцать рублей 09 копеек).

Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию (пункт 21).

Договор поступил в сетевую организацию 15.08.2019, о чем свидетельствует штамп на нем, следовательно, договор считается заключенным 15.08.2019. 

Таким образом, срок исполнения обязательств по договору со стороны ответчика истек 15.12.2019.

Как указывает истец, заявителем нарушены сроки выполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями.

В связи с нарушением ответчиком сроков выполнения мероприятий по договору, истцом начислена неустойка за период с 16.12.2019 по 09.06.2020 в размере 6 937 руб. 76 коп. и направлена претензия от 16.06.2020 № 15-07/ТПр 338/19-379 ответчику с требованием оплаты неустойки (л.д. 14-17).

Ответчиком произведена частичная оплата начисленной неустойки в сумме 3 762 руб. 85 коп., что не оспаривается истцом.

Поскольку оплату неустойки ответчик произвел не в полном объеме, истец обратился в суд с настоящим иском.

Ответчик исковые требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве. 

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований на основании следующего. 

Предметом настоящего спора является материально-правовое требование истца к ответчику о взыскании суммы договорной неустойки за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства, возникшие из договоров, должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Отношения сторон регулируются положениями Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861).

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям регулируется Правилами N 861. 

Под технологическим присоединением понимается состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акта об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии со статьями 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации  по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), заказчик обязуется оплатить эти услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре.

Существенные условия договора указаны в пункте 16 Правил N 861. К ним, в частности, относятся: мероприятия по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению; срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

В пункте 18 Правил N 861 предусмотрено, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в том числе, разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий и осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (пункт 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно абзацу 3 подпункта "в" пункта 16 Правил N 861 при нарушении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплачивается неустойка равная 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Аналогичное условие об ответственности установлено в пункте 17 договора.

Истец ссылается на невыполнение ответчиком своей части мероприятий по технологическому присоединению в согласованный сторонами срок.

Из материалов дела следует, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек 15.12.2019.

Согласно пп. "а" п. 16(6) Правил N 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем, если заявитель, в том числе не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий.

Ответчиком в адрес истца направлено уведомление от 03.12.2019 № 3322 о выполнении им технических условий и необходимости проведения осмотра электроустановок.

По результатам проверки выполнения АО «АК «Железные дороги Якутии» технических условий истцом выявлены замечания, о чем в присутствии представителя ответчика составлен акт от 10.12.2019 № 338/19, от подписания которого представитель ответчика отказался.

Впоследствии ответчиком в адрес истца по результатам устранения замечаний направлены письма от 29.05.2020 № 1403, уведомление от 01.06.2020 № 1425.

В связи с устранением части замечаний между сетевой организацией и заявителем подписан акт о выполнении технических условий от 04.06.2020 № 338/19.

После направления заявителем в адрес сетевой организации повторного уведомления от 09.06.2020 № 1508 между истцом и ответчиком подписан акт о выполнении технических условий от 11.06.2020 № 338/19.

Таким образом, уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий, направлено заявителем с нарушением сроков, установленных договором, что в силу пп. "а" п. 16(6) Правил N 861 является нарушением заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению.  

Поскольку материалами дела подтверждается факт ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по договору, требование истца о взыскании неустойки является обоснованным, расчет проверен и признан правильным. Ответчиком арифметическая правильность расчета не оспорена.

С учетом изложенного, исковые требования о взыскании неустойки подлежат удовлетворению в полном объеме.

Истцу при обращении в суд с исковым заявлением произведен зачет государственной пошлины в размере 2 000 руб., уплаченной по платежному поручению от 09.04.2019 № 614.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 2 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с акционерного общества "Акционерная компания "Железные дороги Якутии" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества  "Дальневосточная распределительная сетевая компания" филиал "Южно-Якутские электрические сети" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку за период с 16.12.2019 по 09.06.2020 в размере 3 174 руб. 91 коп. за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.08.2019 № 2019/Ю579; а также расходы по уплате государственной пошлины 2000 руб. 

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).

           Судья

А.Б. Васильева