ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-36768/2022

22 августа 2022 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть постановления объявлена   18 августа 2022 года

Постановление изготовлено в полном объеме  22 августа 2022 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Черемошкиной В.В.

судей  Нестерова С.А., Пивцаева Е.И.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем судебного заседания ФИО1

при участии:  

от истца: не явился (извещен);   

от ответчика: не явился (извещен);   

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-22310/2022) ООО «Раевсахар» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.05.2022 по делу № А56-36768/2022 (судья Михайлов П.Л.), принятое

по иску общества с ограниченной ответственностью «КС-Инжиниринг»

к обществу с ограниченной ответственностью «Раевсахар»

о взыскании задолженности

установил:

общество с ограниченной ответственностью "КС-ИНЖИНИРИНГ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – арбитражный суд) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Раевсахар" (далее – ответчик) о взыскании задолженности в размере 4 532 000 рублей и неустойки в размере 412 412 рублей.

Решением от 26.05.2022 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск в части, взыскал с ответчика в пользу истца задолженность в размере 4 532 000 рублей, пени в размере 362 560 рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 47 241 рубль. В удовлетворении оставшейся части исковых требований отказал.

Не согласившись с указанным решением суда первой инстанции, ответчик обратился с апелляционной жалобой в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, в которой просил отменить решение в части взыскания неустойки и принять новый судебный акт, в котором во взыскании неустойки отказать в полном объеме.        

Податель жалобы полагает, что взысканная арбитражным судом неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств, поскольку  стоимость работы по договору составляет 11 330 000 рублей.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения. 

Стороны, извещенные надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, не явились, своих представителей не направили.  

Как следует из содержания апелляционной жалобы, решение суда первой инстанции ответчиком обжалуется в части взыскания неустойки, в связи с чем суд в соответствии с частью 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса РФ проверяет решение только в обжалуемой части, в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 и 269 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд пришел к следующим выводам.

Как установлено судом первой инстанции, между истцом (исполнитель) и ответчиком  (заказчик) 29.03.2021 заключен Договор №СПБ-13/21 (далее – Договор), по условиям которого Исполнитель по поручению Заказчика обязался выполнить работы по монтажу здания и оборудования выпарной станции, а Заказчик принять выполненные работы и осуществить платежи согласно Договору (пункт 1.1).

В соответствии с протоколом согласования договорной цены Приложение №2 к Договору стоимость работ составила 11 330 000 рублей.

По условию пункта 2 Приложения №1 к Договору оплата осуществляется в следующем порядке: авансовый платеж в размере 20% производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя за 10 дней до начала работ, 40% в течение 30 дней после начала работ, 40% в течение 30 дней после окончания работ.

Как указал истец, им работы были выполнены в полном объеме в соответствии с Актом №00000021 от 06.12.2021. 

Ответчик частично оплатил выполненные работы:

- по платежному поручению от 18.05.2021 №969 на сумму 2 266 000 рублей;

- по платежному поручению от 18.06.2021 №1298 на сумму 4 532 000 рублей.

Истец также указал, что наличие задолженности подтверждается подписанным сторонами актом сверки взаимных расчетов за период с января 2021 по март 2022 года. 

Ссылаясь на то, что ответчик не исполнил обязательства по оплате выполненных работ, истец направил в его адрес претензию от 28.02.2022 №18/02-2022 с требованием об уплаты задолженности и неустойки. 

Поскольку указанная претензия оставлена без удовлетворения, истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд. 

Суд первой инстанции признал заявленные требования обоснованными и подлежащим удовлетворению в части. 

Изучив материалы дела, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для изменения или отмены судебного акта в обжалуемой части по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Как следует из материалов дела, истец просил взыскать с ответчика неустойку на основании пункта 5.3 договора в размере 412 412 руб. за период  с 11.01.2022 по 11.04.2022.

Согласно пункту 5.3. договора, если Заказчик задерживает оплату, то по письменному требованию Исполнителю Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя неустойку в размере 0,1% от несвоевременной уплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% и от суммы договора.

Материалами дела подтверждается факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательства по оплате выполненных работ.

Вместе с тем, Постановлением Правительства Российской Федерации №497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" от 28.03.2022 (далее - Постановление №497) введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Из  пункта 2 указанного Постановления следует, что оно не применяется в отношении должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу настоящего постановления.

Согласно Обзору по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) №2, утвержденному Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.04.2020 (вопрос 10), одним из последствий введения моратория является прекращение начисления неустоек (штрафов и пеней) и иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежных обязательств и обязательных платежей по требованиям, возникшим до введения моратория (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона №127-ФЗ).

Удовлетворяя указанные требования в части, суд первой инстанции, проверив расчёт неустойки, верно пришел к выводу о том, что неустойка подлежит начислению с 11.01.2022 по 31.03.2022 и составляет 362 560 руб., поскольку Постановление N 497 опубликовано 01.04.2022, в связи с чем, с этой даты и в течение 6 месяцев, то есть по 01.10.2022, невозможно начисление каких-либо финансовых санкций в отношении лиц, указанных в постановлении.

Довод подателя жалобы о том, что взысканная судом неустойка несоразмерна последствиям нарушенного обязательства и о необходимости применения положений статьи 333 ГК РФ, судом апелляционной инстанции отклоняется. 

В соответствии с частью 1 статьи 333 ГК РФ,  если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Как указано в пункте 71 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление N 7), если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 72 Постановления N 7 заявление ответчика о применении положений статьи 333 ГК РФ  может быть сделано исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции (часть 5 статьи 330, статья 387 ГК РФ, часть 6.1 статьи 268, часть 1 статьи 286 АПК РФ).

Из материалов дела следует, что ответчик при рассмотрении спора в суде первой инстанции  не заявлял ходатайство о применении статьи 333 ГК РФ, не указывал на неразумность и несоразмерность взыскиваемой суммы неустойки. 

Оснований для перехода к рассмотрению спора по правилам первой инстанции у суда апелляционной инстанции не имеется.

Таким образом, обжалуемое решение суда первой инстанции является законным и обоснованным. 

Судом первой инстанции исследованы доказательства, представленные сторонами по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального права, нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

При указанных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе оставлены за подателем жалобы, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 26.05.2022  по делу №  А56-36768/2022  оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Черемошкина

Судьи

С.А. Нестеров

 Е.И. Пивцаев