2/2022-321013(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443001, г.Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846) 207-55-15 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

10 августа 2023 года Дело № А55-9968/2022  

Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Рысаевой С.Г.  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Орешкиной Н.А.  

рассмотрев в судебном заседании 10 августа 2023 года дело по иску 

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального  строительства"  

к ООО «ВОЛГАСПЕЦТРАНС»  с участием в деле Прокуратуры Самарской области в качестве третьего лица, не  

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора  Об устранении недостатков  

при участии в заседании от истца – Смирнов А.А. по дов. от 08.12.22г. от ответчика – Илюхина Е.Н. по дов. от 21.10.21г. от третьего лица – Зорячева Е.С. удостоверение 

Руководствуясь ст.ст.110,167-171,176,259 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Р Е Ш И Л: 

Отказать в ходатайстве ответчика об истребовании доказательств.  

Отказать в ходатайстве ответчика о назначении дополнительной судебной  

экспертизы. 

 Обязать ООО «ВОЛГАСПЕЦТРАНС» безвозмездно устранить недостатки работ,  выполненных по государственному контракту от 16.09.2014 № 81, а именно:  

2) Устранить протечку кровли в машинном отделении лифта, шахте лифта для  

МГН, Воздухозаборной шахте, в месте примыкания вентиляционной установки к кровле;  

3) Установить отливы, защищающие шахты от попаданий атмосферных осадков на  

установках Bl, В4, В11, В14, В16, В17, В18, ДУ1, ДУ6, ДУ7, ГШ7; 

4) Установить покрытие кровельного материала крыши воздухозаборной шахты;  

5) Установить отлив по периметру крышу машинного отделения и выхода на  

кровлю; 

6) Устранить дефекты монтажа водоотводной воронки отлива в осях И/1-1;  7) Установить оконный отлив в осях 10-11;  

8) Устранить трещины стен в гардеробной; 

9) Устранить многочисленные трещины в стенах, потолке, карнизах в помещениях  

первого и второго этажей; 

10) Устранить отсутствие герметичности оконного стеклопакета;  11) Устранить вертикальную трещину в стене у лифта на четвёртом этаже;  

12) Устранить вертикальную трещину у лифта пятого этажа; 

13) Привести в рабочее состояние теплообменник; 

14) Устранить трещины подвесного потолка с деформацией и раскрытием швов в  помещении большого зала (над пультом режиссера);  

15) Устранить отсутствие освещения на световых опорах уличного освещения  ОП.З, ОП.4;  

16) Устранить провалы асфальтового покрытия возле дренажных колодцев.  В остальной части в иске отказать.  

 Взыскать с ООО «ВОЛГАСПЕЦТРАНС» в пользу Государственного казенного  учреждения Самарской области «Управление капитального строительства» штраф в  размере 2 282 500 рублей.  

 Взыскать с ООО «ВОЛГАСПЕЦТРАНС» в доход федерального бюджета госпошлину  в сумме 40 413 руб.  

 Выплатить с депозитного счета Арбитражного суда Самарской области ООО «ЭКЦ  Самара» денежные средства в размере 175 000 руб. за производство судебной экспертизы  (заключение № 109 от 17.04.23г).  

 Взыскать с ООО «ВОЛГАСПЕЦТРАНС» в пользу Государственное казенное  учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" судебные  расходы за производство судебной экспертизы в размере 90 000 руб.  

 Возвратить ООО «ВОЛГАСПЕЦТРАНС» с депозитного счета Арбитражного суда  Самарской области денежные средства в размере 125 000 руб.  

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд,  г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской  области.  

Судья / С.Г. Рысаева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 22.02.2023 1:16:00

Кому выдана Рысаева Светлана Геннадиевна