Арбитражный суд Калининградской области  Рокоссовского ул., д. 2-4, г. Калининград, 236016  

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru http://www.kaliningrad.arbitr.ru 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Калининград Дело № А21-5737/2022  «05» октября 2022 года  

 Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Исковое заявление ФГУП «Россморпорт» удовлетворить частично.  

Обязать ООО «Балтийская судоходная компания» (ИНН 

<

***>)  выполнить ремонтные работы арендуемого имущества - объекта недвижимости: Часть  1 причала № 1 паромной переправы, кадастровый номер 39:14:010626:6,  расположенного по адресу: Калининградская область, Балтийский район, г. Балтийск,  Аванпорт, а именно:  

 Выполнить работы по закреплению анкерной тяги на ПК 13,4, ПК 15,2, ПК 16,0,  замене деформированной и установке недостающей анкерной тяги на ПК 54,7 в  течение 3 (трех) месяцев с даты вступления решения суда в законную силу;  

 Выполнить работы по ремонту кордонного уголка на ПК 18 - ПК 20,5 в течение  3 (трех) месяцев с даты вступления решения суда в законную силу;  

 Выполнить ремонт оголовка и колесоотбойного бруса на ПК 0 - ПК 9, ПК 20,7 -  ПК 65,0 в течение 3 (трех) месяцев с даты вступления решения суда в законную силу;  

 Выполнить капитальный ремонт шпунтовой стенки в течение 2-х (двух) лет с  даты вступления решения суда в законную силу, в рамках которого в том числе:  

 - разработать и согласовать с ФГУП «Росморпорт» техническое задание  (задание на проектирование) на капитальный ремонт в течение 2-х (двух) месяцев с  даты вступления решения суда в законную силу;  

 - провести инженерные изыскания и разработать проектную и рабочую  документацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87  «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в  течение 10 (десяти) месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.  

 - приемку выполненных работ произвести при участии ФГУП «Росморпорт».  

В случае неисполнения решения суда в установленные сроки взыскать с ООО  «Балтийская судоходная компания» в пользу ФГУП «Росморпорт» судебную  

неустойку в размере 1500 руб. за каждый день просрочки исполнения решения с  момента истечения срока, установленного для добровольного исполнения, по день  фактического исполнения решения суда.  

В остальной части иска – отказать. 

 Взыскать с ООО «Балтийская судоходная компания» в пользу ФГУП  «Россморпорт» расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.   Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия в  Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.  

Судья А.В. Брызгалова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 08.02.2022 5:13:00Кому выдана Брызгалова Анна Владимировна