23/2022-83102(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А45-21487/2021

город Новосибирск

06 апреля 2022 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Серёдкиной Е.Л., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савченко  А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску закрытого  акционерного общества «Управляющая компания «СПАС-Дом» (ОГРН  1065405025168), г. Новосибирск,  

к фонду модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства  муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН 1105400000430), г.  Новосибирск,  

третьи лица: 1) муниципальное казенное учреждение города Новосибирска  «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда» (ОГРН  1125476010450), г. Новосибирск, 2) Департамент энергетики, жилищного и  коммунального хозяйства города Новосибирска (ОГРН 1075406030270), г.  Новосибирск, 3) Ассоциации строительных организации новосибирской области  (ОГРН 1165476182101), г. Новосибирск, 4) общество с ограниченной  ответственностью «Ярус» (ОГРН 1122225011831), г. Новосибирск,  

об обязании устранить недостатки, допущенные при проведении капитального  ремонта.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

обязать фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства  муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН 1105400000430)  устранить недостатки, допущенные при проведении капитального ремонта крыши  МКД № 8 по ул. Фабричная, в течение 60 (шестидесяти дней) со дня вступления  решения суда в законную силу, путем проведения следующих ремонтно- 

восстановительных работ: Ремонт бетонных ограждений кровли: - отбивка штукатурки с поверхности перил; 

- сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное  

оштукатуривание) известковым раствором стен; - ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (кирпичные столбы); 

- ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных;  - окраска ограждений по подготовленной поверхности: поливинил ацетатная;  

Ремонт вентиляционных шахт: 

- устройство отверстий прямоугольных в кровле из листовой стали;  - кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м;  

- штукатурка поверхности вент. шахт; - окраска вент, шахт: известковая; 

- прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб  

диаметром: 110мм с установкой проходных элементов Master Flesh; 

- изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100;  

- установка прямоугольных зонтов из оцинкованной тонколистовой стали на  

вентиляционных шахтах (серия 5.904-51); - обивка вент. шахт кровельной сталью: оцинкованной по асбесту; - вывоз мусора. 

Взыскать с фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства  

муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН 1105400000430) в  

пользу закрытого акционерного общества «Управляющая компания «СПАС-Дом»  

(ОГРН 1065405025168) 6000 рублей расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  

арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный  

суд Западно-Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения  

арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  

отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Судья Е.Л. Серёдкина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 29.12.2021 6:02:12Кому выдана Серёдкина Екатерина Леонидовна