68/2023-143368(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А13-12144/2023

город Вологда

07 декабря 2023 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области  

р е ш и л:

внести в государственный контракт от 21.07.2023 № 3-332, заключенный  

между казенным учреждением Вологодской области «Управление  

автомобильных дорог Вологодской области» и публичным акционерным  

обществом «Вологодавтодор», следующие изменения: 

пункт 2.5 контракта изложить в следующей редакции:  

«2.5. Объем финансирования в 2023 г. составляет 25 537 322 руб. 34 коп. с  

НДС. 

Объем финансирования в 2024 г. составляет 100 000 000 руб. с НДС.»;  пункт 4.2 контракта изложить в следующей редакции:  

 «4.2. Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по 30  

октября 2024 года (включительно). 

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 15 октября 2024  

года (включительно).»; 

пункт 8.1.12 Описания объекта закупки (приложение № 2 к контракту)  

изложить в следующей редакции: 

«8.1.12. Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта.  Окончание выполнения работ: до 15 октября 2024 года (включительно).»;  

в приложении № 4 к контракту график оплаты выполненных по контракту  

работ изложить в следующей редакции: « 

Объект 

Источник 

финансирования 

2023 год 

2024 год 

Итого по  объекту  

Ремонт моста через  реку Чагодоща км 9209 автомобильной  дороги подъезда к п.  

Бюджет субъекта  Российской  

Федерации (бюджет 

25 537 322,34  руб.  

100 000 000,00 

руб. 

125 537 322,34  руб.  

Чагода в  

Чагодощенском  муниципальном  округе Вологодской  

области 

Вологодской области) 

 ». 

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

Судья А.А. Фадеева