Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-32418/2018

01 июня 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  21 мая 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  01 июня 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

 

рассмотрев в порядке упрощенного производства 

дело по иску: 

Истец: Государственное унитарное предприятие "Топливно-Энергетический Комплекс Санкт-Петербурга" (адрес: Россия 190000, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ул МАЛАЯ МОРСКАЯ 12/ЛИТЕРА А, ОГРН: 

<

***>); 

Ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОПОДЗЕМСТРОЙ" (адрес: Россия 199106, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/ЛИТЕР Б КОРПУС 2/ПОМЕЩЕНИЕ 315А-13, ОГРН: 

<

***>); 

о взыскании 

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

установил:

ГУП "Топливно-Энергетический Комплекс Санкт-Петербурга" после уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ просит взыскать с ООО ПЕТРОПОДЗЕМСТРОЙ" 507 786 руб. 80 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору №74/ТС-16 от 21.02.17.

Ответчик отзыв не предоставил, извещен надлежащим образом.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства на основании ст. 226-229 АПК РФ.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор №74/ТС-16 от 21.02.17 на выполнение работ по реконструкции тепловых сетей к дому 62 по ФИО1 пр. 

Срок выполнения работ – до 30.04.17.

До настоящего времени работы ответчиком не выполнены, акт приема-передачи работ не подписан.

В соответствии с п. 8.2 договора ответчику начислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 0.1% от предельной стоимости работ, которая составляет 4 128 348 руб. 00 коп.

Таким образом, неустойка за период с  01.05.17 по 31.08.17. составляет 507 786 руб. 80 коп.

Ответчик контррасчёт не представил, возражений не заявил.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПЕТРОПОДЗЕМСТРОЙ" после уточнения исковых требований в порядке ст. 49 в пользу Государственного унитарного предприятие "Топливно-Энергетический Комплекс Санкт-Петербурга" 507 786 руб. 80 коп. неустойки по договору №74/ТС-16 от 21.02.17 за период с 01.05.17 по 31.08.17., а также 2 000 руб. расходов по государственной пошлине. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПЕТРОПОДЗЕМСТРОЙ" в доход федерального бюджета 11 156 руб. государственной пошлины. 

Выдать исполнительные листы в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.