ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-5463/2024

Дело № А40-179950/2023

г. Москва

26 февраля 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 21 февраля 2024 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 26 февраля 2024 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Бодровой Е.В.,

судей Тетюка В.И., Кузнецовой Е.Е.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

ООО "ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ", 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.12.2023 

по делу № А40-179950/23, 

по иску ООО "ХИМПРОМСТРОЙ" 

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

к ООО "ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ" 

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 19.01.2024, 

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 16.02.2024. 

 

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Химпромстрой» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Тысяча Мелочей» (далее – ответчик) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ по Договору №03/08-22 от 05.08.2022г. в размере: 250 250,00 (двести пятьдесят тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.; о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ по Договору №14/07-22 от 14.07.2022г. в размере: 169 419,74 (сто шестьдесят девять тысяч четыреста девятнадцать) рублей 74 копейки.; о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате авансового платежа и выполненных работ по Договору №08/08-22 от 08.08.2022г. в размере: 29 789,64 (двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 64 копейки.; о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате авансового платежа и выполненных работ по Договору №13/10-22 от 13.10.2022г. в размере: 49 170,00 (сорок девять тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек.; о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ по Договору №05/07-22 от 05.07.2022г. в размере: 162 060,00 (сто шестьдесят две тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек.; о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ по Договору №30/08-22 от 30.08.2022г. в размере: 125 450,00 (сто двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.; о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ по Договору №25/07-22 от 25.07.2022г. в размере: 27 653,85 (двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 85 копеек.; о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ по Договору №20/07-22 от «01» июля 2022г. в размере: 3 410,00 (три тысячи четыреста десять) рублей 00 копеек.; о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ по Договору №18/07-22 от «18» июля 2022г. в размере: 11 880,00 (одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.12.2023 иск удовлетворен в части.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение Арбитражного суда города Москвы и принять по делу новый судебный акт.  

В обоснование доводов апелляционной жалобы, заявитель указал на неправильное применение истцом неустойки по всем Договорам, которая составляет 0,1% от общей стоимости работ по каждому договору, которая подлежит начислению в случае нарушения Заказчиком оплаты выполненных Подрядчиком работ.

Ссылается на некорректное применение судом первой инстанции статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с тем, что настоящая статья применена только в отношении снижения неустойки по Договору № 14/07-22 от 14.07.2022.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт.

Представитель истца возражал по доводам апелляционной жалобы, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения, представил письменный отзыв на жалобу.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы апелляционной  жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы на основании следующего.

Как следует из материалов дела, 05.08.2022 между истцом и ответчиком заключен Договор подряда № 03/08-22 на выполнение комплекса работ по устройству внутренних и наружных грязезащитных решеток на объекте: «Торговый дом «Зеленоград», расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Центральная площадь, дом 3.

Объем и перечень работ по Договору определялся: Локальной сметой №1. (Приложение № 1 к Договору подряда № 03/08-22 от «05» августа 2022г.). 

Общая стоимость работ по Договору, в соответствии с утвержденной Локальной сметой №1, которая является его неотъемлемой частью и п.3.1. Договора - является твердой и составляет: 3 850 000,00 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 641 666,67 (шестьсот сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. 

Подрядчик полностью выполнил обязательства, предусмотренные Договором в объеме и на общую сумму: 3 850 000,00 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 641666,67 (шестьсот сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, что подтверждено следующим комплектом документов, подписанным Сторонами: Акт выполненных работ по форме КС-2 №1 на общую сумму: 3 850 000,00 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №1 на общую сумму: 3 850 000,00 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; (Приложение №9 к Иску); Акт выполненных работ №57 на общую сумму: 3 850 000,00 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; Итоговый акт выполненных работ на общую сумму: 3 850 000,00 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Руководствуясь п.2.3.7. Договора - Заказчик обязан, оплачивать и финансировать Работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном Договором и Приложениями к нему». 

В соответствии с платежными поручениями №117 и № 261 Заказчик оплатил работы в сумме: 3 850 000,00 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Согласно положения п.3.1.3. Договора - Окончательная оплата работ по настоящему Договору в размере 25% (двадцать пять процентов): 962 500,00 (девятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере — 160 416,67 (сто шестьдесят тысяч четыреста шестнадцать) рублей 67 копеек, производятся Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех работ по Договору, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

Все работы, согласно подписанным Сторонами отчетным документам, были выполнены Подрядчиком 31.08.2022г., однако окончательная оплата за выполненные работы, была осуществлена Заказчиком спустя два с половиной месяца, а именно 11.11.2022г.

В соответствии с п.7.2. Договора - При нарушении Заказчиком сроков оплаты и финансирования Работ или неисполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он выплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по Договору, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора.

31.08.2022 Заказчик принял у Подрядчика работы по Акту выполненных работ №1 на сумму: 3 850 000,00 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

В соответствии с условиями Договора, окончательная оплата должна была быть осуществлена не позднее «06» сентября 2022г. 

В соответствии с платежным поручением №261, окончательная оплата за настоящую работу фактически была осуществлена «11» ноября 2022г. 

Заказчик просрочил срок окончательной оплаты на 65 дней, в соответствии с чем, неустойка за просроченную окончательную оплату составляет: 250 250,00 (двести пятьдесят тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Исходя из вышеизложенного, Подрядчиком применен следующий алгоритм расчета: 

Период просрочки: с 07.09.2022г. по 10.11.2022г. 

Количество дней просрочки: 65 дней. 

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%. 

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 3 850,00 р. 

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 250 250,00 р. 

Формула расчета: 3 850 000,00 - 99,9% х 65.

С учетом изложенного риски неисполнения обязанности по своевременному исполнению обязательства, связанному с оплатой неустойки за несвоевременную оплату выполненных работ, в данном случае несет Заказчик - ООО «Тысяча Мелочей». 

Однако, в нарушении норм Гражданского законодательства и положений Договора подряда №03/08-22 от «05» августа 2022г., ООО «Тысяча Мелочей» до настоящего момента не оплатило неустойку предусмотренную Договором, не предоставив обоснования своих действий.

14.07.2022 между истцом и ответчиком заключен Договор подряда № 14/07-22. на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту фасада здания «Торговый дом «Зеленоград» на объекте: «Торговый дом «Зеленоград», расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Центральная площадь, дом 3.

Объем и перечень работ по Договору определялся: Локальной сметой №1. (Приложение № 1 к Договору подряда № 14/07-22 от «14» июля 2022г.); Локальной сметой №2. (Приложение № 2 к Договору подряда № 14/07-22 от «14» июля 2022г.); Локальной сметой №3. (Приложение № 3 к Договору подряда № № 14/07-22 от «14» июля 2022г.); Локальной сметой №4. (Приложение № 4 к Договору подряда № № 14/07-22 от «14» июля 2022г.); Локальной сметой №5. (Приложение № 5 к Договору подряда № № 14/07-22 от «14» июля 2022г.). 

Общая стоимость работ по Договору, в соответствии с утвержденными Локальными сметами №1, №2, №3, №4, №5, которые являются его неотъемлемой частью и п.3.1. Договора - является твердой и составляет: 4 344 096,00 (четыре миллиона триста сорок четыре тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 724 016,00 (семьсот двадцать четыре тысячи шестнадцать) рублей 00 копеек. 

Подрядчик полностью выполнил обязательства, предусмотренные Договором в объеме и на общую сумму: 4 344 096,00 (четыре миллиона триста сорок четыре тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 724 016,00 (семьсот двадцать четыре тысячи шестнадцать) рублей 00 копеек, что подтверждено следующим комплектом документов, подписанным Сторонами: Акт выполненных работ по форме КС-2 №1 на общую сумму: 117 475,00 (сто семнадцать тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ по форме КС-2 №2 на общую сумму: 281 750,00 (двести восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ по форме КС-2 №3 на общую сумму: 734 834,00 (семьсот тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек; Акт выполненных работ по форме КС-2 №4 на общую сумму: 2 100 000,00 (два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ по форме КС-2 №5 на общую сумму: 1110 037,00 (один миллион сто десять тысяч тридцать семь) рублей 00 копеек; Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №1 на общую сумму: 4 344 096,00 (четыре миллиона триста сорок четыре тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ №47 на общую сумму: 2100 000,00 (два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ №48 на общую сумму: 734 834,00 (семьсот тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек; Акт выполненных работ №49 на общую сумму: 281750,00 (двести восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ №50 на общую сумму: 117 475,00 (сто семнадцать тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ №51 на общую сумму: 1110 037,00 (один миллион сто десять тысяч тридцать семь) рублей 00 копеек; Итоговый акт выполненных работ на общую сумму: 4 344 096,00 (четыре миллиона триста сорок четыре тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек. 

Руководствуясь п.6.8. Договора - Заказчик обязан, производить финансирование и оплату Работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, в порядке, предусмотренном Договором. 

В соответствии с платежными поручениями №81 и № 190, Заказчик оплатил работы в сумме: 4 344 096,00 (четыре миллиона триста сорок четыре тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек. 

Согласно положения п.3.3.1. Договора - Оплата за выполненные работы, производится Заказчиком ежемесячно, в размере 100% (сто процентов) от стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, в каждом отчетном месяце работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента сдачи работ Заказчику. 

Все работы, согласно Актов по форме КС-2 №1, №2, №3, №4, №5, которые были подписаны Сторонами - выполнены Подрядчиком 19.08.2022г., однако окончательная оплата за выполненные работы, была осуществлена Заказчиком лишь спустя полтора месяца, а именно 04.10.2022г. 

В соответствии с п.12.9. Договора - При нарушении Заказчиком сроков оплаты и финансирования Работ или неисполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он выплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по настоящему Договору за каждый календарный день просрочки.

19.08.2022 Заказчик принял у Подрядчика работы по Актам выполненных работ №1, №2, №3, №4, №5 на сумму: 4 344 096,00 (четыре миллиона триста сорок четыре тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек. В соответствии с условиями Договора, окончательная оплата должна была быть осуществлена не позднее «25» августа 2022г. 

В соответствии с платежным поручением №190, окончательная оплата за настоящую работу фактически была осуществлена «04» октября 2022г. Заказчик просрочил срок окончательной оплаты на 39 дней, в соответствии с чем, неустойка за просроченную окончательную оплату составляет: 169 419,74 (сто шестьдесят девять тысяч четыреста девятнадцать) рублей 74 копейки. 

Исходя из вышеизложенного, Подрядчиком применен следующий алгоритм расчета: 

Период просрочки: с 26.08.2022г. по 03.10.2022г. 

Количество дней просрочки: 39 дней. 

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%. 

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 4 344,096 р. 

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 169 419,74 р. 

Формула расчета: 4 344 096,00 - 99,9% х 39. 

С учетом изложенного риски неисполнения обязанности по своевременному исполнению обязательства, связанному с оплатой неустойки за несвоевременную оплату выполненных работ, в данном случае несет Заказчик - ООО «Тысяча Мелочей». 

Однако, в нарушении норм Гражданского законодательства и положений Договора подряда №14/07-22 от «14» июля 2022г., ООО «Тысяча Мелочей» не оплатило неустойку, предусмотренную Договором, не предоставив обоснования своих действий Истцу.

08.08.2022 между истцом и ответчиком заключен Договор подряда № 08/08-22 на выполнение комплекса общестроительных работ на объекте: «Торговый дом «Зеленоград», расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Центральная площадь, дом 3.

Объем и перечень работ по Договору определялся: Локальной сметой №1. (Приложение № 1 к Договору подряда № 08/08-22 от «08» августа 2022г.); Локальной сметой №2. (Приложение № 2 к Договору подряда № 08/08-22 от «08» августа 2022г.). 

Общая стоимость работ по Договору, в соответствии с утвержденными Локальными сметами №1, №2 которые являются его неотъемлемой частью и п.3.1. Договора - является твердой и составляет: 827 490,00 (восемьсот двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% -137 915,00 (сто тридцать семь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек. 

Подрядчик полностью выполнил обязательства, предусмотренные Договором в объеме и на общую сумму: 827 490,00 (восемьсот двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% -137 915,00 (сто тридцать семь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек., что подтверждено следующим комплектом документов, подписанным Сторонами: Акт выполненных работ по форме КС-2 №1 на общую сумму: 689 140,00 (шестьсот восемьдесят девять тысяч сто сорок) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ по форме КС-2 №2 на общую сумму: 138 350,00 (сто тридцать восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек; Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №1 на общую сумму: 689 140,00 (шестьсот восемьдесят девять тысяч сто сорок) рублей 00 копеек; Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №2 на общую сумму: 138 350,00 (сто тридцать восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ №58 на общую сумму: 689 140,00 (шестьсот восемьдесят девять тысяч сто сорок) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ №59 на общую сумму: 138 350,00 (сто тридцать восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек; Итоговый акт выполненных работ на общую сумму: 827 490,00 (восемьсот двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек. 

Руководствуясь п.2.3.7. Договора - Заказчик обязан оплачивать и финансировать Работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном Договором и Приложениями к нему. 

В соответствии с платежными поручениями №177 и 248 (Приложение №42 к Иску), Заказчик оплатил работы в сумме: 827 490,00 (восемьсот двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек. 

На основании п.3.1.2. Договора - Авансовый платеж в размере 85% (восемьдесят пять процентов): 703 366,50 (семьсот три тысячи триста шестьдесят шесть) рублей 50 копеек, в том числе НДС 20% в размере — 117 227,75 (сто семнадцать тысяч двести двадцать семь) рублей 75 копеек оплачивается Заказчиком не позднее «26» сентября 2022г., путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика. 

В соответствии с п/п №177 - авансовый платеж был оплачен «29» сентября 2022г., соответственно, просрочка исполнения обязательства по своевременной оплате авансового платежа составляет 2 (два) календарных дня. 

Сумма неустойки составляет: 1 654,98 (одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре) рубля 98 копеек.

Согласно положения п.3.1.3. Договора - Окончательная оплата работ по настоящему Договору в размере 15% (пятнадцать процентов): 124 123,50 (сто двадцать четыре тысячи сто двадцать три) рубля 50 копеек, в том числе НДС 20% в размере — 20 687,25 (двадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 25 копеек, производятся Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех работ по Договору, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

Все работы, согласно Актов по форме КС-2 №1, №2, которые были подписаны Сторонами - выполнены Подрядчиком 30.09.2022г., однако окончательная оплата за выполненные работы, была осуществлена Заказчиком лишь спустя полтора месяца, а именно 10.11.2022г. 

В соответствии с п.7.2. Договора - При нарушении Заказчиком сроков оплаты и финансирования Работ или неисполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он выплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по Договору, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора. 

30.09.2022 Заказчик принял у Подрядчика работы по Актам выполненных работ №1, №2 на сумму: 827 490,00 (восемьсот двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек. 

В соответствии с условиями Договора, окончательная оплата должна была быть осуществлена не позднее «06» октября 2022г. 

В соответствии с платежным поручением №248, окончательная оплата за настоящую работу фактически была осуществлена «10» ноября 2022г. 

Заказчик просрочил срок окончательной оплаты на 34 дня, в соответствии с чем, неустойка за просроченную окончательную оплату составляет: 28 134,66 (двадцать восемь тысяч сто тридцать четыре) рубля 66 копеек. 

Исходя из вышеизложенного, Подрядчиком применен следующий алгоритм расчета: 

Период просрочки оплаты аванса: с 27.09.2022г. по 28.07.2022г. 

Количество дней просрочки: 2 дня. Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%. 

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 827,49 р. 

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 1 654,98 р. 

Формула расчета: 827 490,00 - 99,9% х 2. 

Период просрочки окончательной оплаты: с 07.10.2022г. по 09.11.2022г. 

Количество дней просрочки: 34 дня. 

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%. 

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 827,49 р. 

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 28 134,66 р. 

Формула расчета: 827 490,00 - 99,9% х 34.

В нарушении норм Гражданского законодательства и положений Договора подряда №08/08-22 от «08» августа 2022г., ООО «Тысяча Мелочей» не оплатило неустойку, предусмотренную Договором, не предоставив обоснования своих действий Истцу.

13.10.2022 между Обществом с ограниченной ответственностью «Тысяча Мелочей» и Обществом с ограниченной ответственностью «Химпромстрой», в дальнейшем именуемые «Стороны», был заключен Договор подряда № 13/10-22 на выполнение .комплекса работ по устройству системы внутреннего освещения на объекте: «Торговый дом «Зеленоград», расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Центральная площадь, дом 3. 

Объем и перечень работ по Договору определялся: Локальной сметой №1. (Приложение № 1 к Договору подряда № 13/10-22 от «13» октября 2022г.).

Общая стоимость работ по Договору, в соответствии с утвержденной Локальной сметой №1, которая является его неотъемлемой частью и п.3.1. Договора - является твердой и составляет: 1490 000,00 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 248 333,33 (двести сорок восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки. 

Подрядчик полностью выполнил обязательства, предусмотренные Договором в объеме и на общую сумму: 1490 000,00 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 248 333,33 (двести сорок восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки, что подтверждено следующим комплектом документов, подписанным Сторонами: Акт выполненных работ по форме КС-2 №1 на общую сумму: 1490 000,00 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек; Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №1 на общую сумму: 1490 000,00 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ №69 на общую сумму: 1490 000,00 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек; Итоговый акт выполненных работ на общую сумму: 1490 000,00 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек. Руководствуясь п.2.3.7. Договора - Заказчик обязан оплачивать и финансировать Работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном Договором и Приложениями к нему. 

В соответствии с платежными поручениями №249 и 293, Заказчик оплатил работы в сумме: 1490 000,00 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек. 

На основании п.3.1.2. Договора - Авансовый платеж в размере 75% (семьдесят пять процентов): 1117 500,00 (один миллион сто семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере — 186 250,00 (сто восемьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, оплачивается Заказчиком в течение 5 (пять) банковских дней с момента подписания настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика. 

То есть аванс должен был быть оплачен не позднее «19» октября 2022г. 

В соответствии с п/п №249 - авансовый платеж был оплачен «09» ноября 2022г., соответственно, просрочка исполнения обязательства по своевременной оплате авансового платежа составляет 20 (двадцать) календарных дней. 

Сумма неустойки составляет: 29 800,00 (двадцать девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 

Согласно положения п.3.1.3. Договора - Окончательная оплата работ по настоящему Договору в размере 25% (двадцать пять процентов): 372 500,00 (триста семьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере — 62 083,33 (шестьдесят две тысячи восемьдесят три) рублей 33 копейки, производятся Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех работ по Договору, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

Все работы, согласно Акта по форме КС-2 №1, который был подписан Сторонами - выполнены Подрядчиком 14.11.2022г., однако окончательная оплата за выполненные работы, была осуществлена Заказчиком лишь спустя более чем пол месяца, а именно 02.12.2022г. 

В соответствии с п.7.2. Договора - при нарушении Заказчиком сроков оплаты и финансирования Работ или неисполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он выплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по Договору, за каждый календарный день просрочки.

14.11.2022 Заказчик принял у Подрядчика работы по Акту выполненных работ №1 на сумму: 1490 000,00 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек. 

В соответствии с условиями Договора, окончательная оплата должна была быть осуществлена не позднее «18» ноября 2022г. 

В соответствии с платежным поручением №293, окончательная оплата за настоящую работу фактически была осуществлена «02» декабря 2022г. Заказчик просрочил срок окончательной оплаты на 13 дней, в соответствии с чем, неустойка за просроченную окончательную оплату составляет: 19 370 руб.

Исходя из вышеизложенного, Подрядчиком применен следующий алгоритм расчета: 

Период просрочки оплаты аванса: с 20.10.2022г. по 08.11.2022г. 

Количество дней просрочки: 20 дней. 

Размер неустойки за один день просрочки: 0Д%. 

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 1490,00 р. 

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 29 800,00 р. 

Формула расчета: 1 490 000,00 - 99,9% х 20. 

Период просрочки окончательной оплаты: с 19.11.2022г. по 01.12.2022г. 

Количество дней просрочки: 13 дней. Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%. 

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 1490,00 р. 

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 19 370,00 р. 

Формула расчета: 1 490 000,00 - 99,9% х 13.

С учетом изложенного риски неисполнения обязанности по своевременному исполнению обязательства, связанному с оплатой неустойки за несвоевременное финансирование и оплату выполненных работ, в данном случае несет Заказчик - ООО «Тысяча Мелочей». 

Однако, в нарушении норм Гражданского законодательства и положений Договора подряда №13/10-22 от «13» октября 2022г., ООО «Тысяча Мелочей» не оплатило неустойку, предусмотренную Договором, не предоставив обоснования своих действий Истцу.

05.07.2022 между истцом и ответчиком заключен Договор подряда № 05/07-22 на выполнение комплекса работ по устройству переходных тамбуров и осуществлению монтажа электроприводов входных створок на объекте: «Торговый расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Централь.

Объем и перечень работ по Договору определялся: Локальной сметой №1. (Приложение № 1 к Договору 05/07-22 от «05» июля 2022г.). 

Общая стоимость работ по Договору, в соответствии с утвержденной Локальной сметой №1, которая является его неотъемлемой частью и п.3.1. Договора - является твердой и составляет: 2 220 000,00 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 370 000,00 (триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Подрядчик полностью выполнил обязательства, предусмотренные Договором в объеме и на общую сумму: 2 220 000,00 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 370 000,00 (триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что подтверждено следующим комплектом документов, подписанным Сторонами: Акт выполненных работ по форме КС-2 №1 на общую сумму: 2 220 000,00 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек; Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №1 на общую сумму: 2 220 000,00 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ №60 на общую сумму: 2 220 000,00 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек; Итоговый акт выполненных работ на общую сумму: 2 220 000,00 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Руководствуясь п.2.3.7. Договора - Заказчик обязан, оплачивать и финансировать Работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном Договором и Приложениями к нему». 

В соответствии с платежными поручениями №74 и 260, Заказчик оплатил работы в сумме: 2 220 000,00 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Согласно положения п.3.1.3. Договора - Окончательная оплата работ по настоящему Договору в размере 25% (двадцать пять процентов): 555 000,00 (пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере — 92 500,00 (девяноста две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, производятся Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех работ по Договору, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

Все работы, согласно подписанным Сторонами отчетным документам, были выполнены Подрядчиком 23.08.2022г., однако окончательная оплата за выполненные работы, была осуществлена Заказчиком спустя два с половиной месяца, а именно 11.11.2022г. 

В соответствии с п.7.2. Договора - При нарушении Заказчиком сроков оплаты и финансирования Работ или неисполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он выплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по Договору, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора.

23.08.2022 Заказчик принял у Подрядчика работы по Акту выполненных работ №1 на сумму: 2 220 000,00 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

В соответствии с условиями Договора, окончательная оплата должна была быть осуществлена не позднее «29» августа 2022г. 

В соответствии с платежным поручением №260, окончательная оплата за настоящую работу фактически была осуществлена «11» ноября 2022г. 

Заказчик просрочил срок окончательной оплаты на 73 дня, в соответствии с чем, неустойка за просроченную окончательную оплату составляет: 162 060,00 (сто шестьдесят две тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек.

Исходя из вышеизложенного, Подрядчиком применен следующий алгоритм расчета: 

Период просрочки: с 30.08.2022г. по 10.11.2022г. 

Количество дней просрочки: 73 дня. 

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%. 

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 2 220,00 р. 

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 162 060,00 р. 

Формула расчета: 2 220 000,00 - 99,9% х 73.

В нарушении норм Гражданского законодательства и положений Договора подряда №05/07-22 от «05» июля 2022г., ООО «Тысяча Мелочей» не оплатило неустойку, предусмотренную Договором, не предоставив обоснования своих действий Истцу.

30.08.2022 между Обществом с ограниченной ответственностью «Тысяча Мелочей» и Обществом с ограниченной ответственностью «Химпромстрой», в дальнейшем именуемые «Стороны», был заключен Договор подряда № 30/08-22 на выполнение работ по устройству системы внутреннего электроснабжения на объекте: «Торговый дом «Зеленоград», расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Центральная площадь, дом 3.

Объем и перечень работ по Договору определялся: Локальной сметой №2. (Приложение №1 к Дополнительному соглашению №1 от «11» октября 2022г. к Договору № 30/08-22 от «30» августа 2022г.). 

Общая стоимость работ по Договору, в соответствии с утвержденной Локальной сметой №2, которая является его неотъемлемой частью и п.3.1. Договора - является твердой и составляет: 9 650 000,00 (девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 1608 333,33 (один миллион шестьсот восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки. 

Подрядчик полностью выполнил обязательства, предусмотренные Договором в объеме и на общую сумму: 9 650 000,00 (девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 1608 333,33 (один миллион шестьсот восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки, что подтверждено следующим комплектом документов, подписанным Сторонами: Акт выполненных работ по форме КС-2 №1 на общую сумму: 9 650 000,00 (девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №1 на общую сумму: 9 650 000,00 (девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ №68 на общую сумму: 9 650 000,00 (девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; Итоговый акт выполненных работ на общую сумму: 9 650 000,00 (девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Руководствуясь п.6.8. Договора - Заказчик обязан, производить финансирование и оплату Работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, в порядке, предусмотренном Договором. 

В соответствии с платежными поручениями №149, 208 и 294, Заказчик оплатил работы в сумме: 9 650 000,00 (девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Согласно положения п.3.3.3. Договора - Окончательная оплата работ по настоящему Договору в размере: 1848 250,00 (один миллион восемьсот сорок восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере — 308 041,66 (триста восемь тысяч сорок один) рубль 66 копеек, производятся Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех работ по Договору, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

Все работы, согласно Акту по форме КС-2 №1, который был подписан Сторонами - выполнены Подрядчиком 14.11.2022г., однако окончательная оплата за выполненные работы, была осуществлена Заказчиком лишь спустя полтора месяца, а именно 02.12.2022г. 

В соответствии с п.12.8. Договора - При нарушении Заказчиком сроков оплаты и финансирования Работ или неисполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он выплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по настоящему Договору за каждый календарный день просрочки.

14.11.2022 Заказчик принял у Подрядчика работы по Акту выполненных работ №1 на сумму: 9 650 000,00 (девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. В соответствии с условиями Договора, окончательная оплата должна была быть осуществлена не позднее «18» ноября 2022г. 

В соответствии с платежным поручением №294, окончательная оплата за настоящую работу фактически была осуществлена «02» декабря 2022г. 

Заказчик просрочил срок окончательной оплаты на 13 дней, в соответствии с чем, неустойка за просроченную окончательную оплату составляет: 125 450,00 (сто двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Исходя из изложенного, Подрядчиком применен следующий алгоритм расчета: 

Период просрочки: с 19.11.2022г. по 01.12.2022г. 

Количество дней просрочки: 13 дней. 

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%. 

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 9 650,00 р. 

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 125 450,00 р. 

Формула расчета: 9 650 000,00 - 99,9% х 13.

В нарушении норм Гражданского законодательства и положений Договора подряда №30/08-22 от «30» августа 2022г., ООО «Тысяча Мелочей» не оплатило неустойку, предусмотренную Договором, не предоставив обоснования своих действий Истцу.

25.07.2022 между Обществом с ограниченной ответственностью «Тысяча Мелочей» и Обществом с ограниченной ответственностью «Химпромстрой», в дальнейшем именуемые «Стороны», был заключен Договор подряда № 25/07-22 на выполнение комплекса работ по внутреннему электроснабжению и осуществлению частичного демонтажа существующих воздуховодов на объекте: «Торговый дом «Зеленоград», расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Центральная площадь, дом 3. 

Объем и перечень работ по Договору определялся: Локальной сметой №1 (Приложение № 1 к Договору подряда № 25/07-22 от «25» июля 2022г.). 

Общая стоимость работ по Договору, в соответствии с утвержденной Локальной сметой №1, которая является его неотъемлемой частью и п.3.1. Договора - является твердой и составляет: 438 950,00 (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 73 158,33 (семьдесят три тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 00 копеек. 

Подрядчик полностью выполнил обязательства, предусмотренные Договором в объеме и на общую сумму: 438 950,00 (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 73 158,33 (семьдесят три тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, что подтверждено следующим комплектом документов, подписанным Сторонами: Акт выполненных работ по форме КС-2 №1 на общую сумму: 438 950,00 (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек; Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №1 на общую сумму: 438 950,00 (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ №46 на общую сумму: 438 950,00 (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек; Итоговый акт выполненных работ на общую сумму: 438 950,00 (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Руководствуясь п.2.3.7. Договора - Заказчик обязан, оплачивать и финансировать Работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном Договором и Приложениями к нему. 

В соответствии с платежными поручениями №104 и № 189, Заказчик оплатил работы в сумме: 438 950,00 (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

На основании п.3.1.2. Договора - Авансовый платеж в размере 75% (семьдесят пять процентов): 329 212,50 (триста двадцать девять тысяч двести двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере — 54 868,75 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 75 копеек, оплачивается Заказчиком в течение 5 (пять) банковских дней с момента подписания настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика. То есть аванс должен был быть оплачен не позднее «29» июля 2022г. 

В соответствии с п/п №104 - авансовый платеж был оплачен «02» августа 2022г., соответственно, просрочка исполнения обязательства по своевременной оплате авансового платежа составляет 3 (три) календарных дней. 

Сумма неустойки составляет: 1 316,85 (одна тысяча триста шестнадцать) рублей 85 копеек. 

Согласно положения п.3.1.3. Договора - Окончательная оплата работ по настоящему Договору в размере 25% (двадцать пять процентов): 109 737,50 (сто девять тысяч семьсот тридцать семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС 20% в размере — 18 289,58 (восемнадцать тысяч двести восемьдесят девять) рублей 58 копеек, производятся Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех работ по Договору, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

Все работы, согласно подписанным Сторонами отчетным документам, были выполнены Подрядчиком 29.07.2022г., однако окончательная оплата за выполненные работы, была осуществлена Заказчиком спустя два с половиной месяца, а именно 04.10.2022г.

В соответствии с п.7.2. Договора - При нарушении Заказчиком сроков оплаты и финансирования Работ или неисполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он выплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по Договору, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора.

29.07.2022 Заказчик принял у Подрядчика работы по Акту выполненных работ №1 на сумму: 438 950,00 (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

В соответствии с условиями Договора, окончательная оплата должна была быть осуществлена не позднее «04» августа 2022г. 

В соответствии с платежным поручением №189, окончательная оплата за настоящую работу фактически была осуществлена «04» октября 2022г. 

Заказчик просрочил срок окончательной оплаты на 60 дней, в соответствии с чем, неустойка за просроченную окончательную оплату составляет: 26 337,00 (двадцать шесть тысяч триста тридцать семь) рублей 00 копеек.

Исходя из изложенного, Подрядчиком применен следующий алгоритм расчета: 

Период просрочки оплаты аванса: с 30.07.2022г. по 01.08.2022г. 

Количество дней просрочки: 3 дня. Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%. 

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 438,95 р. 

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 1 316,85 р. 

Формула расчета: 438 950,00 - 99,9% х 3. 

Период просрочки окончательной оплаты: с 05.08.2022г. по 03.10.2022г. 

Количество дней просрочки: 60 дней. 

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%. 

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 438,95 р. 

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 26 337,00 р. 

Формула расчета: 438 950,00 - 99,9% х 60.

В нарушении норм Гражданского законодательства и положений Договора подряда №25/07-22 от «25» июля 2022г., ООО «Тысяча Мелочей» не оплатило неустойку, предусмотренную Договором, не предоставив обоснования своих действий Истцу.

01.07.2022 между Обществом с ограниченной ответственностью «Тысяча Мелочей» и Обществом с ограниченной ответственностью «Химпромстрой», в дальнейшем именуемые «Стороны», был заключен Договор № 20/07-22. (далее - «Договор») на разработку рабочей документации для объекта: «Торговый дом «Зеленоград», расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Центральная площадь, дом 3. Объем и перечень работ по Договору определялся: Составом рабочей документации. (Приложение № 2 к Договору № 20/07-22 от «01» июля 2022г.). 

Общая стоимость работ по Договору, в соответствии с п.2.1. Договора является твердой и составляет: 155 000,00 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 25 833,33 (двадцать пять тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки. 

Исполнитель полностью выполнил обязательства, предусмотренные Договором в объеме и на общую сумму: 155 000,00 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 25 833,33 (двадцать пять тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки, что подтверждено следующим комплектом документов, подписанным Сторонами: Акт оказанных услуг №45 на общую сумму: 155 000,00 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ на общую сумму: 155 000,00 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Руководствуясь п.5.1.1. Договора - Заказчик обязан, обеспечить соответствующие платежи за весь период действия Договора. 

В соответствии с платежным поручением №176, Заказчик оплатил работы в сумме: 155 000,00 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Опираясь на положения п.2.4.2. Договора - Оплата за выполненные Исполнителем Работы, в размере: 155 000,00 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 25 833,33 (двадцать пять тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки, оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, не содержащего указания на выявленные недостатки в выполненных работах. 

Все работы, согласно подписанным Сторонами отчетным документам, были выполнены Исполнителем 31.08.2022г., однако окончательная оплата за выполненные работы, была осуществлена Заказчиком спустя один месяц, а именно 29.09.2022г. 

В соответствии с п.6.3. Договора - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты и финансирования работ в соответствии с п.2.4. настоящего Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку из расчета 0,1% от общей стоимости настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от общей стоимости работ по Договору.

31.08.2022 Заказчик принял у Исполнителя работы по Акту выполненных работ на сумму: 155 000,00 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 

В соответствии с условиями Договора, окончательная оплата должна была быть осуществлена не позднее «06» сентября 2022г. 

В соответствии с платежным поручением №176, окончательная оплата за настоящую работу фактически была осуществлена «29» сентября 2022г. 

Заказчик просрочил срок окончательной оплаты на 22 дня, в соответствии с чем, неустойка за просроченную окончательную оплату составляет: 3 410,00 (три тысячи четыреста десять) рублей 00 копеек.

Исходя из вышеизложенного, Исполнителем применен следующий алгоритм расчета: 

Период просрочки: с 07.09.2022г. по 28.09.2022г. 

Количество дней просрочки: 22 дня. 

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%. 

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 155,00 р. 

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 3 410,00 р. 

Формула расчета: 155 000,00 - 99,9% х 22.

В нарушении норм Гражданского законодательства и положений Договора подряда №20/07-22 от «01» июля 2022г., ООО «Тысяча Мелочей» не оплатило неустойку, предусмотренную Договором, не предоставив обоснования своих действий Истцу.

18.07.2022 между Обществом с ограниченной ответственностью «Тысяча Мелочей» и Обществом с ограниченной ответственностью «Химпромстрой», в дальнейшем именуемые «Стороны», был заключен Договор № 18/07-22 на разработку рабочей документации разделов: ВК (водоснабжение и канализация) и ЭОМ (система внутреннего электроснабжения и освещения) для объекта: «Торговый дом «Зеленоград», расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Центральная площадь, дом 3. Объем и перечень работ по Договору определялся: Составом рабочей документации. (Приложение № 2 к Договору № 18/07-22 от «18» июля 2022г.). 

Общая стоимость работ по Договору, в соответствии с п.2.1. Договора -является твердой и составляет: 660 000,00 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 110 000,00 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек. 

Исполнитель полностью выполнил обязательства, предусмотренные Договором в объеме и на общую сумму: 660 000,00 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% -110 000,00 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек, что подтверждено следующим комплектом документов, подписанным Сторонами: Акт оказанных услуг №79 на общую сумму: 660 000,00 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ на общую сумму: 660 000,00 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Руководствуясь п.5.1.1. Договора - Заказчик обязан, обеспечить соответствующие платежи за весь период действия Договора. 

Опираясь на положения п.2.4.2. Договора - Оплата за выполненные Исполнителем Работы, в размере: 660 000,00 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% -110 000,00 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек, оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, не содержащего указания на выявленные недостатки в выполненных работах. 

Все работы, согласно подписанным Сторонами отчетным документам, были выполнены Исполнителем 19.12.2022г., однако оплата за выполненные Исполнителем работы в соответствии с платежным поручением №13, были оплачены Заказчиком только 11.01.2023г. 

В соответствии с п.6.3. Договора - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты и финансирования работ в соответствии с п.2.4. Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку из расчета 0,1% от общей стоимости Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от общей стоимости работ по Договору.

19.12.2022 Заказчик принял у Исполнителя работы по Акту выполненных работ на сумму: 660 000,00 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

В соответствии с условиями Договора, окончательная оплата должна была быть осуществлена не позднее «23» декабря 2022г. Фактически, окончательная оплата за работу осуществлена 11.01.2023г. Заказчик просрочил срок оплаты на 18 дней, в соответствии с чем, неустойка за просроченную окончательную оплату составляет: 11880,00 (одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Исходя из вышеизложенного, Исполнителем применен следующий алгоритм расчета: 

Период просрочки: с 24.12.2022г. по 10.01.2023г. 

Количество дней просрочки: 18 дней. 

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%. 

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 660,00 р. 

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 11 880,00 р. 

Формула расчета: 660 000,00 - 99,9% х 18.

В нарушении норм Гражданского законодательства и положений Договора подряда №18/07-22 от «18» июля 2022г., ООО «Тысяча Мелочей» не оплатило неустойку, предусмотренную Договором, не предоставив обоснования своих действий Истцу.

Расчет неустойки проверен, признан верным.

В силу пункта 1 статьи 330 Кодекса неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Ответчиком в суде первой инстанции заявлено о применении положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и снижении размера неустойки.

Учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд первой инстанции установил, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию по всем договорам № 03/08-22 от 05.08.2022г., № 14/07-22 от 14.07.2022г., № 08/08-22 от 08.08.2022г., № 13/10-22 от 13.10.2022г., № 05/07-22 от 05.07.2022г., № 30/08-22 от 30.08.2022г., № 25/07-22 от 25.07.2022г., № 20/07-22 от 01.07.2022г., № 18/07-22 от 18.07.2022г. сумма пени с учетом применения норм ст. 333 ГК РФ в общем размере 391 496,41 рублей (65 450 руб. + 99 694,53 руб. + 14 894,88 руб. + 19 370 руб. + 37 740 руб. + 125 450 руб. + 13 607 руб. + 3 410 руб. + 11 880 руб.), поскольку ответчик не исполнил свои обязательства в установленный договорами срок

Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения суда.

Довод апелляционной жалобы о неправильном применении истцом неустойки по всем Договорам, которая составляет 0,1% от общей стоимости работ по каждому договору, которая подлежит начислению в случае нарушения Заказчиком оплаты выполненных Подрядчиком работ, отклоняется судом апелляционной инстанции.

В силу разделов Договоров «Ответственность сторон» суд приходит к выводу о том, что истцом корректно указан размер неустойки, примененной к ответчику.

Данные расчеты указаны в дополнительных письменных пояснениях истца, представленных в материалах дела.

Размер неустойки за просрочку оплаты, равный 0,1%, соответствует обычно применяемой за нарушение обязательства ставке и обычаям делового оборота в аналогичных правоотношениях.

Таким образом, неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки, не может быть признана несоразмерной, так как является обоснованной и адекватной мерой ответственности за просрочку исполнения обязательств по оплате авансовых платежей и просрочку оплаты выполненных работ, допущенной ответчиком.

В данном случае, стороны руководствовались свободой договора, при определении размера неустойки и отчетного периода, с момента которого она подлежала начислению.

Исходя из изложенного, судом первой инстанции были верно применены нормы материального и процессуального права, при определении размера взыскиваемой с ответчика неустойки по всем Договорам.

Ссылка ответчика на некорректное применение судом первой инстанции статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с тем, что настоящая статья применена только в отношении снижения неустойки по Договору № 14/07-22 от 14.07.2022, не принимается судом апелляционной инстанции.

Суд по своей инициативе может уменьшать размер неустойки если обнаружит, что сумма неустойки явно не соответствует последствиям нарушенного обязательства, что и было сделано судом первой инстанции по его усмотрению в отношении снижения неустойки по Договору №14/07-22 от 14.07.2022 с 286 050 руб. 60 коп., которая соответствует договорной неустойке, до 99 694 руб. 53 коп., применив положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Также суд первой инстанции посчитал справедливым отказать истцу во взыскании неустойки с ответчика, в связи с нарушением последним сроков оплаты авансовых платежей по Договору № 13/10-22 от 13.10.2022 и Договору № 25/07-22 от 25.07.2022.

При таких обстоятельствах, приведенные в апелляционной жалобе доводы не нашли правового и документального обоснования, не могут являться основанием для отмены судебного акта.

Арбитражный суд города Москвы полно, всесторонне и объективно установил и рассмотрел обстоятельства дела, представленным доказательствам дана надлежащая правовая оценка с позиции их относительности, допустимости и достоверности, правильно применил нормы материального и процессуального права.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 11.12.2023 по делу № А40-179950/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа. 

Председательствующий судья:                                                      Е.В. Бодрова 

Судьи:                                                                                               В.И. Тетюк 

                                                                                                           Е.Е. Кузнецова