Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-24910/2019

30 октября 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  08 октября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  30 октября 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем П.Е. Голушко

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ-ПРОЕКТ" (адрес:  Россия 190031, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул МАЛАЯ МОРСКАЯ 15/7/ОФИС, ОГРН:  1027810225520);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "СвязьСтройКомплекс" (адрес:  Россия 675000, г. Благовещенск, Амурская обл, ул. Зейская 134/300, ОГРН: 1172801000415);

о взыскании 10940520.00

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 28.02.18,

- от ответчика: ФИО2 по доверенности от 08.05.19,

установил:

ООО "ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ-ПРОЕКТ" предъявило иск о взыскании с ООО "СвязьСтройКомплекс" 10 380 000 руб. 00 коп. неосновательного обогащения в виде части авансового платежа по договору подряда №02/18 – П от 15.03.18 и 560 520 руб. 00 коп. штрафа за невозврат денежных средств в соответствии с п. 14.28 договора.

Ответчик иск отклонил.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор подряда №02/18 – П от 15.03.18 на выполнение работ по объектам в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири».

Истец – подрядчик перечислил ответчику – субподрядчику авансовые платежи на общую сумму 12 000 000 руб. 00 коп.

Ответчик выполнил работы частично на сумму 1 620 000 руб. 00 коп., что подтверждается актами формы КС-2, КС-3 от 25.10.18.

В связи с нарушением сроков выполнения работ истец уведомлением от 15.10.18 исх. №10.11/399 отказался от исполнения договора.

Неосновательное обогащение ответчика в размере неотработанного аванса составляет 10 380 000 руб. 00 коп. 

До настоящего времени денежные средства ответчиком не возвращены.

В соответствии с п. 14.28 договора при невозврате денежных средств, внесенных в качестве авансового платежа в течении 5 банковских дней, ответчик обязан уплатить штраф в размере 0,1% от невозвращенной суммы за каждый день просрочки.

За период с 26.10.18 по 18.12.18 неустойка составляет 560 520 руб. 00 коп.

Возражения ответчика, изложенные в отзыве, не могут быть приняты судом во внимание, так как выполнение работ по ПРС 65, 63, 76 ответчиком не доказано, акты сдачи – приемки работ сторонами не подписаны.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СвязьСтройКомплекс" 10 940 520 руб. 00 коп., из них: 10 380 000 руб. 00 коп. неосновательного обогащения и 560 520 руб. 00 коп. штрафа, а также 77 703 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.