АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru

http://astrahan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А06-1830/2019

г. Астрахань

10 июня 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена  05  июня  2019года

Арбитражный суд Астраханской области  в составе  судьи: Богатыренко С.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело  по иску  Общества с ограниченной ответственностью "Пневмострой"  к  Администрации муниципального образования "Володарский район"  о  взыскании  задолженности по муниципальному контракту от 25.08.2015г. в сумме 1 782 113 руб. 37 коп., неустойки в размере 29 003 руб. 90 коп. и неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ России, начисленную на сумму долга, начиная  с 13.03.2019г. за каждый день  просрочки  по день фактической оплаты;  по муниципальному контракту от  25.08.2015г. в сумме  488 907 руб. 71 коп., неустойки в размере 7 956 руб. 97 коп., и неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ России, начисленную на сумму долга, начиная  с 12.04.2018г. за каждый день  просрочки  по день фактической оплаты.

 Третье лицо: ООО «СтройТехМеханизация»

 

при участии: 

от истца: не явился, извещен, имеется ходатайство 

от ответчика – ФИО2, представитель по доверенности от 09.01.2019 г., паспорт.

от третьего лица: не явился, извещен. 

                Общество с ограниченной ответственностью "Пневмострой"  обратилось  в арбитражный суд с иском к Администрации муниципального образования "Володарский район"  о  взыскании  задолженности по муниципальному контракту от 25.08.2015г. в сумме 1 782 113 руб. 37 коп., неустойки в размере 29 003 руб. 90 коп. и неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ России, начисленную на сумму долга, начиная  с 13.03.2019г. за каждый день  просрочки  по день фактической оплаты;  по муниципальному контракту от  25.08.2015г. в сумме  488 907 руб. 71 коп., неустойки в размере 7 956 руб. 97 коп., и неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ России, начисленную на сумму долга, начиная  с 12.04.2018г. за каждый день  просрочки  по день фактической оплаты.

             К участию в деле в качестве  третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета иска, привлечено  ООО «СтройТехМеханизация».

Представители истца и третьего лица  в   судебное заседание  не явились, извещены надлежащим образом в  порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судебное заседание в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проводится в отсутствии неявившихся лиц. 

             Представитель ответчика заявил ходатайство о приостановлении производства по делу, в связи с рассмотрением дела №А06-2996/2019 по исковому заявлению администрации МО «Володарский район» к ООО «Пневмострой» о взыскании неустойки. Считает, что удовлетворение требований по иску А06-2996/2019 приведет к взаимозачету требований по рассматриваемому спору.  

         Суд считает, что оснований для приостановления производства по делу не имеется.          

          В рамках дела № А06-2996/2019   рассматриваются требования  Администрации МО «Володарский район»  к ООО «Пневмострой»  о взыскании неустойки   по муниципальному контракту № 0325300022415000320-0178340-01 от 25.08.2015 г. в  сумме 1  656 175 руб. 28 коп. и по муниципальному контракту № 0325300022415000320-0178340-02 от 25.08.2015 г. в сумме  1 799 501 руб. 85 коп. 

В соответствии с частью 9 статьи 130 АПК РФ, в случае если арбитражный суд при рассмотрении дела установит, что в производстве другого арбитражного суда находится дело, требования по которому связаны по основаниям их возникновения и (или) представленным доказательствам с требованиями, заявленными в рассматриваемом им деле, и имеется риск принятия противоречащих друг другу судебных актов, арбитражный суд может приостановить производство по делу в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 143 названного Кодекса.

Пунктом 1 части 1 статьи 143 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

По смыслу названных норм одним из условий приостановления производства по делу является невозможность его рассмотрения до разрешения по существу (принятия и вступления судебного акта в законную силу) другого дела. Обстоятельства, исследуемые в другом деле, должны иметь значение для арбитражного дела, рассмотрение которого подлежит приостановлению, то есть влиять на результат его рассмотрения по существу.

Суд считает, что обязанность суда приостановить производство по делу связана не с наличием другого дела, рассматриваемого в порядке гражданского судопроизводства, а с невозможностью рассмотрения дела до принятия решения по другому вопросу.

Рассмотрение одного дела до разрешения другого дела следует признать невозможным, если обстоятельства, исследуемые судом в ином деле, либо результат рассмотрения иного дела имеют значение для данного рассматриваемого дела, то есть могут повлиять на результат его разрешения по существу.

Из материалов дела не усматривается, что обстоятельства, которое могут быть установлены при рассмотрении дела А06-2996/2019, имеют преюдициальное значение по отношению к обстоятельствам, которые необходимо установить при рассмотрении настоящего спора.

Таким образом, суд считает, что настоящее дело возможно рассмотреть до разрешения дела №  А06-2996/2019.   

Учитывая изложенное, судом считает, что  заявленное ходатайство не подлежит удовлетворению, поскольку  отсутствуют основания предусмотренные  пунктом 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

              Представитель ответчика иск не признает, пояснил, что сумма долга была оплачена  третьему лицу, считает, что задолженность перед истцом отсутствует. Расчет суммы иска не оспаривает. 

            Суд, изучив материалы дела, выслушав доводы представителя  ответчика, 

                                                                          Установил:

            Как следует из материалов дела, 25 августа 2015 года между Комитетом земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности муниципального образования «Володарский район» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Пневмострой» (Продавец) был заключен муниципальный контракт № 0325300022415000320-0178340-01, в соответствии с которым Продавец обязался в срок до 31.03.2016 года передать покупателю благоустроенные квартиры в многоквартирном жилом доме, расположенном на территории поселка Володарский Володарского района, общей площадью 1.286,1 кв.м.

Дополнительным соглашением от 02.12.2015 года к муниципальному контракту № 0325300022415000320-0178340-01 от 25.08.2015 года права и обязанности покупателя Комитетом земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности муниципального образования «Володарский район» переданы Администрации муниципального образования «Володарский район». 

Во исполнение контракта истец 30.03.2016 года согласно актам приема-передачи квартиры передал ответчику 27 квартир в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Астраханская область, Володарский район, поселок Володарский, ул. ФИО3, дом № 37. 

            Пунктом 2.1 контракта стороны установили, что цена контракта составляет 33.123.505 руб. 50 коп., в том числе:

- средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 22.940.000 руб. 52 коп.; 

- средства бюджета Астраханской области – 5.091.752 руб. 49 коп.; 

- средства бюджета МО «Володарский район» - 5.091.752 руб. 49 коп.

             Согласно пункту 2.2 контракта оплата по контракту осуществляется в следующем порядке: 

            2.2.1. После подписания Контракта Покупатель предоставляет Продавцу аванс в размере: 

            - 30% от стоимости средств, предоставляемых за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, что составляет 6.882.000 руб. 15 коп. в течение 5 рабочих дней при условии поступления денежных средств в бюджет МО «Володарский район» Астраханской области из бюджета Астраханской области;

            - 30% от стоимости средств, предоставляемых за счет бюджета Астраханской области, что составляет 1.527.525 руб. 74 коп., не позднее 31 декабря 2015 года при условии поступления денежных в бюджет МО «Володарский район» Астраханской области из бюджета Астраханской области; 

            - 30% от стоимости средств, предоставляемых за счет местного бюджета МО «Володарский район», что составляет 1.527.525 руб. 74 коп., не позднее 31 декабря 2016 года.  

2.2.2. Окончательный расчет с Продавцом Покупатель производит:

- средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - в течение 30 банковских дней со дня подписания акта приема-передачи квартир и получения Покупателем Свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на Объект, оформленных в установленном законом порядке, при условии поступления денежных средств в бюджет МО «Володарский район» Астраханской области из бюджета Астраханской области;

            - средства бюджета Астраханской области - не позднее 31 декабря 2016 года при условии подписания акта приема-передачи квартир и получения Покупателем   Свидетельств   о   государственной регистрации права муниципальной собственности на Объект, оформленных в установленном законом порядке при условии  поступления денежных средств  в бюджет  МО  «Володарский  район» Астраханской области из бюджета Астраханской области;

            - средства местного бюджета МО «Володарский район»:   

            - 35% от стоимости средств не позднее 31 декабря 2017 года при условии подписания акта приема-передачи квартир и получения Покупателем Свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на Объект, оформленных в установленном законом порядке; 

            - 35% от стоимости средств не позднее 31 декабря 2018 года при условии подписания акта приема-передачи квартир и получения Покупателем Свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на Объект, оформленных в установленном законом порядке. 

            Также, 25 августа 2015 года между Комитетом земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности муниципального образования «Володарский район» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Пневмострой» (Продавец) был заключен муниципальный контракт № 0325300022415000321-0178340-02, в соответствии с которым Продавец обязался в срок до 31.03.2016 года передать покупателю благоустроенные квартиры в многоквартирном жилом доме, расположенном на территории поселка Володарский Володарского района, общей площадью 1.397,4 кв.м.

Дополнительным соглашением от 02.12.2015 года к муниципальному контракту № 0325300022415000321-0178340-02 от 25.08.2015 года права и обязанности покупателя Комитетом земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности муниципального образования «Володарский район» переданы Администрации муниципального образования «Володарский район». 

             Согласно пункту 2.2 контракта оплата по контракту осуществляется в следующем порядке: 

            2.2.1. После подписания контракта Покупатель предоставляет Продавцу аванс в размере: 

            - 30% от стоимости средств, предоставляемых за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, что составляет 7.477.573 руб. 29 коп. в течение 5 рабочих дней при условии поступления денежных средств в бюджет МО «Володарский район» Астраханской области из бюджета Астраханской области;

            - 30% от стоимости средств, предоставляемых за счет бюджета Астраханской области, что составляет 1.659.718 руб. 89 коп., не позднее 31 декабря 2015 года при условии поступления денежных в бюджет МО «Володарский район» Астраханской области из бюджета Астраханской области; 

            - 30% от стоимости средств, предоставляемых за счет местного бюджета МО «Володарский район», что составляет 1.659.718 руб. 89 коп., не позднее 31 декабря 2016 года.  

2.2.2. Окончательный расчет с Продавцом Покупатель производит:

- средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - в течение 30 банковских дней со дня подписания акта приема-передачи квартир и получения Покупателем Свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на Объект, оформленных в установленном законом порядке, при условии поступления денежных средств в бюджет МО «Володарский район» Астраханской области из бюджета Астраханской области;

            - средства бюджета Астраханской области - не позднее 31 декабря 2016 года при условии подписания акта приема-передачи квартир и получения Покупателем   Свидетельств   о   государственной регистрации права муниципальной собственности на Объект, оформленных в установленном законом порядке при условии  поступления денежных средств  в бюджет  МО  «Володарский  район» Астраханской области из бюджета Астраханской области;

            - средства местного бюджета МО «Володарский район»:   

            - 35% от стоимости средств не позднее 31 декабря 2017 года при условии подписания акта приема-передачи квартир и получения Покупателем Свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на Объект, оформленных в установленном законом порядке; 

            - 35% от стоимости средств не позднее 31 декабря 2018 года при условии подписания акта приема-передачи квартир и получения Покупателем Свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на Объект, оформленных в установленном законом порядке. 

Истцом обязательства по Контрактам выполнены в полном объеме 30.03.2016г., что подтверждается актами приема-передачи квартир № 1-27, расположенных по адресу: 

<

...> и актами приема-передачи квартир № 1-27, расположенных по адресу: 

<

...>

Переход права собственности был зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области в 2016г.

          По Контракту   № 0325300022415000320-0178340-01 от 25.08.2015 г.    ответчиком оплата произведена частично в сумме 31.207.657 руб. 38 коп.: платежное поручение № 643 от 04.09.2015г. - 6 290 504,72 руб., п.п. № 452903 от 10.12.2015г. - 9 757 495,65 руб., п.п. № 466900 от 14.12.2015г. - 6 892 000,15 руб., по соглашению о зачете требований, заключенному между истцом, ответчиком и ООО «СтройТехМеханизация» - 8 267 656,86 руб.

 По Контракту № 0325300022415000320-0178340-02 от 25.08.2015 г.   оплата произведена частично в сумме 26.308.537 руб. 32 коп.: платежное поручение № 645 от 04.09.2015г. - 7 477 573,29 руб., п.п. № 460769 от 11.12.2015г. - 16 445 238,86 руб., п.п. № 2121 от 28.12.2016г. - 2 570 012,04 руб., п.п. 2122 от 28.12.2016г. - 2 128 713,13 руб.

         Решением Арбитражного суда Астраханской области от 26 октября 2018г. по делу № А06-3352/2018 с ответчика в пользу истца   взыскано      8.788.781 руб. 68 коп., из которых 7.878.895 руб. 71 коп.  – сумма долга, 839.885 руб. 97 коп. – сумма пени и 70.000 руб. – расходы по проведению судебной экспертизы.     Пеня начислена на сумму долга в размере 7.878.895 руб. 71 коп.  и подлежат начислению с 30 июня 2018 года по день фактической уплаты Обществу с ограниченной ответственностью «Пневмострой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) суммы долга в размере 1/300 действующей на дату исполнения настоящего решения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Платежным поручением № от 29.12.2018г. на сумму 1.447.431.01 руб. истец частично погасил сумму долга. 

С  09.01.2019г.  по контракту №  0325300022415000320-0178340-01 от 25.08.2015 г.  образовалась задолженность в размере  1 782 113 руб. 37 коп.

 С  09.01.2019г.  по контракту № 0325300022415000320-0178340-02 от 25.08.2015 г.  образовалась задолженность в размере 488.907 руб. 71 коп.

Поскольку ответчик задолженность не погасил, истец обратился с настоящим иском в суд.

Оценив  в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  доводы сторон, доказательства и обстоятельства по делу суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со статьей 549 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли – продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество (статья 130).

Согласно пункту 5 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В силу статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

            Статьей 488 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случае, когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товара через определенное время после его передачи покупателю (продажа товара в кредит), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором

            В случае, когда покупатель, получивший товар, не исполняет обязанность по его оплате в установленный договором купли-продажи срок, продавец вправе потребовать оплаты переданного товара.

Согласно условиям  контрактов  окончательный расчет с Продавцом Покупатель производит:

- средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - в течение 30 банковских дней со дня подписания акта приема-передачи квартир и получения Покупателем Свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на Объект, оформленных в установленном законом порядке, при условии поступления денежных средств в бюджет МО «Володарский район» Астраханской области из бюджета Астраханской области;

            - средства бюджета Астраханской области - не позднее 31 декабря 2016 года при условии подписания акта приема-передачи квартир и получения Покупателем   Свидетельств   о   государственной регистрации права муниципальной собственности на Объект, оформленных в установленном законом порядке при условии  поступления денежных средств  в бюджет  МО  «Володарский  район» Астраханской области из бюджета Астраханской области;

            - средства местного бюджета МО «Володарский район»:   

            - 35% от стоимости средств не позднее 31 декабря 2017 года при условии подписания акта приема-передачи квартир и получения Покупателем Свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на Объект, оформленных в установленном законом порядке; 

            - 35% от стоимости средств не позднее 31 декабря 2018 года при условии подписания акта приема-передачи квартир и получения Покупателем Свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на Объект, оформленных в установленном законом порядке. 

             Решением Арбитражного суда Астраханской области от 26 октября 2018г. по делу № А06-3352/2018 с ответчика в пользу истца   взыскано      8.788.781 руб. 68 коп., из которых 7.878.895 руб. 71 коп.  – сумма долга, 839.885 руб. 97 коп. – сумма пени и 70.000 руб. – расходы по проведению судебной экспертизы.     Пеня начислена на сумму долга в размере 7.878.895 руб. 71 коп.  и подлежат начислению с 30 июня 2018 года по день фактической уплаты Обществу с ограниченной ответственностью «Пневмострой» суммы долга в размере 1/300 действующей на дату исполнения настоящего решения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

           В данном деле  рассматриваются   требования истца    о взыскании задолженности    с  09.01.2019г.   по контракту №  0325300022415000320-0178340-01 от 25.08.2015 г.     в размере  1 782 113 руб. 37 коп. и  по контракту № 0325300022415000320-0178340-02 от 25.08.2015 г.    в размере 488.907 руб. 71 коп.

              Представитель ответчика, иск не признает, пояснил, что сумма долга была оплачена  третьему лицу. Ответчик считает, что задолженности перед истцом не имеет.

Суд, считает данный   довод  несостоятельным, так как в рамках дела №А06-3352/2018 была проведена судебная экспертиза, в результате которой установлено, что  Соглашение о зачете требований, датированное 18 августа 2016 года, оформленное между ООО «СтройТехМеханизация», ООО «Пневмострой» и Администрацией МО «Володарский район» на сумму 18.417.573 рубля 65 копеек и Соглашение о зачете требований, датированное 14 октября 2016 года, оформленное между ООО «СтройТехМеханизация», ООО «Пневмострой» и Администрацией МО «Володарский район» на сумму 11.597.347 рублей 80 копеек сфальсифицировано.   

Согласно статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Поскольку иных доказательств в подтверждение факта оплаты ответчик не представил, то суд не может признать доказанным факт исполнения со стороны ответчика его обязанности по оплате переданных ему истцом квартир в заявленной истцом сумме.

При таких обстоятельствах суд признает требование истца о взыскании с ответчика долга по муниципальному контракту № 0325300022415000320-0178340-01 от 25.08.2015 года . в сумме 1 782 113 руб. 37 коп.   и по муниципальному контракту № 0325300022415000321-0178340-02 от 25.08.2015 года в  сумме 488 907 руб. 71 коп. обоснованным и подлежащим удовлетворению.

            Пунктом 6.2 контрактов стороны установили, что в случае просрочки исполнения покупателем обязательств, предусмотренных контрактом, Продавец вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы.

            Согласно статьям 329 и 330 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

            Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

            Поскольку ответчиком нарушено условие контрактов о сроке исполнения обязательства, обеспеченного договорной неустойкой, то истец вправе требовать ее уплаты за все время просрочки.

            Сумма пени по муниципальному контракту № 0325300022415000320-0178340-01 от 25.08.2015 года за период просрочки с 09 января 2019 года по 12 марта 2019 года  составила  29 003 руб. 90 коп., по муниципальному контракту № 0325300022415000321-0178340-02 от 25.08.2015 года за период просрочки с 09 января 2019 года по 12 марта 2019  года – 7 956  руб. 97 коп. 

            Отсутствие вины в ненадлежащем исполнении обязательства ответчиком не доказано и судом не установлено.

            При таких обстоятельствах суд считает требования истца в части взыскания пени также обоснованными и подлежащими удовлетворению.

            Согласно пункту 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). 

            Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

При предъявлении настоящего искового заявления истцу была представлена отсрочка по уплате государственной пошлины до рассмотрения спора по существу.

 В соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, государственная пошлина взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.

Поскольку ответчик в силу закона освобожден   от уплаты государственной пошлины, то расходы по уплате государственной пошлины не подлежат  взысканию.

Руководствуясь статьями  167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Муниципального образования «Володарский район» в лице Администрации муниципального образования «Володарсский район» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) за счет средств казны Муниципального образования «Володарский район» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Пневмострой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)   задолженность по муниципальному контракту № 0325300022415000320-0178340-01 от 25.08.2015 г. в сумме 1 782 113 руб. 37 коп., неустойку в сумме 29 003 руб. 90 коп., неустойку, начисленную на указанную сумму долга, начиная с 13.03.2019 г. по день фактической оплаты, исходя из 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки;  задолженность по муниципальному контракту № 0325300022415000320-0178340-02 от 25.08.2015 г. в сумме 488 907 руб. 71 коп.,  неустойку в сумме 7 956 руб. 97 коп., неустойку, начисленную на указанную сумму долга, начиная с 13.03.2019 г. по день фактической оплаты, исходя из 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки

          Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru

Судья

С.В. Богатыренко