1196_546398 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А83-950/2017

06 сентября 2019 года

город Симферополь

 

 Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Государственного унитарного  предприятия Республики Крым «Крымский государственный институт по проектированию  объектов дорожного хозяйства «Крымгипродор» к ответчику ГКУ РК «Служба  автомобильных дорог Республики Крым» при участии в деле в качестве третьих лиц, не  заявляющих самостоятельных требований, относительно предмета спора Министерства  транспорта Республики Крым, Совет Министров Республики Крым, ООО  «Самарадорпроект», ООО «НПП Алекс», Государственный комитет дорожного хозяйства  Республики Крым о взыскании  

при участии представителей сторон: от истца – ФИО2, директор, приказ № 59 от 08.02.19, выписка из ЕГРЮЛ; 

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности № 05-05/126Д от  01.04.2019;  

от третьего лица (Министерство Транспорта Республики Крым) – ФИО4,  доверенность № ДО/150 от 20.05.2019;  

от третьего лица Совет Министров Республики Крым – Гамма А.Ф., представитель по  доверенности № 1/01-58/6547 от 12.10.2018г.  

иные участники процесса явку не обеспечили; 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

автомобильных дорог Республики Крым» (ИНН: 9102164702 ОГРН: 1159102040680) в пользу  Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымский государственный  институт по проектированию объектов дорожного хозяйства «Крымгипродор» (ИНН:  9102164678 ОГРН: 1159102040646) задолженность в размере 17 070 844,53 руб., пеню в  размере 6 175 804,78 руб., расходы на проведение экспертизы в сумме 43 745,05 руб.  

В удовлетворении требований в части взыскания задолженности в размере  49 269 080,00 рублей, а также пени в размере 18 181 522,20 руб. в удовлетворении  требования отказать.  

Взыскать с Государственного Казенного Учреждения Республики Крым «Служба  автомобильных дорог Республики Крым» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) в  пользу ООО «Самарадорпроект» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) расходы на  проведение экспертизы в размере 24 960,41 руб.  

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымский  государственный институт по проектированию объектов дорожного хозяйства  «Крымгипродор» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) в пользу ООО  «Самарадорпроект» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) расходы на проведение  экспертизы в размере 72 039,59 руб.  

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымский  государственный институт по проектированию объектов дорожного хозяйства  «Крымгипродор» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) в доход Федерального бюджета  госпошлину в размере 148 535,00 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия  постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке  апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011,  

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд  Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня  принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.  

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть  получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья В.И. Гайворонский