АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

248000, г. Калуга, ул. Ленина, 90; тел. 8-800-100-23-53, (4842) 505-902, факс: (4842) 50-59-57; 59-94-57  http://kaluga.arbitr.ru; e-mail: arbitr@kaluga.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А23-5401/2017

27 ноября 2017 года

г. Калуга

Резолютивная часть решения объявлена 22 ноября 2017 года Полный текст решения изготовлен 27 ноября 2017 года 

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Погонцева М.И.,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску дело по исковому заявлению  Администрации муниципального района "Жуковский район" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 249191, 

<

...>, к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 311574218600030, ИНН 

<

***>),  

о взыскании неустойки в размере 1 603 руб. 61 коп.,  

У С Т А Н О В И Л:

Администрация муниципального района "Жуковский район" обратилась в  Арбитражный суд Калужской области с иском к индивидуальному  предпринимателю ФИО1 о взыскании неустойки в  размере 41 603 руб. 61 коп. (с учетом уточнений).  

Истец и ответчик в судебное заседание не явились, с учетом положений ст.  123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считаются  извещенными надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела.  

Ответчику направлялись соответствующие уведомления, которые  возвращены органом связи за истечением срока хранения с отметкой о попытке  вторичного вручения.  

В соответствии с ч. 6 ст. 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после  получения определения о принятии искового заявления или заявления к  производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или  привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса  после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу  самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела  с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.  

 Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных  последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении  дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим  образом извещены о начавшемся процессе, за исключением случаев, когда лицами,  участвующими в деле, меры по получению информации не могли быть приняты в  силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.  

Информация о судебном разбирательстве была своевременно размещена в  сети Интернет на сайте http://kad.arbitr.ru/.  

От истца по факсу 22.11.2017 поступило ходатайство о рассмотрении дела  без его участия.  

От истца 03.11.2017 поступило ходатайство об уменьшении исковых  требований, а именно уменьшении размера неустойки до 1 603 руб. 61 коп.  Уточнения приняты судом к рассмотрению.  

Изучив материалы дела, суд пришел к следующим выводам. 

Как усматривается из материалов дела между Администрацией МР  «Жуковский район» (заказчик) и ИП ФИО1 (исполнитель) был заключен  муниципальный контракт от 13.12.2016 № 0137300021316000180-0226340-01-168  (л.д.10-19).  

В силу ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору  подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой  стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а  заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

По условиям контракта Исполнитель (истец) по заданию Заказчика  (ответчик) обязуется в установленный контрактом срок выполнить комплекс  кадастровых и градостроительных работ в отношении 5 (пяти) земельных участков  из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства:  

-площадью 10 306 кв.м. с кадастровым номером 40:17:011501:345,  расположенный по адресу: Калужская обл., Жуковский р-н, д. Чубарово, мкр-н  «Северный», уч. № 1;  

- площадью 10 263 кв.м. с кадастровым номером 40:17:011501:346,  расположенный по адресу: Калужская обл., Жуковский р-н, д. Чубарово, мкр-н  «Северный», уч. № 2;  

- площадью 10 319 кв.м. с кадастровым номером 40:17:011501:347,  расположенный по адресу: Калужская обл., Жуковский р-н, д. Чубарово, мкр-н  «Северный», уч. № 3;  

- площадью 10 380 кв.м. с кадастровым номером 40:17:011501:348,  расположенный по адресу: Калужская обл., Жуковский р-н, д. Чубарово, мкр-н  «Северный», уч. № 4;  

- площадью 10 440 кв.м. с кадастровым номером 40:17:011501:349,  расположенный по адресу: Калужская обл., Жуковский р-н, д. Чубарово, мкр-н  «Северный», уч. № 5, а Заказчик обязуется произвести Исполнителю оплату  выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.  

В соответствии с п.1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена  подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в  договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424  настоящего Кодекса.  

Согласно п. 2.1 цена контракта составляет 145 123 руб. 24 коп без НДС. 

Оплата по настоящему контракту осуществляется за счет средств бюджета  МР «Жуковский район» путем о перечисления Заказчиком денежных средств на  банковский счет исполнителя.  

Согласно ч.1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в  договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.  По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также  сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).  

Как следует из п.1.4 сроком начала выполнения работ считается дата  заключения контракта в течение 150 календарных дней. Окончание выполненных  работ определяется датой подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.  

Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.07.2017,  но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по  контракту.  

Согласно пункту 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации  заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с  участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а  при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или  иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.   

В силу п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача  результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом,  подписанным обеими сторонами.   

Ответчик взятые на себя обязательства по выполнению комплекса  кадастровых и градостроительных работ в отношении земельных участков в срок,  установленный муниципальным контрактом, не исполнил, допустил просрочку  исполнения на 13 дней, что подтверждается актом сдачи – приемки выполненных  работ от 26.05.2017, подписанный сторонами.  

Истцом в адрес ответчика было направлено претензионное письмо по  выплате неустойки за просрочку исполнения работ по муниципальному контракту  от 13.12.2016 № 0137300021316000180-0226340-01-168, которая оставлена  последним без внимания и удовлетворения (л.д.21-22).  

Поскольку Подрядчик допустил просрочку исполнения взятых на себя  обязательств по выполнению работ по муниципальному контракту от 13.12.2016 №  0137300021316000180-0226340-01-168, это послужило основанием для обращения  истца с настоящим иском в суд.  

 Согласно части 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации  исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.  

В соответствии со статьей 330 вышеуказанного кодекса под неустойкой  (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная  сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или  

ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки  исполнения.  

Пунктом 5.3 вышеуказанного контракта установлено, что в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае  просрочки исполнения, Подрядчик несет ответственность в виде уплаты неустойки  в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской  Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему  обязательств, предусмотренных контрактом и фактически выполненных  исполнителем.  

Поскольку ответчик ненадлежащим образом исполнил обязанность по  своевременному выполнению работ, истцом начислена и предъявлена к взысканию  неустойка в размере 1 603 руб. 61 коп. (с учетом уточнений).  

В соответствии с п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от  24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского  кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств",  если должником является коммерческая организация, индивидуальный  предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею  приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только  по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в  любой форме.  

Согласно п. 38 Обзора судебной практики применения законодательства  Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв.  Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017) при расчете пени, подлежащей  взысканию в судебном порядке за просрочку исполнения обязательств по  государственному контракту в соответствии с частями 5 и 7 статьи 34 Закона о  контрактной системе, суд вправе применить размер ставки рефинансирования  Центрального Банка Российской Федерации, действующей на момент вынесения  судебного решения.  

На момент вынесения решения по настоящему спору размер ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации составляет 8,25%.  

На основании вышеизложенного судом произведен самостоятельный расчет  пени, подлежащей взысканию в судебном порядке.  

Как определено п. 6-8 Правил определения размера штрафа,  начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за  исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком  (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день  просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных  Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063,  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком  (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом,  и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату  уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской  Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную  объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически  исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по  формуле:  

П = (Ц - В) x С, 

где:  

Ц - цена контракта; 

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок  

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту,  

определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов  

выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения  

контрактов; С - размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле: C = CЦБ  ДП,  

где: 

 ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным  

банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом  

коэффициента К; ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле: 

ДП 

К= Х100%, 

ДК 

где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день  просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной  Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.   При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за  каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки  рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на  дату уплаты пени.  

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за  каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки  рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на  дату уплаты пени.  

Цена контракта составляет 145 123 руб. 24 коп., срок исполнения контракта –  150 календарных дней, период просрочки – 13 календарных дней.  

К= (13/150) х 100% = 8,67% 

Поскольку величина коэффициента составляет менее 50%, размер ставки  рефинансирования составляет 0,01 (размер ставки на момент вынесения решения  составляет 8,25%)  

С = (0,01х0,0825)х13= 0,010725 П = (145123,24-0)х0,010725 = 1556 руб. 45 коп. 

Таким образом, размер пени за просрочку исполнения ответчиком  обязательств составляет 1 556 руб. 45 коп.  

Исходя из вышеизложенного, на основании статей 330, 331 Гражданского  кодекса Российской Федерации суд считает требования истца о взыскании  неустойки подлежащими удовлетворению частично в размере 1 556 руб. 45 коп. В  остальной части исковых требований отказано.  

Государственная пошлина по иску, от уплаты которой истец как  государственный орган освобожден, подлежит взысканию с ответчика в доход  федерального бюджета.  

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации  

РЕШИЛ:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу администрации муниципального района «Жуковский район»  сумму неустойки по муниципальному контракту от 13.12.2016г. в размере 1 556  (одна тысяча пятьсот пятьдесят шесть) руб. 45 коп.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в доход федерального бюджета расходы по оплате государственной  пошлины в размере 2 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через  Арбитражный суд Калужской области.  

Судья М.И.Погонцев