Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

«27» декабря 2022 года

Дело № А12-18737/2022

Резолютивная часть оглашена 21 декабря 2022 года

Полный текст изготовлен  27 декабря 2022 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Поповой Т.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Донцовой Н.Н., рассмотрел в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании задолженности,

третье лицо - государственное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 4» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), Финансовый управляющий ФИО3.

  Представители сторон в судебное заседание не явились.

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец) обратился в суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору субподряда №22/02-22 от 22.02.2022 в размере 1 560 458 руб. (с учетом уточнения требований, принятых судом к рассмотрению).

Исследовав материалы дела, суд

установил:

Между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (Генеральный Подрядчик) и индивидуальным предпринимателем ПолунинымАлександром Геннадиевичем (Субподрядчик) 22.02.2022 был заключен договор субподряда №22/02-22, согласно которому Генеральный Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту помещений под размещение рентгеновского комплекса в здании ГУЗ «Поликлиника №4», расположенного по адресу: 400001, 

<

...> (далее - Договор).

Согласно п. 2.1. стоимость работ по договору составляет 1 580 512 руб.

Согласно п. 2.2. Договора оплата выполненных работ производится в течение 1(одного) дня после перечисления денежных средств Заказчиком Генподрядчику. 

Согласно п. 3.1. Договора календарные сроки выполнения работ определены с 22.02.2022 по 20.03.2022.

Во исполнение принятых на себя обязательств по Договору ИП ФИО1 выполнил работы на общую сумму 1 560 458 руб., что подтверждается подписанными состороны Ответчика справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 14.03.2022 по форме № КС-3, а также актом о приемке выполненных работ № 1 от 14.03.2022.

Заказчик оплатил работы Генподрядчику 18.04.2022, что подтверждается платежным поручением №263909 от 18.04.2022. 

Работы, выполненные истцом,  Ответчиком не оплачены.

Сумма основного долга по договору составляет 1 560 458 руб.

   В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

Согласно статье 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Руководствуясь ст.ст.110, 112, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л :

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) задолженность в размере  1 560 458 руб.  и государственную пошлину в размере 28 605 руб. 

Выдать индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 200 руб.

Полный текст решения изготовлен в течение пяти рабочих дней с даты оглашения резолютивной части.

Решение может быть обжаловано в течение  одного месяца с момента изготовления в полном объеме в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Волгоградской области.

 Судья                                                                                                                            Т.В.Попова