Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

город Волгоград                                                                 Дело №А12-4483/2024

“05” июня 2024 года

Резолютивная часть решения оглашена 04 июня 2024 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе  судьи   Пантелеевой  В.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Текутовой Д.С.

 

при участии в судебном  заседании:

от истца – представитель ФИО1, доверенность от 03.08.2023г., ФИО2, по доверенности от 15.04.2024 г.,

от ответчика – представитель не явился, извещен, 

от третьих лиц:

от государственного казенного учреждения Волгоградской области «Дирекция автомобильных дорог»  – ФИО2, по доверенности от 06.06.2023 г.,

от общества с ограниченной ответственностью «ПромДорСтрой» – не явился, извещен,

общества с ограниченной ответственностью «Экострой» – не явился, извещен,

общества с ограниченной ответственностью «Южная электромонтажная компания» – не явился, извещен,

временный управляющий ФИО3 – не явился, извещен,

 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к акционерному обществу «Башкиравтодор» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) об обязании совершить действия, 

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, государственного казенного учреждения Волгоградской области «Дирекция автомобильных дорог» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), общества с ограниченной ответственностью «ПромДорСтрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), общества с ограниченной ответственностью «Экострой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), общества с ограниченной ответственностью «Южная электромонтажная компания» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), временного управляющего ФИО3,

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился в арбитражный суд с иском  к ответчику об обязании в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу исполнить принятые на себя обязательства по Государственному контракту от 08.12.2021 №402-21 на выполнение работ по строительству объекта «Путепроводная развязка на пересечении автомобильной дороги 3400013 Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск (км 21+508) и железной дороги Горнополянский - Канальная (км 30+105)» завершить работы, а именно:

-                     работы по укреплению конусов;

-                     работы по сооружению устоев и опор (обеспылевание поверхностей, устройство гидроизоляции и окраска);

-                     работы по устройству пролетных строений монолитных участков МУ – МУ – 5;

-                     работы по устройству мостового полотна (устройство защитного ограждения контактной сети и ВЛ, перильного ограждения из композитивных материалов, устройство дренажных трубок, дренажного канала, подвесных водоотводных коллекторов из композитивного материала, устройство деформационных швов);

-                     работы по укреплению земполотна;

-                     работы по устройству водоотводных сооружений до путепровода, после путепровода;

-                     работы по рекультивации, в том числе восстановление и устройств, надпочвенного покрова;

-                     работы по устройству перильного и барьерного ограждения;

-                     работы по устройству автобусных остановок;

-                     работы по устройству лестничных сходов;

-                     работы по нанесению дорожной разметки;

-                     работы по установке дорожных знаков;

-                     работы по устройству дорожной одежды пк 7 + 60 - 7 + 77, пк 8 + 53 - 9 + 53;

-                     работы по устройству дорожного полотна пк 7 + 77 - 8 + 53;

работы по освещению (освещение, защитное ограждение опор, трансформатор КТПМ).

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, в письменном отзыве не отрицает того обстоятельства, что работы по контракту выполнены не в полном объеме, ссылается на невыполнение работ субподрядчиками.

Представитель государственного казенного учреждения Волгоградской области «Дирекция автомобильных дорог» считает заявленные исковые требования обоснованными, просит иск удовлетворить в полном объеме.

Представители третьих лиц: ООО «ПромДорСтрой», ООО «Экострой», ООО «Южная электромонтажная компания», временного управляющего ФИО3 в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, письменные отзывы по делу не представили.

Суд, выслушав участвующих в деле лиц, изучив материалы дела, оценив фактические обстоятельства дела, приходит к следующему.

Как усматривается из материалов дела, между истцом (государственный заказчик) и ответчиком (генеральный подрядчик) 08.12.2021 г. заключен государственный  контракт на выполнение работ по строительству объекта: «Путепроводная развязка на пересечении автомобильной дороги 3400013 Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск (км 21+508) и железной дороги Горнополянский - Канальная (км 30+105)».

На основании п. 1.6 результатом выполненной работы по Государственному контракту является построенный линейный Объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В соответствии с п. 2.2 Контракта строительный контроль за производством работ на объекте осуществляет государственное казенное учреждение Волгоградской области «Дирекция автомобильных дорог» на основании соглашения от 28.04.2012 № 204-12 на передачу функций Заказчика-застройщика по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области.

Пунктом 6.1 Контракта, предусмотрены календарные сроки выполнения работ по Объекту: начало выполнения работ: с даты подписания Контракта (строительно-монтажных работ через 7 рабочих дней с момента регистрации извещения о начале строительства в Нижне-Волжском Управлении Ростехнадзора). Окончание выполнения и приемки работ: 01 сентября 2022 года.

Настоящим Контрактом пунктом 6.2 предусмотрен один этап исполнения: со дня заключения по 01 октября 2022 года.

В соответствии с  п.3 Дополнительного соглашения №7/406-22 к государственному контракту от 08.12.2021 №402-21 на выполнение работ по строительству объекта: «Путепроводная развязка на пересечении автомобильной дороги 3400013 Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск (км 21+508) и железной дороги Горнополянский - Канальная (км 30+105)» внесены изменения в раздел 6 контракта, при этом п.6.1 изложен в следующей редакции: «Календарные сроки выполнения работ по Объекту: начало выполнения работ: с даты подписания Контракта (строительно-монтажных работ через 7 рабочих дней с момента регистрации извещения о начале строительства в Нижне-Волжском Управлении Ростехнадзора). Окончание выполнения и приемки работ: 01 июня 2023 года.

Согласно п.6.2  государственного контракта (в редакции дополнительного соглашения №7/406-22 от 30.09.2022 г.), настоящим Контрактом предусмотрен один этап исполнения: со дня заключения по 01 июля 2023 года.

Согласно п. 9.2.5 Контракта, Генеральный подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с согласованным и утвержденным календарным графиком производства работ в составе проекта производства работ, а также нести полную ответственность за срыв сроков производства работ.

Пунктом 9.2.9 предусмотрено завершить все работы в сроки, установленные п.6.1 Контракта, и сдать в эксплуатацию в установленном порядке Объект, соответствующий Проекту, в сроки, установленные п. 6.2 Контракта.

Истец указывает, что работы по государственному контракту ответчиком не выполнены до настоящего времени, в связи с чем обратился с настоящим иском.

Согласно ст.702 ГК РФ  По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст.708 ГК РФ В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно ст.763 ГК РФ По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст.310 ГК РФ Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Учитывая, что заключенный между сторонами государственный  контракт от 08.12.2021 №402-21 на выполнение работ по строительству объекта «Путепроводная развязка на пересечении автомобильной дороги 3400013 Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск (км 21+508) и железной дороги Горнополянский - Канальная (км 30+105)» является действующим, у ответчика возникает обязанность по его исполнению.

Факт частичного неисполнения ответчиком обязательств в рамках государственного контракта также подтверждается актом инвентаризации объекта от 15.04.2024 г, ведомостью строительной готовности объекта, составленными с участием представителя ответчика. Каких-либо возражений относительно зафиксированного в указанных документах объема, ответчиком не заявлено.

Таким образом, требования истца об обязании ответчика в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу исполнить принятые на себя обязательства по Государственному контракту от 08.12.2021 №402-21 на выполнение работ по строительству объекта «Путепроводная развязка на пересечении автомобильной дороги 3400013 Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск (км 21+508) и железной дороги Горнополянский - Канальная (км 30+105)» и завершить работы, подлежат удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины в силу ст.110 АПК РФ возлагаются на ответчика.

На  основании  изложенного,  руководствуясь ст. 167-170 АПК РФ,  суд 

                                                           Р Е Ш И Л:

Обязать акционерное общество «Башкиравтодор» в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу исполнить принятые на себя обязательства по Государственному контракту от 08.12.2021 №402-21 на выполнение работ по строительству объекта «Путепроводная развязка на пересечении автомобильной дороги 3400013 Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск (км 21+508) и железной дороги Горнополянский - Канальная (км 30+105)» завершить работы, а именно:

-                     работы по укреплению конусов;

-                     работы по сооружению устоев и опор (обеспылевание поверхностей, устройство гидроизоляции и окраска);

-                     работы по устройству пролетных строений монолитных участков МУ – МУ – 5;

-                     работы по устройству мостового полотна (устройство защитного ограждения контактной сети и ВЛ, перильного ограждения из композитивных материалов, устройство дренажных трубок, дренажного канала, подвесных водоотводных коллекторов из композитивного материала, устройство деформационных швов);

-                     работы по укреплению земполотна;

-                     работы по устройству водоотводных сооружений до путепровода, после путепровода;

-                     работы по рекультивации, в том числе восстановление и устройств, надпочвенного покрова;

-                     работы по устройству перильного и барьерного ограждения;

-                     работы по устройству автобусных остановок;

-                     работы по устройству лестничных сходов;

-                     работы по нанесению дорожной разметки;

-                     работы по установке дорожных знаков;

-                     работы по устройству дорожной одежды пк 7 + 60 - 7 + 77, пк 8 + 53 - 9 + 53;

-                     работы по устройству дорожного полотна пк 7 + 77 - 8 + 53;

работы по освещению (освещение, защитное ограждение опор, трансформатор КТПМ).

Взыскать с акционерного общества «Башкиравтодор»  в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок через Арбитражный суд Волгоградской области.

 

Судья:                                                                                          В.В. Пантелеева