1/2024-5991(1) 

 

Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-9078/2022

г. Благовещенск

24 января 2024 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Ивановой Е.В., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление муниципального учреждения  «Городское управление капитального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Вэлстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

об обязании выполнить работы по обеспечению отвода воды в рамках исполнения  гарантийных обязательств по муниципальному контракту от 03.08.2021 № 0292/2021,  взыскании штрафа в размере 1 000 руб.  

третье лицо: ФИО2 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Вэлстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 10 календарных дней с момента вступления  решения суда в законную силу в рамках исполнения гарантийных обязательств по  муниципальному контракту от 03.08.2021 № 0292/2021 выполнить работы по устранению  локального затопления участка асфальтобетонного покрытия проезда многоквартирного  дома № 46 по ул. Шимановского в г. Благовещенске, а именно: разработать схему  благоустройства участка в районе подъезда № 1 жилого дома № 46 по ул. Шимановского с  водоотведением в существующие дождеприемные колодцы ДК1, ДК3 с горизонтальной  разбивкой уклонов с учетом уровня существующего покрытия въезда для осуществления  сбора и водоотведения дождевых и талых вод; произвести разборку участка  асфальтобетонного покрытия проезда в районе подъезда № 1 дома № 46 по ул.  Шимановского, определенного схемой; произвести планировку территории участка в  соответствии со схемой благоустройства участка в районе подъезда № 1 жилого дома № 46  по ул. Шимановского; произвести устройство асфальтобетонного покрытия в соответствии  со схемой благоустройства участка в районе подъезда № 1 жилого дома № 46 по  

ул. Шимановского. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вэлстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального учреждения «Городское  управление капитального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) штраф  за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом  

от 03.08.2021 № 0292/2021 (неисполнение в установленный заказчиком срок обязательств  по устранению дефектов, выявленных в период гарантийного срока, установленного  контрактом) в размере 1 000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вэлстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 8 000 руб.  

Выплатить с депозитного счета Арбитражного суда Амурской области в пользу  Палаты судебных экспертов ИП ФИО3 (ОГРНИП 318280100011242, ИНН  

<

***>) денежные средства за проведение судебной экспертизы в размере  

150 000 руб. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Вэлстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) с депозитного счета Арбитражного суда Амурской  области излишне внесенные платежным поручением № 42 от 28.03.2023 денежные  средства в сумме 50 000 руб.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству  направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход  бюджета ходатайство взыскателя не требуется.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области.  

Судья Е.В.Иванова