Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-20775/2022

07 июня 2024 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Касумовой С.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем  

ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального  бюджетного учреждения "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города  Нижневартовска" (628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

<

...>, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения  ОГРН: 30.03.2017, ИНН: 

<

***>) к акционерному обществу "ХАНТЫ- МАНСИЙСКДОРСТРОЙ" (628426, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

<

...>, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН:  25.07.2002, ИНН: 

<

***>) об обязании устранить недостатки выполненных работ,  взыскать 2 039 271,88 руб., при участии представителей сторон:  

от истца – ФИО2 по доверенности от 09.02.2024, от ответчика - ФИО3 по доверенности от 09.01.2023, 

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 174, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать акционерное общество "ХАНТЫ-МАНСИЙСКДОРСТРОЙ" в течение  одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу безвозмездно  произвести необходимые работы по устранению недостатков, допущенных при  выполнении работ в рамках контракта от 03.12.2019 № 0187300001219000518  

на выполнение работ о премонту автомобильной дороги: устранить поперечные  и продольные трещины на асфальтобетонном покрытии по всей протяженности  автомобильной дороги по улице Индустриальной от улицы Мира до монумента  "Покорителя Самотлора" г. Нижневартовска.  

Взыскать с акционерного общества "ХАНТЫ-МАНСИЙСКДОРСТРОЙ" в пользу  муниципального бюджетного учреждения "Управление по дорожному хозяйству  и благоустройству города Нижневартовска" 1 019 635,94 руб. - сумму штрафа, а также  судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 39 196 руб.  

Взыскать с акционерного общества "ХАНТЫ-МАНСИЙСКДОРСТРОЙ" в пользу  муниципального бюджетного учреждения "Управление по дорожному хозяйству  и благоустройству города Нижневартовска" судебную неустойку на случай неисполнения  судебного акта в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда до его  фактического исполнения.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный  апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной  жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Судья С.Г. Касумова