2 9 

274/2024-9250(2) 

я н 

в 

 а р 

Арбитражный суд Рязанской области я 

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;   

http://ryazan.arbitr.ru; e-mail: info@ryazan.arbitr.ru 2 

 0 

Именем Российской Федерации 2

 4

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г

г. Рязань Дело № А54-7341/2023 

о

29 января 2024 года д  а  

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 29 января 2024 года.  Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Ушаковой И.А.,  

руководствуясь статьями 110, 167, 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить полностью. 

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью "СКД" (390006, г. Рязань,  

Окский 

<

...>; ОГРН 

<

***>) в срок до 01.05.2024 своими  

силами, средствами и за свой счет, с использованием материалов, качество которых  

не ниже качества материалов, указанных в техническом задании к договору,  

устранить недостатки (дефекты) выполненных на основании договора №  

РТС262А210034(Д) от 28.05.2021 работ по капитальному ремонту крыши  

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>,  

зафиксированные в рекламационном акте от 13.04.2023, путем выполнения  

следующих видов и объемов работ: 

- Демонтаж мелких покрытий (брандмаузэры, парапеты, свесы) из листовой  

оцинкованной стали (покрытие парапета) с вывозом в мусор - 43,5 м2; 

- Монтаж мелких покрытий (брандмаузэры, парапеты, свесы) из листовой  

оцинкованной стали толщиной 0,6 мм (покрытие парапета) шириной 60 см, согласно  

проектной документации с кронштейнами - 87 м/п; - Демонтаж ограждения с вывозом в мусор - 82 м/п; - Монтаж нового ограждения, согласно проекту - 82 м/п; - Огрунтовка кирпичной кладки - 1 м2; - Штукатурка кирпичной кладки - 1 м2; - Погрузка строительного мусора - т/факт.; - Вывоз строительного мусора - т/факт. 

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СКД" (390006, г.  

Рязань, Окский 

<

...>; ОГРН 

<

***>) в пользу Фонда  

капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (г. Рязань, ул.  

Маяковского, д. 1 А, стр. 3, ОГРН 

<

***>) штраф за период с 02.06.2023 по  

06.06.2023 в сумме 50000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в  сумме 8000 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской  области.  

На решение, вступившее в законную силу, через Арбитражный суд Рязанской  области может быть подана кассационная жалоба в случаях, порядке и сроки,  установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Судья И.А. Ушакова