177/2019-55179(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-17384/2017

19 июня 2019 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Кокошиной Н.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску государственного казенного  учреждения Республики Коми «Служба единого заказчика Республики Коми»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Спецстрой»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора  

государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканский  дом-интернат для престарелых и инвалидов»  

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

общество с ограниченной ответственностью «Первый ремонтно-строительный  трест»  

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) об обязании устранить недостатки выполненных работ 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) безвозмездно устранить в соответствии  с проектной документацией по объекту «Спальный корпус со столовой дома- интерната для престарелых и инвалидов в г. Емва» в месячный срок со дня  вступления решения суда в законную силу следующие недостатки результатов  работы, выполненной по контракту от 26.12.2014 № 0107200002714001421- 0032180-04 (135/14):  

1) в отношении водопроводных колодцев ПГ-1, ПГ-2 наружного водопровода В1  

устранить несоосность железобетонных колец колодцев - 1,7 куб. м,  

восстановить гидроизоляцию стыков железобетонных колец колодцев - 3,6 кв.  

м, восстановить наружную гидроизоляцию стен и плит перекрытия колодцев40,4 кв. м, герметизацию мест прохода трубопроводов через стенки колодцев - 4  

отверстия с выемкой грунта - 30 куб. м, обратной засыпкой грунта и его  

уплотнением - 30 куб. м в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85*, СП  

70.13330.2012, предварительно откачав из колодцев воду;  

2) изменить расположение прибора отопления в лестничной клетке на отм. -1,400  в осях Д-Е в соответствии с требованиями п. 4.3.3. СП 1.13130.2009 «Системы  противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» с сохранением  подключения его к сети отопления;  

3) устранить дефекты лакокрасочного покрытия во внутренних помещениях  сушильни, постирочной, помещении персонала цокольного этажа в осях В6-Д7  на общей площади 6 квадратных метров в соответствии с требованиями раздела  7 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия.  Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» с очисткой поверхности стен от  краски - 23 кв. м, обеспыливанием поверхности - 23 кв. м, нанесением  финишной шпаклёвки на стены - 23 кв. м, огрунтовкой стен - 23 кв. м, окраской  поверхности стен - 23 кв. м;  

4) устранить недостатки работ по монтажу силового питания линии наружного  освещения в соответствии с требованиями рабочей документации, шифр  6436/14-ЭС, с обеспечением подключения от ВРУ по питающей линии П13 -  шкаф ШУО электрощитовой цокольного этажа в осях В4-Г5, монтажом в  помещении охраны выключателя светильников наружного освещения  прогулочных площадок;  

5) произвести замену неисправного светильника СДКУ-М-LED-72 наружного  освещения -1 шт.;  

6) устранить недостатки монтажа систем водоснабжения и водоотведения к  стиральным (2 шт.) и кипятильной (1 шт.) машинам в помещении постирочной  цокольного этажа в осях В6-Д7 путём соединения их с трубопроводами  холодного водоснабжения и водоотведения отработанной воды в соответствии с  альбомом 6436/14-1-ВК (лист 2);  

7) устранить недостатки по устройству узлов примыкания вентиляционных шахт и  кровельного покрытия: ВШ-7 в осях Д1-Д2/3 (План кровли, шифр 6436/14-1-АС,  лист 47), ВШ-10 в осях Д7-Д8 (План кровли, шифр 6436/14-1-АС, лист 47), ПД-7  в осях Е1-Ж2/3 (шифр 6436/14-1-ОВ, лист 13), ПД8 в осях Ж 6/7-Е8 (шифр  6436/14-1-ОВ, лист 13) в соответствии с СП 17.13330.2011 путём герметизации  стыков элементов обделок вентиляционных шахт - 6 вентшахт, установки  уплотняющих прокладок в местах примыкания вентиляционных шахт и  кровельного покрытия - 6 вентшахт;  

8) произвести замену повреждённых влагой звукоизолирующих плит растрового  потолка типа «Армстронг» во внутренних помещениях лифтовых холлов 3  этажа в осях Е1-Ж2/3 на площади 2,5 квадратных метра;  

9) произвести замену повреждённых влагой звукоизолирующих плит растрового  потолка типа «Армстронг» во внутренних помещениях лифтовых холлов 3  этажа в осях Е6/7-Ж8 на площади 2,0 квадратных метра;  

10) произвести замену неисправного растрового светильника OPL/R 418 - 1 шт. во  внутреннем помещении лифтовых холлов 3 этажа в осях Е1-Ж2/3;  

11) произвести замену неисправного канального вентилятора SHUFT RFD 700x400- 4 вентиляционной системы В22, установленного в помещении санитарной  комнаты изолятора первого этажа в осях В4-Г4 (шифр 6436/14-1-ОВ, лист 10) в  соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85) «Внутренние  санитарно-технические системы зданий»;  

12) произвести замену неисправного канального вентилятора СК100С  

вентиляционной системы В14, установленного в коридоре цокольного этажа в  осях В7-Г8 (шифр 6436/14-1-ОВ, лист 30) в соответствии с требованиями СП  73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85) «Внутренние санитарно-технические системы  зданий»;  

13) произвести замену неисправного привода огнезадерживающего клапана Уо 2.5  на 1-ом этаже в помещении уборочного инвентаря в осях Г1-В2 в соответствии  с требованиями СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85) «Внутренние санитарно- технические системы зданий»;  

14) произвести замену неисправного привода огнезадерживающего клапана Уо 2.3  на 1-ом этаже помещениях старшей медсестры, хранения медицинских средств  в осях В-Б в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85)  «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;  

15) произвести замену неисправного привода огнезадерживающего клапана Уо 3.1.  в помещениях второго этажа в осях Д-Г 6 в соответствии с требованиями СП  73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85) «Внутренние санитарно-технические системы  зданий»;  

16) произвести замену отслоившейся от основания и частично разрушенной  настенной кафельной плитки во внутренних помещениях горячего цеха кухни  цокольного этажа в осях АЗ-А5 на общей площади 15 квадратных метров в  соответствии с требованиями СП 71.13330.2017.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой»  

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу государственного казенного  

учреждения Республики Коми «Служба единого заказчика Республики Коми»  

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 6 000 руб. судебных расходов по уплате  

государственной пошлины и 20 000 руб. судебных расходов на оплату услуг  

судебного эксперта. Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу. 

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном  

порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей жалобы  

через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в  

полном объеме. 

Судья Н.В. Кокошина