АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел: 8(4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: 8(4842) 599-457

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru

 

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А23-8554/2021

23 августа 2022 года

г. Калуга

Резолютивная часть решения объявлена 16 августа 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 23 августа 2022 года.

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Пашковой Е.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

при участии:

от истца ФИО2 (доверенность от 01.07.2022 № 9-Д),

от ответчика ФИО3 (доверенность от 12.01.2022), ФИО4 (приказ от 14.09.2021 № 1),

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление государственного бюджетного учреждения культуры Калужской области "Калужский музей изобразительных искусств" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 248000, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью Калужское реставрационное предприятие "Дара" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 248007, Калужская обл.,

<

...>) об устранении недостатков выполненных работ по договорам,

УСТАНОВИЛ:

государственное бюджетное учреждение культуры Калужской области "Калужский музей изобразительных искусств" (далее – учреждение КО "КМИИ") обратилось в Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Калужское реставрационное предприятие "Дара" (далее – общество КРП "Дара") об обязании устранить выявленные в период гарантийного срока недостатки выполненных работ по договорам от 10.01.2019 № 5, 6 (далее – договоры).

По заявлению ответчика с учетом мнения истца в соответствии со ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) суд назначил экспертизу.

Ответчик заявил о вызове эксперта, представил вопросы эксперту, на которые эксперт дал ответы, сообщил о необходимости дополнительной оплаты участия в арбитражном процессе для дачи пояснений и ответов на дополнительные вопросы.

Представитель ответчика заявил об объявлении перерыва в судебном заседании, представитель истца не возражал против его удовлетворения.

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв.

Представитель ответчика заявил об отложении судебного разбирательства для представления рецензии на заключение эксперта, заявления о назначении повторной экспертизы, представитель истца возражал против его удовлетворения.

Поскольку на протяжении достаточного времени с момента представления заключения эксперта 21.04.2022 ответчик не представил рецензию на заключение эксперта, надлежаще в письменном виде не заявил о назначении повторной экспертизы с указанием необоснованности заключения, неустранимых противоречий и представления надлежащих доказательств этому, а также не представил доказательства внесения денежных средств на депозитный счет суда для дополнительной оплаты участия в арбитражном процессе для дачи пояснений и ответов на дополнительные вопросы, кроме того, эксперт дал ответы на вопросы ответчика, то на основании п. 2 ст. 87, ст. 158 АПК РФ с учетом разъяснений, изложенных в п. 22 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", отсутствуют правовые основания для удовлетворения заявления ответчика об отложении судебного разбирательства для представления рецензии на заключение эксперта, заявления о назначении повторной экспертизы.

Истец изменил иск, просил обязать общество КРП "Дара" безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по договору подряда от 10.01.2019 № 6 объекта культурного наследия регионального значения "Здание магазина И-вых, банк XX в.", расположенного по адресу: 

<

...> (коридор) в тридцатидневный срок с даты вступления в законную силу решения суда, а именно:

- устранить трещины на поверхности окраски стен из гипсокартона;

- устранить пятна, полосы, неровности шпатлевки на поверхности окраски стен;

- устранить недостатки, обнаруженные при осмотре окон помещения № 2 (коридор), указанные в акте о недостатках выполненных работ от 13.05.2021 и заключении эксперта.

Так как изменение иска заявлено уполномоченным лицом, не противоречит закону, не нарушает права других лиц, то на основании ст. 49 АПК РФ подлежит принятию.

Ответчик представил отзыв.

Представитель истца поддержал иск, представители ответчика возражали против его удовлетворения.

Оценив представленные доказательства, выслушав объяснения представителей истца и ответчика, суд установил следующее.

Во исполнение договоров подрядчик общество КРП "Дара" выполнило работы по ремонту помещений, заказчик учреждение КО "КМИИ" приняло их.

Заказчик уведомил подрядчика о недостатках выполненных работ, проведении осмотра, в присутствии представителя подрядчика выявил недостатки выполненных работ по договорам: на стенах появились трещины в стыках гипсокартона; краска стен выцветает с разной интенсивностью. Со временем на стенах появились пятна разных оттенков, свидетельствующие об окрашивании локальных участков стен в разные периоды времени; в структуре шпаклевки просматриваются неровности, шагрень, крупные поры и кратеры, следы от обработки шпателем под разными углами; деформация оконного переплета, тугое закрывание створок вследствие их перекоса.

Ссылаясь на неустранение выявленных в период гарантийного срока недостатков выполненных работ по договорам, истец предъявил указанный иск.

Предметом иска является требование заказчика к подрядчику об обязании устранить выявленные в период гарантийного срока недостатки выполненных работ по договорам.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик указал на надлежащее выполнение работ по договорам.

Существо спора выражается в разногласиях сторон по обязанности подрядчика устранить недостатки выполненных работ по договорам.

Рассмотрев исковое заявление, суд пришел к следующим выводам.

Согласно п. 1 ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В соответствии со ст. 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

В силу п. 1 ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

На основании ст. 724 ГК РФ если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей.

В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1статьи 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком.

К исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются соответственно правила, содержащиеся в пунктах 2 и 4 статьи 471 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, соглашением сторон или не вытекает из особенностей договора подряда.

Как указано в п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", заказчик не лишен права представить суду свои возражения по качеству работ, принятых им по двустороннему акту.

В п. 5.1, 5.2 договоров стороны согласовали, что гарантийный срок на выполняемые работы (и их результаты) составляет 3 года с даты подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

Во исполнение договоров подрядчик выполнил работы по ремонту помещений, заказчик принял их.

Заказчик уведомил подрядчика о недостатках выполненных работ, проведении осмотра, в присутствии представителя подрядчика выявил недостатки выполненных работ по договорам: на стенах появились трещины в стыках гипсокартона; краска стен выцветает с разной интенсивностью. Со временем на стенах появились пятна разных оттенков, свидетельствующие об окрашивании локальных участков стен в разные периоды времени; в структуре шпаклевки просматриваются неровности, шагрень, крупные поры и кратеры, следы от обработки шпателем под разными углами; деформация оконного переплета, тугое закрывание створок вследствие их перекоса.

В результате проведения экспертизы эксперт пришел к выводам о том, что выявленные истцом недостатки выполненных работ на объекте являются следствием некачественного выполнения работ по договорам подряда.

По результатам проведения строительно-технической экспертизы объекта, расположенного по адресу: 

<

...>, установлено следующее. В помещении № 2 (коридор) 2 этажа выявлены пятна, полосы, неровности шпатлевки на поверхности окраски стен в помещении № 2 (коридор) 2-го этажа, что является нарушением требований СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87" табл. 7.7 (Требования к качеству выполненных малярных работ). Выявленные дефекты являются следствием некачественно выполненных строительно-монтажных работ. Выявлены трещины на поверхности окраски стен из гипсокартона в помещении №2 (коридор) 2-го этажа, что является нарушением требований СП 163.1325800.2014 "Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа" К.2 Выявленные дефекты являются следствием некачественно выполненных строительно-монтажных работ. При осмотре окон в помещении №2 (коридор) 2-го этажа, установлено, что резиновый уплотнитель деревянных окон отклеивается локально, створка окна открывается с затруднением вследствие перекоса, присутствуют трещины между оконным блоком и стеной. Нарушения требований СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 "Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ" табл. 3. Выявленные дефекты являются следствием некачественно выполненных строительно-монтажных работ.

Эксперт дал пояснения, ответил на вопросы ответчика.

Судебная экспертиза назначена в соответствии со ст. 82 АПК РФ и проведена с соблюдением ст. 83 АПК РФ, норм Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"(далее – Закон о судебно-экспертной деятельности).

Заключение содержит подробное описание проведенных исследований, сделанные выводы являются мотивированными, ясными, полными, не содержат противоречий. Имеется подписка эксперта о предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. В материалы дела не представлены доказательства, свидетельствующие о недостоверности заключения судебной экспертизы.

Возражения ответчика по заключению эксперта сводятся к несогласию с выводами, сделанными квалифицированным специалистом.

В соответствии со ст. 7 Закона о судебно-экспертной деятельности, который распространяет свое действие и на лиц, осуществляющих производство судебных экспертиз вне государственных судебно-экспертных учреждений в силу ст. 41 Закона о судебно-экспертной деятельности, эксперт независим от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела, и дает заключение, основываясь на результатах проведенных исследований в соответствии со своими специальными знаниями, что соответственно предполагает независимость в выборе методов, средств и методик экспертного исследования, необходимых, с его точки зрения, для выяснения поставленных вопросов и решения экспертных задач.

Принцип независимости эксперта как субъекта процессуальных правоотношений на основании ч. 2 ст. 7 Закона о судебно-экспертной деятельности предполагает его самостоятельность в выборе методов проведения экспертного исследования.

Оценка методики исследования, способов и приемов, примененных экспертами, не является предметом судебного рассмотрения, поскольку определяется лицами, проводящими исследование и обладающими специальными познаниями для этого. С учетом изложенного, предупреждения судебного эксперта об уголовной ответственности, основания для вывода о сомнительности или противоречивости выводов составленного им исследования отсутствуют.

Довод ответчика об отсутствии у эксперта разрешения на ремонт объектов культурного наследия в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 25.06.2002№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", п. 11 Положением о лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 349, отклоняется, поскольку предложенный самим ответчиком эксперт проводил экспертизу, а не ремонт объекта, имеет необходимые образование, опыт для проведения экспертизы ремонтных работ в помещениях, не требующих дополнительных разрешений, а также является членом объединения судебных экспертов.

Суд предложил ответчику представить доказательства в обоснование доводов, заявить о назначении экспертизы, разъяснил правовые последствия несовершения процессуальных действий.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ ответчик не представил доказательства отсутствия обязательства, в том числе того, что недостатки произошли вследствие нормального износа результата работ или его частей, неправильной их эксплуатации, устранения недостатков, надлежаще не заявил о назначении повторной экспертизы, в связи с чем в силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ несет риск наступления последствий несовершения процессуальных действий.

Поскольку в период гарантийного срока заказчик выявил недостатки выполненных работ по договорам, то подрядчик обязан устранить их.

Оценив представленные доказательства по правилам ст.ст. 67, 68 и 71 АПК РФ, с учетом указанных конкретных обстоятельств данного дела суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для обязания подрядчика устранить выявленные в период гарантийного срока недостатки выполненных работ по договорам.

В связи с неуплатой истцом государственной пошлины, удовлетворением иска полностью в соответствии с абз. первым ч. 1 ст. 110 АПК РФ 6 000 руб. государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Внесенные на депозитный счет суда за экспертизу денежные средства согласност. 109 АПК РФ подлежат перечислению эксперту.

Руководствуясь ст.ст. 109, 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

удовлетворить иск полностью.

Обязать общество с ограниченной ответственностью Калужское реставрационное предприятие "Дара" безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по договору подряда от 10.01.2019 № 6 объекта культурного наследия регионального значения "Здание магазина И-вых, банк XX в.", расположенного по адресу: 

<

...> (коридор) в тридцатидневный срок с даты вступления в законную силу решения суда, а именно:

- устранить трещины на поверхности окраски стен из гипсокартона;

- устранить пятна, полосы, неровности шпатлевки на поверхности окраски стен;

- устранить недостатки, обнаруженные при осмотре окон помещения № 2 (коридор), указанные в акте о недостатках выполненных работ от 13.05.2021 и заключении эксперта.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Калужское реставрационное предприятие "Дара" в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Калужской области индивидуальному предпринимателю ФИО5 37 500 руб., внесенных обществом с ограниченной ответственностью Калужское реставрационное предприятие "Дара" по платежному поручению от 31.01.2022 № 16.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Калужской области.

 

Судья

Е.А. Пашкова