1259/2017-268056(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 10 ноября 2017 года 

по делу А33-23280/2017 Красноярск 

10 ноября 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Строй Бизнес Монтаж" (ИНН  

2466260128, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации 01.08.2016) безвозмезд- 

но устранить до 1 мая 2018 года (начало прохождения паводковых вод) недостатки работ по  

муниципальному контракту от 07.10.2015 № 0119300016815000085-0225318-01, стоимость  

которых согласно локальному сметному расчету по состоянию на 14.09.2017 составляет 887 513,00 руб., а именно: 1. Береговая защитная дамба. 

- восстановить асфальтовое покрытие в проектных отметках дорожного полотна с ПК  

16+90 по ПК 17+10; 

- восстановить асфальтовое покрытие в проектных отметках дорожного полотна с ПК  

24+70 по ПК 25+00; 

- восстановить асфальтовое покрытие в проектных отметках дорожного полотна с ПК  

26+40 по ПК 26+60; 

- восстановить асфальтовое покрытие в проектных отметках вдоль парапета с ПК 27+70  

по ПК 28+00; 

- восстановить асфальтовое покрытие в проектных отметках вдоль парапета  

с ПК 29+50 по ПК 29+70, с ПК 29+70 по ПК 30+00, с ПК 31+00 по ПК 31+30; 

- восстановить асфальтовое покрытие в проектных отметках по кромке  

проезжей части на 4-м участки с ПК 36+00 по ПК 58+00; 

- заделать стыки между блоками сборного парапета с ПК 15+00 по ПК 15+20, с ПК 28+40  

по ПК 28+60, с ПК 29+60 по ПК 29+80, с ПК 32+30 по ПК 32+50;  

- заделать швы битумной мастикой между плитами откоса с ПК 12+00 по ПК 15+20, с  

ПК 27+00 по ПК 27+20, с ПК 28+50 по ПК 29+00, с ПК 31+50 по ПК 32+20; 

- произвести сводку растительности с ПК 23+00 по ПК 24+40;  - выполнить водонепроницаемость затвора шлюза. ПК 17+17,70;  

- восстановить откосы с ПК 44+60 по ПК 44+70, с ПК 46+70 по ПК 47+00; 

- восстановить горизонтальность и вертикальность линий парапета в соответствии с про- 

ектными отметками с ПК 26+00 по ПК 29+10, с ПК 28+40 по ПК 28+50 (с выполнением де- 

монтажа и монтажа сборного парапета). 2.Береговой открытый дренаж. - уплотнить откос у оголовков на переезде ПК 5+00. 3.Самотечный водовыпуск с отводящим каналом. 

- заделать швы между плитами, крепление откоса битумной мастикой;  - спланировать откос выходного оголовка (укрепив откос скальной наброской).  

4. Регулирующий резервуар для сбора дренажных и ливневых вод. 

- выполнить скальную отсыпку открылков входного дренажа самотечного водовыпуска.  Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строй Бизнес Монтаж" (ИНН  

2466260128, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации 01.08.2016) в доход фе- 

дерального бюджета 6 000,00 руб. государственной пошлины. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья О.С. Щёлокова