ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №   А46-11982/2020

28 апреля 2021 года

город Омск

Резолютивная часть постановления объявлена  21 апреля 2021 года. 

Постановление изготовлено в полном объеме  28 апреля 2021 года. 

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Лебедевой Н.А.,

судей Веревкина А.В., Еникеевой Л.И., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-2902/2021) общества с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Континент» на решение от 04.02.2021 Арбитражного суда Омской области по делу № А46-11982/2020 (судья Е.В. Малыгина), по иску бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Континент» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании выполнить работы по устранению дефектов,

при участии в судебном заседании: 

от общества с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Континент» – ФИО2 по доверенности от 19.08.2020 сроком действия один год,

от бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» – ФИО3 по доверенности от 27.08.2020 № 153, 

установил:

бюджетное учреждение города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (далее – БУ г. Омска «УДХБ», истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Континент» (далее – ООО «СК «Континент», ответчик) об обязании за счёт собственных средств выполнить работы по устранению дефектов на автомобильных дорогах в рамках гарантийных обязательств в течение 20 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

До рассмотрения искового заявления по существу истец уточнил исковые требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), просил обязать ООО «СК «Континент» выполнить работы по устранению дефектов на автомобильных дорогах в рамках гарантийных обязательств, а именно: 

По улице 22 Апреля (от улицы Химиков до улицы Энергетиков): 

- просадка асфальтобетонного покрытия 1 кв.м. в районе выезда с 

<

...>; 

По улице Красных Зорь (от улицы Куйбышева до проспекта К. Маркса): 

- просадка асфальтобетонного покрытия в районе 

<

...> кв.м.; 

- разрушение асфальтобетонного покрытия люка в районе 

<

...> кв.м.; 

- просадка асфальтобетонного покрытия перед перекрестком с ул. Пушкина в сторону ул. Куйбышева; 

- выбоина 1 кв.м. в районе 

<

...>;

- просадка асфальтобетонного покрытия 2 (двух) люков в районе 

<

...>; 

- выбоина в районе перекрестка с ул. Декабристов - 5 кв.м.; 

По улице Волочаевская (от у улицы Кемеровская до улицы Фрунзе): 

- в районе 

<

...> устранить выбоину - 0,5 кв.м.; 

- просадка асфальтобетонного покрытия в районе 

<

...> кв.м.; 

- просадка асфальтобетонного покрытия в районе д.13 по ул. Волочаевская - 2 кв.м.; 

Участки дорожно-транспортной сети в 

<

...> (от развязки Ленинградского моста до улицы 70 лет Октября): 

- разрушение бордюрного камня около решетки ливневой канализации напротив АЗС; 

По улице Кондратюка (от улицы Волгоградской до путепровода через железную дорогу): 

- повреждение ЛКП ограждений, следы коррозии; 

- деформация ограждений в районе ООТ «8-я Солнечная» - 2 шт.; 

- повреждение бордюрного камня в районе остановочных павильонов; 

- повреждение ограждений в районе ООТ напротив д.107 по ул. Кондратюка - 10 шт.; 

- повреждение ограждений ООТ напротив 

<

...> шт.; 

- повреждение ограждений в районе ул. Толмачева; 

- отсутствие секции ограждения в районе ул. Толмачева - 1 шт.; По улице Конева (от улицы 70 лет Октября до улицы Ватутина); 

- повреждение секции ограждения в районе ООТ «11-й Микрорайон» -1 шт.; 

По улице Транссибирская (от улицы Авиационная до улицы 12 Декабря): 

- разрушение покрытия тротуара - 1 кв.м. По улице 12 Декабря (от улицы Транссибирской и до ж/д переезда);

 - повреждение ЛКП ограждений, следы коррозии.

Указанные уточнения приняты судом первой инстанции в установленном законом порядке (статья 49 АПК РФ). 

 Решением от 04.02.2021 Арбитражного суда Омской области исковые требования БУ г. Омска «УДХБ» удовлетворены полностью.

Не соглашаясь с указанным судебным актом, ООО «СК «Континент» обратилось в Восьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить оспариваемое решение, принять по делу новый судебный акт.

Мотивируя свою позицию, податель жалобы указывает, что ряд установленных дефектов (просадка асфальтобетонного покрытия 1 м3 в районе выезда с дома 6 улице 22 Апреля, просадка асфальтобетонного покрытия в районе дома 19 ул. Красных Зорь - 10 м3, разрушение асфальтобетонного покрытия люка в районе дома 54 по улице Красных Зорь – 1 м3, просадка асфальтобетонного покрытия перед перекрестком с ул. Пушкина в сторону ул. Куйбышева, выбоина 1 м3 в районе дома 20 по ул. Красных Зорь, просадка асфальтобетонного покрытия двух люков в районе дома 91 по ул. Красных Зорь, выбоина в районе перекрестка с ул. Декабристов - 5 м3, выбоина в районе дома 9/3 по ул. Волочаевская - 0,5 м3, просадка асфальтобетонного покрытия в районе дома 9/3 по ул. Волочаевская - 6 м3, просадка асфальтобетонного покрытия в районе д.13 по ул. Волочаевская - 2 м3, разрушение бордюрного камня около решетки ливневой канализации напротив АЗС; повреждение ЛКП ограждений, следы коррозии; деформация ограждений в районе ООТ «8-я Солнечная» - 2 шт., повреждение ограждений в районе ООТ напротив д.107 по ул. Кондратюка - 10 шт., повреждение ограждений ООТ напротив д. 75 по ул. Кондратюка- 1 шт., повреждение ограждений в районе ул. Толмачева, отсутствие секции ограждения в районе ул. Толмачева, повреждение секции ограждений в районе ООТ «11-й Микрорайон» - 1 шт., разрушение покрытия тротуара - 1 м3 по ул. Транссибирская, разрушение покрытия тротуара по ул. 12 Декабря от ул. Транссибирской и до ж.д. переезда), не относятся к дефектам, подлежащим устранению в рамках гарантийных обязательств. 

В судебном заседании 21.04.2021 представитель ООО «СК «Континент» поддержал требования, изложенные в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

Представитель БУ г. Омска «УДХБ» просил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Повторно рассмотрев материалы дела, доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции установил, что исковые требования учреждения, мотивированы следующими обстоятельствами. 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, за период с 2016 года по 2019 год между БУ г. Омска «УДХБ» (заказчик) и ООО «СК «Континент» (подрядчик) заключены договоры на выполнение подрядных работ по ремонту участков дорожно-транспортной сети города Омска (далее - договоры): 

1) от 15.08.2016 № Ф.2016.211736 (по улице 22 Апреля (от улицы Химиков до улицы Энергетиков)); 

2) от 22.08.2016 № Ф.2016.220290 (по улице проспект Менделеева (от улицы Заозерная до Красноярского тракта)); 

3) от 22.08.2016 № Ф.2016.222796 (по улице Ипподромная (от улицы ФИО4 до улицы Куйбышева); 

4) от 22.08.2016 № Ф.2016.222506 (по улице Красных Зорь (от улицы Куйбышева до улицы проспекта К. Маркса)); 

5) от 22.08.2016 № Ф.2016.222065 (по улице Волочаевская (от улицы Кемеровская до улицы Фрунзе)); 

6) от 10.05.2017 № Ф.2017.184788 (по улице 25-я Северная (от улицы 24-я Северная до Красноярского тракта)); 

7) от 29.05.2017 № Ф.2017.184679 (по улице проспект Королева (от улицы Химиков до улицы Заозерная, от улицы 7 Дунайская до Красноярского тракта)); 

8) от 02.07.2017 № Ф.2017.193816 (по улице Энтузиастов в границах улицы Доковской и улицы Химиков)); 

9) от 02.06.2017 № Ф.2017.193010 (по улице Нефтезаводская в границах улицы Энтузиастов и проспекта Губкина); 

10) от 28.05.2018 № Ф.2018.225700 участки дорожно-транспортной сети в Советском административном округе 

<

...> в границах улицы Энтузиастов и улицы Комбинатская; - проспект Менделеева в границах улицы Заозерная и улицы Химиков. 

11) от 29.05.2018 № Ф.2018.211029 от улицы Гагарина ПК 0+207,15 по направлению к проспекту Карла Маркса с учетом тротуара; 

12) от 20.05.2019 № Ф.2019. 260436 участки дорожно-транспортной сети в городе Омске: 

- по улице 70 лет Октября (от улицы Конева до улицы 3-я Енисейская); 

- по улице Енисейская (от развязки Ленинградского моста до улицы 70 лет Октября); 

- по улице Кондратюка (от улицы Волгоградской до путепровода через железную дорогу);

 - по улице Конева (от улицы 70 лет Октября до улицы Ватутина); - по улице Транссибирская (от ул. Авиационная до ул. 12 Декабря); 

- объездная дорога поселок Чукреевка (от улицы 22 Декабря до улицы Волгоградская). 

13) от 30.09.2019 № Ф.2019.001080 по улице 12 Декабря (от улицы Транссибирской и до ж/д переезда).

В соответствии с пунктом 7.1 договоров 2016 года подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные договором, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству предусмотренным договором, в течение  (четырех) лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). 

Гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания акта о приемке выполненных работ (пункт 7.2 договоров 2016 года). 

Гарантии качества, согласно пункту 7.3 договоров 2016 года, распространяются на результат выполненных подрядчиком по договору работ, а также на используемые материалы. Подрядчик обязуется за свой счет устранять дефекты и (или) недостатки выполненных им в соответствии с настоящим договором работ, обнаруженные в течение установленного настоящим договором гарантийного срока. 

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков (пункт 7.4 договоров 2016 года). 

При обнаружении заказчиком в течение гарантийного срока дефектов и (или) недостатков, заказчик обязан сообщить об этом подрядчику в письменной форме, а подрядчик обязан не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения либо устранить выявленные дефекты и (или) недостатки либо направить своего полномочного представителя для составления и подписания двустороннего акта о выявленных дефектах и (или) недостатках, в котором указываются сроки их устранения (не более 15 дней) (пункт 7.5 договоров 2016 года). 

В случае неявки представителя подрядчика в установленный заказчиком срок, заказчик самостоятельно в отсутствие представителя подрядчика составляет и подписывает акт о выявленных недостатках и (или) дефектах с указанием сроков их устранения. Один экземпляр акта направляется подрядчику и является основанием для устранения подрядчиком дефектов и (или) недостатков (пункт 7.6 договоров 2016 года). 

В соответствии с пунктом 7.1 договора от 02.06.2017 № Ф.2017.193010, от 02.07.2017 № Ф.2017.193816 подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству, предусмотренным настоящим договором, законодательством Российской Федерации. 

Гарантийный срок на выполненные работы с момента подписания акта о приемке выполненных работ заказчиком, согласно пункту 7.2 договоров составляет - 4 года, на дорожную разметку - 3 месяца. 

Подрядчик оформляет гарантийный паспорт на законченный ремонтом участок автомобильной дороги (за исключением дорожной разметки), согласно приложению № 1 к распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 7 мая 2003 года № ИС – 414-р «О введение в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные и искусственные сооружения на них» (пункт 7.3 договоров). 

В соответствии с пунктом 7.4 договоров гарантии качества в течение гарантийного срока распространяются результат выполненных подрядчиком по договору работ, а также на исполняемые материалы. 

Подрядчик обязуется за свой счет устранять дефекты и (или) недостатки выполненных им в соответствии с настоящим договором работ, обнаруженные в течение установленного настоящим договором гарантийного срока. Гарантийный срок в этом продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков (пункт 7.5 договоров). 

При обнаружении заказчиком в течение гарантийного срока дефектов и (или) недостатков, заказчик обязан сообщить об этом подрядчику в письменной форме, а подрядчик обязан не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения либо устранить выявленные дефекты и (или) недостатки либо направить своего полномочного представителя для составления и подписания двустороннего акта о выявленных дефектах и (или недостатках, в котором указываются сроки их устранения (не более 15 дней) (пункт 7.6 договоров). 

В случае неявки представителя подрядчика в установленный заказчиком срок, заказчик самостоятельно в отсутствие представителя подрядчика составляет и подписывает акт о выявленных недостатках и (или) дефектах с указанием сроков их устранения. Один экземпляр акта направляется подрядчику и является основанием для устранения подрядчиком дефектов и (или) недостатков (пункт 7.7 договоров). 

Согласно условиям остальных договоров 2017 года результат выполненных работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 5.1 договоров 2017 года). 

Подрядчик несет ответственность за недостатки и (или) дефекты (трещины, локальные нарушения ровности асфальтобетонного покрытия, просадки на инженерных коммуникациях, в том числе смотровых колодцах, отдельные выбоины, выкрашивание асфальтобетонного покрытия, шелушение асфальтобетонного покрытия, некачественно нанесенные элементы горизонтальной дорожной разметки, колейность, неровности, связанные с проведением ремонтных работ, устройством люков, пересечением рельсовых путей и прочие дефекты) обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами (пункт 5.4 договоров 2017 года). 

Согласно пункту 5.8 договоров 2017 года гарантийные сроки на выполненные работы по настоящему договору составляют не менее 4 лет с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (за исключением дорожной разметки), а по дорожной разметке - 3 месяца с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). 

Гарантийный срок, предусмотренный пунктом 5.8 настоящего договора (за исключением гарантийного срока на выполненные работы по дорожной разметке) должны быть указаны в гарантийном паспорте на законченный ремонтом участок автомобильной дороги, согласно приложению № 1 к распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 7 мая 2003 года № ИС-414-р «О введение в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них» (пункт 5.9 договоров 2017 года). 

В соответствии с пунктом 4.1.1 договоров 2018 года подрядчик обязуется выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в договоре. 

В разделе 7 договоров 2018 года предусмотрены гарантии качества работ. 

Так, согласно пункту 7.1 договоров, подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству, предусмотренным договором. 

Согласно пункту 7.2 договоров гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и составляет:

 - на нижний слой покрытия 5 лет; 

- на верхний слой покрытия - 4 года; 

- на дорожную разметку - 3 месяца. 

Пунктом 7.3 договоров предусмотрено, что подрядчик оформляет гарантийный паспорт на законченный ремонтом участок автомобильной дороги (за исключением дорожной разметки), согласно приложению № 1 к распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 7 мая 2003 года № ИС-414-р «О введение в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них». 

Гарантии качества в течение гарантийного срока распространяются на результат выполненных подрядчиком по настоящему договору работ, а также на используемые товары (материалы) (пункт 7.4 договоров 2018 года). 

Подрядчик обязуется за свой счет устранять дефекты и (или) недостатки выполненных им в соответствии с настоящим договором работ, обнаруженные в течение установленного настоящим договором гарантийного срока. 

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков (пункт 7.5 договоров 2018 года). 

При обнаружении заказчиком в течение гарантийного срока дефектов и (или) недостатков, в соответствии с пунктом 7.6, 7.7 договоров, заказчик обязан сообщить об этом подрядчику в письменной форме, а подрядчик обязан не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения либо устранить выявленные дефекты и (или) недостатки либо направить своего полномочного представителя для составления и подписания двустороннего акта о выявленных дефектах и (или) недостатках, в котором указываются сроки их устранения (не более 15 дней). 

В случае неявки представителя подрядчика в установленный заказчиком срок, Заказчик самостоятельно в отсутствие представителя подрядчика составляет и подписывает акт о выявленных недостатках и (или) дефектах с указанием сроков их устранения. Один экземпляр акта направляется подрядчику и является основанием для устранения подрядчиком дефектов и (или) недостатков. 

Подрядчик, в свою очередь в соответствии с пунктом 7.8 договоров, несет ответственность за недостатки и (или) дефекты (трещины, локальные нарушения ровности асфальтобетонного покрытия, просадки на инженерных коммуникациях, в том числе смотровых колодцах, отдельные выбоины, выкрашивание асфальтобетонного покрытия, шелушение асфальтобетонного покрытия, некачественно нанесенные элементы горизонтальной дорожной разметки, колейность, неровности, связанные с проведением ремонтных работ, устройством люков, пересечением рельсовых путей и прочие дефекты) обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

По условиям пункта 9.1 договора от 20.05.2019 № Ф.2019. 260436 подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные договором, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству, предусмотренным настоящим договором, законодательством Российской Федерации. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и составляет: 

- дорожное основание - 4 года; 

- нижний слой покрытия - 4 года; 

- верхний слой покрытия - 4 года; 

- горизонтальная разметка пластичными материалами - 1 год (по всем показателям); 

- бортовой камень - 4 года; 

- ливневая канализация - 4 года; 

- остановка автобусная и остановочная площадка - 4 года; 

- ограждения - 2 года; 

- обочина - 2 года (пункт 9.2 договора). 

В соответствии с пунктом 9.3 договора подрядчик оформляет гарантийный паспорт на законченные ремонтом участки автомобильных дорог (за исключением дорожной разметки), согласно приложению № 1 к распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 7 мая 2003 года № ИС-414-р «О введение в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них». 

Гарантии качества в течение гарантийного срока распространяются на результат выполненных подрядчиком по договору работ, а также на используемые материалы (пункт 9.4 договора). 

Подрядчик, согласно пункту 9.5 договора, обязуется за свой счет устранять дефекты и (или) недостатки выполненных им в соответствии с договором работ, обнаруженные в течение установленного договором гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков. 

При обнаружении заказчиком в течение гарантийного срока дефектов и (или) недостатков, заказчик обязан сообщить об этом подрядчику в письменной форме, а Подрядчик обязан не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения либо устранить выявленные дефекты и (или) недостатки либо направить своего полномочного представителя для составления и подписания двустороннего акта о выявленных дефектах и (или) недостатках, в котором указываются сроки их устранения (не более 15 дней) (пункт 9.6 договора). 

В соответствии с пунктом 9.7 договора, в случае неявки представителя подрядчика в установленный заказчиком срок, заказчик самостоятельно в отсутствие представителя подрядчика составляет и подписывает акт о выявленных недостатках и (или) дефектах с указанием сроков их устранения. Один экземпляр акта направляется подрядчику и является основанием для устранения подрядчиком дефектов и (или) недостатков. 

По условиям пункта 7.1 договора от 30.09.2019 № Ф.2019.001080 подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные договором, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству, предусмотренным договором, законодательством Российской Федерации. Гарантии качества распространяются на результат выполненных подрядчиком по настоящему договору работ, а также на используемые материалы, оборудование, с учетом требований к гарантийному сроку, указанному в пункте 7.3 договора (пункт 7.2 договора). 

Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), в соответствии с пунктом 7.3 договора, составляет: 

- дорожное основание - 4 года;

 - нижний слой покрытия - 4 года; 

- верхний слой покрытия - 4 года; 

- горизонтальная разметка пластичными материалами - 1 год (по всем показателям); 

- бортовой камень - 4 года; 

- остановка автобусная - 4 года; 

- ограждения - 5 лет. 

В соответствии с пунктом 7.4 договора подрядчик оформляет гарантийный паспорт на законченные ремонтом участки автомобильных дорог (за исключением дорожной разметки), согласно приложению № 1 к распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 7 мая 2003 года № ИС-414-р «О введение в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них». 

Подрядчик, согласно пункту 7.5 договора, обязуется за свой счет устранять дефекты и (или) недостатки выполненных им в соответствии с договором работ, обнаруженные в течение установленного договором гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков. 

При обнаружении заказчиком в течение гарантийного срока дефектов и (или) недостатков, Заказчик обязан сообщить об этом подрядчику в письменной форме, а подрядчик обязан не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения либо устранить выявленные дефекты и (или) недостатки либо направить своего полномочного представителя для составления и подписания двустороннего акта о выявленных дефектах и (или) недостатках, в котором указываются сроки их устранения (не более 15 дней) (пункт 7.6 договора). 

В соответствии с пунктом 7.7 договора, в случае неявки представителя подрядчика в установленный заказчиком срок, заказчик самостоятельно в отсутствие представителя подрядчика составляет и подписывает акт о выявленных недостатках и (или) дефектах с указанием сроков их устранения. 

Один экземпляр акта направляется подрядчику и является основанием для устранения подрядчиком дефектов и (или) недостатков. 

В марте - апреле 2020 года в ходе комиссионных обследований автомобильных дорог, проведенных с участием представителей подрядчика и контроля выявлены дефекты и недостатки которые отражены истцом при подаче первоначального искового заявления. 

БУ г. Омска «УДХБ» в адрес ООО «СК «Континент» направлены претензии о необходимости устранить замечания, в рамках гарантийных обязательств в срок до 20.05.2020 соответственно. 

15.07.2020, 10.08.2020 в ходе комиссионного обследования автомобильных дорог с участием представителя БУ г. Омска «УДХБ» и ООО «СК «Континент» установлено, что обнаруженные недостатки ответчиком в марте - апреле 2020 года не устранены, что и явилось основанием для предъявления учреждением иска об обязании ответчика за счёт собственных средств выполнить работы по устранению дефектов на автомобильных дорогах в рамках гарантийных обязательств.

Решением от 04.02.2021 Арбитражного суда Омской области исковые требования БУ г. Омска «УДХБ» удовлетворены полностью, что послужило основанием для обращения ООО «СК «Континент» в суд апелляционной инстанции с жалобой.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения оспариваемого решения, исходя из следующего.

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии со статьей 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Кодексе.

В силу части 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (часть 1 статьи 721 ГК РФ).

Частью 1 статьи 722 ГК РФ предусмотрено, что в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

По условиям частей 1, 2 статьи 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Таким образом, действующим законодательством предусмотрена презумпция вины подрядчика в недостатках, обнаруженных в пределах гарантийного срока. 

Бремя доказывания обстоятельств того, что выявленные дефекты не явились следствием ненадлежащего качества выполненных работ, а появились вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, лежит на подрядчике.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Наличие дефектов в выполненных обществах работах, подтверждены актами комиссионного обследования, наличествующими в материалах дела (том. 3 л.д. 98-137).

Ответчик, оспаривая обязанность по устранению выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств, в апелляционной жалобе указывает на то, что, часть выявленных дефектов не подлежат устранению обществом.

По существу, все возражения подателя жалобы, об исключении части выявленных дефектов из круга дефектов, устранение которых должно быть осуществлено силами подрядчика, сводятся к тому, что на ряде участках проводились ремонтные работы собственниками инженерных сетей, бордюрный камень на данных участках деформирован при эксплуатации дорожного покрытия, деформация ограждений произошла путем механического воздействия.

 Указанная позиция общества не может быть признана судом состоятельной, поскольку, как и сказано выше, вина подрядчика в пределах гарантийного срока за недостатки (дефекты) выполненных работ презюмируется, пока последним не доказано иное.

 Вместе с тем, подрядчиком в настоящем случае не доказано, что выявленные дефекты появились не вследствие некачественного производства работ ООО «СК «Континент» (статья 9, 65  АПК РФ).

Так, в соответствии частью 5 статьи 720 ГК РФ при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

В рассматриваемом случае ответчик не совершил каких-либо действий, свидетельствующих об опровержении позиции истца, а именно: комиссионный осмотр результата работ не инициировал; о проведении судебной экспертизы не заявил.

При таких обстоятельствах, доводы истца оспариваются ответчиком лишь формальным подходом к документам и не опровергают представленные в дело доказательства.

Обязанность по доказыванию оснований, освобождающих от ответственности в рамках гарантийных обязательств, ответчик надлежащим образом не исполнил.

Принимая во внимание презумпцию вины подрядчика в гарантийный период, недоказанность ответчиком факта возникновения недостатков не по его вине, суд первой инстанции пришел к обоснованным выводам о возложении на ответчика обязанности по безвозмездному устранению недостатков работ, выполненных в рамках спорных договоров. 

При принятии судебного акта суд первой инстанции полно исследовал обстоятельства, относящиеся к предмету доказывания, верно применил нормы права, подлежащие применению, дал надлежащую правовую оценку представленным доказательствам и доводам лиц, участвующих в деле, и принял законный, обоснованный и мотивированный судебный акт. 

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не нашли своего подтверждения при рассмотрении апелляционной жалобы, не содержат фактов, которые имели бы юридическое значение, влияли на обоснованность и законность решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены или изменения обжалуемого судебного акта. 

Нормы материального права применены арбитражным судом первой инстанции правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ в любом случае основаниями для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. С учетом изложенного оснований для отмены решения арбитражного суда и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется. 

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на подателя апелляционной жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 04.02.2021 Арбитражного суда Омской области по делу № А46-11982/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Cибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Н.А. Лебедева

Судьи

А.В. Веревкин

 Л.И. Еникеева