Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-5701/2023

27 октября 2023 года

город Якутск

  Резолютивная часть решения объявлена 23.10.2023  

Мотивированное решение изготовлено 27.10.2023 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Семёнова У. Н., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью "Ориентир-14" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от 26.06.2023   № бн к государственному бюджетному учреждению Республики Саха (Якутия)  "Нерюнгринская центральная районная больница" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) об отмене одностороннего отказа от исполнения контракта от 07.02.2023   № 0816500000622020825,  

на судебное заседание стороны не явились, извещены, 

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью "Ориентир-14" обратилось в  арбитражный суд с иском от 26.06.2023 № бн к государственному бюджетному  учреждению Республики Саха (Якутия) "Нерюнгринская центральная районная больница"  об отмене одностороннего отказа от исполнения контракта от 07.02.2023 №  0816500000622020825.  

Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, провел судебное заседание в отсутствие представителей сторон,  извещенных о времени и месте проведения судебного заседания.  

Суд, исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства. 

07.02.2023 между обществом с ограниченной ответственностью «Ориентир-14»  (Подрядчик) и Государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия)  «Нерюнгринская центральная районная больница» (Заказчик) заключен государственный  контракт на выполнение работ по объекту "Реконструкция здания Женской консультации  ГБУ РС (Я) "Нерюнгринская ЦРБ" 1 этап № 0816500000622020825 по итогам  осуществления закупки с идентификационным кодом  222143401616414340100107620014120407 (далее – Контракт), согласно которому Заказчик  поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный настоящим  Контрактом срок выполнить собственными и/или привлечёнными силами и средствами  реконструкцию здания на объекте: Женской консультации ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская  ЦРБ» РС (Я), 

<

...>, квартала «Д» (далее - Объект) в  соответствии с условиями настоящего Контракта, проектной документацией, сметой  контракта по объекту (Приложение № 1), ведомости объемов конструктивных решений  

(элементов) и комплексов (видов) работ (Приложение № 2), графиком выполнения работ  (Приложение № 3) и Описанием объекта закупки (Приложение № 7), являющихся  неотъемлемой частью настоящего Контракта, и передать результат работ Заказчику (п.2.1  Контракта).  

Место выполнения работ: 

<

...>, квартал «Д» Кадастровый номер здания: 14-14-08/003/2009-985 (п. 2.6. Контракта).  

Согласно п. 3.1. Контракта, цена контракта является твердой, определена на весь  срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов,  сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с  выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ)  составляет: 62 646 750 (Шестьдесят два миллиона шестьсот сорок шесть тысяч семьсот  пятьдесят) рублей 80 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС)  по налоговой ставке НДС (не облагается), а в случае если контракт заключается с лицами,  не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и  сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.  

В соответствии с п. 3.2. Контракта, цена этапов выполнения работ определяется в  соответствии с графиком оплаты согласно приложению № 4 к контракту.  

Согласно п. 4.1. Договора, в рамках исполнения Контракта Подрядчик принимает на  себя следующие обязательства:  

4.1.1. Сдать Заказчику выполненные Работы в порядке и на условиях Контракта; 

4.1.2. Принять на себя обязательства выполнить работы по реконструкции объекта в  сроки, предусмотренные контрактом в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложением N3), который является неотъемлемой частью к  контракту.  

В соответствии с п. 5.1. Контракта, датой начала исполнения обязательств Сторон по  Контракту является дата подписания Контракта. Срок начала выполнения работ согласно  Графика выполнения строительно-монтажных работ.  

Срок окончания выполнения работ по Контракту устанавливается в приложении № 3  к Контракту график выполнения строительно-монтажных работ, с приемкой выполненных  работ по акту приемки (п. 5.2. Контракта).  

Сроки начала и окончания Работ, а также промежуточные сроки выполнения работ  устанавливаются Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение   № 3), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта (п. 5.3. Контракта).  

Сроки завершения отдельных видов работ определены в графике выполнения  строительно-монтажных работ (Приложение № 3). В случае если в ходе выполнения работ  возникнет необходимость внесения изменений в график выполнения строительно-монтажных работ, то такие изменения должны вноситься по соглашению Сторон и  оформляться дополнительным соглашением (п. 5.4. Контракта).  

Согласно п. 5.6. Контракта, Подрядчик несет ответственность, установленную  разделом 15 Контракта, за нарушение как начального, так и промежуточных и конечного  сроков выполнения работ.  

В п. 5.7. Контракта, Стороны установили, что начальные и конечные сроки  выполнения работ по Контракту являются существенными условиями и любое их  нарушение более чем на 5 (пять) календарных дней влечет невозможность  своевременного окончания работ по Контракту.  

Согласно п. 7.1.1 Контракта, Заказчик на основании выписанного Подрядчиком  счета производит Подрядчику предварительную оплату (аванс) для начала выполнения  работ в течение 30 (тридцать) календарных дней, с даты предоставления счета.  

Согласно п. 7.2. Контракта, оплата за фактически выполненные Подрядчиком  работы, производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания  Заказчиком документа о приемке в соответствии с п. 6.5 Контракта. Оплата выполненных  

работ производится при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству  выполненных Работ.  

Согласно п. 7.9. Контракта, источник финансирования – Государственный бюджет  Республики Саха (Якутия) и (или) Федеральный бюджет.  

Строительный контроль проводится на всех этапах выполнения работ на Объекте в  соответствии с положениями гражданского, градостроительного, природоохранного  законодательства, законодательства о техническом регулировании и единстве измерений  (п. 8.2. Контракта).  

Согласно п. 8.9. Контракта, Заказчик назначает на объекте своего уполномоченного  представителя, который от имени Заказчика совместно с представителем Подрядчика  осуществляет технический и производственный контроль качества строительно-монтажных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком  строительных материалов и оборудования, условиям Контракта и проектной  документации. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право  беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения  и в любое время их производства.  

В соответствии с п. 19.1. Контракта, расторжение Контракта допускается по  соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны  контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.  

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта  по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа  от исполнения данного вида обязательства (п. 19.3 Контракта).  

Согласно п. 19.7. Контракта, решение Заказчика об одностороннем отказе от  исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять  дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе  от исполнения Контракта.  

17.03.2023 в адрес Подрядчика была направлена Претензия № 4 о нарушении сроков  выполнения утверждённого и согласованного Графика работ.  

28.02.2023г. в адрес Подрядчика было выставлено Требование (исх. № 01-08/1428)  об устранении нарушений предусмотренные условиями Контракта, по п. 4.1.47, п. 4.1.31,  п. 4.1.4, п. 4.1.23.  

02.03.2023 в адрес Подрядчика была направлена Претензия № 2 (исх. № 0108/1493) о не выполнении условий предусмотренных контрактом, а именно об  обязанности в соответствии с п. 4.1.37 Контракта перед началом производственных работ  изготовить и установить информационно - наглядные материалы, касающиеся сведений о  Подрядчике, реконструируемом Объекте (паспорт объекта), возможных путях объезда и  по другим вопросам связанных с реконструируемым объектом в соответствии с  Инструкцией организации.  

03.03.2023 в адрес Подрядчика была направлена Претензия № 3 (исх. № 0108/1498) о нарушении сроков выполнения утверждённого и согласованного Графика  работ.  

17.03.2023 в адрес Подрядчика была направлена Претензия № 4 (исх. № 0108/1860) о нарушении сроков выполнения утверждённого и согласованного Графика  работ.  

12.04.2023 в адрес Подрядчика была направлена Претензия № 5 (исх. № 0108/2535) об устранении выявленных недостатков (дефектов).  

Истец письмом № 57 от 20.03.2023 в ответ на претензию № 4 от 17.03.2023  сообщило о выполнении неучтенных контрактом видов и объемов работ и уведомило об  устранении замечаний в течение 4 рабочих дней.  

Письмом № 69 от 29.03.2023 истец уведомил о приостановлении строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция здания Женской консультации ГБУ РС (Я)  

"Нерюнгринская ЦРБ" 1 этап», в случае непредставления разрешения на строительство в  срок до 03 апреля 2023 года.  

Истец также направлял следующие письма: 

- 13.02.2023 просил подготовить акт приема-передачи объекта и освободить  помещения к 15.02.2023 для начала демонтажных работ;  

- 14.02.2023 стороны подписали акт передачи объекта к производству работ при  реконструкции Женской консультации ГБУ РС (Я) "Нерюнгринская ЦРБ".  

- 17.02.2023 направил проектно-сметную документацию по объекту: «Реконструкция  здания Женской консультации ГБУ РС (Я) "Нерюнгринская ЦРБ" 1 этап» с просьбой  проставить штамп «В производство работ»;  

- Ответы на претензии и требования заказчика № 42 от 06.03.2023, № 41 от  03.03.2023, № 32 от 01.03.2023;  

- 21.03.2023 истец сообщил о необходимости направить документы и список лиц  уполномоченных на осуществление технического и производственного контроля качества  строительно-монтажных работ;  

- Истец письмом № 76 от 13.04.2023 ответил на претензию № 5 от 12.04.2023; 

- 15.05.2023 просил согласовать замену железобетонных перемычек;  - 22.05.2023 направил акты освидетельствования скрытых работ;  

- 24.05.2023 просили согласовать отсутствующие проектные решение об устранении  недостатков ПСД;  

- 26.05.2023 ответ на претензию № 6 от 26.05.2023; 

- 31.05.23 письмо Министру здравоохранения по мероприятиям для усиления работы  Подрядчика на объекте.  

24.04.2023 со стороны ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» был заключен договор с  Обществом ограниченной ответственностью «СТК-ТЕМП» № 0816500000623005806 «На  оказание услуг по строительному контролю «Строительному надзору» при выполнении  работ по реконструкции объекта капитального строительства: Реконструкция здания  Женской консультации ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» г. Нерюнгри.  

04.05.202. со стороны ООО «СТК-ТЕМП» (Стройконтроль) в адрес ООО  «Ориентир -14» были вынесены предписания № 01/ЗЖК ГБУ от 04.05.2023, № 02/ЗЖК  ГБУ об устранении ряда нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном  ремонте объекта капитального строительства.  

25.05.2023 со стороны ООО «СТК-ТЕМП» (Стройконтроль) в адрес ООО  «Ориентир -14» были вынесены предписания № 01-П/ЗЖК ГБУ от 25.05.2023г., № 02- П/ЗЖК ГБУ от 25.05.2023, об устранении ряда нарушений при строительстве,  реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.  

31.05.2023 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения  контракта № 01-08/3940.  

05.06.2023 Подрядчик составил возражение на решение об одностороннем отказе от  исполнения контракта № 0816500000622020825 от 07.02.2023.  

06.06.2023 Заказчик в ответ на возражение Подрядчика на решение об  одностороннем отказе, сообщило о том, что нарушения со стороны Подрядчика не  устранены, и не предпринимались меры к их устранению.  

07.06.2023 Подрядчик повторно просил отменить принятое решение.  

09.06.2023 Подрядчик направил комплект запрошенных документов и сообщило о  возможности расторжения Контракта в обоюдном порядке.  

13.06.2023 Заказчик в ответ сообщило, что расторжение государственного контракта  по соглашению сторон в обоюдном порядке не предоставляется возможным и уведомило  о необходимости сдать объект реконструкции в установленном порядке.  

07.07.2023 Стороны подписали акт об инвентаризации выполненных работ. 

Согласно акту № 1 от 25.05.2023 комиссией в составе представителей прокуратуры,  заказчика, подрядчика, организации осуществляющей контроль произведен осмотр  

выполненных подрядной организацией ООО «ОРИЕНТИР-14» работ на объекте  строительства, реконструкции здания Женской консультации ГБУ PC (Я)  «Нерюнгринская ЦРБ», в результате которой установлено что продление срока контракта  на 1 месяц 10 дней, то есть до 10 сентября 2023 также не создаст возможность для  исполнения условий контракта ввиду фактического отставания по видам работ.  

Прокуратурой города Нерюнгри вынесено Представление об устранении нарушений  федерального законодательства № 19-2023/Прдп420-23-20980020 от 30.05.2023, в  частности: принять меры к проведению процедуры расторжения Контракта с  соблюдением последовательности и сроков совершения действий, предусмотренных  частями 12.1, 13 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, принять меры ко  включению ООО «Ориентир-14» в реестр недобросовестных поставщиков.  

21.06.2023 УФАС РФ по РС(Я) принято решение не включать сведения об ООО  «Ориентир-14» в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта на  выполнение работ по объекту "Реконструкция здания Женской консультации ГБУ РС (Я)  "Нерюнгринская ЦРБ" 1 этап в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,  исполнителей) Российской Федерации, а также заказчик ГБУ РС (Я) "Нерюнгринская  ЦРБ" признан нарушившим ч.3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  

Ответчик в порядке статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации представил отзыв в материалы дела, просит в иске отказать, поскольку  нарушения указанные Ответчиком в решение об одностороннем отказе от исполнения  контракта Истцом в 10 -дневный срок устранены не были, следовательно оснований у  Ответчика на его отмену не было, по истечению 10 дней контракт между Ответчиком и  Истцом был расторгнут.  

Суд, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке  статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к  следующим выводам.  

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -  ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных  законом, иных правовых актов, а также действий граждан и юридических лиц, которые,  хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла  гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В качестве  основания возникновения гражданских прав и обязанностей в статье 8 ГК РФ названы  договоры и иные сделки.  

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных  правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонне  изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных  законом.  

Отношения между сторонами регулируются положениями ГК РФ, применимыми к  договору строительного подряда (глава 37), общими положениями о договорах,  обязательствах и сделках, с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее-Закон № 44-ФЗ), а также  условиями государственного контракта.  

Из материалов дела следует, что спорные правоотношения сторон возникли из  государственного контракта № 0816500000622020825 от 07.02.2023, правовое  регулирование которого осуществляется общими положениями гражданского  законодательства и специальными нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской  Федерации.  

В данном случае договор, заключенный между сторонами относится к договору  строительного подряда, регулируемого § 3 главы 37 Гражданского кодекса Российской  Федерации.  

В соответствии со статьей 763 ГК РФ по государственному или муниципальному  контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных  нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со  строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного  характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а  государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и  оплатить их или обеспечить их оплату.  

На основании статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре  подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию  между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения  отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом,  иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет  ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков  выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и  промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке,  предусмотренных договором. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса  последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока  выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.  

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по  договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок  построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные  строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для  выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

Доказательством сдачи подрядчиком результатов работы и приемки его заказчиком  является двусторонний акт, удостоверяющий приемку выполненных работ (пункт 4 статьи  753 Гражданского кодекса Российской Федерации), что в силу положений пункта 1 статьи  711, пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 8  Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда Российской  Федерации от 24.01.2000 N 51 «Обзор практики разрешения споров по договору  строительного подряда» является основанием возникновения на стороне заказчика  обязательства по оплате принятых результатов работ.  

Согласно статьям 711, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик  обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов  работы.  

Согласно части 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ расторжение контракта  допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа  стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским  законодательством.  

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта  по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа  от исполнения данного вида обязательства (п. 19.3 Контракта).  

В соответствии с положениями статьи 450 Гражданского кодекса Российской  Федерации расторжение договора возможно, в том числе по требованию одной из сторон  по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной.  Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для  другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была  вправе рассчитывать при заключении договора.  

Согласно пункту 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом,  другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний  отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено  управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора  (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного  

уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами,  иными правовыми актами или договором.  

Пунктом 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора)  полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым  или измененным.  

Согласно части 14 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракт может быть включено  условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с  положениями частей 8 - 26 статьи 95 настоящего Федерального закона.  

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта  по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения  отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом  (часть 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ).  

Пунктом 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено,  что при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не  предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.  

Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по  обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не  установлено законом или соглашением сторон.  

В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от  другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство  либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон  применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава  60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа  обязательства (пункт 4 указанной статьи).  

При расторжении договора сторона не лишена права истребовать в качестве  неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства,  если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и  обязанность его предоставить отпала. При ином подходе на стороне ответчика имела бы  место необоснованная выгода (пункт 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от  11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о  неосновательном обогащении»).  

Таким образом, положения пункта 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской  Федерации не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного  обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное  удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его  предоставить отпала.  

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 19 Обзора судебной практики №  2 (2018), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации  04.07.2018, прекращение договора подряда порождает необходимость соотнесения  взаимных предоставлений сторон по этому договору и определения завершающей  обязанности одной стороны в отношении другой.  

31.05.2023 решение об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено на  сайте ЕИС Закупки.  

В связи с чем, договор считается расторгнутым 13.06.2023, правоотношения сторон  по нему прекращенными.  

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений.  

Доводы истца о том, что в процессе работ у ООО "Ориентир-14" сформировалась  просрочка, ввиду несоответствия ПСД в части стоимости и объемов заложенных работ и  

материалов, наличия большого объема дополнительных работ, а также учитывая все  нарушения Заказчика, в связи с чем Исполнитель не имел возможности избежать  нарушения графика выполнения работ, судом не принимаются.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно  предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при  обнаружении, в том числе, при наличии иных не зависящих от подрядчика обстоятельств,  которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают  невозможность ее завершения в срок.  

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1  настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в  договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или  несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при  предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на  указанные обстоятельства (пункт 2 статьи 716 ГК РФ).  

Суть такой информационной обязанности состоит в заблаговременном уведомлении  заказчика о наличии обстоятельств, препятствующих завершению работы в срок для  принятия заказчиком соответствующих мер реагирования, отсутствие которых возложит  уже на заказчика неблагоприятные последствия от допущенного подрядчиком нарушения.  Поскольку подрядчик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, выполняет  работу и несет ответственность за ее результат по принципу риска (статьи 2 ГК РФ), он  должен предпринять меры для предотвращения обстоятельств, негативно влияющих на  сроки выполнения работ.  

Исследовав переписку сторон, суд приходит к выводу о том, что истец 29.03.2023  уведомил о приостановлении строительно-монтажных работ только до 03 апреля 2023  года.  

Таким образом, факт выполнения истцом работ по контракту с нарушением сроков  подтверждается материалами дела.  

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка  его заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами.  

Срок окончания выполнения работ по Контракту устанавливается в приложении № 3  к Контракту график выполнения строительно-монтажных работ, с приемкой выполненных  работ по акту приемки (п. 5.2. Контракта).  

Оценив указанные обстоятельства и представленные доказательства в их  совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, суд отказывает в удовлетворении иска.  

Истец при подаче иска платежным поручением от 19.06.2023 № 183 оплатил  государственную пошлину в размере 6 000 рублей.  

Суд, руководствуясь статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, с учетом результатов рассмотрения дела, относит судебные  расходы по уплате государственной пошлины на истца.  

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного  усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в  сети «Интернет».  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть  направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Лица, участвующие в деле, могут получить информацию о движении дела в  общедоступной базе данных «Картотека арбитражных дел» по электронному адресу:  www.kad.arbitr.ru.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции  через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть  подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте  арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет  http://yakutsk.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства  информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на  интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.  

Судья Семёнова У. Н.