АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-23946/2021

24 мая 2022 года

город Симферополь

Резолютивная часть решения объявлена 17 мая 2022 года.

Решение изготовлено в полном объеме 24 мая 2022 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Радвановской Ю.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску Администрации Заветненского сельского поселения Советского района Республики Крым к Обществу с ограниченной ответственностью «Спецстройсервис-К», при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, - Общества с ограниченной ответственностью «Гранит – 2», Муниципального унитарного предприятия «Торгсервис», о взыскании денежных средств,

при участии представителей сторон:

от истца – ФИО2, решение №1;

от ответчика – не явились;

УСТАНОВИЛ:

Администрация Заветненского сельского поселения Советского района Республики Крым обратилась в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к ООО «Спецстройсервис-К» о взыскании пени в сумме 805 630.99 руб., штрафа в сумме 1 289 503.20 руб..

Определением АС РК от 27.01.2022г. суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, - ООО «Гранит – 2» , МУП «Торгсервис».

Определением АС РК от 24.03.2022г. суд в порядке положений статьи 49 АПК РФ суд принял к рассмотрению заявление Администрацию Заветненского сельского поселения Советского района Республики Крым об уточнении исковых требований № 103 от 09.02.2022г., согласно которого истец просил суд взыскать с ответчика пеню за период с 15.12.2020г. по 02.12.2021г. в сумме 805 630.99 руб., штрафа за неисполнение условий контракта в сумме 1 289 503.20 руб..

В судебное заседание 17.05.2022г. явился представитель истца; иные лица, участвующие в деле, явку своих уполномоченных представителей в судебное заседание не обеспечили, при этом, суд в порядке положений статьи 123 АПК РФ признал их извещенными о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.

В отсутствии ходатайств, свидетельствующих о невозможности рассмотрения данного дела, а также во избежание нарушения процессуальных сроков, принимая во внимание полноту материалов дела, суд признал возможным рассмотреть его по существу. 

Судом были установлены следующие обстоятельства.

18.09.2020г. между Администрацией Заветненского сельского поселения Советского района Республики Крым и ООО «Спецстройсервис-К» был заключен контракт № 2.

Согласно пункта 1.1 контракта заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт стадиона по ул. Октябрьская в с. Заветное Советского района Республики Крым» в соответствии с проектно-сметной документацией, переданной заказчиком подрядчику, в порядке пункта 5.2.1 контракта и в срок, установленный пунктом 4.1 контракта и Графиком выполнения работ (Приложение № 1 к контракту - форма), но цене, указанной в пункте 2.1 контракта.

Пунктом 2.1 контракта предусмотрено, что его цена составляет 25 790 064.00 руб., в том числе НДС 20 % - 4 298 344.00 руб..

Аванс не предусмотрен (пункт 3.1 контракта).

В соответствии с пунктом 3.2 контракта оплата платежей выполненные работы, осуществляется заказчиком поэтапно в соответствии с Графиком выполнения работ (согласно Приложению № 1 к контракту), в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3, на основании выставленного подрядчиком счета на оплату работ.

Пунктом 4.1 контракта предусмотрено, что работы, предусмотренные контрактом, выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложению №1 к контракту), согласованным сторонами в порядке, предусмотренном контрактом.

Начало выполнения работ (оказания услуг) происходит с даты заключения муниципального контракта, а окончание – 15.12.2020г..

Срок начала выполнения работ на объекте и срок окончания выполнения работ на объекте (конечный срок) определяются Графиком выполнения работ.

Объем работ по контракту должен быть исполнен в соответствии с Графиком выполнения работ и в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год (пункт 4.2 контракта).

За нарушение Графика выполнения работ подрядчик несет ответственность перед заказчиком, если не докажет, что допущенные нарушения обусловлены действиями (бездействием) заказчика (пункт 4.3 контракта).

Приемка результата исполнения контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом и (или) в виде электронных документов, сформированных к единой информационной системе в электронной форме и подписанных электронной подписью (пункт 7.1 договора).

Согласно пункта 7.1.1 контракта для учета выполненных работ и целей осуществления оплаты работ в порядке,  предусмотренном контрактом, подрядчик направляет заказчику следующие отчетные документы, необходимые для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе: Акты о приемке выполненной работы по унифицированной форме № КС-2, оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.1999г. № 100 в 4 (четырех) экземплярах; Справку о стоимости выполненной работы по унифицированной форме № КС-3, оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.1999г. № 100 в 4 (четырех) экземплярах; комплект исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и контрактом, в том числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов; журнал учета выполненных Работ по форме КС-6а оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.1999г.№ 100 в формате разработки; счета на оплату работ и счета-фактуры (при необходимости).

Вышеуказанные документы исполнитель формирует в ЕИС в электронной форме и подписывает электронной подписью либо направляет документы о приемке выполненных работ на бумажном носителе.

Подписание заказчиком актов в соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 контракта является промежуточной приемкой работ и не лишает заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии но объему и качеству работ (пункт 7.7 контракта).

Пунктом 7.9 контракта предусмотрено, что после завершения работ но капитальному ремонту объекта подрядчик обязан письменно уведомить заказчика о завершении работ по капитальному ремонту объекта и готовности передать работы по капитальному ремонту заказчику с приложением документов, необходимых для приемки объекта, в том числе подписанных им: Акта приема-передачи (согласно Приложению.№ 3 к контракту) в 3 экземплярах; исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, установленном законодательством Российской Федерации; проектной документации, переданной заказчиком подрядчику для выполнения рабой и рабочей документации; счета на оплату работ и счета-фактуры; схемы, на которых соображены объекты капитального ремонта и сети инженерно- технического обеспечения в границах земельного участка, и схемы планировочной организации земельного участка; иной отчетной документации в отношении объекта, предусмотренной законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

Конечным результатом настоящего контракта является передача законченного капитальным ремонтом объекта заказчику (пункт 7.13 контракта).

Согласно пункта 11.1.1 контракта при нарушении условий контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

В соответствии с пунктом 11.3 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Пунктом 16.1 контракта предусмотрено, что он вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Контракт действует с момента подписания и до 31.12.2020г.. Отношения по контракту прекращаются по завершении гарантийного срока учетом его продления. Истечение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств (пункт 16.2 контракта).

Как указывает истец в своем исковом заявлении, ООО «Спецстройсервис-К» были нарушены условия пункта 4.1 контракта, работы в срок до 15.12.2020г. завершены не были.

В обоснование исковых требований истец ссылался на нарушение ответчиком сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом.

Администрация Заветненского сельского поселения Советского района Республики Крым направляло в адрес ООО «Спецстройсервис-К» требования об исполнении условий контракта и надлежащем выполнении работ № 1392 от 15.12.2020г., № 1445 от 29.12.2020г., № 191 от 24.02.2020г., № 367 от 13.04.2021г., № 511 от 25.05.2021г., № 659 от 28.06.2021г., № 771 от 28.07.2021г..

В своем исковом заявлении, истец указывает, что работы выполнены ответчиком за пределами срока, установленного пунктом 4.1 контракта, в обоснование чего ссылался на Акты о приемке выполненных работ № 1 от 09.10.2020г., № 2 от 06.11.2020г.,  № 4 от 21.09.2021г., № 5 от 21.09.2021г.,  № 6 от 08.12.2021г., подписанные сторонами и скрепленные их печатями.

13.10.2021г. Администрацией Заветненского сельского поселения Советского района Республики Крым направило в адрес ООО «Спецстройсервис-К»  претензию (требование) № 990 от 13.10.2021г. с требованиями об оплате штрафа и пени.

Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Так, согласно представленного искового заявления (с учетом заявления об уточнении исковых требований № 103 от 09.02.2022г.) истец просил суд взыскать с ответчика пеню за период с 15.12.2020г. по 02.12.2021г. в сумме 805 630.99 руб. и штраф за неисполнение условий контракта в сумме 1 289 503.20 руб..

Возникшие между сторонами правоотношения регулируются параграфами 1, 3 и 5 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом № 44-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 763 ГК РФ подрядные работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основании государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

Согласно пункту 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Пунктом 1 статьи 766 ГК РФ предусмотрено, что государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.

В соответствии с частью 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Согласно положениям статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с положениями  статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

Как следует из пункта 1 статьи 94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 721 Гражданского кодекса РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Согласно части 1 статьи 723 Гражданского кодекса РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают результат его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов по устранению недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 722 Гражданского кодекса РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

Как следует из положений пункта 1.1 контракта заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт стадиона по ул. Октябрьская в с. Заветное Советского района Республики Крым» в соответствии с проектно-сметной документацией, переданной заказчиком подрядчику, в порядке пункта 5.2.1 контракта и в срок, установленный пунктом 4.1 контракта и Графиком выполнения работ (Приложение № 1 к контракту - форма), но цене, указанной в пункте 2.1 контракта.

Согласно пункта 4.1 контракта работы выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложению №1 к контракту), согласованным сторонами в порядке, предусмотренном контрактом. При этом, начало выполнения работ (оказания услуг) происходит с даты заключения муниципального контракта, а окончание – 15.12.2020г..

В обоснование факта просрочки исполнения обязательств по контракту истец ссылается на Акты о приемке выполненных работ № 1 от 09.10.2020г., № 2 от 06.11.2020г.,  № 4 от 21.09.2021г., № 5 от 21.09.2021г.,  № 6 от 08.12.2021г..

Ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований, ссылался на наличие при выполнении работ назависящих от него обстоятельств, вследствие удорожания материалов, в связи с чем ссылался на постановление Правительства РФ от 23.03.2022г. № 439 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Так, постановлением Правительства РФ от 23.03.2022г. № 439 внесены изменения в Правила списания неустоек № 783, согласно которым если контрагент не смог полностью исполнить контрактные обязательства из-за существенного роста цен на строительные ресурсы, заказчик списывает неустойку за это нарушение в период с даты заключения контракта до даты представления предложения контрагента об изменении существенных условий контракта (подпункт «в» пункта 2, подпункт «г» пункта 3 Правил списания неустоек № 783).

Для списания таких неустоек достаточно представить (подпункт «д» пункта 5 Правил списания неустоек № 783): акт приемки (иной документ), подтверждающий исполнение (при наличии) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту; письменное обоснование обстоятельств, которые привели к невозможности исполнить контракт в связи с введением санкций и (или) мер ограничительного характера, с приложением подтверждающих документов (при наличии).

При этом, ответчиком не предоставлено доказательств наличия обстоятельств, которые привели к невозможности исполнить контракт в связи с введением санкций и (или) мер ограничительного характера, не представлены суду  подтверждающие документы.

Таким образом, доказательств наличия уважительных причин, независящих от подрядчика и повлекших нарушение срока выполнения работ, и незамедлительного уведомления об их наличии заказчика, ответчик не представил.

В силу пункта 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Установленная данной нормой свобода договора предполагает, что обе стороны договора могут участвовать в согласовании его условий и заключают договор на взаимовыгодных условиях.

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (пункт 1 статьи 425 ГК РФ).

В силу общих начал и смысла гражданского законодательства обязанность лица совершить то или иное предусмотренное договором действие определяется содержанием этого договора и сопутствующими соответствующей обязанности условиями.

Ответчик, подписав контракт№ 2 от 18.09.2020г. принял на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту стадиона в согласованные сторонами сроки.

Как установлено частью 1 статьи 329 ГК РФ, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с частью 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Из приведенной нормы видно, что юридически значимыми обстоятельствами делу о взыскании неустойки ввиду просрочки подрядчиком сроков окончания работ являются: факт наличия договорных обязательств; согласование срока окончания работ; нарушение сроков окончания работ

Согласно части 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответчики с частью 6 указанной статьи в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Как указано в части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Судом проверен расчет пени признан арифметически и методологически неточным в отношении определения начала периода начисления неустойки и применения значения ставки рефинансирования ЦБ РФ, в связи с чем судом был произведен собственный перерасчет.

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

14 676 944,40

16.12.2020

Новая задолженность на 14 676 944,40 руб.

14 676 944,40

16.12.2020

13.05.2021

149

5

14 676 944,40 ? 149 ? 1/300 ? 5%

364 477,45 р.

10 249 464,00

14.05.2021

21.09.2021

131

6.75

10 249 464,00 ? 131 ? 1/300 ? 6.75%

302 102,95 р.

681 859,20

22.09.2021

02.12.2021

72

7.5

681 859,20 ? 72 ? 1/300 ? 7.5%

12 273,47 р

Сумма неустойки: 687 853.87 руб.

 

Таким образом, суд признает требования о взыскании пени в части периода с 16.12.2020г. по 02.12.2021г. в части суммы 687 853.87 руб. обоснованными и такими, что подлежат удовлетворению. В удовлетворении оставшейся части требований о взыскании пени надлежит отказать.

Также, истцом ко взысканию заявлен штраф за неисполнение обязательств по контракту в сумме 1 289 503.20 руб..

В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Согласно части 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ (в редакции, действующей на момент заключения контракта) штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

Согласно пункта 11.1.1 контракта за каждый факт неисполнения и ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 5 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно).

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, отраженной в пункте 36 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 28.06.2017г., одновременно с пеней за просрочку исполнения контракта за факт неисполнения государственного (муниципального) контракта, послужившего основанием для одностороннего отказа от договора, может быть взыскан штраф в виде фиксированной суммы.

Согласно Актов № 1 от 09.10.2020г., № 2 от 06.11.2020г.,  № 4 от 21.09.2021г., № 5 от 21.09.2021г.,  № 6 от 08.12.2021г. работы выполнены в полном обхеме.

Между тем, в рассматриваемом споре истец фактически ссылается на несоблюдениеответчиком установленных контрактом сроков приемки выполненных работ, что не может быть основанием для начисления штрафа. Ссылки на то, что заказчик не оказывалсодействия и нарушал сроки направления ответов, так же не могут служить основанием для взыскания штрафа.

Истец не указал, какие именно условия контракта нарушены ответчиком.

При этом, материалами дела подтверждается и не оспаривается сторонами полное исполнение ответчиком своих обязательств по контракту.

Суд также отмечает, что контракт № 2 от 18.09.2020г.сторонами расторгнут не был.

Таким образом, требования истца о взыскании штрафа удовлетворению не подлежат в полном объеме.

В соответствии с положениями части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Согласно пункта 1 части 1 статьи 333.21 НК РФ при цене иска свыше 2 000 000.00 руб. госпошлина составляет 33 000.00 руб. плюс 0.5% суммы, превышающей 2 000 000.00 руб., но не более 200 000.00 руб..

Таким образом, при цене иска 2 095 134.19 руб. госпошлина составляет: 33 000.00 + 0.5% от (2 095 134.19 - 2 000 000.00) = 33 000.00 + 475.67 = 33 476.00 руб..

При этом, с учетом пропорционального распределения расходов по уплате государственной пошлины с ответчика в пользу истца надлежит взыскать 10 895.00 руб. государственной пошлины (687 853.87 руб. (размер удовлетворенных требований) х 33 476.00 руб. (размер государственной пошлины) / 2 095 134.19 (размер заявленных ко взысканию требований).

При этом, учитывая, что истец при обращении с иском в суд освобожден от уплаты государственной пошлины, она подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить частично. 

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Спецстройсервис-К» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Администрации Заветненского сельского поселения Советского района Республики Крым (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) пеню за период с 16.12.2020г. по 02.12.2021г. в сумме 687 853.87 руб..

3. В удовлетворении оставшейся части требований отказать.

4. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Спецстройсервис-К» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 10 895.00 руб..

5. Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

6. Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

 

Судья                                                                                                                Ю.А. Радвановская