1219/2023-168892(1) 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-8382/2022

г. Оренбург

22 августа 2023 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи  Лебедянцевой Анны Александровны, при ведении протокола судебного  заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску  

некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области», ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Оренбург,  

к обществу с ограниченной ответственностью «56 Альпинистов»,  ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Оренбург,  

третьи лица. не заявляющие самостоятельных требований  относительно предмета спора:  

1.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ПРОЕКТСТРОЙИНДУСТРИЯ" 460004, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ,  ОРЕНБУРГ ГОРОД, БРАТЬЕВ КОРОСТЕЛЕВЫХ ПРОСПЕКТ, 28/3,  ОГРН: 

<

***>,  

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ЖЭУРЕМСТРОЙСЕРВИС" 460036, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ,  ОРЕНБУРГ ГОРОД, КАРАГАНДИНСКАЯ УЛИЦА, 94/1,  

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВАНИЯ" 461040, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ,  БУЗУЛУК ГОРОД, ФИО3 

<

...>,  

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ОРИГИНАЛСТРОЙ" 460961, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЕНБУРГ  ГОРОД, АВТОМАТИКИ 

<

...>. ОБЩЕСТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"  461637, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУГУРУСЛАН ГОРОД, 2  МИКРОРАЙОН НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ, ДОМ 40,  

 6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА" 461040,  ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУЗУЛУК ГОРОД, 4-Й МИКРОРАЙОН, ДОМ  1К,  

 7. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК  УРАЛПРОЕКТ" 456209, РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,  ФИО2, ЗЛАТОУСТ Г., ЗЛАТОУСТ Г., ШОССЕЙНАЯ  УЛ., Д. 1, ОФИС 312, 6 А47-8382/2022  

8. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "КИРОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" 610033, КИРОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ, КИРОВ ГОРОД, МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 107Б,  ЭТАЖ/ПОМ 10/17.  

о понуждении к исполнению гарантийных обязательств,  Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 АПК РФ, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ООО «56 Альпинистов» в течение 30ти дней со дня вступления  решения суда в законную силу провести работы по гарантийному ремонту объекта, расположенного по адресу, 

<

...> (фасад), а именно произвести следующие работы по  устранению дефектов:  

• Заменить конструкции продухов 2 шт.; 

• Выполнить очистку шва от старого герметика, провести герметизацию  шва герметиком для долговременной герметизации в объеме 1525,7 м, по всему  периметру дома.  

Обязать ООО «56 Альпинистов» в течение 30ти дней со дня вступления  решения суда в законную силу провести работы по гарантийному ремонту объекта, расположенного по адресу, 

<

...> (крыша), а именно устранить следующие дефекты:  

• Произвести разборку креплений, желоба- 285 м. 

• Произвести установка желобов с креплением их так чтобы желоб  обеспечивал сбор и отвод воды с поверхностей покрытия в лоток и в  дальнейшем в водочную систему, создать контруклон в соответствии с СП 31- 101-97, СП 17.13330.2011. СНИП П-26-76. В количестве -285 м.  

Обязать ООО «56 Альпинистов» в течение 30ти дней со дня вступления  решения суда в законную силу провести работы по гарантийному ремонту объекта, расположенного по адресу, 

<

...> (крыша), а именно устранить следующие дефекты:  

- Произвести демонтаж деформированных заглушек-9 шт.  • Произвести установку заглушек- 9 шт.;  

• Требуется промазать шов герметиком, над 6 подъездом.  

Обязать ООО «56 Альпинистов» в течение 30ти дней со дня вступления  решения суда в законную силу провести работы по гарантийному ремонту объекта, расположенного по адресу, 

<

...> (фасад), а именно устранить следующие дефекты:  

• Произвести обивку штукатурки с поверхности фасада, -примерно 440 м2  - по всему периметру фасада;  

• Произвести нанесение грунтовки на подготовленную поверхность -  примерно 440 м2 - по всему периметру фасада.;  

• Произвести крепление сетки к кирпичным и бетонным поверхностям  раствором примерно 440 м2 - по всему периметру фасада.  

• Произвести нанесение штукатурного раствора на поверхности с  разравниванием и затиркой на стены фасада (примерно 440 м2 - по всему  периметру фасада).  

• Произвести шпатлевку на стены фасада (примерно 440 м2 - по всему  периметру фасада). Произвести грунтование поверхности. Окраску  поверхности фасада за 2 раза (примерно 440 м2 - по всему периметру фасада);  

• Произвести обивку штукатурки с поверхности плит балкона снизу-16 м2,  со стороны главного фасада;  

• Произвести нанесение состава антисептического на подготовленную  поверхность при помощи аппарата-распылителя. -16 м2, со стороны главного  фасада;  

• Произвести нанесение тиксотропного состава на подготовленную  поверхность вручную в один слой толщиной 20 мм с разравниванием-16 м2, со  стороны главного фасада;  

• Произвести крепление сетки к кирпичным и бетонным поверхностям  раствором -16 м2 со стороны главного фасада;  

• Нанесение тиксотропного состава на подготовленную поверхность  вручную в один слой толщиной 20 мм с разравниванием смесью Скрепа М  500".  

• Произвести шпатлевку на балконные плиты. Произвести грунтование поверхности. Окраску поверхности за 2 раза, со стороны главного фасада;  

• Произвести очистку вручную поверхности откосов.  • Произвести шпатлевку на балконные плиты.  

• Произвести грунтование поверхности. Окраску поверхности за 2 раза. 

Обязать ООО «56 Альпинистов» в течение 30ти дней со дня вступления  решения суда в законную силу провести работы по гарантийному ремонту объекта, расположенного по адресу, 

<

...> (крыша), а именно устранить следующие дефекты:  

- Требуется частично закрепить конструкцию снегозадержателя по  периметру кровли.  

• Требуется частично закрепить конструкцию снегозадержателя по  периметру кровли.  

• Произвести установку снегозадержателя на крыше со сборкой их из  

готовых звеньев. - примерно 90 м (отсутствующие)наличие технологического  

зазора между стеной вентканала и фартуком из листовой стали (примыкание),  

отсутствие герметичности. 

• Укрепить покрытие, устранить зазор путем заведения герметика между  

листом и стеной вентканала (4м) над 2 подъездом 

Обязать ООО «56 Альпинистов» в течение 30ти дней со дня вступления  

решения суда в законную силу провести работы по гарантийному ремонту объекта, расположенного по адресу, 

<

...>  

Микрорайон, д. 28А (крыша), а именно устранить следующие дефекты: 

• Произвести демонтаж подвесного деформированного желоба-132 м;  • Произвести заготовку и установка желобов с их креплением. -132 м;  

• Привести водосточную систему в соответствии с СП 31-101-97, СП  

17.13330.2011. СНИП П-26-76; 

• Произвести демонтаж частично деформированных труб настенного  

желоба - 110 м 

• Произвести монтаж настенного желоба новыми трубами с креплением к  

стене; • Произвести разборку кирпичной кладки -5 м2 • Произвести кладку кирпичом разрушенных участков стен фасада - 5 м2; 

• Требуется замена участка кровли из профлиста: -Произвести разборку  

профлиста по краям торцов -19 м2; 

- Произвести укладку листов из профлиста С21-1000-0,7 по краям торцов,  

укрепить лист с помощью болтов. -19 м2; Для замены фартуков на вентканалах требуется: 1. Провести демонтаж обшивки вентканала-19,1 м2 

2. Произвести демонтаж нащельника на вентканалах -25,39 м Произвести  

разборку фартуков вентканала -42,39 м 

3.Произвести устройство верхнего и нижнего фартука вентканалов33,91м2 (42,39 м)  

4.Произвести облицовку вентканалов б/у стальным профилированным  

листом с креплением винтами и заклепками-19,1 м2. 5. Произвести монтаж нательника на вентканалах -25,39 м 

6. После замены фартуков на вентканалах требуется герметизация швов  

герметиком- 42,39 м. 

Обязать ООО «56 Альпинистов» в течение 30ти дней со дня вступления  

решения суда в законную силу провести работы по гарантийному ремонту объекта, расположенного по адресу, Оренбургская область, г. Бузулук,  

ФИО3, 52 (крыша), а именно устранить следующие дефекты: 

-Требуется провести разборку покрытий кровель из рулонных материалов  

40,5кв.м (над 4 подъездом); 

-Провести приготовление грунтовки. Огрунтовать основания праймером  

битумным 40,5кв.м. (над 4 подъездом); 

-Провести наклейку рулонного материала на битумном праймере.  Провести наплавление рулонного материала на кровлю 16,5 м.кв. (над 4  подъездом)  

-Провести отбивку штукатурки с поверхности стены в местах МОП.-5  м.кв.  

-Провести нанесение штукатурного раствора на поверхность стены с  разравниванием и затиркой 5 кв.м.  

-Провести огрунтовку стены, нанесение шпаклевки на поверхность с  выравниванием и затиркой 5 м.кв.  

-Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая  по штукатурке и сборными конструкциями стен.5 кв.м.  

-Требуется провести заполнение шва герметическим материалом (герметик  завести между стеной парапета и устройством покрытия из листовой стали  парапета 11,6 м.кв.  

-Произвести устройство примыканий рулонного покрытия балконов  методом заведения на стены рулонного покрытия 80м.  

-Требуется провести разборку покрытий кровель из рулонных материалов16.5 м2 (над 4 подъездом)  

-Провести огрунтовку основания праймером битумным -16,5 м2 (над 4  подъездом)  

-Провести наклейку рулонного материала на битумном праймере -16,5 м2  (над 4 подъездом)  

-Провести отбивку штукатурки с поверхности стены в местах МОП-5 м2 - Провести нанесение штукатурного раствора на поверхность стены с разравниванием и затиркой- 5 м2  

-Произвести окраску поверхности стены - 5 м2 

-Требуется провести разборку покрытий кровель из рулонных материалов24 м2 (80м)  

-Провести огрунтовку основания праймером битумным -24 м2 (80 м) -  Произвести устройство примыканий рулонного покрытия балконов методом  заве-дения на стены рулонного покрытия- 80м.  

-Требуется провести заполнение шва герметическим материалом (герметик  завести между стеной парапета и устройством покрытия из листовой стали  парапета - 11.6 м.  

В случае несвоевременного исполнения судебного акта по настоящему  делу взыскать с общества с ограниченной ответственностью «56 Альпинистов»,  судебный штраф, в размере 5000 рублей за каждый день просрочки исполнения  решения начиная с 31 дня вступления в законную силу до дня фактического  исполнения судебного акта.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «56 Альпинистов»  в пользу некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области» расходы по оплате  государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке ст.ст. 319, 320 АПК  РФ.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства  в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд  Оренбургской области.  

Судья А.А. Лебедянцева 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 09.03.2023 8:36:00

 Кому выдана Лебедянцева Анна Александровна