АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Воронеж                    Дело № А14-25954/2018

«20» февраля 2019 г.      

 

Резолютивная часть решения объявлена 13 февраля 2019 г.

Решение в полном объеме изготовлено 20 февраля 2019 г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Кострюковой И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,       

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «Воронеж Кровля», г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Коммунально-бытовые услуги», г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)

о взыскании 779 529 руб. 24 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, представитель, доверенность № 005 от 09.01.2019 (сроком по 31.12.2019),

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом, 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Воронеж Кровля» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Коммунально-бытовые услуги» (далее - ответчик) о взыскании задолженности по договору 510 679 руб. 22 коп. задолженности по договору подряда № 9 от 30.01.2018, 268 850 руб. 02 коп. задолженности по договору подряда № 25 от 07.06.2018.

Определением суда от 10.12.2018 исковое заявление принято судом к производству. 

В судебное заседание 13.02.2019 ответчик не явился, о месте и времени рассмотрения дела надлежаще извещен. На основании статьи 156 АПК РФ дело рассматривалось в его отсутствие.

Истец поддержал исковые требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, требования не оспорил.

Из материалов дела следует, что 30.01.2018 между ООО УК «КБУ» (заказчик) и ООО «Воронеж Кровля» (подрядчик) заключен договор подряда № 9, по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить подрядные работы своими или привлеченными силами и средствами, а также с использованием собственных материалов по ремонту (текущему ремонту) кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...> (далее – объект), в строгом соответствии с объемом, установленным в локальной смете на проведение работ и дефектной ведомости, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных договором (пункт 1.1. договора).

В соответствии с пунктом 2.1. договора цена договора определяется в соответствии со сметой и составляет 510 679 руб. 22 коп., в том числе НДС – 18%, 77 900 руб. 22 коп. и состоит из: стоимости материалов в размере 396 919 руб. 22 коп., стоимости работ в размере 113 760 руб. 00 коп.

Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации. Форма расчетов – безналичный расчет (пункты 2.2, 2.2.1. договора).

Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора (пункт 2.3. договора).

Согласно пункту 2.5. договора оплата по договору производится в следующем порядке:

- заказчик производит выплату авансового платежа подрядчику на расчетный счет, указанный в статье 13 договора, в размере 30% от суммы договора в сумме 153 203 руб. 77 коп., в том числе НДС – 18% - 23 370 руб. 07 коп.; обязательство заказчика по внесению авансового платежа считается исполненным с момента списания денежных средств с банковского счета  заказчика;

- окончательный расчет в сумме 357 475 руб. 45 коп., в том числе НДС – 18% - 54 530 руб. 15 коп., производится заказчиком путем перечисления на расчетный счет подрядчика, указанный в статье 13 договора, после выполнения последним всего предусмотренного договором и приложениями к нему объема работ, подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в течение 5 банковских дней с даты представления подрядчиком счета и счета-фактуры, при отсутствии у заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ.

В соответствии с пунктом 3.2. договора общий срок выполнения работ составляет 33 календарных дня: дата начала работ – в течение 3-х календарных дней после получения авансового платежа; дата окончания работ – 30 календарных дней с момента начала работ. 

Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств (пункт 11.1. договора).

07.06.2018 между ООО УК «КБУ» (заказчик) и ООО «Воронеж Кровля» (подрядчик) заключен договор подряда № 25, по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить подрядные работы своими или привлеченными силами и средствами, а также с использованием собственных материалов по ремонту (текущему ремонту) кровель из наплавляемых материалов в под. № 7 и машинных отделений                 под. № 4,6.7,8 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...> (далее – объект), в строгом соответствии с объемом, установленным в локальной смете на проведение работ и дефектной ведомости, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных договором (пункт 1.1. договора).

В соответствии с пунктом 2.1. договора цена договора определяется в соответствии со сметой и составляет 268 850 руб. 02 коп., в том числе НДС – 18%, 41 011 руб. 02 коп. и состоит из: стоимости материалов в размере 87 184 руб. 00 коп., стоимости работ в размере 181 666 руб. 02 коп.

Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации. Форма расчетов – безналичный расчет (пункты 2.2, 2.2.1. договора).

Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора (пункт 2.3. договора).

Согласно пункту 2.5. договора оплата по договору производится в следующем порядке:

- заказчик производит выплату авансового платежа подрядчику на расчетный счет, указанный в статье 13 договора, в размере 30% от суммы договора в сумме 80 655 руб. 01 коп., в том числе НДС – 18% - 12 303 руб. 31 коп.; обязательство заказчика по внесению авансового платежа считается исполненным с момента списания денежных средств с банковского счета  заказчика;

- окончательный расчет в сумме 188 195 руб. 01 коп., в том числе НДС – 18% -              28 707 руб. 71 коп., производится заказчиком путем перечисления на расчетный счет подрядчика, указанный в статье 13 договора, после выполнения последним всего предусмотренного договором и приложениями к нему объема работ, подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в течение 5 банковских дней с даты представления подрядчиком счета и счета-фактуры, при отсутствии у заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ.

В соответствии с пунктом 3.2. договора общий срок выполнения работ составляет 28 календарных дней: дата начала работ – в течение 3-х календарных дней после получения авансового платежа; дата окончания работ – 25 календарных дней с момента начала работ. 

Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств (пункт 11.1. договора).

Во исполнение условий договоров № 9 от 30.01.2018, № 25 от 07.06.2018 истцом выполнены работы на общую сумму 779 529 руб. 24 коп., что подтверждается представленными в материалы дела актами выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат, подписанными сторонами без возражений.

Встречное обязательство по оплате выполненных работ ответчик не исполнил.

Направленная в адрес ответчика претензия оставлена последним без удовлетворения

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате принятых работ, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения истца, оценив представленные по делу доказательства, суд находит заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Заключенные между сторонами договоры № 9 от 30.01.2018, № 25 от 07.06.2018  по своей правовой природе является договорами подряда.

Исходя из существа заявленных исковых требований и правовой природы отношений, вытекающих из спорных договоров, к возникшему спору подлежат применению нормы главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) о договорах подряда (строительного подряда).

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ определено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (статья 740 ГК РФ).

В соответствии со статьей 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

На основании пункта 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. 

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (статьи 711, 746 ГК РФ).

Как видно из материалов дела, в том числе актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, подписанных сторонами без замечаний и возражений, счетов-фактур, истец выполнил работы, предусмотренные договорами № 9 от 30.01.2018, № 25 от 07.06.2018 на общую сумму 779 529 руб. 24 коп.

Выполненные работы ответчик не оплатил, доказательств погашения долга суду не представил.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Факт наличия задолженности ответчика по договорам № 9 от 30.01.2018, № 25 от 07.06.2018 в размере 779 529 руб. 24 коп. доказан материалами дела, ответчиком документально в порядке ч.3 1 ст. 70 АПК РФ не оспорен, в связи с чем исковые требования следует считать правомерно заявленными и подлежащими удовлетворению за счет ответчика.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в ст. 9 названного Кодекса, а также положений ст. 65 Кодекса, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права, в том числе и на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий несовершения им соответствующих процессуальных действий.

Расходы по госпошлине на основании ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика и составляют 18 590 руб. 60 коп.

Поскольку при подаче иска по платежному поручению № 238 от 08.10.2018 истец уплатил в доход федерального бюджета госпошлину размере 18 590 руб. 60 коп., с ответчика подлежит взысканию в пользу истца вышеуказанная сумма.

Руководствуясь статьями 167-171  АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Коммунально-бытовые услуги», г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Воронеж Кровля», г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) 779 529 руб. 24 коп. задолженности; 18 590 руб. 60 коп. расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия через суд, вынесший судебный акт.

Судья                                                                                                                 И.В. Кострюкова