Именем Российской Федерации

                                                         

Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва

10.06.2019г.             Дело № А40-302252/18-151-2214

Резолютивная часть решения оглашена 03.06.2019г.

Решение изготовлено в полном  объеме 10.06.2019г.

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Щербаковой И.Э, 

при ведении протокола  секретарем судебного заседания  Кунижевым И.Б. 

рассмотрев в открытом судебном заседании  по делу по иску  - ФКР МОСКВЫ (ОГРН 1157700003230)

к ответчику ООО ИСК "ОНИКС" (ОГРН (ОГРН 1127747256548)

о взыскании 1 459 254 руб. 86 коп. 

от истца  –  согласно  протокола. 

от ответчика –     неявка, извещен.   

УСТАНОВИЛ:

Иск предъявлен о взыскании 1 459 254 руб. 86 коп. неустойки по Договору № КР-000524-167 от 06.04.2017г. 

Истец  исковые требования поддержал,  представил письменные пояснения. 

Ответчик, надлежаще извещенный о времени и месте рассмотрения дела в порядке ст.ст. 121 -123 АПК РФ, в судебное заседание не явился, представил ходатайствовал об отложении, с намерением заключить мировое соглашение. Истец против отложения рассмотрения дела возражал

Дело рассматривается в порядке ст. 156 АПК РФ.  

Рассмотрев материалы дела,  заслушав представителя истца, обозрев представленные по делу документы, суд установил,  что между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее - Истец, Заказчик) и ООО ИСК «ОНИКС» (далее - Ответчик, Генподрядчик), заключен договор № КР-000524-17 от 06.04.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме САО г. Москва по адресу: Красностуденческий пр., д. 15 (далее - Договор), согласно которому Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по вышеуказанному адресу (далее - Объект), включая выполнение строительных - монтажных работ на Объекте (-ах), сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу объекта  по акту о приемке законченных работ на каждом Объекте, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Заказчик оплачивает выполненные Генподрядчиком работы в порядке и сроки, предусмотренные Договором, после приемки законченных работ на Объекте (-ах) комиссией по приемке выполненных работ.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно пунктам 14.7, 14.7.2, 14.7.6 Договора Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора оплатив Генподрядчику стоимость надлежащим образом выполненных и принятых работ, в случае задержки Генподрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме, а также в случае нарушения Генподрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из Объектов.

В соответствии с пунктами 4.2.1, 4.2.2 Договора дата начала работ -21.04.2017, дата окончания работ - 20.12.2017.

Генподрядчиком были нарушены сроки выполнения работ по Графику производства и стоимости работ (Приложение №1 к Договору) (далее - График), что подтверждается Актом выверки объемов работ от 25.05.2018, которым зафиксировано частичное выполнение работ по системам МКД, а также Актами простоя от 18.05.2018 и от 24.05.2018, подтверждающими систематическое нарушение Генподрядчиком сроков выполнения работ.

В связи с неисполнением /ненадлежащим исполнением Ответчиком своих обязательств по Договору Истцом было принято решение о расторжении договора в одностороннем порядке в соответствии с п. 14.7.6. Договора.

На основании вышеизложенного, Истец расторгнул Договор с Ответчиком в одностороннем порядке, направив решение и уведомление от 17.08.2018 № ИСХ-У-271/8 об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора от и уведомление в адрес Ответчика, что подтверждается реестром почтовых отправлений от 17.08.2018 (п. 3 реестра) и описью вложений в ценное письмо.

В силу п. 14.9. договора решение Заказчика об одностороннем расторжении Договора направляется Генподрядчику нарочным или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по юридическому и по фактическому адресам, указанным в настоящем Договоре (посредством государственных или коммерческих почтовых операторов или транспортных компаний).

Аналогичное положение содержится в п. 17.6. договора, согласно которому претензии, ответы на претензии, предписания, уведомления о нарушении условий Договора, уведомления (предложения) о расторжении, а также рекламационные акты направляются только заказным или ценным письмом (посредством государственных или коммерческих почтовых операторов или транспортных компаний) получателю по его адресу (раздел 19 настоящего Договора), либо вручаются под расписку уполномоченному лицу адресата.

Решение и уведомление были направлены в адрес подрядчика в установленном порядке: по почте с описью вложения, что подтверждается реестром отправки почтовой корреспонденции от 17.08.2018 (пункт 3 почтового реестра).

По юридическому адресу (109341, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР МЯЧКОВСКИЙ, д. 8, оф. 59) заказчиком в адрес подрядчика было направлено решение и уведомление о расторжении договора почтовым отправлением с номером 10176714233311. Согласно сведениям с официального сайта почты России: уведомление и решение получены ответчиком - 07.09.2018.

В силу абз. 2 п. 3 ст. 54 ГК РФ указано, что юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя.

Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

Согласно ч. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Таким образом, ООО ИСК "ОНИКС" считается уведомленным о расторжении договора надлежащим образом. Заказчик направил уведомление и решение о расторжении договора по юридическому адресу подрядчика, в связи с чем считает свою обязанность по уведомлению подрядчика о расторжении договора исполненной.

Согласно п. 14.12. договора решение Заказчика об одностороннем расторжении Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 15 дней (без учета выходных и праздничных дней) с даты направления уведомления о расторжении договора Генподрядчику.

Следовательно, с учетом направления решения и уведомления № ИСХ-У-271/8 об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора в адрес подрядчика 17.08.2018, договор считается расторгнутым с 09.09.2018.

На основании статьи 715 ГК РФ и согласно пунктам 14.7 и 14.7.6 Договора, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в случае нарушения Генподрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 дней по любому из объектов.

В силу п. 14.1. Договора настоящий договор может быть расторгнут досрочно Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке (односторонний отказ от исполнения Договора).

Согласно п. 14.7 Договора Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, оплатив Генподрядчику стоимость надлежащим образом выполненных и принятых работ, в следующих случаях: п. 14.7.6. нарушение Генподрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 дней по любому из Объектов.

Доказательством нарушения условий договора в части сроков выполнения работ являются: акт выверки объемов работ от 25.05.2018 (подрядчик вызывался уведомлением от 21.05.2018 № исх-сао-2011/8), акт простоя от 18.05.2018 (подрядчик вызывался уведомлением от 14.05.2018 № исх-сао-1894/8), акт простоя от 24.05.2018 (подрядчик вызывался уведомлением от 21.05.2018 № исх-сао-2010/8).

Уведомления о вызовах подрядчика на объект для составления актов направлялись на эл. почту подрядчика в связи с условиями п. 19.2. договора.

В соответствии с пунктом 12.4.13 Договора, в случае досрочного расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, по основаниям, указанным в пункте 14.7 Договора, Генподрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере, предусмотренном пунктом 228 постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - 615-ПП), который закрепляет, что Договор об оказании услуг должен предусматривать условие, в соответствии с которым в случае расторжения договора об оказании услуг в одностороннем порядке, подрядная организация уплачивает заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости договора об оказании услуг в порядке, установленном договором об оказании услуг.

Таким образом, стороны в договоре закрепили условие, что обязательным условием для взыскания суммы штрафа в порядке п. 12.4.13 является досрочное расторжение договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, по основаниям, указанным в пункте 14.7 Договора.

Договор был расторгнут заказчиком по основаниям, предусмотренным п. 14.7. договора. В решении от 17.08.2018 об одностороннем отказе заказчика от исполнения договора содержится ссылка на конкретный пункт договора: п. 14.7.6, на основании которого производится расторжение договора.

В силу п. 14.7.6. договора Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случая нарушения Генподрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 дней по любому из Объектов.

Со стороны подрядчика имело место нарушение сроков производства работ на объекте, что дало заказчику законное основание для расторжения договора и взыскания суммы штрафа в порядке, предусмотренном п. 12.4.13 договора.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

В соответствии с п. 228 постановления Правительства РФ № 615-ПП от 01.07.2016 подрядная организация уплачивает заказчику штраф в размере 10 % (Десяти процентов) от стоимости договора.

Истец представил расчет  штрафа и просит взыскать 1 459 254,86 рублей.

Расчет судом проверен и признан правильным. 

В рамках досудебного урегулирования спора Истцом в адрес Ответчика направлена претензия от 01.10.2018 №ИСХ-КС-4630/8 об оплате Истцу штрафа в размере 10 % (Десяти процентов) от стоимости невыполненных по Договору работ, что подтверждается копией почтовой квитанции и иными документами об отправке.

На основании  изложенного,  исковые требования  подлежат удовлетворению. 

Расходы по госпошлине суд относит на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 8, 12, 307, 310, 314, 330, 702,  740, 746 ГК РФ,  ст. ст. 65, 102, 110, 121-123, 156, 167-171, 180, 319   АПК  РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с  ООО ИСК  «ОНИКС»   (ОГРН (ОГРН 1127747256548) в пользу  ФКР МОСКВЫ (ОГРН 1157700003230) 1 459 254 руб. 86 коп.  неустойки, 27 593 руб. госпошлины. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

СУДЬЯ                                                                       И.Э. Щербакова