188/2020-24070(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  25 февраля 2020 года А46-21707/2019  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Баландина В.А., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрел в открытом заседании суда дело по иску товарищества собственников  недвижимости "Нефтебаза 5" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью "СК "Константа" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о понуждению к исполнению гарантийных обязательств в натуре,  

В заседании приняли участие: от истца – ФИО2 (директор); 

 ФИО3 по доверенности от 01.01.2018;  от ответчика – ФИО4 по доверенности от 15.11.2019;  

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 167 – 171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "СК "Константа" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение трех месяцев со дня вступления в законную  силу судебного акта выполнить гарантийные обязательства по договору подряда № 8-П/17  на ремонт многоквартирных домов от 24.08.2017, а именно выполнить следующие  работы:  

- произвести замену кровельного покрытия, выполненного из листов толщиной 0,45  мм на профнастил оцинкованный неокрашенный МП-20 толщиной 0,55 мм, при  выполнении работ соблюсти продольный нахлест листов профилированного настила на  250 мм, обеспечить отсутствие просветов на стыках листов профнастила кровли,  выполнить закрепление листов профилированного настила между собой заклепками на  площади кровли в плане 322,08 кв.м.;  

- произвести замену обрешетки с прозорами на сплошную обрешетку на карнизном  участке кровли в соответствии с проектом, увеличить кровельный свес по периметру  крыши, установить ветровую планку по периметру, выполнить подшивку карниза в  объеме 77,2 м.п.;  

- произвести переустройство гидроизоляционной пленки ЮТАФОЛ с обеспечением  нахлеста холстов пленки на 150 мм в соответствии с проектом на площади 425 кв.м.;  

- произвести замену стропил в местах связи с мауэрлатом и кирпичными стенами с  уменьшенной высотой сечения на стропила в соответствии с проектом, замену  деревянных конструкций, поврежденных короедом, зачистку деревянных конструкций,  замену стропильных конструкций с проектным сечением и обеспечением проектного шага  в объеме 7,54 куб.м.;  

- выполнить огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций в соответствии с  

проектом в объеме 504 кв.м.;  

- устранить контруклон желобов водосточной системы для организации водостока в  соответствии с проектом в объеме 66 м.п.;  

- устранить просветы в обшивке фронтонов в объеме 98 кв.м.; 

- произвести переукладку (переустройство) кирпичной кладки вентиляционных  каналов, парапета в объеме 7,9 куб.м.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СК "Константа" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу товарищества собственников недвижимости  "Нефтебаза 5" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебные расходы по оплате  государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если  не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня  принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке  апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме).  

Судья В.А. Баландин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 31.05.2019 7:41:53

Кому выдана Баландин Виталий Александрович