1415/2023-113953(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 

15 сентября 2023 года Дело № А33-18016/2023 

Красноярск 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 14 сентября 2023 года. В полном объёме решение изготовлено 15 сентября 2023 года. 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Смольниковой Е.Р., рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества «Васильевский рудник»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации – 26.10.2002; адрес: 663400,  Красноярский край, Мотыгинский район, поселок Партизанск, промзона АО Васильевский рудник, стр. 23)  

к Администрации Мотыгинского района (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации – 26.12.2002; адрес: 663400, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт.  Мотыгино, ул. Советская, 128)  

о взыскании долга и процентов, в присутствии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1 - представителя по доверенности № 228/2022 от  27.12.2022,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2, 

установил:

акционерное общество «Васильевский рудник» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края к Администрации Мотыгинского района (далее – ответчик) с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, о взыскании 55 340 руб. задолженности по муниципальным контрактам № 10/00163 от 19.03.2020, № 15/00211 от 12.05.2020, № 26/00291 от 16.07.2020, №  35/00422 от 30.11.2020, № 36/00423 от 30.11.2020, 6 291,60 руб. процентов за пользование  чужими денежными средствами.  

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 18.07.2023 возбуждено производство по делу.  

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и  месте судебного заседания, в том числе в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Сведения о дате и месте слушания размещены на  сайте Арбитражного суда Красноярского края. Согласно статье 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие  ответчика.  

От ответчика по системе «Мой Арбитр» поступил отзыв на исковое заявление, согласно которому ответчик признает задолженность, просит рассмотреть дело в отсутствие  представителя.  

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.  

19.03.2020 между истцом и ответчиком заключен муниципальный контракт №  10/00163 (далее по тексту - контракт), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по сносу жилищного фонда (демонтаж, вывоз строительных отходов, планировка участков), согласно техническому заданию (приложение № 1), по адресу: Красноярский край Мотыгинский район п. Партизанск, ул. Геологическая (номера объектов согласно перечня), ул. Ленина (номера объектов согласно перечня), ул. Лесная (номера объектов  согласно перечня), ул. Первомайская (номера домов согласно перечня), и сдать результат  заказчику по акту. Заказчик обязуется оказывать содействие в выполнении работ, принять  и оплатить их результат.  

Пунктом 3.1. контракта установлены сроки выполнения работ: начало - в течение 2  дней после подписания контракта, окончание - не позднее 31 мая 2020 года.  

На основании параграфа 4 контракта цена составляет 40 000 руб. Оплата производится в безналичной форме в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ на  расчётный счёт, указанный в п.8 контракта.  

12.05.2020 между истцом и ответчиком заключен муниципальный контракт №  15/00211 (далее по тексту - контракт), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по сносу жилищного фонда (демонтаж, вывоз строительных отходов, планировка участков), согласно техническому заданию (приложение № 1), по адресу: 

<

...> (номера объектов согласно перечня), ул. Ленина (номера объектов согласно перечня), ул. Лесная (номера объектов  согласно перечня), ул. Первомайская (номера домов согласно перечня), ул. Советская  (номера домов согласно перечня), ул. Центральная, ул. Партизанская (номера домов согласно перечня) и сдать результат заказчику по акту. Заказчик обязуется оказывать содействие в выполнении работ, принять и оплатить их результат.  

Пунктом 3.1. контракта установлены сроки выполнения работ: начало - в течение 2  дней после подписания контракта, окончание - не позднее 31 мая 2020 года.  

На основании параграфа 4 контракта цена составляет 40 руб. Оплата производится в  безналичной форме в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ на  расчётный счёт, указанный в п.8 контракта.  

ответ на претензию должен быть представлен в течение 10 дней со дня ее получения.  

16.07.2020 между истцом и ответчиком заключен муниципальный контракт №  26/00291 (далее по тексту - контракт), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по сносу жилищного фонда (демонтаж, вывоз строительных отходов, планировка участков), согласно техническому заданию (приложение № 1), по адресу: 

<

...> (номера объектов согласно перечня), ул. Ленина (номера объектов согласно перечня), ул. Советская (номера домов согласно перечня), ул. Первомайская (номера домов согласно перечня), ул. пер. Советский  (номера домов согласно перечня), ул. Центральная, ул. Партизанская (номера домов согласно перечня) и сдать результат заказчику по акту. Заказчик обязуется оказывать содействие в выполнении работ, принять и оплатить их результат.  

Пунктом 3.1. контракта установлены сроки выполнения работ: начало - в течение 2  дней после подписания контракта, окончание - не позднее 15 августа 2020 года.  

На основании параграфа 4 контракта цена составляет 7 900 руб. в том числе НДС  20%, 1 316,67 руб. Оплата производится в безналичной форме в течение 30 дней со дня  подписания актов выполненных работ на расчётный счёт, указанный в п.8 контракта.  

30.11.2020 между истцом и ответчиком заключен муниципальный контракт №  35/00422 (далее по тексту - контракт), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по сносу жилищного фонда (демонтаж, вывоз строительных отходов, планировка участков), согласно техническому заданию (приложение № 1), по адресу: 

<

...> (номера объектов согласно перечня), ул. Ленина (номера объектов согласно перечня), ул. Советская (номера домов согласно перечня), ул. Первомайская (номера домов согласно перечня), ул. Центральная, ул.  

Партизанская (номера домов согласно перечня), ул. Геологическая (номера объектов согласно перечня) и сдать результат заказчику по акту. Заказчик обязуется оказывать содействие в выполнении работ, принять и оплатить их результат.  

Пунктом 3.1. контракта установлены сроки выполнения работ: начало - в течение 2  дней после подписания контракта, окончание - не позднее 15 августа 2020 года.  

На основании параграфа 4 контракта цена составляет 4 000 руб. в том числе НДС  20%, 666,67 руб. Оплата производится в безналичной форме в течение 30 дней со дня  подписания актов выполненных работ на расчётный счёт, указанный в п.8 контракта.  

30.11.2020 между истцом и ответчиком заключен муниципальный контракт №  36/00423 (далее по тексту - контракт), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по сносу жилищного фонда (демонтаж, вывоз строительных отходов, планировка участков), согласно техническому заданию (приложение № 1), по адресу: 

<

...> (номера объектов согласно перечня), ул. Ленина (номера объектов согласно перечня), ул. Советская (номера домов согласно перечня), ул. Первомайская (номера домов согласно перечня), ул. Центральная, ул.  Партизанская (номера домов согласно перечня) и сдать результат заказчику по акту. Заказчик обязуется оказывать содействие в выполнении работ, принять и оплатить их результат.  

Пунктом 3.1. контракта установлены сроки выполнения работ: начало - в течение 2  дней после подписания контракта, окончание - не позднее 15 августа 2020 года.  

На основании параграфа 4 контракта цена составляет 3 400 руб. в том числе НДС  20%, 566,67 руб. Оплата производится в безналичной форме в течение 30 дней со дня  подписания актов выполненных работ на расчётный счёт, указанный в п.8 контракта.  

Во исполнение условий контрактов истцом выполнены и приняты ответчиком работы  на сумму 55 340 руб. согласно подписанным сторонами актам о приемке выполненных  работ № 1 от 20.06.2021 на сумму 40 000 руб., на сумму 40 руб., на сумму 7 900 руб., на  сумму 4 000 руб., на сумму 3 400 руб.  

В связи с неоплатой стоимости выполненных работ в сумме 55 340 руб. истец обратился к ответчику с претензией № 1-07-00274 от 12.04.2023, а затем с иском о взыскании  долга и процентов в размере 6 291,60 руб.  

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в  деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.  

Заключенные между сторонами контракты по своей правовой природе являются договорами подряда, отношения по которым регулируются главой 37 Гражданского кодекса  Российской Федерации.  

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда  одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). В соответствии с пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре  подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.  

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором  подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных  ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и  в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и  принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора,  

ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об  этом подрядчику.  

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом,  подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем  делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной (часть 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации.). Как разъяснено в пункте 8 информационное  письмо Президиума высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №  51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» и следует из  положения пункта 1 статьи 702, статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации,  основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.  

Факт выполнения истцом и принятия ответчиком работ по контрактам на сумму  55 340 руб. подтверждается подписанными сторонами актами № 1 от 20.06.2021 на сумму  40 000 руб., на сумму 40 руб., на сумму 7 900 руб., на сумму 4 000 руб., на сумму 3 400  руб. и признаются ответчиком. Претензий к качеству выполненных работ ответчиком не  заявлено. Срок оплаты выполненной работы наступил.  

Поскольку доказательства оплаты выполненных подрядчиком работ суду не представлены, требование истца о взыскании 55 340 руб. долга является обоснованным и подлежит удовлетворению.  

Наравне с иным, истцом заявлено требование о взыскании 6 291,60 руб. процентов за  неправомерное использование денежных средств в соответствии со ст. 395 Гражданского  кодекса Российской Федерации за период с 21.07.2021 по 05.06.2023 с исключением мора-торного периода.  

В силу положений статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. В противном случае, а именно при нарушении одной из  сторон условий возникшего обязательства, возникает основание для привлечения такой  стороны к гражданско-правовой ответственности, к видам которой относится неустойка.  

В соответствии с частью 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в  случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной  просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов  определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или  договором. В силу части 3 указанной статьи проценты за пользование чужими средствами  взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.  

Ответчик расчет процентов не оспорил. Суд проверил расчет процентов и признал его  арифметически верным. С учетом изложенного, требования о взыскании процентов за  пользование чужими денежными средствами подлежат удовлетворению в заявленном  размере - 6 291,60 руб.  

Вышеизложенное свидетельствует о наличии оснований для удовлетворения требований истца в полном объеме.  

Государственная пошлина за рассмотрение имущественных требований на сумму  61 631,60 руб. составляет 2 465 руб. Истцом при подаче иска платежным поручением №  4340 от 06.06.2023 уплачена государственная пошлина в сумме 2 589 руб. Судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 465 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учётом удовлетворения требований, излишне уплаченная государственная пошлина в размере 124 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета  

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам,  участвующим в деле, посредством размещения в установленном порядке в информацион- 

но-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ). По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе  могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Администрации Мотыгинского района в пользу акционерного общества  «Васильевский рудник» 55 340 руб. задолженности, 6 291,60 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, 2 465 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

Возвратить акционерному обществу «Васильевский рудник» 124 руб. излишне уплаченной платежным поручением № 4340 от 06.06.2023 государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Е.Р. Смольникова 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 09.03.2023 4:08:00

Кому выдана Смольникова Елена Рудольфовна