АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

28 октября 2021 года

 

Дело № А33-14659/2021

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 22 октября 2021 года.

В полном объёме решение изготовлено 28 октября 2021 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Куликовской Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ФСК Регион" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации – 18.01.2017)

к обществу с ограниченной ответственностью "ЯР Констракшн" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации – 28.03.2016)

о взыскании задолженности,

в присутствии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, по доверенности от 18.10.2021 № 1,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО2, 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ФСК Регион" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЯР Констракшн" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору подряда от 26.05.2020 № 35 в размере 4 973 211,60 руб.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 09.07.2021 возбуждено производство по делу.

Ответчик, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился. Сведения о дате и месте слушания размещены на сайте Арбитражного суда Красноярского края. В порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие представителя ответчика.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между ООО «Яр Констракшн» (Заказчик) и ООО «ФСК Регион» (Подрядчик) заключен договор подряда от 26.05.2020 №35, согласно пункту 1.1. которого подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика отделочные работы в установленный договором срок на объекте: «Многоэтажный жилой с инженерным обеспечением по улице Ленинградская в Октябрьском районе города Красноярска. Корпус 3», а заказчик обязуется принять и оплатить эти работы в соответствии с условиями договора.

Общая стоимость работ по настоящему договору определяется Приложением (Локальный сметный расчет), являющийся неотъемлемой частью договора, и составляет 4 973 211,60 руб., в том числе НДС 20 %. Стоимость работ, предусмотренная настоящим договором, является ориентировочной договорной стоимостью. Окончательная стоимость работ по настоящему договору определяется согласно стоимости фактически выполненных работ, определенной на основании подписанный сторонами актов сдачи-приемки формы КС-2, КС-3 (пункт 2.1. договора).

Согласно пункту 9.1 договора, приемка работ осуществляется по Акту приемки выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

В соответствии с пунктом 4.1. договора сторонами установлены следующие сроки выполнения работ: начало – 26.05.2020, окончание – 15.07.2020.

В соответствии с пунктом 9.2. договора, порядок приемки работ следующий:

-    Подрядчик письменно извещает заказчика о готовности работ к сдаче;

-    Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней организует и осуществляет приемку работ в присутствии представителя подрядчика и при отсутствии замечаний к выполненным работам подписывает акты формы № КС-2 и справки формы КС-3.

Согласно пункту 9.3. договора, при сдаче-приемке работ и направлении на подписание форм КС-2 и КС-3, подрядчик обязан передать заказчику счет-фактуру. Заказчик обязан принять работы и подписать акты формы КС-2 и справку формы КС-3, предоставленные подрядчиком в течение 5 пяти) календарных дней. В случае если у Заказчика имеются замечания к выполненным работам, он обязан незамедлительно представить Подрядчику мотивированные возражения в письменной форме с указанием разумного срока устранения обнаруженных недостатков. В случае отказа заказчика от принятия работ и подписания Акта сдачи-приемки услуг без письменного мотивированного обоснования в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания работ и предоставления Акта сдачи-приемки, работы считаются принятыми, а обязательства Подрядчика по настоящему Договору выполненными и подлежат оплате в полном объеме.

В соответствии с пунктом 9.6. договора, выполнение обязательств подрядчиком подтверждается подписанием заказчиком и подрядчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Из пояснений истца следует, что обязательства, предусмотренные договором выполнены подрядчиком в полном объеме.

Между сторонами подписан акт о приемки-сдачи выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ затрат по форме КС-3  № 1 от 10.07.2020 на сумму 4 973 211,60 руб.

28.09.2020 истец направил в адрес ответчика претензию № 091 с требованием о погашении задолженности. Требование истца, направленное посредством почтового отправления (№66013645020100) ответчиком не получено, 30.10.2020 возвращено отправителю за истечением срока хранения.

Неисполнение требований истца в добровольном порядке послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Ответчик отзыв на исковое заявление в материалы дела не представил, факт выполнения истцом работ не оспорил.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданское законодательство в Российской Федерации основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Судом установлено, что заключенный между сторонами договор от 26.05.2020 №35 по своей правовой природе является договором подряда, отношения по которым регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданское законодательство в Российской Федерации основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Судом установлено, что заключенный между сторонами договор №03/260-03л от 09.08.2017 по своей правовой природе является договором подряда, отношения по которым регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). В соответствии с пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Исходя из положений пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», суд приходит к выводу о том, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ.

Истец в подтверждение факта выполнения работ по договору представил акт о приемки-сдачи выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ затрат по форме КС-3  № 1 от 10.07.2020 на сумму 4 973 211,60 руб. Претензий к качеству выполненных работ в указанном документе не отражено.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При наличии подписанных сторонами без замечаний актов о приемке выполненных работ по договору подряда, и в случае возникновения у заказчика таких претензий по качеству и объему выполненных и принятых им работ, бремя доказывания таких обстоятельств возлагается на заказчика.

Доказательств наличия претензии относительно некачественного выполнения работ ответчик в материалы дела не представил, отзыв на иск не направил, сумму долга не оспорил.

На основании вышеизложенного исковые требования подлежат удовлетворению в заявленном размере.

Государственная пошлина за рассмотрение настоящего искового заявления составляет 47 866 руб. и в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЯР Констракшн" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации  28.03.2016) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ФСК Регион" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  дата регистрации  18.01.2017) 4 973 211,60 руб. задолженности, 47 866 руб.  расходов по уплате государственной пошлины.

Настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

 

Судья

Е.А. Куликовская