Арбитражный суд Краснодарского края Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А32-22150/17

г. Краснодар

31 августа 2017 г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Гречко О.А. 

руководствуясь статьями 110, 167-171 АПК РФ, 

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Групп» в течение  

одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему  

делу исполнить следующие государственные контракты в части предоставления  

следующих исполнительных документов:  государственный контракт № 226/16 от 24.10.2016 г. (Холодоснабжение): 

 представить отчет о проведении пуско-наладочных работ и приемочные документы на  систему кондиционирования воздуха – 1 комплект;  

государственный контракт № 227/16 от 18.11.2016 г.(Пожарная сигнализация): 

представить исполнительную документацию, отчет о проведении пуско-наладочных работ  

пожарной сигнализации -1 комплект. 

 государственный контракт № 243/16 от 27.09.2016 г. (Сантехника, электрика,  отделочные работы, видеонаблюдение):  

представить исполнительную схему системы видеонаблюдения -1 комплект;  

предоставить исполнительную документацию на инженерные системы (холодное  водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление, вентиляцию, электроснабжение,  электроосвещение - 1 комплект;  

- передать приемочные документы на электрический водонагреватель, объемом 1500 л. - 1  комплект.  

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Групп» в течение  одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу  

безвозмездно устранить следующие недостатки работ, выполненных по государственному  контракту № 143/16 от 29.07.2016 г. (Замена наружных оконных и дверных блоков) по  капитальному ремонту Пляжного корпуса для ФКУЗ «Санаторий «Прогресс» МВД  России:  

провести регулировку металлопластиковых окон 17 шт., дверей – 17 шт. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Групп» в  пользу ФКУЗ «Санаторий «Прогресс» МВД России штраф в сумме 677 158 руб. 85 коп.,  расходы по госпошлине в сумме 22 543 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в порядке  апелляционного производства и в порядке кассационного производства в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, через  принявший решение в первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края.  

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может  быть обжаловано в кассационном порядке, если было предметом рассмотрения в  арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Судья О.А. Гречко