Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-76207/2019

12 февраля 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  05 февраля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  12 февраля 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Скала Строй" (адрес:  Россия 192019, 

<

...>, лит А, пом. 8Н-8-11, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" (адрес:  Россия 199034, 

<

...>, лит. А, пом. 49Н , 50Н, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании, 

при участии: 

- от истца: ФИО2 (генеральный директор), ФИО3 (доверенность от 13.06.2019),

- от ответчика: ФИО4 (доверенность от 31.07.2019), ФИО5 (доверенность от 31.07.2019), 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Скала Строй» (далее - истец, подрядчик, ООО «Скала Строй») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс» (далее - ответчик, заказчик, ООО «Прогресс») с учетом уточненных в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ требований, принятых к рассмотрению суда, о взыскании 8 618 000 руб. задолженности по договору подряда № 44/2017 от 15.12.2017, 7 614 315 руб. 25 коп. неустойки по состоянию на 31.08.2019, а также 2 031 621 руб. 67 коп. штрафа.

В обосновании иска подрядчик указал на то, что предусмотренные договором подряда работы Истцом были выполнены в полном объеме, 01.04.2019 подписан акт приемки законченного строительством объекта. Однако, ООО «Прогресс» не подписало направленные в его адрес акты сдачи-приемки выполненных работ № 18 от 15.03.19 на сумму 200 000 руб., № 19 от 15.03.19 на сумму 2 636 875 руб. 86 коп., а также окончательный акт сдачи-приемки всего объема работ по договору; не погасило задолженность по оплате выполненных работ, вследствие чего Истцом были начислены договорные неустойка и штраф.

На основании статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса РФ к совместному рассмотрению с первоначальным иском судом принято встречное исковое заявление ООО «Прогресс» о взыскании с ООО «Скала Строй» переплаченного аванса в размере 2 638 018 руб. 84 коп., штрафа в размере 4 930 980 руб. 40 коп. 

В обоснование встречного иска заказчик сослался на нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, повлекшее реализацию заказчиком права на удержания неустоек в связи с допущенной просрочкой выполнения каждого этапа работ. При этом Ответчик указал на то, что в акте сдачи-приемки работ от 01.04.2019 содержаться исключительно сведения об окончании строительства газораспределительных сетей, без учета условий о предоставлении предусмотренной Договором документации и устранения недостатков работ, выявленных при испытании газопровода. При этом в соответствии с п.п. 4.2.3., 4.22 технического задания в редакции дополнительного соглашения № 2 от 28.04.2018 к Договору результатом выполнения этапов работ № 2.3 «Подготовка исполнительной документации», № 22 «Сдача газопровода как объекта строительства надзорному органу Государственного строительного надзора Ленинградской области» является получение разрешения на врезку от ГРО «Петербурггаз», которые было получено только 14.06.2019 письмом № 6107/19, в связи с чем этапы работ № 2.3., № 22 по актам от 15.03.2019 № 18, 19, по мнению Ответчика, по состоянию на 15.03.2019 были правомерно не приняты заказчиком.

В отзыве на встречный иск ООО «Скала Строй» против его удовлетворения возражало, ссылаясь на наличие вины заказчика в нарушении сроков выполнения работ, выразившейся в неисполнении заказчиком встречных обязательств, в том числе по авансированию подрядчика, оказанию ему содействия при выполнении работ, передаче документации и строительной площадки. Также Истец сослался на то, что 15.04.2019 исполнительная документация была сдана ООО «Прогресс» в архив ГРО «ПетербургГаз» без замечаний. По причине отсутствия финансирования работ подрядчик приостанавливал их выполнение в установленном порядке. Также Истец полагал неправомерным односторонне изменение стоимости работ посредством уменьшения на 1/3 стоимости этапа 22 в связи с отсутствием необходимости в получении заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Данная сумма, по мнению Истца, является экономией подрядчика. Кроме того, Истец полагает некорректным представленный Ответчиком расчет, в том числе в связи с изменением стоимости последнего этапа работ, необоснованным учетом неустойки за просрочку выполнения работ в сумме 2 868 857 руб. 14 коп. ранее, чем было заявлено требование об удержании (письмо от 25.04.2019), необоснованным исключением из стоимости выполненных работ по каждому этапу 4% удержания. Кроме того, Истец полагал условие о штрафе за нарушение срока заключения договора страхования несогласованным.

В судебном заседании представители сторон поддержали заявленные ими требования, против удовлетворения иска противоположной стороны в споре возражали.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Из взаимосвязи положений норм статей 702, 711 и 753 Гражданского кодекса РФ, а также правовой позиции, изложенной в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", следует, что основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате работ является сдача подрядчиком результата этих работ.

Судом установлено, что между сторонами заключен договор строительного подряда № 44/2017 от 15.12.2017, по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по строительству линейного объекта «Внеплощадочный газопровод» в соответствии с заданием заказчика, утвержденной проектной документацией и сдать его совместно с заказчиком в ГРО ООО «ПетербургГаз», СЗУ Ростехнадзора (Отдел по надзору за безопасностью объектов систем газораспределения и газопотребления), Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, в соответствии с условиями Договора.

Согласно п. 6.1 Договора (в редакции дополнительного соглашения №2 от 28.04.2018 к Договору) срок выполнения полного объема работ по Договору определен в отношении начала работ - 18.12.2017, окончания работ - 30.09.2018.

Сроки выполнения отдельных этапов работ установлены Техническим заданием на проведение работ по строительству газопровода (приложение А1 к дополнительному соглашению №2 от 28.04.2018 к Договору).

В соответствии с п. 12.5. Договора датой окончания отдельного этапа работ считается дата документально подтвержденной приемки отчета подрядчика заказчиком и подписания соответствующих отчетных документов по форме КС-3 и КС-2 заказчиком.

Исходя из дат подписания заказчиком отчетных документов по форме КС-3 и КС-2, суд приходит к выводу о наличии просрочки подрядчика в выполнении каждого этапа работ, расчет периодов которой приведен заказчиком в «Таблице сроков исполнения обязательств по договору и расчета сумм обязательств».

Так, по этапу 3 «Снос зеленых насаждений в зонах производства работ» просрочка составила 60 дней, по этапу 4 «Устройство лежневых дорог по трассе производства работ» просрочка составила 50 дней, по этапу 5 «Прокладка газопровода методом ГШБ ПК13+42,5- ПК 13+72,5» просрочка составила 22 дня, по этапу 2.1. «Подготовка территории строительства (в том числе: обустройство городка, разработка ППР, шурфление грунта в местах пересечений коммуникаций, разбивка геодезической основы)» просрочка составила 69 дней, по этапу 7 «Прокладка газопровода методом ГШБ ПК 24+00,5 - ПК 24+30,5» просрочка составила 10 дней, по этапу 8 «Прокладка газопровода методом ГШБ ПК 17+43 - ПК 18+20» просрочка составила 16 дней, по этапу 6 «Прокладка газопровода методом ГШБ ПК 26+00 - ПК 27+00» просрочка составила 66 дней, по этапу 13 «Прокладка газопровода открытым способом ПК 24+30,5-ПК26+00» просрочка составила 70 дней, по этапу 14 «Прокладка газопровода открытым способом П К27+005-ПК27+35,2» просрочка составила 70 дней, по этапу 11 «Прокладка газопровода открытым способом ПК13+72,5-ПК17+43» просрочка составила 43 дня, по этапу 12 «Прокладка газопровода открытым способом ПК18+20-ПК24+00,5» просрочка составила 66 дней, по этапу 10 «Прокладка газопровода открытым способом ПК1+08,5-ПК13+42,5» просрочка составила 28 дней, по этапу 1 «Поставка материалов» просрочка составила дней, по этапу просрочка составила 104 дня, по этапу 2.2. «Корректировка проектной документации, прохождение экспертизы, получение положительного заключения по проектной документации, корректировка рабочей документации» просрочка составила 130 дней, по этапу 15 «Врезка задвижки Vexve Ду 400» просрочка составила 165 дней, по этапу 16 «Врезка задвижки Vexve Ду 200» просрочка составила 144 дня, по этапу 17 «Врезка задвижки Vexve Ду 150» просрочка составила 123 дня, по этапу 18 «Очистка внутренней полости газопровода» просрочка составила 98 дней, по этапу 19 «Пневматическое испытание смонтированного газопровода» просрочка составила 81 день, по этапу 20 «Благоустройство, рекультивация» просрочка составила 68 дней, по этапу 9 «Прокладка газопровода методом ГШБ ПК 0+00 - ПК 1+08,5» просрочка составила 114 дней, по этапу 2,3. «Подготовка исполнительной документации» просрочка составила 306 дней, по этапу 22 «Сдача газопровода как объекта строительства надзорному органу Государственного Строительного Надзора Ленинградской области» просрочка составила 244 дня.

Кроме того, подпунктами 4.2.3., 4.22. Технического задания (в редакции дополнительного соглашения №2 от 28.04.2018 к Договору) в числе результатов выполнения этапов работ № 2.3 «Подготовка исполнительной документации», № 22 «Сдача газопровода как объекта строительства надзорному органу Государственного Строительного Надзора Ленинградской области» (в части Подготовки и сдачи исполнительной документации в C3Y РТН и ГРО «Петербурггаз») предусмотрено получение разрешения на врезку от ГРО «Петербурггаз». Данное разрешение на врезку от ГРО «Петербурггаз» было получено письмом от 14.06.2019 за исх. № 6107/19, в связи с чем датой окончания выполнения работ по данным этапам суд признает 14.06.2019.

В силу положений статьи 708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работ. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником (пункт 2 статьи 401 Гражданского кодекса РФ).

Между тем в силу положений пункта 3 статьи 405 Гражданского кодекса РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства (статья 406 Гражданского кодекса РФ).

Доводы Истца о том, что нарушение сроков выполнения работ произошло исключительно по вине заказчика, не могут быть признаны обоснованными и опровергаются материалами дела.

Так, после передачи строительной площадки 05.02.2018 сроки выполнения работ были повторно согласованы сторонами, что подтверждается подписанием сторонами после этого 28.04.2018 Дополнительного соглашения № 2 к Договору, в соответствии с п.1.5 которого был изменен Календарный график производства работ. Подписанием уточненного Календарного графика производства работ подрядчик подтвердил разумность и достаточность вновь утвержденных конечных сроков выполнения работ по этапам с учетом всех обстоятельств, предшествующих подписанию названного соглашения.

Пунктом 1 статьи 719 Гражданского кодекса РФ установлено, что подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

По смыслу приведенной нормы подрядчик вправе приостановить выполнение работ при таком нарушении заказчика, которое объективно препятствует подрядчику выполнять работу.

Истец не представил доказательств, свидетельствующих об обоснованном приостановлении им работ по Договору и направлении Ответчику соответствующего уведомления, за исключением приостановки работ в соответствии с письмом № 149/11-18 от 30.11.2018.

Период приостановки работ составил 13 дней, поскольку согласно общему журналу работ № 1 (запись № 248) приостановка работ продлилась до 13.12.2018, когда была осуществлена подготовка к проведению пневматического испытания на объекте. Данный период приостановки работ учтен заказчиком при определении периодов просрочки выполнения работ.

С учетом положений пункта 9.4.1 Договора суд отклоняет доводы Истца об отсутствии содействия заказчика в получении необходимых разрешений.

Исходя из положений п. 1.3 Приложения С1 к дополнительному соглашению №2 к Договору, п.п. 12.2, 7.2. Договора, регламентирующих порядок документооборота и изготовления исполнительной документации, суд не усмотрел просрочки заказчика в подписании актов формы КС-2.

Доводы Истца о том, что нарушение сроков выполнения работы было обусловлено просрочкой заказчика во внесении авансовых платежей, не могут быть приняты судом, поскольку согласованные в техническом задании и календарном графике сроки выполнения работ определены конкретной датой и в силу пункта 1 статьи 328 Гражданского кодекса РФ в отсутствие соглашения сторон об обратном обязательство по выполнению работ не является встречным по отношению к обязательству заказчика по внесению авансовых платежей. В свою очередь, сроки оплаты авансирования за материалы сторонами не согласованы.

Кроме того, Истец в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ не представил доказательств то обстоятельству, что нарушение сроков выполнения работ имело место исключительно в связи с несвоевременным внесением авансов.

Цена Договора в соответствии с п. 5.1 Договора (в редакции дополнительного соглашения №2 от 28.04.2018 к Договору) определяется Приложением «Е» и Приложением «С», является твердой, окончательной и неизменной применительно к объему работ и составляет сумму 85 895 862 руб.

В отношении определения подлежащей оплате стоимости этапа работ № 22 «Сдача газопровода как объекта строительства надзорному органу Государственного Строительного Надзора Ленинградской области» суд приходит к следующему выводу. По смыслу положений пункта 4.22 Технического задания этап № 22 включает в себя 3 вида работ: «Сдача газопровода органу строительного надзора» (результатом выполнения работ является получение заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации); «Подготовка и сдача исполнительной документации в СЗУ РТН и ГРО «Петербурггаз» (результатом выполнения работ является подписание акта законченного строительством объекта и разрешение на врезку от ГРО «Петербурггаз»); «Монтаж установки электрохимической защиты» (результатом выполнения работ является подписание акта об окончании монтажа и окончания испытаний ЭХЗ). Стоимость всего этапа работ согласно смете (приложение Н1 к дополнительному соглашению № 2 к Договору) составляет 2 234 640 руб. 56 коп.

Однако в связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 № 330-ФЗ «О внесении изменения в статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации» объект строительства по Договору – газопровод был выведен из под строительного надзора, ввиду чего также утратилась необходимость получать от органа строительного надзора Ленинградской области официальное заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

Учитывая изложенное, следует признать, что треть работ этапа работ № 22 фактически подрядчиком не выполнялась ввиду отсутствия надобности. В этой связи суд полагает возможным согласиться с доводами Ответчика о том, что подлежащая оплате стоимость этапа № 22 применительно к положениям статьи 723 Гражданского кодекса РФ должна быть соразмерно уменьшена на 1/3, что будет составлять 1 757 917 руб. 24 коп. Довод Истца о том, что стоимость этапа № 22 подлежит выплате в полном объеме в связи с экономией подрядчика (статья 710 Гражданского кодекса РФ), основан на неправильном толковании положений указанной правовой нормы, в связи с чем подлежит отклонению. Доказательств иной стоимости работ по сдаче газопровода как объекта строительства надзорному органу Государственного Строительного Надзора Ленинградской области Истцом не представлено.

С учетом изложенного стоимость выполненных Истцом и подлежащих оплате работ составила 85 016 903 руб. 38 коп.

Порядок оплаты выполненных работ определен сторонами в разделе седьмом Договора, согласно п. 7.1.1. которого (в редакции дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017) заказчик перечисляет подрядчику аванс в размере 32 448 970 руб., в том числе в следующем порядке:

П. 7.1.1.1. - 3 000 000 руб. до 29.12.2017 при условии получения заказчиком выставленного подрядчиком счета;

П. 7.1.1.2. - 3 000 000 руб. до 26.01.2018 при условии получения заказчиком выставленного подрядчиком счета;

П. 7.1.1.3. - 26 448 970 руб. в течение 15-ти рабочих дней со дня подписания Договора обеими сторонами при условии получения заказчиком выставленного подрядчиком счета и предоставления банковской гарантии возврата авансового платежа подрядчиком заказчику на вышеуказанную сумму, равную размеру авансового платежа, установленную пунктом 7.1.1.3 Договора, со сроком действия, равным 9 месяцам.

Оставшаяся часть цены работ в размере 54 946 892 руб. выплачивается подрядчику в соответствии с п. 7.1.3. Договора.

Согласно п. 7.1.2. Договора оплата 5% от Цены Договора (Удержание) производится в первый платежный день заказчика по истечении 5-ти банковских дней со дня предоставления подрядчиком банковской гарантии, определенной в пункте 19.3. Договора и штрафной неустойки в случаях, предусмотренных в пункте 9.1.3 Договора. Банковская гарантия предоставляется заказчику в размере 5% от стоимости выполненных работ.

В соответствии с п. 7.1.3. Договора заказчик по окончании каждого этапа работ (приложение С), фактически выполненный подрядчиком и принятый заказчиком, в соответствии со статьёй 12 Договора (Приемка работ) и пунктом 7.2. Договора оплачивает за вычетом следующих сумм:

- суммы удержания в счет оплаты суммы, указанной в пункте 7.1.1. по Договору, которая учитывается в расчетах за каждый выполненный и принятый этап работ, путем вычета из стоимости этапа работ 37,128% от фактической стоимости этапа работ, т.е. заказчик в случае выплаты заказчиком подрядчику авансового платежа в соответствии с условиями пункта 7.1.1 Договора, удерживает 37,48% каждого причитающегося подрядчику за выполнение работ платежа в счет зачета ранее выплаченного авансового платежа до момента полного удержания ранее выплаченного аванса;

- суммы штрафов в соответствии со статьей 9.1.3. и статьей 15 Договора в период выполнения этапа работ;

- суммы удержания в счет оплаты суммы, указанной в пункте 7.1.2. Договора, которая учитывается в расчетах за каждый выполненный и принятый этап работ, путем вычета из стоимости этапа работ 5% от фактической стоимости этапа работ;

- оставшаяся после удержаний, указанных в настоящем пункте, сумма оплачивается заказчиком при условии приемки заказчиком этапа работ в соответствии со статьёй 12 Договора (приемка Работ) и пунктом 7.2. Договора.

Согласно п. 7.3. Договора в течение 10-ти рабочих дней после получения заказчик изучает, проверяет и возвращает подрядчику документы, указанные в пункте 7.2. Договора, одобрив их, или представив свои замечания. В случае одобрения, заказчик подписывает формы КС-2 и КС-3, скрепляет их печатью и принимает представленный подрядчиком счет к оплате, которая производится не позднее первого платежного дня заказчика по истечении 45-ти календарных дней со дня подписания заказчиком указанных в настоящем пункте документов и получения оригинала счета.

Платежными днями заказчика является каждая первая и третья рабочая среда месяца.

В силу положений п. 7.4. Договора в случае, если платежи не осуществляются в течение 60-ти дней после даты подписания заказчиком указанных в пункте 7.3. Договора документов, это считается просрочкой оплаты, которая является основанием для подрядчика требовать уплаты штрафных санкций, рассчитываемых согласно статье 15 Договора, а также применить право подрядчика на приостановку работ (п. 9.3.3. Договора).

Согласно пп. (а) п. 9.1.3. Договора за нарушение по вине подрядчика сроков выполнения каждого этапа работ, только если нарушение приведет к явным срывам сроков сдачи всего объекта в целом, заказчик вправе уменьшить платеж удержания, предусмотренный пунктом 7.1.2 и/или уменьшить платеж за завершенный и принятый последний этап работ на сумму штрафной неустойки (взыскиваемую сверх убытков) в размере 0,2% за каждый просроченный день от стоимости этапа работ. Такая неустойка не может превышать 15% от цены этапа. При расчете штрафной неустойки суммируются дни просрочки по каждому из этапов.

В свою очередь, в соответствии с п. 9.3.3. Договора подрядчик имеет право, в случае нарушения заказчиком оплаты выполненных и принятых работ (п. 7.3. Договора), приостановить выполнение работ по Договору и выставить штраф в размере 5% от принятых, но неоплаченных работ до момента полного исполнения заказчиком своей обязанности по оплате выполненных работ.

Согласно п. 15.1. Договора просрочки в выполнении работ со стороны подрядчика, за исключением просрочки сроков выполнения работ (п. 9.1.3. Договора), по его вине, в том числе просрочки заключения подрядчиком договора страхования, указанного в пункте 18.2., просрочка предоставления на утверждение заказчику графика производства работ, влекут за собой наложение штрафных санкций из расчета 0,2% от цены этапа работ за каждый календарный день просрочки. Общая сумма штрафных санкций, взимаемых в порядке и на условиях, установленных данным пунктом Договора, не может превышать 15% от цены Договора.

В соответствии с п. 15.3. Договора просрочка оплаты работ или их отдельных этапов со стороны заказчика против сроков, указанных в соответствующих положениях настоящего Договора, (если обязанность по оплате возникла в соответствии с условиями Договора), влечет за собой возникновение у подрядчика права требовать уплаты штрафной неустойки из расчета 0,2% от просроченной суммы платежа за каждый день такой просрочки, но не более 15% от цены Договора. Нарушение заказчиком обязательства по оплате, которое не было устранено в течение 45-ти дней после даты возникновения такого обязательства дает право подрядчику приостановить выполнение работ, предварительно в письменной форме уведомив об этом заказчика, с соответствующим продлением сроков их исполнения на период задержки (при этом подрядчик не вправе приостанавливать выполнение работ, если очередной платеж был уменьшен заказчиком на сумму штрафа в соответствии со статьей 15 и статьей 9.1.3 Договора).

Как следует из п. 5 Дополнительного соглашения № 1 от 15.12.2017 к Договору, в случае непредоставления банковской гарантии обеспечения надлежащего исполнения обязательств подрядчика по Договору в соответствии с пунктом 4 Соглашения в течение 60-ти календарных дней с даты подписания Договора, заказчик, в том числе имеет право на 4 % удержания от каждого причитающегося подрядчику за каждый выполненный и принятый этап работ платежа в счет удержания гарантийных обязательств в дополнение к условиям п. 7.1.3. Договора. Оплата Заказчиком 4 % от цены Договора (Удержание) производится заказчиком по истечении 5 (пяти) банковских дней со дня предоставления подрядчиком заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

В соответствии с п. 2 Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017 к Договору в случае наступления условий пункта 2 указанного Соглашения (непредоставление банковской гарантии возврата авансового платежа на сумму 26 448 970 руб.) авансирование работ подрядчика будет осуществляться заказчиком на основании заявок (счетов) от подрядчика на закупку материалов напрямую поставщикам (работ, услуг), подрядчик также обязан подготовить список поставщиков (работ, услуг) и согласовать их с заказчиком.

Таким образом, Договором предусмотрен следующий порядок осуществления расчетов. Заказчик производит авансовые платежи по договору. При этом уплаченная сумма аванса в размере 32 448 970 руб. в силу Договора подлежит учету в оплате выполненных работ посредством зачета 37,48% от каждого причитающегося подрядчику за выполнение работ платежа до момента полного удержания этой суммы аванса. Суммы аванса, превышающие 32 448 970 руб., подлежат учету в оплате выполненных работ посредством зачета в 100 % размере. Из суммы оплаты стоимости выполненных работ вычитаются два удержания, направленные на обеспечение выполнения подрядчиком гарантийных обязательств: удержание в размере 5 % и удержание в размере 4 %. Удержание в размере 5 % уплачивается подрядчику в первый платежный день заказчика по истечении 5 (пяти) банковских дней со дня предоставления подрядчиком банковской гарантии, определенной в пункте 19.3. Договора. Удержание в размере 4 % уплачивается подрядчику по истечении 5-ти банковских дней со дня предоставления заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

Учитывая изложенное, доводы Истца о неправомерности удержания 4% стоимости этапа работ противоречат достигнутым сторонами договоренностям на случай непредставления подрядчиком банковской гарантии (пункт 5 дополнительного соглашения № 1 от 15.12.2017).

Из суммы оплаты стоимости выполненных работ вычитаются суммы неустойки, начисляемые за просрочку выполнения работ, в размере 0,2% за каждый просроченный день от стоимости этапа работ. Размер неустойки за просрочку выполнения этапа работ не может превышать 15% от цены этапа. При расчете штрафной неустойки суммируются дни просрочки по каждому из этапов. Удержание неустоек возможно только при явном срыве сроков сдачи всего объекта в целом. Просрочка в оплате определяется на 61-ый день после даты подписания заказчиком отчетных документов по форме КС-3 и КС-2 заказчиком, если до этого оплата работ не была совершена.

В свою очередь, за просрочку оплаты выполненных работ подрядчик праве начислить неустойку из расчета 0,2% от просроченной суммы платежа за каждый день такой просрочки, но не более 15% от цены Договора, а также штраф в размере 5 % от просроченной в оплате суммы.

За просрочку заключения подрядчиком договора страхования заказчик вправе начислить неустойку из расчета 0,2% от Цены этапа работ за каждый календарный день просрочки.

Таким образом, из условий Договора следует, что сумма оплаты за каждый этап должна быть равна следующей величине: стоимость этапа работ - 37,48% от стоимости этапа работ (в зачет суммы аванса в размере 32 448 970 руб. по п. 7.1.1. Договора) – 5 % от стоимости этапа работ (гарантийное удержание по п. 7.1.2. Договора) – 4 % от стоимости этапа работ (удержание по п. 5 Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017 к Договору) – неустойка за просрочку выполнения работ (по пп. (а) п. 9.1.3. Договора) – переплаченный договорный аванс (аванс, превышающий договорную величину аванса в размере 32 448 970 руб.).

Поскольку в пп. (а) п. 9.1.3. Договора стороны отдельно оговорили, что удержание неустоек возможно только при явном срыве сроков сдачи всего объекта в целом, следует признать, что заказчик обоснованно начал удерживать начисленные неустойки, только начиная с 12 этапа работ, а именно «Прокладка газопровода открытым способом ПК18+20-ПК24+00,5», который был сдан 04.09.2018, после чего для заказчика стало очевидным, что подрядчиком допускается явный срыв срока сдачи всего объекта, а именно после 30.09.2018. Обратного подрядчиком не доказано.

При таких обстоятельствах суд отклоняет расчет задолженности, подготовленный Истцом, поскольку данный расчет не учитывает порядок осуществления удержаний сумм, установленный п. 7.1.3. Договора. Представленный Ответчиком в «Таблице сроков исполнения обязательств по договору и расчета сумм обязательств» расчет, принимается судом в качестве достоверного доказательства состояния взаиморасчетов сторон, поскольку данный расчет основан на вышеуказанных положениях Договора.

Судом установлено, что в соответствии с положениями п. 7.1.1. Договора и п. 3 дополнительного соглашения № 1 от 15.12.2017 к Договору заказчиком были перечислены следующие денежные средства в счет авансирования работ подрядчика по Договору:

Платежным поручением №254 от 01.02.2018 подрядчику перечислен аванс в размере 3 000 000 руб.

На основании счета №1352 от 29.01.2018 платежным поручением № 282 от 02.02.2018 перечислена оплата за материалы в размере 3 139 000 руб.

На основании счета № 82 от 15.03.2018 платежным поручением № 682 от 21.03.2018 перечислена оплата за материалы в размере 105 600 руб.

На основании счета № 180 от 06.03.2018 платежным поручением № 683 от 21.03.2018 произведена оплата за материалы в размере 1 088 652 руб. 85 коп.

На основании счета № 82 от 15.03.2018 платежным поручением № 684 от 21.03.2018 перечислена оплата за материалы в размере 24 750 руб.

На основании счета № 23 от 15.03.2018 платежным поручением № 685 от 21.03.2018 перечислена оплата за материалы в размере 437 900 руб.

На основании счета № 113 от 15.03.2018 платежным поручением № 686 от 21.03.2018 перечислена оплата за материалы в размере 167 250 руб.

На основании счета № 2018/79 от 14.03.2018 платежным поручением № 687 от 21.03.2018 перечислена оплата за материалы в размере 87 600 руб.

На основании счета № НФНФ-1178 от 16.03.2018 платежным поручением № 688 от 21.03.2018 перечислена оплата за материалы в размере 174 782 руб.

На основании счета № 425 от 21.03.2018 платежным поручением № 705 от 22.03.2018 перечислена оплата за материалы в размере 249 015 руб. 40 коп.

На основании счета № 4318 от 16.03.2018 платежным поручением № 706 от 22.03.2018 перечислена оплата за материалы в размере 5 866 290 руб.

На основании счета № 4263 от 15.03.2018 платежным поручением № 707 от 22.03.2018 перечислена оплата за материалы в размере 3 866 400 руб.

На основании счета № УТ-2169 от 13.03.2018 платежным поручением № 771 от 29.03.2018 перечислена оплата за материалы в размере 429 284 руб.

На основании счета № УТ-2064 от 07.03.2018 платежным поручением № 772 от 29.03.2018 перечислена оплата за материалы в размере 201 080 руб. 77 коп.

Платежным поручением № 789 от 30.03.2018 подрядчику перечислен аванс в размере 1 449 600 руб.

На основании счета № 3 от 30.03.2018 платежным поручением № 818 от 30.03.2018 перечислена оплата за работы в счет договора в размере 1 550 400 руб.

На основании счета № 8368 от 14.05.2018 платежным поручением № 1294 от 15.05.2018 перечислена оплата за материалы в размере 5 002 172 руб.

На основании счета № 9 от 25.05.2018 платежным поручением № 1448 от 29.05.2018 перечислена оплата за материалы в размере 119 475 руб.

На основании счета № 10 от 25.05.2018 платежным поручением № 1449 от 29.05.2018 перечислена оплата за материалы в размере 53 481 руб.

На основании счета № 213 от 14.06.2018 платежным поручением №1 707 от 21.06.2018 перечислена оплата за материалы в размере 14 900 руб.

На основании счета № 128 от 13.04.2018 платежным поручением № 1708 от 21.06.2018 перечислена оплата за материалы в размере 78 631 руб. 95 коп.

На основании счета № 8743 от 13.06.2018 платежным поручением № 1709 от 21.06.2018 перечислена оплата за материалы в размере 36 345 руб.

На основании счета № 573 от 13.04.2018 платежным поручением № 1710 от 21.06.2018 перечислена оплата за материалы в размере 24 909 руб. 80 коп.

На основании счета № 171 от 16.04.2018 платежным поручением № 1711 от 21.06.2018 перечислена оплата за материалы в размере 324 450 руб.

На основании счета № 8742 от 13.06.2018 платежным поручением № 1712 от 21.06.2018 перечислена оплата за материалы в размере 4 340 руб.

На основании счета № 19 от 09.06.2018 платежным поручением № 1713 от 21.06.2018 перечислена оплата за материалы в размере 285 420 руб.

На основании счета № 435 от 28.04.2018 платежным поручением №1950 от 11.07.2018 перечислена оплата за материалы в размере 2 114 730 руб.

На основании счета № 60 от 03.08.2018 платежным поручением № 2348 от 10.08.2018 перечислена оплата за материалы в размере 2 501 000 руб.

На основании счета № 1407 от 28.08.2018 платежным поручением № 2531 от 30.08.2018 перечислена оплата за материалы в размере 72 983 руб.

На основании счета № 1 от 24.07.2018 платежным поручением № 2984 от 02.10.2018 перечислена оплата за работы в счет договора в размере 708 480 руб.

На основании счета № 6413 от 19.10.2018 платежным поручением № 3265 от 23.10.2018 перечислена оплата за материалы в размере 5 950 руб.

На основании счета № 10267 от 19.10.2018 платежным поручением № 3266 от 23.10.2018 перечислена оплата за материалы в размере 16 705 руб.

На основании счета № 2280 от 19.10.2018 платежным поручением № 3267 от 23.10.2018 перечислена оплата за материалы в размере 10 500 руб.

На основании счета № 218 от 03.10.2018 платежным поручением № 3500 от 12.11.2018 перечислена оплата за материалы в размере 148 898 руб. 16 коп.

На основании счета № ВЭ00658000 от 25.11.2018 платежным поручением № 3739 от 28.11.2018 перечислена оплата за материалы в размере 1 084 руб.

На основании счета № ВЭ00659280 от 25.11.2018 платежным поручением № 3740 от 28.11.2018 перечислена оплата за материалы в размере 10 000 руб.

На основании счета № 329 от 16.11.2018 платежным поручением № 3741 от 28.11.2018 перечислена оплата за материалы в размере 183 243 руб. 38 коп.

На основании счета № 2852 от 22.11.2018 платежным поручением № 3742 от 28.11.2018 перечислена оплата за материалы в размере 14 000 руб.

На основании счета № Х-913486 от 06.11.2018 платежным поручением № 3743 от 28.11.2018 перечислена оплата за материалы в размере 36 000 руб.

На основании счета № Х-013973 от 15.11.2018 платежным поручением № 3744 от 28.11.2018 перечислена оплата за материалы в размере 24 500 руб.

На основании счета № ЗП8-ПС00085629 от 26.11.2018 платежным поручением № 3745 от 28.11.2018 перечислена оплата за материалы в размере 131 400 руб.

На основании счета № 701 от 26.11.2018 платежным поручением № 3746 от 28.11.2018 перечислена оплата за материалы в размере 39 100 руб.

На основании счета № 1415 от 26.11.2018 платежным поручением № 3747 от 28.11.2018 перечислена оплата за материалы в размере 152 715 руб. 60 коп.

На основании счета № 18 от 09.11.2018 платежным поручением № 3748 от 29.11.2018 перечислена оплата за материалы в размере 1 420 000 руб.

На основании счета № ГП 112-1 от 07.12.2018 платежным поручением № 3852 от 07.12.2018 перечислена оплата за материалы в размере 30 000 руб.

На основании счета № 7448 от 07.12.2018 платежным поручением № 3853 от 07.12.2018 перечислена оплата за материалы в размере 183 500 руб.

На основании счета № 1756 от 28.12.2018 платежным поручением № 667 от 06.03.2019 перечислена оплата за материалы в размере 1 753 051 руб. 58 коп.

Таким образом, судом установлено, что общая сумма авансирования работ по Договору составила 37 339 570 руб. 49 коп.

Как было указано выше, судом установлен факт допущенной подрядчиком просрочки выполнения этапов работ. В результате исследования обстоятельств сдачи подрядчиком результатов работ по каждому этапу заказчику судом установлено следующее нарушение договорных сроков, повлекшее право на гарантийные удержания и удержание неустоек согласно нижеприведенному расчету.

Этап 3 «Снос зеленых насаждений в зонах производства работ». Цена этапа составляет: 1 000 000 руб. Срок выполнения этапа работ по Договору: 05.03.2018.

Этап работ был сдан подрядчиком: 04.05.2018 (в соответствии с п. 12.5 Договора момент исполнения обязательства определяется датой подписания заказчиком акта КС-2).

Период просрочки подрядчика составляет: 04.05.2018-05.03.2018=60 дней. Размер неустойки в соответствии с п. 9.1.3 Договора: 0,002* 1000000 руб.* 60 дней = 120 000 руб.

Сумма аванса к зачету в соответствии с п.7.1.1 Договора в размере 37,48% составляет:

1 000 000 руб.* 0,3748= 374 800 руб.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 4% в соответствии с п. 5 Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017 к Договору составляет: 1 000 000 руб. * 0.04 = 40 000 руб.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 5% в соответствии с п. 7.1.2 Договора составляет: 1000000 руб. * 0,05 =50 000 руб.

Итого сумма к оплате: 1 000 000 - 374 800 руб.- 40 000 руб.- 50 000 руб. = 535 200 руб.

Оплачено по платежному поручению № 1300 от 16.05.2018 - 535 200 руб.

Остаток аванса к зачету в размере 37,48 % после удержания: 26 090 177 руб. 02 коп.

Долг заказчика при оплате работ по данному этапу отсутствует.

Этап 4 «Устройство лежневых дорог по трассе производства работ».

Цена этапа составляет: 1000000 руб. Срок выполнения этапа работ по Договору: 15.03.2018. Этап работ был сдан подрядчиком: 04.05.2018.

Период просрочки подрядчика: 04.05.2018-05.03.2018=50 дней. Размер неустойки в соответствии с п. 9.1.3 Договора: 0,002*1 000 000 руб. * 50 дней = 100 000 руб.

Сумма аванса к зачету в соответствии с п.7.1.1 Договора в размере 37,48% составляет: 1000000 руб.* 0,3748=374 800 руб.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 4% в соответствии с п. 5 Дополнительного соглашения № 1 от 15.12.2017 к Договору составляет: 1000 000 руб. * 0,04 =40 000 руб.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 5% в соответствии с п. 7.1.2 Договора составляет: 1000000 руб. * 0,05 = 50 000 руб.

Итого сумма к оплате: 1000 000 руб. - 374 800 руб.- 40 000 руб. - 50 000 руб. = 535 200 руб. Оплачено по платежному поручению №1300 от 16.05.2018 - 535 200 руб.

Остаток аванса к зачету в размере 37.48 % после удержания: 26 090 177 руб. 02 коп. Долг заказчика при оплате работ по данному этапу отсутствует.

Этап 5 «Прокладка газопровода методом ГШБ ПК13+42,5- ПК 13+72,52».

Цена этапа составляет: 2 000 000 руб. Срок выполнения этапа работ по Договору: 30.04.2018. Этап работ был сдан подрядчиком 22.05.2018. Период просрочки подрядчика: 22.05.2018 - 30.04.2018 = 22 дня. Размер неустойки к подрядчику в соответствии с п. 9.1.3 Договора: 0,002* 2 000 000 руб.*22 дн. = 88 000 руб. Сумма аванса к зачету в соответствии с п.7.1.1 Договора в размере 37,48% составляет: 2 000 000 руб.* 0*3748 =749 600 руб.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 4% в соответствии с п. 5 Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017 к Договору составляет: 2 000 000 руб. * 0,04 = 80 000 руб.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 5% в соответствии с п. 7.1.2 Договора составляет: 2000000 руб. * 0,05 *100000 руб.

Итого сумма к оплате: 2000000 руб.- 749 600 руб.- 80 000 руб.-100 000 руб. = 1 070 400 руб.

Оплачено по платежному поручению № 1714 от 21.06.2018 1 070 400 руб.

Остаток аванса к зачету в размере 37,48 % после удержания: 25 513 533 руб. 02 коп.

Долг заказчика при оплате работ по данному этапу отсутствует.

Этап 2.1 «Подготовка территории строительства (в том числе: обустройство городка, разработка ПНР, шурфление грунта в местах пересечений коммуникаций, разбивка геодезической основы)». Цена этапа составляет: 5 163 124 руб. 14 коп.

Срок выполнения этапа работ по Договору: 31.03.2018. Этап работ был сдан подрядчиком 08.06.2018. Период просрочки подрядчика: 08.06.2018-31.03.2018 = 69 дней. Размер неустойки к подрядчику в соответствии с п. 9.1.3 Договора: 0,002* 5 163 124,14 руб.* 69 дней = 712 468 руб.

Сумма аванса к зачету в соответствии с п.7.1.1 Договора в размере 37,48% составляет: 5 163 124,14руб. * 0,3748= 1 935 138 руб. 93 коп. Сумма удержания из суммы оплаты в размере 4% в соответствии с п. 5 Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017 к Договору составляет: 5 163 124 руб. 14 коп. * 0,04 = 206 524 руб. 97 коп.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 5% в соответствии с п. 7.1.2 Договора составляет: 5 163 124 руб. 14 коп. * 0,05 = 258 156 руб. 21 коп.

Итого сумма к оплате: 5 163 124 руб. 14 коп. - 1 935 138 руб. 93 коп. - 206 524 руб. 97 коп. - 258 156 руб. 21 коп. = 2 763 304 руб. 03 коп.

Оплачено по платежному поручению № 1812 от 02.07.2018 - 1 763 304 руб. 03 коп., по платежному поручению от 25.06.2018 - 1 000 000 руб.

Остаток аванса к зачету в размере 37,48 % после удержания: 24 347 390 руб. 84 коп. Долг заказчика при оплате работ по данному этапу отсутствует.

Этап 7 «Прокладка газопровода методом ГШБ ПК 24+00,5 - ПК 24+30,5».

Цена этапа составляет: 2 000 000 руб.

Срок выполнения этапа работ по Договору: 31.05.2018. Этап работ был сдан подрядчиком: 10.06.2018. Период просрочки подрядчика: 10.06.2018-31.05.2018 = 10 дней.

Размер неустойки к подрядчику в соответствии с п. 9.1.3 Договора: 0,002* 2000000 руб.* 10 дн. = 40 000 руб.

Сумма аванса к зачету в соответствии с п.7.1.1 Договора в размере 37,48% составляет: 2000000 руб.* 0,3748 = 749 600 руб.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 4% в соответствии с п. 5 Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017 к Договору составляет: 2 000 000 руб. * 0,04 = 80 000 руб.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 5% в соответствии с п. 7.1.2 Договора составляет: 2000000 руб. * 0,05 =100000 руб.

Итого сумма к оплате: 2000000 руб.- 749 600 руб.- 80 000 руб.-100000 руб. = 1 070 400 руб. Оплачено по платежному поручению №2253 от 07.08.2018 - 1 070 400 руб.

Остаток аванса к зачету в размере 37,48 % после удержания: 25 712 520 руб. 84 коп. Долг заказчика при оплате работ по данному этапу отсутствует.

Этап 8 «Прокладка газопровода методом ГШБ ПК 17+43 - ПК 18+20». Цена

этапа составляет: 2 000 000 руб. Срок выполнения этапа работ по Договору: 25.06.2018. Этап работ был сдан подрядчиком 11.07.2018. Период просрочки Подрядчика: 11.07.2018 - 25.06.2018 = 16 дней.

Размер неустойки к подрядчику в соответствии с п. 9.1.3 Договора: 0,002* 2000000 руб.* 16 дн. = 64 000 руб.

Сумма аванса к зачету в соответствии с п.7.1.1 Договора в размере 37,48% составляет: 2000000 руб.* 0,3748= 749 600 руб.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 4% в соответствии с п. 5 Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017 к Договору составляет: 2000000 руб. * 0,04 =80 000 руб.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 5% в соответствии с п. 7.1.2 Договора составляет: 2 000 000 руб. * 0,05 =100 000 руб.

Итого сумма к оплате: 2 000 000 руб.- 749 600 руб.- 80 000 руб.-100 000 руб. = 1 070 400 руб. Оплачено по платежному поручению № 2568 от 04.09.2018 - 1 070 400 руб.

Остаток аванса к зачету в размере 37,48 % после удержания: 27 515 431 руб. 07 коп. Остаток аванса к зачету в 100% размере: 21472 руб. 77 коп. Долг заказчика при оплате работ по данному этапу отсутствует.

Этап 6 «Прокладка газопровода методом ГШБ ПК 26+00 - ПК 27+00». Цена этапа составляет: 4 000 000 руб. Срок выполнения этапа работ по Договору: 15.05.2018.

Этап работ был сдан подрядчиком 20.07.2018. Период просрочки подрядчика: 20.07.2018 - 15.05.2018= 66 дней. Размер неустойки к подрядчику в соответствии с п. 9.1.3 Договора: 0,002* 4 000 000 руб. *66 дней = 528 000 руб.

Сумма аванса к зачету в соответствии с п.7.1.1 Договора в размере 37,48% составляет: 4000000 руб. * 0,3748 = 1 499 200 руб.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 4% в соответствии с п. 5 Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017 к Договору составляет: 4 000 000 руб. * 0,04 =160 000 руб.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 5% в соответствии с п. 7.1.2 Договора составляет: 4 000 000 руб. * 0,05 =200 000 руб.

Итого сумма к оплате: 4000000 руб. - 1 499 200 руб.- 160 000 руб.- 200 000 руб. = 2 140 800 руб.

Оплачено по платежному поручению №2707 от 13.09.2018 - 2 140 800 руб.

Остаток аванса к зачету в размере 37,48 % после удержания:

26 016 231 руб. 07 коп. Остаток аванса к зачету в 100% размере: 21472 руб. 77 коп.

Долг заказчика при оплате работ по данному этапу отсутствует.

Этап 13 «Прокладка газопровода открытым способом ПК 24+30,5-ПК26+00».

Цена этапа составляет: 4 026 311 руб. Срок выполнения этапа работ по Договору: 31.05.2018.

Этап работ был сдан подрядчиком 09.08.2018. Период просрочки подрядчика: 09.08.2018 - 31.05.2018 =70 дней. Размер неустойки к Подрядчику в соответствии с п. 9.1.3 Договора: 0,002* 4 026 311 руб.* 70 дней = 563 683 руб. 54 коп.

Сумма аванса к зачету в соответствии с п. 7.1.1 Договора в размере 37,48% составляет 4 026 311 руб. * 0,3748= 1 509 061 руб. 36 коп.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 4% в соответствии с п. 5 Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017 к Договору составляет: 4 026 311 руб. * 0,04 =161 052 руб. 44 коп.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 5% в соответствии с п. 7.1.2 Договора составляет: 4 026 311 руб. * 0.05 = 201 315 руб. 55 коп.

Итого сумма к оплате: 4 026 311 руб. -1 509 061 руб. 36 коп.- 161 052 руб. 44 коп.- 201 315 руб. 55 коп. Оплачено по платежному поручению № 2894 от 25.09.2019 2 154 881 руб. 65 коп.

Остаток аванса к зачету в размере 37,48 % после удержания: 23 706 342 руб. 80 коп. Остаток аванса к зачету в 100% размере: 21 472 руб. 77 коп. Долг заказчика при оплате работ по данному этапу отсутствует.

Этап 14 «Прокладка газопровода открытым способом П К27+005-ПК27+35,2». Цена этапа составляет: 2 136 678 руб. Срок выполнения этапа работ по Договору: 31.05.2018. Этап работ был сдан подрядчиком 09.08.2018.

Период просрочки Подрядчика: 09.08.2018 - 31.05.2018 = 70 дней

Размер неустойки к Подрядчику в соответствии с п. 9.1.3 Договора: 0,002* 2 136 678 руб.* 70 дней = 299 134 руб. 92 коп.

Сумма аванса к зачету в соответствии с п. 7.1.1 Договора в размере 37,48% составляет: 2 136 678 руб. * 0,3748= 800 826 руб. 91 коп.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 4% в соответствии с п. 5 Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017 к Договору составляет: 2 136 678 руб. * 0,04 = 85 467 руб. 12 коп.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 5% в соответствии с п. 7.1.2 Договора составляет: 2 136 678 руб. * 0,05 = 106 833 руб. 90 коп.

Итого сумма к оплате: 2 136 678 руб. - 800 826 руб. 91 коп. - 85 467 руб. 12 коп. - 106 833 руб. 90 коп. – 1 143 550 руб. 07 коп. Оплачено по платежному поручению № 2894 от 25.09.2019 - 1 143 550 руб. 07 коп. Остаток аванса к зачету в размере 37,48 % после удержания: 23 706 342 руб. 80 коп. Остаток аванса к зачету в 100% размере: 21 472 руб. 77 коп. Долг заказчика при оплате работ по данному этапу отсутствует.

Этап 11 «Прокладка газопровода открытым способом ПК13+72,5-ПК.17+43». Цена этапа составляет: 4 110 785 руб. 50 коп. Срок выполнения этапа работ по Договору: 31.07.2018. Этап работ был сдан подрядчиком 12.09.2018. Период просрочки подрядчика: 12.09.2018 -31.07.2018 = 43 дня.

Размер неустойки к подрядчику в соответствии с п. 9.1.3 Договора 0,002* 4 110 785 руб. 50 коп.* 43 дня = 353 527 руб. 55 коп.

Сумма аванса к зачету в соответствии с п.7.1.1 Договора в размере 37 48% составляет 4 110 785 руб. 50 коп. * 0,3748 = 1 540 722 руб. 41 коп.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 4% в соответствии с п. 5 Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017 к Договору составляет: 4 110 785 руб. 50 коп. * 0 04 = 164 431 руб. 42 коп.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 5% в соответствии с п. 7.1.2 Договора составляет: 4 110 785 руб. 50 коп. * 0,05 = 205 539 руб. 28 коп.

Итого сумма к оплате: 4 110 785 руб. 50 коп. – 1 540 722 руб. 41 коп. - 164 431 руб. 42 коп.- 205 539 руб. 28 коп. = 2 200 092 руб. 39 коп.

Оплачено по платежному поручению №3194 от 18.10.2018 - 2 200 092 руб. 39 коп. Остаток аванса к зачету в размере 37,48 % после удержания: 22 165 620 руб. 39 коп. Остаток аванса к зачету в 100% размере: 729 952 руб. 77 коп.

Долг заказчика при оплате работ по данному этапу отсутствует.

Этап 12 «Прокладка газопровода открытым способом ПК18+20-ПК24+00,5». Цена этапа составляет: 11 760 766 руб. Срок выполнения этапа работ по Договору: 30.06.2018.

Этап работ был сдан подрядчиком: 04.09.2018. Период просрочки подрядчика: 04.09.2018 - 30.06.2018 = 66 дней. Размер неустойки к подрядчику в соответствии с п. 9.1.3 Договора: 0,002* 11 760 766 руб. * 66 дней = 1 552 421 руб. 11 коп.

Сумма накопленной к удержанию неустойки за просрочку сдачи работ подрядчиком по предыдущим этапам в соответствии с п. 9.1.3 Договора составляет: 120 000 руб. + 100 000 руб. + 88 000 руб. + 712 511 руб. 13 коп. + 40 000 руб. + 64 000 руб. + 528 000 руб. + 563 683 руб. 54 коп. + 299 134 руб. 92 коп. + 353 527 руб. 55 коп. = 2 868 857 руб. 14 коп.

Сумма неустойки к удержанию за данный этап работ составляет 4 421 278 руб. 26 коп. (2 868 857 руб. 14 коп. +1 552 421 руб. 11 коп.).

В соответствии с пп. (а) п. 9.1.3. Договора удержание неустойки применено, начиная с расчетов по данному этапу, поскольку именно на данном этапе стало очевидным, что подрядчиком допускается явный срыв срока сдачи всего объекта (30.09.2018).

Сумма аванса к зачету в соответствии с п.7.1.1 Договора в размере 37,48% составляет: 11 760 766 руб. * 0,3748= 4 407 935 руб. 10 коп.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 4% в соответствии с п. 5 Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017 к Договору составляет: 11 760 766 руб. * 0,04 =470 430 руб. 64 коп.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 5% в соответствии с п. 7.1.2 Договора составляет: 11 760 766 руб. * 0,05 = 588 038 руб. 30 коп.

Общая сумма, уплаченного заказчиком к дате расчетов за данный этап аванса, который засчитывается в 37,48 % по п. 7.1.3. Договора (руб.) превысила, установленную п. 7.1.1 Договора (в редакции дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017) сумму в размере 32 448 970 руб. и составила 33 360 975 руб. 93 коп.: 3 000 000 руб. + 3 139 000 руб. + 105 600 руб. + 1 088 652 руб. 85 коп. +24 750 руб. + 437 900 руб. + 167 250 руб. + 87 600 руб. + 174 782 руб. + 249 015 руб. 40 коп. + 5 866 290 руб. + 3 866 400 руб. + 429 284 руб. + 201 080 руб. 77 коп. + 1 449 600 руб. + 1 550 400 руб. + 5 002 172 руб. + 119 475 руб. + 53 481 руб. + 14 900 руб. + 78 631 руб. 95 коп. + 36 345 руб. + 24 909 руб. 80 коп. + 324 450 руб. + 4 340 руб. + 285 420 руб. + 2 114 730 руб. + 2 501 000 руб. + 72 983 руб. + 708 480 руб. + 5 950 руб. + 16 705 руб. + 10 500 руб. + 148 898 руб. 16 коп.

При таких обстоятельствах излишне уплаченный к дате расчетов аванс в размере 912 005 руб. 93 коп. (33 360 975 руб. 93 коп. - 32 448 970 руб.) засчитывается в 100% размере за данный этап, поскольку в установленной пропорции 37,48 % засчитывается только аванс, уплаченный в сумме 32 448 970 руб.

Итого сумма к оплате: 11 760 766 руб. – 4 407 935 руб. 10 коп.- 470 430 руб. 64 коп. - 588 038 руб. 30 коп. - 4 421 278 руб. 26 коп. - 912 005 руб. 93 коп. = 961 077 руб. 78 коп.

Оплачено по платежному поручению №3455 от 09.11.2018 - 1 000 000 руб., переплачено по платежному поручению №3572 от 15.11.2018 - 5 294 361 руб. 96 коп.

Остаток аванса к зачету в размере 37,48 % после удержания:

17 757 685 руб. 29 коп. Итого остаток аванса к зачету в 100% размере после удержания составляет 5 333 284 руб. 18 коп. Долг заказчика при оплате работ по данному этапу отсутствует.

Этап 10 «Прокладка газопровода открытым способом ПК1+08,5-ПК13+42,5». Цена этапа составляет: 9 474 951 руб. 50 коп. Срок выполнения этапа работ по Договору: 15.08.2018. Этап работ был сдан подрядчиком 12.09.2018. Период просрочки подрядчика: 12.09.2018 - 15.08.2018= 28 дней.

Размер неустойки к подрядчику в соответствии с п. 9.1.3 Договора: 0,002* 9474951 руб. 50 коп.* 28 дней = 530 597 руб. 28 коп.

Сумма аванса к зачету в соответствии с п.7.1.1 Договора в размере 37,48% составляет: 9 474 951 руб. 50 коп. * 0,3748 = 3 551 211 руб. 82 коп.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 4% в соответствии с п. 5 Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017 к Договору составляет: 9 474 951 руб. 50 коп. * 0,04 = 378 998 руб. 06 коп.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 5% в соответствии с п. 7.1.2 Договора составляет: 9 474 951 руб. 50 коп. * 0,05 = 473 747 руб. 58 коп.

Итого сумма к оплате: 9 474 951,5 руб. - 3 551 211 руб. 82 коп. - 378 998 руб. 06 коп. - 473 747 58 руб. - 530 597 руб. 28 коп. = 4 540 396 руб. 76 коп.

4 540 396 руб. 76 коп. - засчитывается в 100% из переплаченного к дате расчетов аванса.

Остаток аванса к зачету в размере 37,48 % после удержания: 14 206 473 руб. 47 коп. Остаток аванса к зачету в 100% размере после удержания: 7 558 827 руб. 16 коп. – 4 540 396 руб. 76 коп. = 3 018 430 руб. 40 коп.

Долг заказчика при оплате работ по данному этапу отсутствует.

Этап 1 «Поставка материалов». Цена этапа составляет: 25 948 970 руб. Срок выполнения этапа работ по Договору: 15.06.2018. Этап работ был сдан подрядчиком 27.09.2018. Период просрочки подрядчика: 27.09.2018 -15.06.2018 =104 дня.

Размер неустойки к подрядчику в соответствии с п. 9.1.3 Договора: 0,002* 25 948 970 руб.* 104 дня = 5 397 385 руб. 76 коп.

Ограничение размера неустойки: 0,15* 25 948 970 руб. = 3 892 345 руб. 50 коп.

Итого неустойка к подрядчику: 3 892 345 руб. 50 коп.

Сумма аванса к зачету в соответствии с п.7.1.1 Договора в размере 37,48% составляет: 25 948 970 руб. * 0,3748= 9 725 673 руб. 96 коп.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 4% в соответствии с п. 5 Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017 к Договору составляет:

25 948 970 руб. * 0,04 =1 037 958 руб. 80 коп.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 5% в соответствии с п. 7.1.2 Договора составляет: 25 948 970 руб. * 0,05 =1 297 448 руб. 50 коп.

3 018 430 руб. 40 коп. засчитывается в 100% из переплаченного к дате расчетов аванса. Итого сумма к оплате: 25 948 970 руб. - 9 725 673 руб. 96 коп. - 1 037 958 руб. 80 коп.- 1 297 448 руб. 50 коп. - 3 892 345 руб. 50 коп. - 3 018 430 руб. 40 коп. = 6 977 112 руб. 84 коп.

Платежным поручением №3931 от 12.12.2018 оплачено 2 000 000 руб., платежным поручением № 3994 от 19.12.2018 оплачено 2 000 000 руб., платежным поручением №4132 от 26.12.2018 оплачено 2 000 000 руб., платежным поручением №4157 от 28.12.2018 оплачено 2 000 000 руб., платежным поручением №142 от 18.01.2019 переплачено 1 000 000 руб., платежным поручением №258 от 28.01.2019 переплачено 2 370 534 руб. 38 коп.

Остаток аванса к зачету в размере 37,48 % после удержания: 4 480 799 руб. 51 коп. Остаток аванса к зачету в 100% размере после удержания: 2 000 000 руб.+ 2 000 000 руб. + 2 000 000 руб. + 2 000 000 руб. + 1 000 000 руб. + 2 370 534 руб. 38 коп.- 6 977 112 руб. 84 коп. = 4 393 4421 руб. 54 коп. Долг заказчика при оплате работ по данному этапу отсутствует.

Этап 2.2. «Корректировка проектной документации, прохождение экспертизы, получение положительного заключения по проектной документации, корректировка рабочей документации». Цена этапа составляет: 1 000 000 руб. Срок выполнения этапа работ по Договору: 30.07.2018.

Этап работ был сдан Подрядчиком: 20.12.2018. Период просрочки подрядчика: 20.12.2018-30.07.2018 - 13 дней приостановки работ = 130 дней.

Размер неустойки к подрядчику в соответствии с п. 9.1.3 Договора: 0,002*1000000 руб.* 130 дней=260 000 руб. Ограничение размера неустойки: 0,15* 1000000= 150 000 руб.

Итого неустойка к подрядчику: 150 000 руб.

Сумма аванса к зачету в соответствии с п.7.1.1 Договора в размере 37,48% составляет: 1000000 руб.* 0,3748=374 800 руб. Сумма удержания из суммы оплаты в размере 4% в соответствии с п. 5 Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017 к Договору составляет: 1 000 000 руб. * 0,04 = 40 000 руб.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 5% в соответствии с п. 7.1.2 Договора составляет: 1000000 руб. * 0,05 =50 000 руб.

Итого сумма к оплате: 1 000 000-374 800 руб.- 40 000 руб.-50 000 руб. -150 000 руб. = 385 200 руб.- засчитывается в 100% (руб.) из переплаченного к дате расчетов аванса. Остаток аванса к зачету в размере 37,48 % после удержания: 4 105 999 руб. 51 коп.

Остаток аванса к зачету в 100% размере после удержания: 4 393 421 руб. 54 коп. - 385 200 руб. = 4 008 221 руб. 54 коп. Долг заказчика при оплате работ по данному этапу отсутствует.

Этап 15 «Врезка задвижки Vexve Ду 400». Цена этапа составляет: 600 000 руб.

Срок выполнения этапа работ по Договору: 25.06.2018. Этап работ был сдан подрядчиком: 20.12.2018. Период просрочки подрядчика: 20.12.2018- 25.06.2018 -13 дней приостановки работ = 165 дней.

Размер неустойки к подрядчику в соответствии с п. 9.1.3 Договора: 0,002* 600000 руб.* 165 дней = 198 000 руб. Ограничение размера неустойки: 0,15* 600 000= 90 000 руб. Итого неустойка к подрядчику: 90 000 руб.

Сумма аванса к зачету в соответствии с п.7.1.1 Договора в размере 37,48% составляет* 600000 руб. * 0,3748=224 880 руб.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 4% в соответствии с п. 5 Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017 к Договору составляет: 600 000 руб. * 0, 04=240 000 руб.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 5% в соответствии с п. 7 1 2 Договора составляет: 600000 руб. * 0,05 =30 000 руб.

Итого сумма к оплате: 600 000 руб. -224 880 руб.- 24 000 руб.- 30 000 руб. – 90 000 руб. = 231 120 руб.

231 120 руб.- засчитывается в 100% (руб.) из переплаченного к дате расчетов аванса. Остаток аванса к зачету в размере 37,48 % после удержания: 3 881 119 руб. 51 коп.

Остаток аванса к зачету в 100% размере после удержания: 4 008 221 руб. 54 коп. - 231 120 руб. = 3 777 101 руб. 54 коп. Долг заказчика при оплате работ по данному этапу отсутствует.

Этап 16 «Врезка задвижки Vexvc Ду 200». Цена этапа составляет: 100 000 руб. Срок выполнения этапа работ по Договору: 16.07.2018. Этап работ был сдан подрядчиком: 20.12.2018.

Период просрочки Подрядчика: 20.12.2018-16.07.2018-13 дней приостановки работ = 144 дня.

Размер неустойки к подрядчику в соответствии с п. 9.1.3 Договора: 0,002* 100 000 руб.* 144 дн.* 28 800 руб. Ограничение размера неустойки: 0,15* 100000= 15 000 руб. Итого неустойка к подрядчику: 150 00 руб.

Сумма аванса к зачету в соответствии с п.7.1.1 Договора в размере 37,48 % составляет: 100 000 руб. * 0,3748= 37 480 руб. Сумма удержания из суммы оплаты в размере 4% в соответствии с п. 5 Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017 к Договору составляет 100 000 руб. * 0,04 = 4 000 руб. Сумма удержания из суммы оплаты в размере 5% в соответствии с п. 7.1.2 Договора составляет: 100000 руб. * 0,05 = 5000 руб.

Итого сумма к оплате: 100000 руб. - 37480 руб.- 4000 руб.- 5000 руб. - 15 000 руб. = 38 520 руб. - засчитывается в 100% (руб.) из переплаченного к дате расчетов аванса.

Остаток аванса к зачету в размере 37,48 % после удержания: 3 843 639 руб. 51 коп. Остаток аванса к зачету в 100% размере после удержания 3 777 101 руб. 54 коп. - 38 520 руб. =3 738 581 руб. 54 коп. Долг заказчика при оплате работ по данному этапу отсутствует.

Этап 17 «Врезка задвижки Vexve Ду 150». Цена этапа составляет: 100 000 руб. Срок выполнения этапа работ по Договору: 06.08.2018.

Этап работ был сдан подрядчиком 20.12.2018. Период просрочки подрядчика: 20.12.2018- 06.08.2018 -13 дней приостановки работ = 123 дня.

Размер неустойки к подрядчику в соответствии с пунктом 9.1.3 Договора: 0,002* 100 000 руб.*123 дня = 24600 руб.

Ограничение размера неустойки: 0,15* 100000 руб. = 15 000 руб.

Итого неустойка к подрядчику: 15 000 руб.

Сумма аванса к зачету в соответствии с п.7.1.1 Договора в размере 37,48% составляет: 100 000 руб. * 0,3748 = 37 480 руб.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 4% в соответствии с п. 5 Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017 к Договору составляет: 100 000 руб. * 0,04 = 4000 руб. Сумма удержания из суммы оплаты в размере 5% в соответствии с п. 7.1.2 Договора составляет: 100000 руб. * 0,05 = 5000 руб.

Итого сумма к оплате: 100000 руб. - 37480 руб.- 4000 руб.- 5000 руб. - 15 000 руб. = 38 520 руб.

38 520 руб.- засчитывается в 100% (руб.) из переплаченного к дате расчетов аванса. Остаток аванса к зачету в размере 37,48 % после удержания: 3 806 159 руб. 51 коп.

Остаток аванса к зачету в 100% размере после удержания 738 581,54 руб.- 38 520 руб. *= 3 700 061 руб. 54 коп.

Долг заказчика при оплате работ по данному этапу отсутствует.

Этап 18 «Очистка внутренней полости газопровода». Цена этапа составляет: 547 040 руб. Срок выполнения этапа работ по Договору: 31.08.2018.

Этап работ был сдан подрядчиком: 20.12.2018. Период просрочки Подрядчика: 20.12.2018 - 31.08.2018 -13 дней приостановки работ = 98 дней.

Размер неустойки к подрядчику в соответствии с п. 9.1.3 Договора: 0,002* 547040 руб.* 98 дней = 107219 руб. 84 коп. Ограничение размера неустойки: 0,15* 547040 руб.=82 056 руб.

Итого неустойка к подрядчику: 82 056 руб.

Сумма аванса к зачету в соответствии с п.7.1.1 Договора в размере 37,48% составляет: 547 040 руб. * 0,3748 = 205 030 руб. 59 коп.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 4% в соответствии с п. 5 Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017 к Договору составляет: 547 040 руб. * 0 04 = 21 881 руб. 60 коп.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 5% в соответствии с п. 7 1 2 Договора составляет: 547 040 руб. * 0,05 = 27 352 руб. Договора.

Итого сумма к оплате: 547 040 руб. -205 030 руб. 59 коп. – 21 881 руб. 60 коп. – 27 352 руб. - 82 056 руб. = 210 719 руб. 81 коп.

210 719 руб. 81 коп. – засчитывается в 100% (руб.) из переплаченного к дате расчетов аванса. Остаток аванса к зачету в размере 37.48 % после удержания: 3 601 128 руб. 92 коп.

Остаток аванса к зачету в 100% размере после удержания: 3 700 061 руб. 54 коп. - 210 719 руб. 81 коп. = 3 489 341 руб. 73 коп.

Долг заказчика при оплате работ по данному этапу отсутствует.

Этап 19 «Пневматическое испытание смонтированного газопровода». Цена этапа составляет: 2 064 360 руб. Срок выполнения этапа работ по Договору: 17.09.2018. Этап работ был сдан подрядчиком: 20.12.2018. Период просрочки подрядчика: 20.12.2018- 17.09.2018 -13 дней приостановки работ = 81 день.

Размер неустойки к подрядчику в соответствии с п. 9.1.3 Договора: 0,002* 2064360 руб.* 81 дн. = 334 426 руб. 32 коп. Ограничение размера неустойки: 0,15* 2064360 руб. = 309 654 руб.

Итого неустойка к подрядчику: 309 654 руб.

Сумма аванса к зачету в соответствии с п.7.1.1 Договора в размере 37,48% составляет 2064360 руб. * 0,3748= 773 772 руб. 13 коп.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 4% в соответствии с п. 5 Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017 к Договору составляет: 2064360 руб. 0,04= 82 574 руб. 40 коп.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 5% в соответствии с п. 7.1.2 Договора составляет: 2064360 руб. * 0,05 = 103 218 руб.

Итого сумма к оплате: 2 064 360 руб. -773 772 руб. 13 коп.- 82 574 руб. 40 коп.- 103 218 руб. - 309 654 руб. = 795 191 руб. 47 коп.

795 191 руб. 47 коп. - засчитывается в 100% (руб.) из переплаченного к дате расчетов аванса.

Остаток аванса к зачету в размере 37,48 % после удержания: 2 827 406 руб. 79 коп. Остаток аванса к зачету в 100% размере после удержания: 3 489 341 руб. 73 коп. - 795 191 руб. 47 коп. = 2 694 150 руб. 26 коп.

Долг заказчика при оплате работ по данному этапу отсутствует.

Этап 20 «Благоустройство, рекультивация». Цена этапа составляет: 26 000 руб. Срок выполнения этапа работ по Договору: 30.09.2018.

Этап работ был сдан подрядчиком: 20.12.2018. Период просрочки подрядчика: 20.12.2018 -30.09.2018 -13 дней приостановки работ =68 дней.

Размер неустойки к подрядчику в соответствии с п. 9.1.3 Договора: 0,002*26 000 руб.*68 = 3 900 руб.

Сумма аванса к зачету в соответствии с п.7.1.1 Договора в размере 37.48% составляет- 26000 руб. * 0,3748= 9 744 руб. 80 коп.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 4% в соответствии с п. 5 Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017 к Договору составляет: 26000 руб. * 0,04 = 1040 руб.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 5% в соответствии с п. 7.1.2 Договора составляет: 26000 руб. * 0,05 = 1300 руб.

Итого сумма к оплате: 26 000 руб. - 9 744 руб. 80 коп.- 1 040 руб. - 1 300 руб. - 3 900 руб. = 10 015 руб. 20 коп.

10 015 руб. 20 коп. - засчитывается в 100% (руб.) из переплаченного к дате расчетов аванса. Остаток аванса к зачету в размере 37,48 % после удержания: 2 817 661 руб. 99 коп.

Остаток аванса к зачету в 100% размере после удержания: 2 694 150 руб. 26 коп. - 10 015 руб. 20 коп. = 2 684 135 руб. 06 коп.

Долг заказчика при оплате работ по данному этапу отсутствует.

Этап 9 «Прокладка газопровода методом ГШБ ПК 0+00 - ПК 1+08,5». Цена этапа составляет: 4 000 000 руб. Срок выполнения этапа работ по Договору: 15.08.2018.

Этап работ был сдан подрядчиком 20.12.2018. Период просрочки подрядчика: 20.12.2018 - 15.08.2018 - 13 дней приостановки работ = 114 дней.

Размер неустойки к Подрядчику в соответствии с п. 9.1.3 Договора: 0,002* 4 000 000 руб.* 114 дней = 912 000 руб.

Ограничение размера неустойки: 0,15* 4 000 000 руб. = 600 000 руб. Итого неустойка к подрядчику: 600 000 руб. Сумма аванса к зачету в соответствии с п.7.1.1 Договора в размере 37,48% составляет: 4 000 000 руб. * 0,3748= 1 499 200 руб.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 4% в соответствии с п. 5 Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2017 к Договору составляет: 4 000 000 руб. * 0,04 =160 000 руб.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 5% в соответствии с п. 7.1.2 Договора составляет: 4 000 000 руб. * 0,05 = 200 000 руб.

Итого сумма к оплате: 4 000 000 руб. -1 499 200 руб.-160 000 руб.- 200 000 руб. - 600 000 руб. = 1 540 800 руб.

1 540 800 руб.- засчитывается в 100% (руб.) из переплаченного к дате расчетов аванса. Остаток аванса к зачету в размере 37,48 % после удержания: 1 318 461 руб. 99 коп.

Остаток аванса к зачету в 100% размере после удержания 2 684 135 руб. 06 коп. – 1 540 800 руб. = 1 143 335 руб. 06 коп. Платежным поручением №667 от 06.03.2019 оплачено 1 753 051 руб. 58 коп. Итого остаток аванса к зачету в 100% в размере: 2 896 386 руб. 64 коп. (1 753 051 руб. 58 коп. +1 143 335 руб. 06 коп.).

Долг Заказчика при оплате работ по данному этапу отсутствует.

Этап 2.3 «Подготовка исполнительной документации». Цена этапа составляет: 200 000 руб. Срок выполнения этапа работ по договору 30.07.2018. Этап работ был сдан Подрядчиком 14.06.2019. Период просрочки подрядчика: 14.06.2019- 30.07.2018 -13 дней приостановки работ = 306 дней.

Размер неустойки к подрядчику в соответствии с п. 9.1.3 Договора: 0,002* 200000 руб. * 306 дней=122 400 руб. Ограничение размера неустойки: 0,15* 200000 руб .= 30 000 руб.

Итого неустойка к подрядчику: 30 000 руб. Сумма аванса к зачету в соответствии с п.7.1.1 Договора в размере 37,48% составляет: 200000 руб. * 0,3748= 74 960 руб.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 5% в соответствии с п. 7.1.2 Договора составляет: 200 000 руб. * 0,05 =10 000 руб.

Итого сумма к оплате: 200000 руб. -74960 руб.- 10 000 руб. - 30 000 руб. = 85 040 руб. 85 040 руб. засчитывается в 100% (руб.) из переплаченного к дате расчетов аванса. Остаток аванса к зачету в размере 37,48 % после удержания: 1 233 421 руб. 99 коп.

Остаток аванса к зачету в 100% размере после удержания 2 896 386 руб. 64 коп. - 85 040 руб. = 2 811 346 руб. 64 коп.

Долг заказчика при оплате работ по данному этапу отсутствует.

Этап 22 «Сдача газопровода как объекта строительства надзорному органу Государственного Строительного Надзора Ленинградской области». Цена этапа составляет: 2 636 875 руб. 86 коп. * 2/3 = 1 757 917 руб. 24 коп. Срок выполнения этапа работ по Договору: 30.09.2018. Этап работ был сдан подрядчиком: 14.06.2019.

Период просрочки подрядчика: 14.06.2019 -30.09.2018 -13 дней приостановки работ = 244 дня.

Размер неустойки к подрядчику в соответствии с п. 9.1.3 Договора: 0 002* 1 757 917 руб. 24 коп.* 244 дня = 857 863 руб. 61 коп.

Ограничение размера неустойки: 0,15* 1757 917 руб. 24 коп. = 263 687 руб. 59 коп.

Итого неустойка к подрядчику: 263 687 руб. 59 коп.

Сумма аванса к зачету в соответствии с п.7.1.1 Договора в размере 37,48% составляет- 2 636 875 руб. 86 коп. * 0,3748= 988 301 руб. 07 коп.

Сумма удержания из суммы оплаты в размере 5% в соответствии с п. 7.1.2 Договора составляет: 2 636 875 руб. 86 коп. * 0,05 = 87 895 руб. 86 коп.

Итого сумма к оплате: 1 757 917 руб. 24 коп. - 988 301 руб. 07 коп.- 87 895 руб. 86 коп. - 263 687 руб. 59 коп. = 418 032 руб. 72 коп.

418 032 руб. 72 коп. засчитывается в 100% (руб.) из переплаченного к дате расчетов аванса.

Остаток аванса к зачету в размере 37.48 % после удержания: 245 120 руб. 92 коп.

Остаток аванса к зачету в 100% размере после удержания: 2 811 346 руб. 64 коп. - 418 032 руб. 72 коп. = 2 393 313 руб. 92 коп.

Долг заказчика при оплате работ по данному этапу отсутствует.

Таким образом, подлежащий возврату неотработанный аванс составляет 245 120 руб. 92 коп. + 2 393 313 руб. 92 коп. = 2 638 434 руб. 84 коп.

ООО «Прогресс» письмом за исх. № 01-01-19/286 от 25.04.2019, досудебной претензией от 19.08.2019 направляло ООО «Скала Строй» уведомление о применении штрафных санкций по Договору на основании пункта п. 9.1.3.

При оценке допустимости удержания неустойки за предшествующие периоды, суд полагает возможным по аналогии с прекращением обязательства зачетом применить разъяснения, изложенные определении Верховного Суда Российской Федерации от 16.08.2018 по делу N 305-ЭС18-3914, согласно которым подача заявления о зачете является выражением воли стороны односторонней сделки на прекращение встречных обязательств и одновременно исполнением требования закона, установленного к процедуре зачета (статьи 154, 156, 410 Гражданского кодекса Российской Федерации). Дата такого заявления не влияет на момент прекращения обязательства, который определяется моментом наступления срока исполнения того обязательства, срок которого наступил позднее (пункт 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 N 65 "Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований").

При зачете нет принципиальных различий по правовым последствиям для лица, исполнившего обязательство по договору, и лица, обязательство которого прекращено зачетом в порядке статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этой связи начисление неустойки на сумму погашенного зачетом требования за период с наступления срока исполнения более позднего обязательства до подачи заявления о зачете, не соотносится с назначением неустойки как ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Учитывая данные разъяснения, суд отклоняет доводы Истца об отсутствии у заказчика права единовременно удержать неустойку за предшествующие периоды.

Таким образом, согласно расчету Ответчика общий размер неустойки, подлежащей удержанию с Истца при оплате работ, составляет 10 403 518 руб. 63 коп., неотработанный аванс составляет 2 638 434 руб. 84 коп.; неустойка, начисленная Ответчику за просрочку оплаты, составляет, 396 909 руб. 53 коп.; штраф, начисленный Ответчику за просрочку оплаты, составляет 349 601 руб. 09 коп. 

Подробный расчет неустойки и штрафа за нарушение сроков оплаты приведен в представленной Ответчиком таблице.

Согласно статье 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Поскольку оснований для удержания переплаченного аванса Истец не имеет, то он должен быть возращен Ответчику.

Таким образом, в пользу Истца с Ответчика подлежит взысканию 396 909 руб. 53 коп. неустойки, 349 601 руб. 09 коп. штрафа (в соответствии с пунктами 9.3.3., 15.3 Договора, статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации). В пользу Ответчика с Истца подлежит взысканию 2 638 434 руб. 84 коп. переплаченного аванса (неосновательное обогащение) применительно к положениям статьи 1102 Гражданского кодекса РФ.

В силу п. 18.5 Договора подрядчик не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания Договора обязан заключить договор страхования гражданской ответственности, на сумму, равную стоимости работ, и в этот же срок предоставить заказчику заверенную печатью подрядчика копию такого договора.

Срок исполнения обязательства по передаче договора страхования составляет: 18.12.2018+30 дней = 16.01.2018. Срок фактического исполнения обязательств подрядчиком: 14.02.2018, в связи с чем период просрочки исполнения подрядчиком обязательства, установленного п. 18.5 Договора, составил: 14.02.2018 - 16.01.2018 = 29 дней.

Размер неустойки в соответствии с п. 15.1 Договора за просрочку заключения подрядчиком договора страхования согласно расчету Ответчика составил: 85 016 903 руб. 38 коп. (стоимость фактически выполненных работ по Договору) *0,2%* 29 дней=4 930 980 руб. 49 коп.

Между тем данное требование Ответчика по встречному иску подлежит отклонению в силу того, что буквальное толкование Договора не позволяет бесспорно определить размер начисляемой неустойки за указанное нарушение Договора. 

Согласно п. 15.1. Договора за нарушение сроков заключения подрядчиком договора страхования предусматривается начисление неустойки в размере 0,2% от цены этапа работ за каждый календарный день просрочки. Однако условиями Договорам не предусмотрено отнесение обязанности по заключению договора страхования к какому-либо этапу работ, в связи с чем не представляется возможным определить сумму, от которой необходимо произвести расчет штрафа (статья 331 Гражданского кодекса Российской Федерации). Произведенный Ответчик расчет штрафа от всей суммы Договора нельзя признать обоснованным.

Суд также не усматривает оснований для снижения размера начисленных штрафных санкций.

Согласно пункту 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Из анализа пунктов 75, 77 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации", пункта 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 N 17 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации", позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определениях от 14.10.2004 N 293-О, от 15.01.2015 N 6-О и N 7-О, следует, что основанием для снижения в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации предъявленной к взысканию неустойки может быть только ее явная несоразмерность последствиям нарушения обязательства, которая должна быть доказана лицом, заявляющим о снижении размера неустойки. 

Стороны в нарушение требований части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ не представил доказательств явной несоразмерности сумм неустоек, штрафа последствиям нарушения обязательства.

Стороны в соответствии с принципом свободы договора подписали Договор на изложенных в нем условиях относительно размера ответственности.

Учитывая, что стороны при заключении Договора действовали добровольно и, следовательно, должны были предвидеть соответствующие неблагоприятные последствия несвоевременного исполнения своих обязательств, а также принимая во внимание соотношение цены Договора и размера неустоек, суд не усматривает явной несоразмерности неустойки и штрафа последствиям нарушения обязательства и не находит оснований для уменьшения их размера.

Расходы по делу распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально размеру удовлетворенных судом требований.

Таким образом, по первоначальному иску с ООО «Прогресс» в пользу ООО «Скала Строй» следует взыскать 396 909 руб. 53 коп. неустойки, 349 601 руб. 09 коп. штрафа, а также 4 673 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

 В удовлетворении остальной части первоначального иска надлежит отказать. По встречному иску с ООО «Скала Строй» в пользу ООО «Прогресс» следует взыскать 2 638 018 руб. 84 коп. неосновательного обогащения, а также 21 206 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части встречного иска необходимо отказать.

Согласно части 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса РФ при полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной части решения указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета.

В результате зачета удовлетворенных требований сторон с ООО «Скала Строй» в пользу ООО «Прогресс» следует взыскать 1 908 041 руб. 22 коп.

ООО «Скала Строй» из федерального бюджета следует возвратить 15 319 руб. государственной пошлины по первоначальному иску применительно к положениям статьи 333.40 Налогового кодекса РФ. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "СКАЛА СТРОЙ" 396 909 руб. 53 коп. неустойки, 349 601 руб. 09 коп. штрафа, 4 673 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СКАЛА СТРОЙ" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС" 2 638 018 руб.                 84 коп. неосновательного обогащения, 21 206 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части встречного иска отказать.

В результате зачета удовлетворенных требований сторон взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СКАЛА СТРОЙ" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС" 1 908 041 руб. 22 коп.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "СКАЛА СТРОЙ" из федерального бюджета 15 319 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Коросташов А.А.