АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Рокоссовского, д. 2, г. Калининград, 236040 http://www.kaliningrad.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 Дело № А21-7 512 /2020 

25 мая 2023 года г. Калининград 

Руководствуясь статьями 106, 110, 112, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Калининградской области  

Р Е ШИ Л:

Исковые требования администрации Советского городского округа  удовлетворить полностью.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМ- МОНОЛИТ» в двух месячный срок с момента вступления в законную силу  решения суда устранить за счёт собственных средств строительные недостатки  (дефекты) в выполненных работах по муниципальному контракту №  0135200000519002572 от 26.07.2019 в городе Советске Калининградской области, а  именно:  

На участке от улицы Герцена до переулка Янтарный (фрагмент территории  набережной «В» согласно проектной документации):  

- заполнить песком швы между брусчаткой площадью 93,5 м²; 

- устранить просадку тротуарной плитки на въезде на территорию  набережной между домами № 11 и № 15 по ул. Набережной в объеме 0,14 м²;  

- устранить уступы между покрытием из плитки из резиновой крошки и  тротуарной плиткой детской площадки № 2 и спортивной площадки № 3 на  площади 423,98 м²;  

- дефект в виде несоответствия бетонной плиты детской площадки № 2  строительным нормам устранить путём полной переделки объекта спортивной  площадки № 2 в соответствии с проектной документацией;  

- устранить просадку покрытия из тротуарной плитки толщиной 80 мм  технического проезда по пер. Янтарный на площади 9,6 м²;  

- выполнить обустройство слоя из песчано-гравийной смеси толщиной 150  мм под покрытием из плитки толщиной 80 мм проезда пер. Янтарный - ул.  Набережная на площади 67,8 м²;  

На участке от пер. Янтарный до ул. Мамина-Сибиряка (фрагмент территории  набережной «С» согласно проектной документации):  

- устранить уступы между покрытием из плитки из резиновой крошки и  тротуарной плиткой спортивной площадки № 1 на площади 535,91 м²;  

- устранить сдвиг тротуарной плитки толщиной 60 мм и швы между этими  плитками в местах примыкания тротуарной плитки к брусчатке фонтана площадью  25,72 м²;  

- выполнить обустройство слоя из песчано-гравийной смеси толщиной не  мене 300 мм под покрытием из тротуарной плитки в месте примыкания тротуарной  плитки к брусчатке фонтана на площади 25,72 м²;  

- устранить зазор вдоль подпорной стены между покрытием из тротуарной  плитки и резиновой плитки со стенкой подпорной стены 1,5 м²;  

На участке от ул. Мамина-Сибиряка до площадки № l (фрагмент территории  набережной D, E, F согласно проектной документации):  

- устранить колейность тротуарной плитки толщиной 80 мм на участке  проезда фрагмента D путём разбора покрытия из плитки, устройства песчано-цементного слоя 50 мм, песчаного слоя из песка по ГОСТ 87367-93* толщиной 150  мм и песчано-гравийной смеси толщиной 150 мм на участке площадью 636,47 м²;  

- устранить уступы между покрытием из плитки из резиновой крошки и  тротуарной плиткой спортивной площадки № 2 на площади 104,42 м²;  

- устранить просадку тротуарной плитки на площадках № 1 и № 2 в объёме  12 м²;  

Общие работы по объектам: 

- установить фасонные элементы нестандартных двух туалетов по периметру  дверного блока в количестве 1 блок, по периметру оконных блоков с внутренней  стороны в количестве 5 блоков;  

- установить наружный водоизоляционный и внутренний пароизоляционный  слои монтажного шва нестандартных двух туалетов по периметру дверного блока в  количестве 1 блок, по периметру оконных блоков с внутренней стороны в  количестве 5 блоков;  

- устранить отслоение окрасочного слоя деревянных конструкций стропил  крытых променадов вызванных некачественной подготовкой деревянных  

конструкций к окраске путем удаления старой окраски, подготовки деревянных  конструкций к окраске и выполнении окраски на площади 224 м²;  

- устранить коррозию стальных элементов каркаса пергол путём удаления  окрасочного слоя, удаления следов коррозии, подготовки стальных конструкций к  окрашиванию, окраски площадью 32 м²;  

- устранить отслоение окрасочного слоя деревянных конструкций стропил  пергол путём удаления старой окраски, подготовки деревянных конструкций к  окраске и выполнении окраски на площади 167,24 м²;  

- устранить коррозию стальных элементов ограждения подпорных стен  путём удаления окрасочного слоя, удаления следов коррозии, подготовки стальных  конструкций к окрашиванию, окраски площадью 33 м².  

- устранить дефекты системы наружного освещения: 

a) выполнить соединения в опорах осветительных и распределительной  коробке (фрагмент D) в соответствии с требованиями проектной документации (без  скруток);  

б) провести пуско-наладку. 

В случае неисполнения решения суда по делу № А21-7512/2020 взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМ-МОНОЛИТ» в пользу  администрации Советского городского округа судебную неустойку в размере 5000  рублей за каждый день, начиная со следующего дня с момента истечения  установленного для исполнения судебного решения двухмесячного срока, по день  исполнения обязательств полном в объёме.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМ- МОНОЛИТ» в пользу администрации Советского городского округа в возмещение  расходов по оплате экспертизы 276 000 рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМ- МОНОЛИТ» в доход федерального бюджета 6000 рублей государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный срок  со дня его принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Калининградской области.  

 Судья М.С. Глухоедов 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 05.05.2023 8:52:00Кому выдана Глухоедов Максим Сергеевич