56/2023-39062(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А13-1198/2023

город Вологда

05 апреля 2023 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 04 апреля 2023 года Полный текст решения изготовлен 05 апреля 2023 года 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Поповой С.В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  Департамента лесного комплекса Вологодской области к обществу с  ограниченной ответственностью «Экспо Лес» об обязании в срок до 01.09.2023  выполнить обязательства по договору аренды лесного участка от 01.08.2008 №  02-02-16/68-2008 в части исполнения обязательств по выполнению работ по  охране, защите и воспроизводству лесов на арендованном лесном участке,  

при участии от истца ФИО2 по доверенности от 10.11.2022,  

у с т а н о в и л:

Департамент лесного комплекса Вологодской области (далее –  Департамент, истец) обратился в Арбитражный суд Вологодской области с  иском к обществу с ограниченной ответственностью «Экспо Лес» (далее – ООО  «Экспо Лес», ответчик) о возложении на ответчика обязанности в срок до 01  сентября 2023 года выполнить следующие обязательства по договору аренды  лесного участка от 01.08.2008 № 02-02-16/68-2008 в части исполнения  обязательств по выполнению работ по охране, защите и воспроизводству лесов  на арендованном лесном участке:  

1) естественное лесовосстановление – в объеме 97 га; 2)  комбинированное лесовосстановление – в объеме 3,8 га; 3) агротехнический  уход за лесными культурами – объеме 64,8 га; 4) обработка почвы под лесные  культуры будущего года – в объеме 87,1 га; 5) лесоводственный уход за  лесными культурами – в объеме 102,40 га; 6) рубки ухода за молодняками  (осветление и прочистки) – в объеме 13,20 га, а также выполнить работы по  лесовосстановлению на следующих площадях:  

1. Мотомское участковое лесничество, квартал 155, выдел 13, площадь  2,0 га (естественным способом лесовосстановления);  

2. Мотомское участковое лесничество, квартал 52, выдел 10, площадь 5,2  га (искусственным способом лесовосстановления);  

3. Мотомское участковое лесничество, квартал 52, выдел 6,8, площадь 3,5  га (искусственным способом лесовосстановления);  

4. Мотомское участковое лесничество, квартал 154, выдел 28, площадь  3,8 га (естественным способом лесовосстановления);  

5. Мотомское участковое лесничество, квартал 35, выделы 17, 18,  площадь 7,0 га (естественным способом лесовосстановления);  

6. Мотомское участковое лесничество, квартал 159, выделы 25, 26, 27, 30,  35, 36, площадь 14,5 га (искусственным способом лесовосстановления);  

7. Мотомское участковое лесничество, квартал 54, выдел 6, площадь 1,8  га (искусственным способом лесовосстановления);  

8. Мотомское участковое лесничество, квартал 20, выделы 8, 9, площадь  7,5 га (искусственным способом лесовосстановления),  

Требования указаны с учетом уточнения исковых требований, принятого  судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации (далее – АПК РФ).  

В обоснование своих требований ссылается на нарушение ответчиком  лесного законодательства и условий договора аренды лесного участка, статьи  61, 62 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ), статьи 309,  310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).  

Представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме.  

Ответчик извещен надлежащим образом о месте и времени судебного  разбирательства, отзыв на иск не представил.  

После завершения предварительного судебного заседания дело  рассмотрено по существу в соответствии с пунктом 4 статьи 137, статьей 156  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК  РФ) в отсутствие ответчика.  

Исследовав материалы дела и оценив собранные по делу доказательства,  заслушав пояснения представителя истца, суд считает, что исковые  требования подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим  основаниям.  

Как следует из материалов дела, 01 августа 2008 года Департаментом  лесного комплекса Вологодской области (далее – Департамент, Арендодатель)  с обществом с ограниченной ответственностью «Эспа» заключен договор  аренды лесного участка № 02-02-16/68–2008 (далее – Договор),  зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области 15 октября 2008  года за регистрационным номером 35-35-13/020/2008-445 с целью  осуществления заготовки древесины.  

Дополнительным соглашением к Договору от 18 мая 2010 года общество  с ограниченной ответственностью «Эспа» передало все права и обязанности по  Договору обществу с ограниченной ответственностью «Экспо Лес» (далее –  ООО «Экспо Лес», Арендатор).  

Срок действия Договора до 22 сентября 2031 года (пункт 24 Договора).  

По акту приема-передачи лесного участка в аренду (приложение № 5 к  Договору) лесной участок передан Арендатору.  

Все приложения к Договору ( №№ 1-7) являются его неотъемлемой  частью.  

Схема расположения и границы участка, приведены в приложении № 1 к  договору аренды, характеристики лесного участка и его насаждений - в  приложении № 2 к договору аренды, цели и объемы использования лесов – в  приложении № 3, сроки внесения арендной платы – в приложении № 4, акт  приема-передачи лесного участка – в приложении № 5, объемы работ по  охране, защите и воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом  лесном участке – в приложении № 6, расчет арендной платы за пользование  лесным участком – в приложении № 7.  

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 11 Договора Арендатор обязан  осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия, лесовосстановление и  уход за лесом на лесном участке на условиях, в объемах и сроки, которые  указаны в Проекте освоения лесов и приложении № 6.  

Подпунктом «з» пункта 11 Договора установлено, что Арендатор обязан  сдать по окончанию сроков выполнения работ по охране, защите и  воспроизводству на арендуемом лесном участке, согласно приложению № 6 к  настоящему договору, указанные работы, на основании Акта выполненных  работ, с подписанием данного Акта уполномоченными представителями сторон  настоящего Договора. Приемка выполненных работ осуществляется в  соответствии с графиком сдачи-приемки работ, ежегодно устанавливаемого  соглашением сторон.  

Согласно приложению № 6, которое является неотъемлемой частью к  Договору, Арендатор принял на себя обязательства по выполнению работ по  охране, защите и воспроизводству лесов на арендуемом лесном участке.  

В 2022 году Череповецким территориальным отделом-государственном  лесничеством Департамента был составлен график сдачи-приемки работ на  2022 год по охране, защите и воспроизводству лесов на лесном участке,  переданном по Договору ООО «Экспо Лес». График был согласован сторонами.  Согласно данному графику ООО «Экспо Лес» обязано было выполнить в  период апрель-октябрь 2022 года на арендном участке следующие виды работ:  

 №  п/п  

Вид работ 

План  

Срок 

выполнения  

Местоположение  

Дата 

приемки  

1 

Устройство минерализованных полос 

1,8 км.  

май 2022 г.  

Кубинское у/л: 

кв.155,156,172,173,  

15.06.2022 г.  

2 

Уход за минерализованными  полосами  

0,8 км.  

май 2022 г.  

Кубинское 

у/л:155,156,172,173  

15.06.2022 г.  

3 

Установка противопожарных  аншлагов  

1 шт.  

 май 2022 г.  

Мотомское у/л кв.232  в.18  

15.06.2022 г.  

4 

Благоустройство мест отдыха  для граждан  

2 шт.  

Май 2022 г.  

Кубинское у/л;кв.173  в.23  

Мотомское у/л кв.232  в.18  

15.06.2022 г.  

 

5 

Строительство дорог  противопожарного  

назначения 

0,12 км.  

сентябрь2022 г.  

Мотомское у/л кв.222  в.4,15,16,20  

18.10.2022 г.  

6 

Реконструкция дорог,  предназначенных для охраны  

лесов от пожаров 

0,24 км  

сентябрь 2022 г.  

Кубинское у/л;  Мотомское у/л кв.222  

в.4,15,16,20 

18.10.2022 г.  

7 

Прочистка квартальных  просек  

2,4 км.  

сентябрь 2022 г.  

Мотомское у/л  кв.:15-29  

27.10.2022 г.  

8 

Организация пункта  сосредоточения  

противопожарного 

оборудования и инвентаря  

1 шт.  

Февраль-март  

2022 г.  

Череповецкий р-он,  Ягановский с/с,  

д. Угрюмово 

17.03.2022 г.  

9 

Всего лесовосстановления в  2022 г.  

159,9 га  

 Апрель- сентябрь 2022г.  

Кубинское у/л:  Мотомское у/л:  

20.09.2022 г.  

9.1  

Искусственное 

лесовосстановление*  

21,0 га  

Май-сентябрь  

2022 г.  

Кубинское у/л:  Мотомское у/л  

20.09.2022 г.  

9.2  

Естественное 

лесовосстановление *  

116,40 га  

Апрель- сентябрь 2022 г.  

Кубинское у/л;  Мотомское у/л  

20.09.2022г.  

9.3  

Комбинированное 

лесовосстановление*  

22,5 га  

 Апрель- сентябрь 2022г.  

Кубинское у/л:  Мотомское у/л:  

20.09.2022 г.  

10  

Агротехнический уход за  лесными культурами  

137,0 га  

 Май-сентябрь  

2022 г.  

Кубинское у/л:  

20.09.2022г.  

11  

Обработка почвы под лесные  культуры будущего года **  

87,1 га  

Апрель-  октябрь 2022г.  

Кубинское у/л;  Мотомское у/л  

10.10.2022 г.  

12  

Лесоводственный уход за  лесными культурами  

102,40 га  

Апрель- сентябрь 2022  

Кубинское у/л;  Мотомское у/л  

20.09.2022 г.  

13  

Рубки ухода за молодняками  (осветление и прочистки)  

13,20 га/ 

106 м³  

 Март-сентябрь  

2022г. 

Кубинское у/л;  Мотомское у/л  

10.10.2022г.  

Однако в срок, установленный графиком сдачи-приемки работ, работы  выполнены не в полном объеме, а именно на 03 февраля 2023 года не  выполнены следующие виды работ: естественное лесовосстановление – 97 га;  комбинированное лесовосстановление – 3,8 га; агротехнический уход за  лесными культурами – 64,8 га; обработка почвы под лесные культуры будущего  года – 87,1 га; лесоводственный уход за лесными культурами – 102,40 га; рубки  ухода за молодняками (осветление и прочистки) – 13,20 га.  

Приложением к графику сдачи-приемки работ определен перечень мест  выполнения работ по лесовосстановлению на лесном участке, переданном в  аренду по Договору на 2022 год.  

В соответствии с данным перечнем ООО «Экспо Лес» обязано было  выполнить работы по лесовосстановлению на следующих площадях:  

1. Мотомское участковое лесничество, квартал 155, выделы 11/1, 13/1,  площадь 2,6 га, вырубка 2014 г.  

2. Мотомское участковое лесничество, квартал 52, выдел 10/1, площадь  5,2 га, вырубка 2019 г.  

3. Мотомское участковое лесничество, квартал 52, выделы 6/1, 8/1,  площадь 3,5 га, вырубка 2019 г.  

4. Мотомское участковое лесничество, квартал 154, выделы 17/1, 28/2,  площадь 4,7 га, вырубка 2016 г.  

5. Мотомское участковое лесничество, квартал 35, выделы 17/1, 18/1,  площадь 7,0 га, вырубка 2016 г.  

6. Мотомское участковое лесничество, квартал 47, выделы 4/1, 6/1,  площадь 3,8 га, вырубка 2015 г.  

7. Мотомское участковое лесничество, квартал 159, выделы 25/1, 26/1,  27/1, 30/1, 35/1, 36/1, площадь 14,5 га, вырубка 2018 г.  

8. Мотомское участковое лесничество, квартал 54, выдел 6/1, площадь 1,8  га, вырубка 2019 г.  

9. Мотомское участковое лесничество, квартал 20, выделы 8/1, 9/1,  площадь 9,4 га, вырубка 2019 г.  

Однако на 03 февраля 2023 года проекты лесовосстановления на данные  площади арендатором не предоставлены, работы по лесовосстановлению не  выполнены, что подтверждается актами сдачи-приемки выполненных ООО  «Экспо Лес» работ в 2022 году, служебной запиской ведущего специалиста  Череповецкого территориального отдела – государственного лесничества  Департамента ФИО3  

Вместе с тем, 07 ноября 2022 года в адрес арендатора Департаментом  было направлено претензионное письмо по факту невыполнения работ и  начислении неустойки в размере 187 150 руб. 99 коп. за неисполнение  договорных обязательств в части выполнения работ по охране, защите,  воспроизводству лесов. Неустойка в размере 187 150 руб. 99 коп. Арендатором  оплачена 07 декабря 2022 года, обязательства в части выполнения работ по  воспроизводству лесов Арендатором до настоящего времени не исполнены, что  послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.  

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ, обязательства должны  исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и  требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно  предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения  обязательства не допускается.  

Согласно статье 83 Лесного кодекса Российской Федерации органам  государственной власти субъектов Российской Федерации переданы  полномочия Российской Федерации в области лесных отношений но  предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных участков в  постоянное бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное  пользование, а также заключению договоров купли-продажи лесных  насаждений, в том числе организации и проведению соответствующих  аукционов, а также осуществлению федерального государственного лесного  надзора (лесная охрана) и федерального государственного пожарного надзора в  лесах.  

В соответствии с Положением о Департаменте лесного комплекса  Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства  Вологодской области от 24.09.2012 № 1108 Департамент является постоянно  действующим органом исполнительной государственной власти области в  сфере организации и обеспечения использования, охраны, защиты и  

воспроизводства лесов на землях лесного фонда, ведения государственного  лесного реестра, осуществления федерального государственного лесного  надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в  лесах, обеспечения инвестиционного и инновационного развития  лесопромышленного комплекса области.  

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих  требований и возражений.  

Согласно статье 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск  наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных  действий.  

Обязанность ответчика по выполнению работ по охране, защите и  воспроизводству лесов предусмотрена договором, ответчиком не исполнена,  что подтверждается материалами дела.  

Обоснованных возражений на иск, доказательств надлежащего  исполнения договорных обязательств ответчиком в материалы дела не  представлено.  

Одним из способов защиты гражданских прав, предусмотренных статьей  12 ГК РФ, является присуждение к исполнению обязанности в натуре.  

В силу статьи 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему  усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.  Возможность исполнения установленных подпунктами «ж» и «з» пункта 11  договора аренды лесного участка обязанностей по выполнению работ по  охране, защите и воспроизводству лесов и сдачи по окончанию сроков  выполнения работ по акту Арендодателю Арендатором не утрачена.  

При таких обстоятельствах, исковые требования подлежат  удовлетворению в полном объеме.  

В связи с удовлетворением иска и с учетом того, что истец освобожден от  уплаты государственной пошлины при подаче иска, по правилам статьи 110  АПК РФ государственную пошлину следует взыскать с ответчика в доход  федерального бюджета.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области  

р е ш и л :

обязать общество с ограниченной ответственностью «Экспо Лес» в срок  до 01 сентября 2023 года выполнить следующие обязательства по договору  аренды лесного участка от 01.08.2008 № 02-02-16/68-2008 в части исполнения  обязательств по выполнению работ по охране, защите и воспроизводству лесов  на арендованном лесном участке:  

1) естественное лесовосстановление – в объеме 97 га; 2)  комбинированное лесовосстановление – в объеме 3,8 га; 3) агротехнический  уход за лесными культурами – объеме 64,8 га; 4) обработка почвы под лесные  

культуры будущего года – в объеме 87,1 га; 5) лесоводственный уход за  лесными культурами – в объеме 102,40 га; 6) рубки ухода за молодняками  (осветление и прочистки) – в объеме 13,20 га, а также выполнить работы по  лесовосстановлению на следующих площадях:  

1. Мотомское участковое лесничество, квартал 155, выдел 13, площадь  2,0 га (естественным способом лесовосстановления);  

2. Мотомское участковое лесничество, квартал 52, выдел 10, площадь 5,2  га (искусственным способом лесовосстановления);  

3. Мотомское участковое лесничество, квартал 52, выдел 6,8 площадь 3,5  га (искусственным способом лесовосстановления);  

4. Мотомское участковое лесничество, квартал 154, выдел 28, площадь  3,8 га (естественным способом лесовосстановления);  

5. Мотомское участковое лесничество, квартал 35, выделы 17, 18,  площадь 7,0 га (естественным способом лесовосстановления);  

6. Мотомское участковое лесничество, квартал 159, выделы 25, 26, 27, 30,  35, 36 площадь 14,5 га (искусственным способом лесовосстановления);  

7. Мотомское участковое лесничество, квартал 54, выдел 6, площадь 1,8  га (искусственным способом лесовосстановления);  

8. Мотомское участковое лесничество, квартал 20, выделы 8, 9 площадь  7,5 га (искусственным способом лесовосстановления).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Экспо Лес» в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.  

Решение суда может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия судебного акта.  

Судья С.В. Попова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 16.03.2022 4:53:00

Кому выдана Попова Светлана Васильевна