1476/2020-346133(2) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 22 декабря 2020 года 

по делу А33-25281/2019 Красноярск 

15 декабря 2020 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Рос- сийской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Идеал-Строй» в пользу му- ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Рождественской средней  общеобразовательной школы 112 979,75 руб. неустойки за нарушение срока выполнения  работ за период с 21.09.2018 по 25.10.2018, 213 764,01 руб. убытков в виде понесенных  заказчиком расходов на подвоз учащихся, 7 022,23 руб. судебных расходов по оплате гос- ударственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Взыскать с муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Рожде- ственской средней общеобразовательной школы 700 руб. государственной пошлины в до- ход федерального бюджета.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжало- вано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Е.Р. Смольникова