Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-25341/2022

15 марта 2023 г.

г. Челябинск

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Малыхина В.В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем Бачановой В.В.,  рассмотрев в открытом судебном заседании  

дело по иску муниципального казенного учреждения «Служба  жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры», ОГРН:  1047414000600, с. Еткуль Челябинской области, к индивидуальному  предпринимателю Ермолаеву Николаю Сергеевичу, ОГРНИП:  319745600136106, г. Челябинск, при участии в деле в качестве третьего лица,  не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,  Контрольно-счетную палату Челябинской области, ОГРН 1027403889710, г.  Челябинск, общества с ограниченной ответственностью «АгроИнвестСтрой»,  ОГРН 1127453012158, г. Челябинск, о возложении обязанности исполнить  муниципальный контракт,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать индивидуального предпринимателя Ермолаева Николая  Сергеевича, ОГРНИП: 319745600136106, в течение двух месяцев с момента  вступления в силу решения выполнить работы по муниципальным  контрактам, а именно:  

- по муниципальному контракту № 9 от 31.03.2021 выполнить работы  по подготовке посадочных мест (ям, 138), посадка кустарников-саженцев в  живую изгородь (шт, 141), рыхление вокруг саженцев (шт, 141), выявленные  в соответствии с актом № 1 от 13.04.2022 контрольного обмера работ на  объекте «Благоустройство дворовой территории по адресу: Челябинская  область, Еткульский район, с. Еткуль, пер. 10, д.3»;  

- по муниципальному контракту № 6 от 31.03.2021 выполнить работы  по устройству наброски из щебня (м3, 6), резке обсадочных труб диаметром  до 720 мм (резка, 5), выявленные в соответствии с актом № 4 от 12.04.2022  контрольного обмера объемов работ на объекте «Благоустройство тротуара  

вблизи ул. Набережная д. Печенкино Еткульского района Челябинской  области»;  

- по муниципальному контракту № 11 от 03.11.2020 выполнить работы  по устройству бетонной подготовки (м3, 1,41 частично не забетонированы  ножки скамеек), выявленные в соответствии с актом № 3 от 12.04.2022  контрольного обмера объемов работ на объекте «Благоустройство дворовой  территории по ул. Центральная, д. 10, 12, 14, 16, 18, 20 п. Новобатурино  Еткульского муниципального района Челябинской области»;  

- по муниципальному контракту № 9 от 03.11.2020 выполнить работы  по устройству асфальтобетонных покрытий (м2, 8,8), выявленные в  соответствии с актом № 2 от 12.04.2022 контрольного обмера объемов работ  на объекте «Благоустройство дворовых территорий домов № 15, 16, 18 по ул.  Октябрьская в с. Еманжелинка Еткульского района Челябинской области».  

Взыскать индивидуального предпринимателя Ермолаева Николая  Сергеевича, ОГРНИП: 319745600136106, в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия  (изготовления в полном объеме) в апелляционную инстанцию –  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы  через Арбитражный суд Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Судья В.В. Малыхина  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы  можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного  суда http://18aas.arbitr.ru.