1012/2023-248603(2) 

 

Арбитражный суд Тамбовской области 

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Тамбов «29» июня 2023 года Дело № А64-1154/2023 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе: судьи Тишина А.А.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Горшевской Л.В. рассмотрел в судебном заседании дело № А64-1154/2023 по исковому заявлению Комитета дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова Тамбовской области 

Тамбовская обл., г.Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  к Обществу с ограниченной ответственностью "ДорСтройСервис"  

Тамбовская обл., г.Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  об обязании устранить дефекты, взыскании 543 108,46 руб.  

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1 – представитель, доверенность от 10.11.2022г.  от ответчика: не явился, извещен  

Отводов не заявлено. Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕШИЛ: 

1. Исковые требования удовлетворить в полном объеме 

2. Обязать Общество с ограниченной ответственностью "ДорСтройСервис"  (

<

...>/4, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу  устранить выявленные зафиксированные дефекты асфальтобетонного покрытия на  автомобильной дороге по ул. Сергеева-Ценского на участке от ул. Набережной до ул.  Железнодорожной, ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Пролетарской до ул.  Железнодорожной, ул. Пензенская на участке от ул. Советской до ул. Мичуринской, ул.  Южная на участке от ул. Астраханской до ул. Уральской в городе Тамбове, а именно:  

ул. Пензенская от ул. Советской до ул. Мичуринской: раскрытие осевого и  поперечного шва на стыке с ул. Советской, а также у д. № 61; раскрытие шва на стыке с ул.  К. Маркса;  

ул. Ф.Энгельса от ул. Пролетарской до ул. Железнодорожной:  

раскрытие шва на стыке с ул. Железнодорожной; образование продольных трещин в  прикромочной зоне в районе пересечения с ул. Железнодорожной; не заделаны места  отбора проб; разрушение а/б покрытия на съезде на ул. им. А. Гайдара;  

ул. Южная от ул. Астраханской до ул. Уральской (тротуар): разрушение кромки а/б  покрытия на тротуаре в районе дома 12; 2 поперечные трещины у дома 48; выкрашивание  а/б покрытия в районе дома 21; продольная трещина в районе дома 13;  

ул. Сергеева-Ценского: завал борта в районе дома 34 на парковке; выкрашивание  а/б покрытия на тротуаре в районе 34 дома; выкрашивание а/б покрытия и раскрытие  

29 июня 2023 года 

поперечного шва между д. 1 и д.3; просадка плиточного покрытия вокруг колодца на  съезде к гимназии № 12; раскрытие шва на примыкании к ул. Советской; занижен колодец  на проезжей части в районе дома № 12 к. 3; просадка технического тротуара на съезде к  дому № 5; раскрытие швов па примыкании к ул. Набережной; занижение колодца на  проезжей части в районе 36 дома; раскрытие шва на съезде к д. № 26; раскрытие осевого  шва от ул. Советской до д. 26; раскрытие шва на примыкании к ул. Советской; скопление  дождевых и талых вод на тротуаре в районе дома № 23; занижен люк на проезжей части в  районе д. № 23; продольная трещина на тротуаре в районе д. № 25; продольная трещина  на тротуаре в районе д. № 37; скопление воды на тротуаре в районе д. № 39; провал  технического тротуара у дома 41 механическим воздействием; раскрытие шва осевого на  примыкании с ул. К.Маркса; занижены решетки ливневой канализации (2шт.) на  примыкании к ул.К.Маркса; скопление дождевых и талых вод на примыкании к ул.  К.Маркса; трещины у д. № 68 на тротуаре; выкрашивание а/б в районе дома 74 на  проезжей части; на пешеходном тротуаре выкрашивание а/б и провал в районе д. № 106;  разрушение продольного и осевого шва на съезде на ул. Пролетарскую; провал а/б на  тротуаре в районе д. № 89; скопление дождевых и талых вод на тротуаре в районе д. № 47  и 81; у дома 113А разрушение кромки а/б покрытия на проезжей части; просадка а/б  покрытия в районе д. 116А на проезжей части; разрушение кромки в районе д. 129А;  просадка колодца в районе д. № 135А; раскрытие осевого шва на примыкании к ул.  Железнодорожной; выкрашивание а/б на тротуаре в районе д. № 122.  

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ДорСтройСервис"  (

<

...>/4, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6 000 руб.  

4. Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в течение одного месяца со  дня принятия в Девятнадцатый апелляционный арбитражный суд (394006, Воронеж, ул.  Платонова, дом 8), а также в порядке кассационного обжалования в Арбитражный суд  Центрального округа в течении двух месяцев со дня его вступления в законную силу,  через арбитражный суд Тамбовской области.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайтах  Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда Арбитражного суда Центрального  округа.  

Судья Тишин А.А. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 04.04.2023 11:10:00

Кому выдана Тишин Андрей Александрович