Арбитражный суд Краснодарского края

350000, г. Краснодар, ул. Постовая, 32

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Краснодар

«21» марта 2024 года                                                              Дело № А32-46187/2023

 

Резолютивная часть решения суда объявлена 02.02.2024

Полный текст решения суда изготовлен 21.03.2024

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Хмелевцевой А.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Засько Я.Ю. рассмотрев в судебном заседании дело общества с ограниченной ответственностью «Икс Системс» (ИНН 

<

***> ОГРН: 

<

***>) г. Хабаровск

к обществу с ограниченной ответственностью «Партнер-Строй»  (ИНН 

<

***>

 ОГРН: 

<

***>) г. Краснодар 

о взыскании задолженности по договорам субподрядам в размере 6 318 297,12 руб.

 

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 – доверенность, ФИО2 – доверенность,

от ответчика: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Икс Системс» (ИНН 

<

***> ОГРН: 

<

***>) г. Хабаровск обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Партнер-Строй»  (ИНН 

<

***> ОГРН: 

<

***>) г. Краснодар о взыскании задолженности по договорам субподрядам в размере 6 318 297,12 руб.

Основания требований изложены в исковом заявлении.

Представитель истца в судебном заседании поддержал позицию, изложенную в исковом заявлении. 

В судебном заседании объявлен перерыв до 09:00 02.02.2024. По окончании перерыва судебное заседание продолжено. Стороны явку в судебное заседание не обеспечили, истец направил ходатайство об уточнении требований, согласно которому просил взыскать с ответчика в свою пользу  задолженность в размере 5 965 754,82 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины. Ходатайство истца судом рассмотрено и удовлетворено в порядке ст. 49 АПК РФ.

            Ответчик, надлежащим образом уведомленный о времени и месте, явку представителя в судебное заседание не обеспечил.

            Дело подлежит рассмотрению согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

В соответствии с частью 2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Как следует из материалов дела, 10.06.2022 между истцом и ответчиком заключены 2 договора субподряда № ПС-10-1/06-22 (Литер 11), № ПС-10-2/06-22 (Литер 12), на выполнение работ по заполнению проемов на Объектах: Жилой квартал «Красная площадь», расположенный по ул. Конгрессная в г. Краснодаре, Многоэтажный жилой дом Литер 12 и Литер 11 с пристроенной подземной автостоянкой.

В соответствии с п. 3.1. договора субподряда№ ПС-10-1/06-22 от 10.06.2022 г. (Литер 11) договорная цена, согласно Сметного расчета № 1, составляет 46 088 552,01 руб, в том числе НДС 20%.

В соответствии с п. 3.1. договора субподряда № ПС-10-2/06-22 от 10.06.2022 г. (Литер 12) договорная цена, согласно Сметного расчета № 1, составляет 39 514 008,17 руб., в том числе НДС 20%.

Общая договорная сумма по вышеуказанным договорам субподряда составляет                85 602 560 рублей 18 копеек, в том числе НДС 20%.

По указанным договорам истцом работы выполнены на основании подписанных форм КС-2 и КС-3 в полном объёме, которые переданы Ответчику, однако не были оплачены полностью.

Истец 03.07.2023 в адрес ответчика направил уведомление о завершении строительных работ на объекте «Жилой квартал «Красная площадь», расположенного по ул. Конгрессная в г. Краснодаре, а также акты сверок взаимных расчетов между организациями за период 01.01.2022 по 03.07.2023, по 2 (двум) договорам субподряда, по которым предоставлены следующие расчеты:

- по договору субподряда № ПС-10-1/06-22 от 10.06.2022 (Литер 11) работы выполнены на основании следующих принятых ответчиком и подписанных форм КС-2 и КС-3:

- № 1 от 15.08.2022 г. на сумму 2 711 576,60 руб.;

- № 4 от 09.09.2022 г. на сумму 3 139 693,25 руб.;

- № 5 от 03.10.2022 г. на сумму 10 602 060,55 руб.;

- № 7 от 17.10.2022 г. на сумму 5 654 091,69 руб.;

- № 9 от 07.11.2022 г. на сумму 5 190 884,16 руб.;

- № 10 от 02.12.2022 г. на сумму 12 880 365,54 руб.;

- № 11 от 10.12.2022 г. на сумму 3 900 409,89 руб.;

- № 13 от 12.12.2022 г. на сумму 2 327 100,63 руб.

на общую сумму 46 406 182 рублей 31 коп. Ответчиком работы оплачены на сумму 46 144 331 рублей 37 коп. в связи с чем на стороне ответчика образовалась задолженность в размере 261 850 рублей 94 коп;

- по договору субподряда № ПС-10-2/06-22 от 10.06.2022 (Литер 12) работы выполнены на основании следующих принятых ответчиком и подписанных форм КС-2 и КС-3:

- № 2 от 15.08.2022 г. на сумму 8 033 961,45 руб.;

- № 3 от 09.09.2022 г. на сумму 7 957 981,92 руб.;

- № 6 от 17.10.2022 г. на сумму 10 496 645,53 руб.;

- № 8 от 07.11.2022 г. на сумму 6 464 485,32 руб.;

- № 12 от 10.12.2022 г. на сумму 3 048 289,58 руб.;

- № 1 от 25.02.2023 г. на сумму 2 955 251,64 руб.

на общую сумму 38 956 615 рублей 44 коп. но всего по акту сверки понесённых затрат истцом в том числе на оплату электричества и т.д. в сумме 39 046 615 рублей 44 коп. 

Ответчиком работы оплачены на сумму 32 990 169,26 руб., в связи с чем на стороне ответчика образовалась задолженность в размере 6 056 448, 18 руб.

12.07.2023 истцом в адрес ответчика заказным письмом направлена претензия с требованием произвести оплату образовавшейся задолженности.

Требования, изложенные в претензии, оставлены ответчиком без удовлетворения.

При принятии решения суд руководствовался следующим.

Правоотношения сторон, являющиеся предметом данного судебного разбирательства, относятся к договору подряда и регулируются нормами, закрепленными в гл. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В силу части 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В соответствии со статьей 68 АПК РФ, обстоятельства дела, которые, согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о бремени доказывания, исходя из принципа состязательности сторон, согласно которому риск наступления последствий не совершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. Факт исполнения со стороны истца принятых на себя в рамках договора обязательств по выполнению работ, подтвержден материалами дела. 

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

Истцом в подтверждение доводов о наличии на стороне ответчика задолженности в материалы дела представлены следующие документы, подтверждающие факт выполнения работ: 

- по договору субподряда № ПС-10-1/06-22 от 10.06.2022 (Литер 11) акты по форме КС-2 и КС-3:

- № 1 от 15.08.2022 г. на сумму 2 711 576,60 руб.;

- № 4 от 09.09.2022 г. на сумму 3 139 693,25 руб.;

- № 5 от 03.10.2022 г. на сумму 10 602 060,55 руб.;

- № 7 от 17.10.2022 г. на сумму 5 654 091,69 руб.;

- № 9 от 07.11.2022 г. на сумму 5 190 884,16 руб.;

- № 10 от 02.12.2022 г. на сумму 12 880 365,54 руб.;

- № 11 от 10.12.2022 г. на сумму 3 900 409,89 руб.;

- № 13 от 12.12.2022 г. на сумму 2 327 100,63 руб.

на общую сумму 46 406 182 рублей 31 коп. 

- по договору субподряда № ПС-10-2/06-22 от 10.06.2022 г. (Литер 12) работы выполнены на основании следующих принятых ответчиком и подписанных форм КС-2 и КС-3:

- № 2 от 15.08.2022 г. на сумму 8 033 961,45 руб.;

- № 3 от 09.09.2022 г. на сумму 7 957 981,92 руб.;

- № 6 от 17.10.2022 г. на сумму 10 496 645,53 руб.;

- № 8 от 07.11.2022 г. на сумму 6 464 485,32 руб.;

- № 12 от 10.12.2022 г. на сумму 3 048 289,58 руб.;

- № 1 от 25.02.2023 г. на сумму 2 955 251,64 руб.

на общую сумму 38 956 615 рублей 44 коп.

Пунктом 2.1. договора № ПС-10-1/06-22 от 10.06.2022, Приложением №1 к договору стороны определили объем работ, что следует из сметного расчета № 1. Сроки выполнения работ установлены п. 5.1. Договора до 15 сентября 2022 года. 

Стоимость работ по договору согласно  п. 3.1 составляет 46 088 552,01 руб, в том числе НДС 20%. 

Пунктом 4 договора стороны установили порядок оплаты по договору. Обязательства по Договору истцом исполнены, результаты работ переданы заказчику своевременно и в полном объеме, заказчиком работы приняты без замечаний, что подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и актами о приемке выполненных работ (КС-2) на сумму 46 210 951,28 рублей. Претензий по качеству и срокам выполнения работ от заказчика не предъявлял.

В соответствии с п. 4.2 договора окончательный расчет (с учетом промежуточных платежей, перечисленных ранее, если такие производились, с учетом гарантийного удержания 5%), за фактически выполненные и принятые объемы работ осуществляется в течение 65 (шестидесяти пяти) календарных дней с даты подписания/одобрения Генподрядчиком и Подрядчиком комплекта документов указанных в данном пункте Договора, предоставленных Субподрядчиком. 

По договору субподряда № ПС-10-2/06-22 от 10.06.2022 истец взял на себя обязанность выполнить работы по заполнению проемов на Объекте: «Жилой квартал "Красная площадь", расположенном по ул. Конгрессная в г. Краснодар. Многоэтажный жилой дом Литер 12» (далее по тексту «Объект»), в соответствии со сметным расчетом №1 (Приложение №1 к настоящему Договору). 

На условиях пунктом 2.1. Договора, Приложением № 1 к договору стороны определили объем работ, что следует из сметного расчета № 1. Сроки выполнения работ установлены п. 5.1. Договора до 15 сентября 2022 года. 

Стоимость работ по договору согласно п. 3.1 договора составляет 39 514 008,17 руб., в том числе НДС 20%. Пунктом 4 Договора стороны установили порядок оплаты по договору. 

Обязательства по договору истцом исполнены, результаты работ переданы заказчику своевременно и в полном объеме, заказчиком работы приняты без замечаний, что подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и актами о приемке выполненных работ (КС-2) на сумму 38 889 304,19 рублей. 

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от заказчика не предъявлял.

В соответствии с п. 4.2 Договора окончательный расчет (с учетом промежуточных платежей, перечисленных ранее, если такие производились, с учетом Гарантийного удержания 5%), за фактически выполненные и принятые объемы работ осуществляется в течение 65 (шестидесяти пяти) календарных дней с даты подписания/одобрения Генподрядчиком и Подрядчиком комплекта документов указанных в данном пункте Договора, предоставленных Субподрядчиком. 

Истцом представлены дополнительные пояснения к исковому заявлению, из которого следует, что ответчиком производились оплаты на основании платежных поручений, что также отражено в актах сверки,  

Сумма задолженности составляет№ ПС-10-2/06-22 от 10.06.2022  5 825 253,64 руб.

Для исполнения обязательств по договору субподряда № ПС-10-1/06-22                              от 10.06.2022 истец производил закупку ПВХ изделий у ООО «Оконная строительная компания» по договору поставки №010-1/06-2022 от 10.06.2022. По указанному договору на 31.12.2022 задолженность истца перед ООО «Оконная строительная компания» составляла 4 910 688,14 руб.

На основании акта о трехстороннем взаимозачете от 09.01.2023, подписанного между ООО «Оконная строительная компания», ООО «Партнер-Строй» и ООО «Икс Системс»  произведен взаимозачет на сумму 4 910 688,14 руб.

Таким образом, сумма задолженности по договору субподряда № ПС-10-1/06-22 от 10.06.2022 составляет 140 501, 20 руб.

Ответчиком отзыв на исковое заявление, равно как и доказательств встречного исполнения обязательств или добровольного возврата денежных средств в материалы дела  не представлено, доводы истца не опровергнуты, с учетом произведенных оплат на стороне ответчика имеется задолженность в размере 5 965 754,84 руб., в связи с чем требование о взыскании задолженности в размере является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Партнер-Строй»                     (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) г. Краснодар в пользу общества с ограниченной ответственностью «Икс Системс» (ИНН 

<

***> ОГРН: 

<

***>) г. Хабаровск

задолженность в размере 5 965 754,84 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 52 829 руб.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Икс Системс»                                (ИНН 

<

***> ОГРН: 

<

***>) г. Хабаровск справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 1 762 руб., оплаченной на основании платежного поручения от 03.08.2023 № 79.

Решение может быть обжаловано в течение 1 месяца в суд апелляционной инстанции.

 

Судья                                                                                                                          Хмелевцева А.С.