5/2022-99641(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-5841/2022

г. Владивосток

23 мая 2022 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Плехановой Н.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску краевого государственного бюджетного  учреждения здравоохранения "Хасанская центральная районная больница"  (ИНН2531007061, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Стройком" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

об обязании устранить недостатки работ 

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Стройком» в течение  

месяца со дня вступления решения в законную силу безвозмездно устранить недостатки  

работ по капитальному ремонту акушерского отделения КГБУЗ «Хасанская ЦРБ»  

выполненных по контракту от 13 января 2020 № 0320300029819000117, а именно: 

 - в помещении моечной родильного зала № 1 на двух внутренних стенах устранить  

вертикальные трещины, общей протяженностью: 0,8+1,64+1,43+2,4+2+0,83+0,4+0,бм.п.  

=10,13 м.п. шириной от 1-2 мм, 

- в помещении родильного зала № 2 устранить трещины на кафеле 1+1,76 м.п.,  толщиной 1-2 мм,  

- в палате № 5 (послеродовая) на стене, по штукатурке устранить продольные и  поперечные трещины, общей площадью 10 м2,  

- в палате № 3 по стене площадью 13,7 устранить трещины,  

- в комнате гигиены устранить трещины на входной дверью, протяженность 3,4 м.п.,  

- в помещении ординаторской на двух оконных рамах устранить широкие продольные  и вертикальные трещины,  

- в помещении акушерской по штукатурке устранить трещины, общей протяженностью  8 м.п.,  

- в палате № 1, палате интенсивной терапии, прививочном кабинете, помещении  сестринской отрегулировать окна, путем устранения причин свободного движение  воздушных масс и отток тепловой энергии,  

- в процедурном кабинете, над окном подклеить пластиковый уголок, 

- в палате № 3 отрегулировать дверь, чтоб она закрывалась на фиксатор, устранить  трещины на стене, протяженностью 8,6 м.п.,  

- в коридоре, широким массивом, устранить продольные и вертикальные трещины,  частично над входными дверями,  

- в санитарной комнате приемного покоя роддома над кафелем устранить  горизонтальные широкие трещины.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройком" в пользу  краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Хасанская  центральная районная больница" 3 000 рублей расходов по оплате государственной  пошлины по иску.  

Исполнительный лист выдается по заявлению взыскателя после вступления  решения в законную силу.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в  течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в  Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу.  

Судья Плеханова Н.А. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 23.12.2021 19:56:30

 Кому выдана Плеханова Наталья Александровна