АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Иркутск                                                                                 Дело № А19-6501/2018

«14» июня 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 05.06.2018. Полный текст решения изготовлен 14.06.2018.

Арбитражный суд  Иркутской области в составе судьи Колосовой Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Урбанаевой Ю.Г., рассмотрев в судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГАРАНТ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:

<

***>, адрес: 664047, 

<

...>)

к ИРКУТСКОМУ ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664025, 

<

...>)

о взыскании 1 485 020 руб. 64 коп.

при участии в заседании суда:

от истца: представитель ФИО1 по доверенности от 24.04.2018, паспорт; 

от ответчика: представитель ФИО2 по доверенности № 451 от 16.08.2016, паспорт;

установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГАРАНТ» 27.03.2018 обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к ИРКУТСКОМУ ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» о  взыскании 1 959 944 руб. 28 коп., из них: 

1. по договору № 258-003/17 в размере 17 303 руб. 35 коп.:

- 17 128 руб. – задолженность,

- 175 руб. 35 коп. – неустойка за период с 30.11.2017 по 26.03.2018;

2. по договору № 121-041/16 в размере 48 472 руб. 12 коп.,:

- 47 899 руб. – основной долг;

- 573 руб. 12 коп. – неустойка за период с 30.11.2017 по 26.03.2018;

3. по договору № 121-006/16 в размере 107 656 руб. 91 коп.,:

- 106 384 руб. – основной долг;

- 1 272 руб. 91 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 30.11.2017 по 26.03.2018;

4. по договору № 258-002/16 в размере 893 256 руб. 27 коп.,:

- 886 728 руб. – основной долг;

- 6 528 руб. 27 коп. – неустойка за период с 29.12.2017 по 26.03.2018; 

5. по договору № 258-035/17 в размере 893 256 руб. 27 коп.,:

- 413 446 руб. – основной долг;

- 5 392 руб. 02 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 25.12.2017 по 26.03.2018.

Истец в судебном заседании заявил об уточнении иска, просил взыскать с ответчика 1 485 020 руб. 64 коп., из них: 1 471 586 руб. – основной долг, 13 434 руб. 64 коп. – неустойка.

Уточнение иска судом принято; иск рассматривается в уточненной редакции.

Ответчик в судебном заседании иск не признал, представил возражения, указав, что сумма основного долга не соответствует действительности, приложил контррасчет неустойки; после уточнения истцом размера исковых требований возражений не заявил.

Выслушав истца, ответчика, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком заключены следующие договоры:

1) № 258-003/17 от 18.01.2017 на выполнение непредвиденных работ, в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию заказчика непредвиденные работы и устранение дефектов тепловой изоляции тепломеханического оборудования ТЭЦ-6 ТИиТС в г. Братске на филиале ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 (Теплоисточники и теплосети), в объеме, определенном настоящим договором и в соответствии с технической документацией, являющейся его неотъемлемой частью, с соблюдением действующих норм и правил, и передать результат работ заказчику, а заказчик обязался создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Цена ремонтных работ, выполняемых по заявке (Приложение № 3), в которой указаны сроки проведения и место выполнения работ, а также общие объемы работ, выполняемых по договору, определяются сметными расчетами (Приложение № 2) и дефектными ведомостями (Приложение № 1), составленными заказчиком с участием подрядчика, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 2.1. договора № 258-003/17).

Сметная документация и расчет стоимости работ в текущих ценах выполняется в соответствии с СТП 011,504,115-2015 «Ценообразование в ремонтной, строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера и по уборке помещений и территорий» с учетом поправочных коэффициентов и часовой заработной платы принятым в ПАО «Иркутскэнерго» с 01.01.2017 г. с применением понижающего коэффициента в общей стоимости работ к=0,97 (пункт 2.2. договора № 258-003/17).

Согласно пункту 2.3. договора № 258-003/17 общая стоимость ремонтных работ, выполняемых по настоящему договору является приблизительной и составляет 1 000 000 руб., кроме того НДС (18%) 180 000 руб.

2) № 121-041/16 от 22.06.2016 на выполнение ремонтных работ, по условиям которого подрядчик обязался в установленный договором срок выполнить по заданию заказчика на филиале ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 центральный участок ремонтные работы следующего содержания: ремонт тепловой изоляции оборудования турбинного отделения Центрального участка (ЦУ) ТЭЦ-6 в объеме, определенном договором и в соответствии с технической документацией, являющейся его неотъемлемой частью, с соблюдением действующих норм и правил и передать результат работ заказчику, а заказчик обязался создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Дополнительным соглашением № 2 от 31.01.2017 к договору подряда № 121-041/16 от 22.06.2016 стороны пришли к соглашению заключить дополнительное соглашение на ремонт тепловой изоляции оборудования турбинного отделения ЦУ ТЭЦ-6 по договору№ 121-041/16 от 22.06.2016 на филиале ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 в 2017.

Согласно пункту 1.1. Дополнительного соглашения № 2 от 31.01.2017 к договору подряда № 121-041/16 от 22.06.2016 общая стоимость ремонтных работ, выполняемых по договору в 2017 году, составляет 7 130 127 руб., кроме того НДС (18%) 1 283 422 руб. 86 коп.

В соответствии с пунктом 2.2. договора № 121-041/16 (в ред. Дополнительного соглашения № 2 от 31.01.2017) общая стоимость ремонтных работ, выполняемых по договору,определяется расчетом договорной стоимости работ на 2016-2017 (Приложение № 4) исоставляет 12 330 127 руб., кроме того НДС (18%) 2 219 422 руб. 86 коп., в том числе:

в 2016 году - 5 200 000 руб., кроме того НДС (18%) 936 000 руб.

в 2017 году - 7 130 127 руб., кроме того НДС (18%) 1 283 422 руб. 86 коп.

3) № 121-006/16 от 24.12.2015 на выполнение ремонтных работ, в соответствии с которым подрядчик обязался в установленный настоящим договором срок выполнить по заданию Заказчика на филиале ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 центральный участок ремонтные работы следующего содержания: ремонт тепловой изоляции, обмуровки, окожуховки оборудования котельного отделения, секции главного паропровода, растопочного паропровода Центрального участка (ЦУ) ТЭЦ-6 в объеме, определенном договором и в соответствии с технической документацией, являющейся его неотъемлемой частью, с соблюдением действующих норм и правил и передать результат работ заказчику, а заказчик обязался создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Дополнительным соглашением № 3 от 16.02.2017 к договору подряда № 121-006/16 от 24.12.2015 стороны пришли к соглашению заключить дополнительное соглашение на ремонт тепловой изоляции, обмуровки, окожуховки оборудования котельного отделения, секции главного паропровода, растопочного паропровода ЦУ ТЭЦ-6 по договору№ 121-006/16 от 24.12.2015 на филиале ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 в 2017.

Согласно пункту 1.1. Дополнительного соглашения № 3 от 16.02.2017 к договору подряда № 121-006/16 от 24.12.2015 общая стоимость ремонтных работ, выполняемых по настоящему договору в 2017 году, составляет 11 950 883 руб., кроме того НДС (18%) 2 151 158 руб. 94 коп.

Пунктом 2.2. договора № 121-006/16 (в ред. Дополнительного соглашения № 3 от 16.02.2017) общая стоимость ремонтных работ, выполняемых по настоящему договору в 2016 году и в 2017 году, определяется расчетом договорной стоимости работ (Приложение № 4) и составляет 26 258 542 руб., кроме того НДС (18%) 4 726 537 руб. 56 коп., в том числе:

в 2016 году - 14 307 659 руб., кроме того НДС (18%) 2 575 378 руб. 62 коп.

в 2017 году – 11 950 883 руб., кроме того НДС (18%) 2 151 158 руб. 94 коп.

4) № 258-002/16 от 13.01.2016 на выполнение ремонтных работ, в соответствии с которым подрядчик обязался в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика на филиале ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 (Теплоисточники и теплосети (ТИиТС)) ремонтные работы (ремонт обмуровки, теплоизоляции и металлопокрытия оборудования ТЭЦ-6 ТИиТС) в объеме, определенном договором и в соответствии с технической документацией, являющейся его неотъемлемой частью, с соблюдением действующих норм и правил и передать результат работ заказчику, а заказчик обязался создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Дополнительным соглашением № 1 от 31.01.2017 к договору подряда № 258-002/16 от 13.01.2016 стороны пришли к соглашению заключить дополнительное соглашение на ремонт обмуровки, теплоизоляции и металлопокрытия оборудования ТЭЦ-6 ТИиТС по договору№ 258-002/16 от 13.01.2016 на филиале ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 в 2017.

Согласно пункту 3 Дополнительного соглашения № 1 от 31.01.2017 к договору подряда № 258-002/16 от 13.01.2016 стоимость ремонтных работ, выполняемых по договору в 2017 году, составляет 6 195 192 руб., кроме того НДС (18%) 1 115 134 руб. 56 коп.

В соответствии с пунктом 2.2. договора № 258-002/16 (в ред. Дополнительного соглашения № 1 от 31.01.2017) общая стоимость ремонтных работ, выполняемых по настоящему договору в 2017 году, определяется локальными сметными расчетами №№ 32обм, 32из, 66 обм, 66 из, 77 обм, 77 из, 89 обм, 89 из, 112,131,435,469,186 обм, 186 из, 238 обм, 238 из, 259 обм, 259 из, 306 обм, 306 из, 348 обм, 348 из, 374,378,396,407,410,492 (Приложение № 7) и расчетом договорной стоимости работ на 2017 год   (Приложение № 9), составляет 6 195 192 руб., кроме того НДС (18%) 1 115 134 руб. 56 коп.

Общая стоимость ремонтных работ, выполняемых по договору, составляет 12 845 192 руб., кроме того НДС (18%) 2 312 134 руб 56 коп.

Стоимость работ на 2017-2018 годы определяется в текущем уровне цен, принятом в ПЛО «Иркутскэнерго» на момент заключения дополнительного соглашения, с применением коэффициента конкурсного снижения К-0,9802 (определенного по результатам открытого запроса предложений).

5) № 258-035/17 от 19.07.2017 на выполнение ремонтных работ, по условиям которого подрядчик обязался в установленный настоящим договором срок выполнить по заданию Заказчика на филиале ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 (Теплоисточники и теплосети (ТИиТС)) ремонтные работы следующего содержания: ремонт обмуровки, теплоизоляции и металлопокрытия К/А ст. №№ 6,8 КТЦ-ТИ ТЭЦ-6 ТИиТС для проведения технического диагностирования в объеме, определенном договором и в соответствии с технической документацией, являющейся его неотъемлемой частью, с соблюдением действующих норм и правил и передать результат работ заказчику, а заказчик обязался создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Цена ремонтных работ, выполняемых по настоящему договору, определена локальными сметными расчетами №№ 1 обм, 1 из, 2 обм, 2 из (Приложение № 2), расчетом стоимости работ (Приложение № 4), являющимися неотъемлемой частью договора (п. 2.1. договора № 258-035/17).

Согласно пункту 2.2. договора № 258-035/17 общая стоимость ремонтных работ, выполняемых по настоящему договору, составляет 2 399 956 руб., кроме того НДС (18%) 431 992 руб. 08 коп.

Истец выполнил в полном объеме принятые на себя обязательства по вышеуказанным договорам; ответчик принял работы в полном объеме без замечаний путем подписания актов выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме №КС-3.

Ответчик работы в полном объеме не оплатил.

Истец направил в адрес ответчика претензии (требования) № 258-003/17 от 18.01.2017, № 121-041/16 от 22.06.2016, № 121-006/16 от 24.12.2015, № 258-002/16 от 13.01.2016, № 258-035/17 от 19.07.2017, предлагал в течение 5 календарных дней с момента получения претензии оплатить задолженность.

Ответчик требования претензии не исполнил, что явилось основанием для обращения истца в суд с иском.

Оценив представленные в материалы дела документы в соответствии с положениями статей 65, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд пришел к следующему выводу.

Проанализировав условия представленных договоров № 258-003/17 от 18.01.2017, № 121-041/16 от 22.06.2016, № 121-006/16 от 24.12.2015, № 258-002/16 от 13.01.2016, № 258-035/17 от 19.07.2017 суд считает, что по своей правовой природе указанные договоры являются договорами подряда, правовое регулирование которых осуществляется главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы, по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В силу требований статей 708, 743 Гражданского кодекса Российской Федерации к числу существенных условий договора строительного подряда относится согласование сторонами объема, содержания работ и других предъявляемых к ним требований, определяемых технической документацией, а также сроков выполнения подрядных работ.

Следовательно, в силу названных правовых норм существенными для спорного договора строительного подряда являются:

- условия о содержании и объеме работ (предмете);

- срок выполнения работ.

Оценив условия договоров, суд пришел к выводу о согласовании сторонами всех его существенных условий:

- предмет договора (объем и содержание подрядных работ) определены в пунктах 1.1, технических документациях (Приложение № 1 к контракту);

- сроки выполнения работ согласованы в пункте 4.1 договоров.

С учетом проведенного анализа суд приходит к выводу, что вышеуказанные договоры подряда является заключенным – порождающим взаимные права и обязательства сторон.

Факт выполнения истцом работ подтверждается актами о приемке работ, подписанным и скрепленными печатями сторон без каких-либо замечаний относительно объема, качества и сроков выполненных работ.

В силу положений пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с пунктом 7.1 договоров № 258-003/17, № 121-041/16, № 121-006/16, № 258-002/16 оплата работ, выполненных подрядчиком по договору, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по унифицированной форме № КС-3, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в договоре.

Пунктом 7.1 договора № 258-035/17 предусмотрено, что оплата работ, выполненных подрядчиком по настоящему договору, осуществляется в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по унифицированной форме № КС-3, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом; односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. 

Ответчик доказательства оплаты долга в размере 1 471 586 руб. не представил. 

Учитывая изложенное, положение статей  309, 310, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, условия договоров № 258-003/17 от 18.01.2017, № 121-041/16 от 22.06.2016, № 121-006/16 от 24.12.2015, № 258-002/16 от 13.01.2016, № 258-035/17 от 19.07.2017 суд приходит к выводу, что иск о взыскании основного долга в размере 1 471 586 руб. заявлен обоснованно и подлежит удовлетворению.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно пунктам 8.6 договоров № 258-003/17, № 121-006/16 (в ред. Дополнительного соглашения № 3 от 16.02.2017), № 258-035/17 за нарушение сроков оплаты выполненных работ подрядчик вправе взыскать с заказчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ на момент начисления, за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % от стоимости неоплаченной суммы.

Пунктом 8.6 договоров № 121-041/16, № 258-002/16 установлено, что за нарушение сроков оплаты выполненных работ подрядчик вправе взыскать с заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных в срок работ, за каждый день просрочки платежа до фактического исполнения обязательств.

Истец в соответствии с условиями договоров начисли неустойку в сумме 13 434 руб. 64 коп.

Ответчик представил контррасчет неустойки.

Исследовав контррасчет неустойки судом установлено, что составлен неверно, поскольку исчислен с иной сумы задолженности (большей).

Согласно статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Ответчик ходатайства о снижении неустойки, равно как и доказательств ее несоразмерности, не заявил.

Поэтому у суда отсутствует право на уменьшение неустойки судом в рамках своих полномочий, так как это вступает в противоречие с принципом осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также с принципом состязательности (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации), что соответствует правовой позиции, изложенной  в Постановлении Президиума ВАС РФ от 13.01.2011 №11680/10 по делу № А41-13284/09.

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

При принятии решения арбитражный суд в силу положений части 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации решает вопросы о сохранении действия мер по обеспечению иска или об отмене обеспечения иска либо об обеспечении исполнения решения; при необходимости устанавливает порядок и срок исполнения решения; определяет дальнейшую судьбу вещественных доказательств, распределяет судебные расходы, а также решает иные вопросы, возникшие в ходе судебного разбирательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Требования истца судом признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

При обращении в суд с иском истец уплатил государственную пошлину в размере 13 400 руб., о чем свидетельствует платежное поручение № 239 от 26.03.2018.

В соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина за рассмотрение настоящего дела, составляет 26 850 руб. 21 коп.

Следовательно, с ответчика в доход федерального бюджета следует взыскать государственную пошлину в размере 13 450 руб. 21 коп.

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ИРКУТСКОГО ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664025, 

<

...>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГАРАНТ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:

<

***>, адрес: 664047, 

<

...>) 1 471 586 руб. задолженности за выполненные работы, 13 434 руб. 64 коп. неустойки, 13 400 руб. расходов по уплате государственной пошлине.

Взыскать с ИРКУТСКОГО ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664025, 

<

...>)  в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 13 450 руб. 21 коп. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Иркутской области.

Судья                                                                    Е.Ю. Колосова