Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-6322/2018

23 октября 2018 года

город Якутск

резолютивная часть решения объявлена 18 октября 2018 г.

мотивированное решение изготовлено 23 октября 2018 г.

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Артамоновой Л.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания Сапожниковой Ю.Ю.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Публичного акционерного общества "Якутскэнерго" (ИНН 1435028701, ОГРН 1021401047260) к Обществу с ограниченной ответственностью "СахаКластер" (ИНН 1435244364, ОГРН 1111435008871) о взыскании 868 800,42 рублей,

при участии в заседании: от истца – ФИО2 по доверенности, от ответчика – ФИО3 по доверенности;

УСТАНОВИЛ:

Публичное акционерное общество "Якутскэнерго" обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "СахаКластер" о взыскании 868 800,42  рублей задолженности по договору № 202 ТП/ТС от 30.11.2016, в том числе: 468 034,24 руб. основной долг, 400 766,15 руб. неустойки по п.19 договора, а также расходы по уплате государственной пошлины.

Ответчик в судебном заседании пояснил, что стороны не достигли мирового соглашения.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлен перерыв до 18.10.2018 12 час. 20 мин., после перерыва заседание продолжено.

Истец представил ходатайство об уменьшении размера неустойки до суммы 193 766,18 рублей.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом принято уменьшение размера исковых требований до суммы 661 800,42 рублей, в том числе: 468 034,24 руб. основного долга, 193 766,18 руб. неустойки.

Ответчик с иском в части основного долга согласен, в части неустойки полагается на усмотрение суда.

Из материалов дела судом установлено, что 30.11.2016 между истцом (исполнитель) и ответчиком (заказчик) заключен договор № 202 ТП/ТС о подключении (технологическом присоединении) в сетям теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом – 2 очередь в квартале Новопортовской г. Якутска», по которому (п.1) исполнитель обязуется выполнить действия по подготовке сетей централизованного теплоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта заказчика в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) (далее – технические условия) объекта согласно приложению № 1.

Согласно пункту 4 договора подключение объекта будет произведено в течении 18 месяцев с даты заключения договора, в соответствии с приложением №1а.

Пунктом 9 договора установлено, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с установленным постановлением Правления ГКЦ – РЭК РС (Я) от 23.12.2015 № 320 «Об установлении размера платы за технологическое присоединение заявителей к сетям теплоснабжения ПАО «Якутскэнерго» и составляет 968 034,24 рублей, в том числе НДС 18 % 147 666,24 рублей.

В соответствии с пунктом 10 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

Согласно п.11.1 заказчик обязан внести плату на расчетный счет исполнителя в следующем порядке:

 - 145 205,14 руб. (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора);

 - 484 017,12 руб. (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения);

 - 338 811,98 руб. (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче энергоресурсов на объект заявителя, но не позднее выполнения технических условий).

Истцом обязательства по технологическому присоединению объекта выполнены, что подтверждается актом сдачи-приемки оказанной услуги технологического присоединения к сети теплоснабжения ПАО «Якутскэнерго» от 23.11.2017, актом о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования от 23.11.2017, актом о подключении (технологическом присоединении) объекта от 23.11.2017, актом выполнения технических условий на подключение объекта к сети теплоснабжения ПАО «Якутскэнерго» от 23.11.2017.

Ответчиком оплачено 500 000 рублей по платежному поручению № 100 от 16.03.2017, оплата оказанных услуг в полном объеме не произведена, в связи с чем истцом в адрес ответчика направлена претензия от 25.04.2018 № 371/1121 об оплате 468 034,24 руб. основного долга и пени по п.19 договора.

Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к выводу об   удовлетворении иска по следующим основаниям.

Между сторонами возникли правоотношения, вытекающие из договора возмездного оказания услуг, на которые распространяются положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Пунктом 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации  Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с пунктом 1 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Исполнение истцом своих обязательств по договору подтверждено материалами дела.

Как установлено частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В нарушение условий договора ответчик оплату оказанных услуг не произвел, задолженность не оспорил.

При таких обстоятельствах, требование истца о взыскании стоимости оказанных услуг подлежит удовлетворению в полном объеме в размере 468 034,24 рублей.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с пунктом 19 договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате, установленных п.11.1 настоящего договора, исполнитель вправе потребовать от заказчика уплаты неустойки в размере 0,2 % от цены договора за каждый день просрочки. 

Истец составил расчет пени за период с 08.12.2017 по 06.07.2018 (218 дней) от цены договора 968 034,24 руб. по ставке 0,2 % , что составило 422 062,93 руб.

В последующем истец заявил об уменьшении размера неустойки до суммы 193 766,18 рублей.

Поскольку ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по внесению платы подтверждено материалами дела, истец правомерно начислил пени по пункту 19 договора, требование о взыскании неустойки подлежит удовлетворению в размере, не превышающим пределы заявленных требований, в сумме 193 766,18 рублей.

Иск следует удовлетворить в полном объеме.

При подаче иска истцом уплачена государственная пошлина в сумме 20 376 рублей по платежным поручениям № 267668 от 20.07.2018, № 274423 от 15.08.2018.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 16 236  рублей относятся на ответчика, излишне уплаченная государственная пошлина в размере 4 140 рублей подлежит возврату истцу из федерального бюджета в порядке, предусмотренном статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СахаКластер" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Публичного акционерного общества "Якутскэнерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 661 800,42 рубля, в том числе основной долг 468 034,24 рубля, неустойка 193 766,18 рублей, а также расходы по государственной пошлине в размере 16 236 рублей.

Возвратить Публичному акционерному обществу "Якутскэнерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) государственную пошлину из федерального бюджета в размере 4 140 рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Судья

Артамонова Л. И.