ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 18АП-18418/2018

г. Челябинск

21 января 2019 года

Дело № А07-13136/2018

 

Резолютивная часть постановления объявлена 14 января 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 января 2019 года.

 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Махровой Н.В.,

судей Лукьяновой М.В., Карпусенко С.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «СтроймонтажТимано-Печора» на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 24.10.2018 по делу №А07-13136/2018 (судья Кузнецов Д.П.).

 

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью «Башнефть – Полюс» - ФИО2 (паспорт, доверенность №ДОВ/БП/011/19 от 11.11.2018), ФИО3 (паспорт, доверенность № ДОВ/БП/110/19 от 29.12.2018).

 

Общество с ограниченной ответственностью «СтроймонтажТимано-Печора» (далее – ООО «СтроймонтажТимано-Печора», истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Башнефть – Полюс»  (далее – ООО «Башнефть – Полюс», ответчик) о взыскании задолженности по договору подряда № БП/у/136/16/УКС от 30.03.2016 в размере 5 504 161 руб.33 коп., неустойки за период с 30.05.2016 по 18.01.2018 в размере 839 589 руб.03 коп., задолженности по договору подряда № БП/у/107/17/УКС от 06.03.2017 в размере 8 005 141 руб. 74 коп., неустойки за период с 29.07.2017 по 18.01.2018 в размере 787 831 руб. 97 коп., задолженности по договору подряда №БП/у/12/16/УКС от 21.06.2016 в размере 5 957 571 руб. 48 коп. и неустойки за период с 28.06.2016 по 18.01.2018 в размере 595 757 руб. 08 коп., задолженности по договору подряда № БП/у/122/17/УКС от 20.03.2017   в размере 24 983 100 руб.11 коп. и неустойки за период с 28.05.2017   по 18.01.2018   в размере 2 227 865 руб. 92 коп., задолженности по договору подряда № БП/у/41/17/УКС от 21.02.2017   в размере 4 370 593 руб. 66 коп. и неустойки в размере 437 059 руб. 36 коп., задолженности по договору подряда № БП/у/166/16/УКС от 29.02.2016 в размере 13 145 088 руб. 45 коп. и неустойки в размере 1 314 508руб. 76 коп. (с учетом объединения дел А07-13136/2018, №А07-13154/2018, №А07-13315/2018, №А07-13397/2018,  №А07-13398/2018, №А07-13659/2018  в одно производство определением суда от 10.09.2018).

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 24.10.2018  в удовлетворении исковых требований отказано (т.11 л.д. 97-134).

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ООО «СтроймонтажТимано-Печора» обжаловало его в апелляционном порядке, просило решение отменить и принять новый судебный акт. 

В обоснование доводов апелляционной жалобы истец на противоречие выводов суда нормам действующего законодательства.

По мнению заявителя, встречное приостановление исполнения обязательств применимо только в рамках обычной хозяйственной деятельности, но не в рамках банкротства, которое введено в отношении истца.

Взыскиваемая истцом сумма задолженности за выполненные подрядные работы включается в конкурсную массу и распределяется соразмерно заявленным требованиям кредиторов, в очередности, предусмотренной статьей 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Оспаривая судебный акт, истец ссылается на то, что поскольку вся первичная документация со стороны ответчика подписана без замечаний, то в соответствии с п. 13.1.3  договоров подлежит оплате не позднее 60 календарных дней с даты их подписания.

Кроме того, заявитель указывает на то, что ООО «СтроймонтажТимано-Печора» находится в стадии банкротства, деятельность не ведет, в связи с чем, исполнить взятые на себя обязательства по договорам в полном объеме не имеет возможность. 

До начала судебного заседания от ответчика поступил отзыв на апелляционную жалобу, приобщенный к материалам дела в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, уведомлены о дате, времени и месте судебного разбирательства посредством почтовых отправлений, размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в судебное заседание истец не явился.

С учетом мнения представителей ответчика и в  соответствии со статьями 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие истца.

В судебном заседании представители ответчика поддержали отзыв на апелляционную жалобу, указав на ее несостоятельность, считает решение суда законным и обоснованным,

Законность и обоснованность оспоренного судебного акта проверяются судом апелляционной инстанции в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между ООО «Башнефть – Полюс» (заказчик) и ООО «СтроймонтажТимано-Печора» (подрядчик) заключены следующие договоры подряда на выполнение работ по капитальному строительству: договор №БП/у/12/16/УКС от 21.01.2016, договор №БП/у/41/17/УКС от 21.02.2017, договор №БП/у/107/17/УКС от 06.03.2017, договор №БП/у/122/17/УКС от 20.03.2017, договор №БП/у/136/16/УКС от 30.03.2016, договор №БП/у/166/16/УКС от 29.02.2016, по условиям которых подрядчик принял на себя обязательства в установленный договорами срок выполнить по заданию заказчика комплекс строительно-монтажных работ на объектах заказчика, расположенных на нефтяных месторождениях им. А. Титова и Р. Требса.

Согласно п. 7.1, п. 7.2.2 договоров подряда подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ с использованием строительных материалов, приобретаемых у заказчика на основании договоров купли-продажи. 

Во исполнение вышеуказанных условий договоров подряда между истцом и ответчиком были заключены следующие договоры купли-продажи строительных материалов: №БП/П/87/16/МТС от 22.01.2016 для проведения строительно-монтажных работ в рамках договора подряда №БП/у/12/16/УКС; №БП/У/230/17/УСХ от 13.06.2017 в рамках договора подряда №БП/у/41/17/УКС, №БП/У/229/17/УСХ от 13.06.2017 в рамках договора подряда № БП/у/107/17/УКС, №БП/П/87/17/УСХ  в рамках договора подряда №БП/у/122/17/УКС, №БП/П/417/16/МТС от 13.04.2016 в рамках договора подряда №БП/у/136/17/УКС; №БП/П/241/16/МТС от 24.02.2016 в рамках договора подряда №БП/у/166/16/УКС. 

Согласно п. 13.1.1 – 13.1.3 договоров подряда, п. 4.4 договоров купли-продажи следует, что сторонами установлен следующий порядок расчетов по ежемесячно выполненным и принятым работам и использованным в строительстве материалам: 

- по окончании этапа выполненных работ, в справке КС-3 отражается стоимость строительных материалов, вовлеченных для выполнения работ, на основании которых заказчик производит подрядчику оплату в размере использованных при строительстве  материалов, компенсируя стоимость использованных материалов при строительстве; 

- после оплаты заказчиком материалов по справке КС-3, подрядчик производит расчет за указанные материалы в рамках исполнения обязательств по договору купли-продажи материалов;

- впоследствии при условии оплаты подрядчиком материалов, приобретенных у заказчика по договорам купли-продажи материалов, заказчик производит оплату по справке КС-3 в части выполненных работ.

Сроки выполнения работ по договорам подряда в соответствии с п. 4.1. договоров определяются «Графиком производства строительно-монтажных работ по законченным этапам» (Приложение №4 к Договору) и «Детализированным графиком производства работ», порядок которого излагается в п. 6.23 договоров подряда.

Согласно п. 6.63 договоров подряда подрядчик обязан предоставлять заказчику в срок не позднее 25 числа отчетного месяца документы, подтверждающие выполнение работ за отчетный месяц, к которым относится справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и акт о приемке выполненных работ КС-2. 

Согласно п. 13.3 договоров подряда заказчик резервирует 10% указанной в п. 3.1.1 договора стоимости строительно-монтажных работ, включая стоимость материалов и оборудования, приобретаемых подрядчиком самостоятельно, до завершения строительства объекта. Резервирование осуществляется заказчиком путем оплаты объемов соответствующих строительно-монтажных работ по каждой счет-фактуре за минусом 10% от указанной в ней сумме. Зарезервированные таким образом 10% выплачиваются подрядчику не позднее 30 календарных дней после полного окончания работ (включая устранение выявленных при приемке завершенного строительством объекта дефектов) и подписания заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта (по форме № КС-11). 

Истцом выполнены, а ответчиком приняты и оплачены  работы в следующем объеме:

По договору подряда № БП/у/12/16/УКС от 21.01.2016 предусмотренные договором работы в размере 175 518 774, 27 руб. (п. 3.1 договора), были выполнены частично на сумму 121 151 651, 22 руб. 

Оплата выполненных работ произведена ответчиком в размере 115 194 079,74  руб. Размер неоплаченных денежных средств заказчиком по договору подряда № БП/у/12/16/УКС составляет 5 957 571, 48 руб.  Сумма резерва (10% от стоимости материалов) составляет 4 842 163, 50 руб. (пункт 13.3 договора подряда).

Окончательные результаты работ истцом не сданы, сторонами не подписаны акты приемки законченных строительством объектов по форме КС-11.

Исполнение сторонами договора подряда № БП/у/12/16/УКС подтверждается следующим: 

- по счет-фактуре № 195 от  08.04.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 08.04.2016, акту о приемке выполненных работ  № 1 от 08.04.2016 истцом выполнены работы на сумму 22 150 869, 48 руб. (с НДС), из них стоимость вовлеченных в работы материалов составляет 12 505 065, 68  руб., стоимость работ - 9 645 803, 80 руб.  Сумма резерва в соответствии с пунктом 13.3 договора подряда (10 % от стоимости работ) составляет 964 580, 38  руб. Оплата произведена ответчиком на сумму 21 186 289, 10 руб., из которых оплата вовлеченных в строительство материалов составляет 12 505 065, 68 руб. (платежное поручение № 290408 от 16.05.2016); оплата работ составляет 8 681 223, 42  руб. (платежное поручение № 304456 от 09.06.2016); 

- по счет-фактуре № 205 от 28.04.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат  № 2 от 28.04.2016, акта о приемке выполненных работ № 2-1 от 28.04.2016 истцом выполнены работы на сумму 11 059 088, 15 руб. (с НДС), включающих в себя стоимость вовлеченных материалов в размере 6 597 744, 15 руб., стоимость работ  - 4 461 344 руб. Сумма резерва (10% от  стоимости работ) составляет  446 134, 40 руб. Оплата произведена ответчиком на сумму 10 612 953, 75 руб., из которых оплата вовлеченных в строительство материалов составляет  6 597 744, 15 руб. (платежное поручение от 08.06.2016 № 303456); оплата работ - 4 015 209, 60 руб. (платежное поручение №315192 от 27.06.2016); 

- по счет-фактуре № 241 от 28.06.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 28.06.2016, акту о приемке выполненных работ № 3 от 28.06.2016 истцом были выполнены работы на сумму 2 330 364, 85 руб. (с НДС). Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила  233 036, 49  руб. Оплата произведена ответчиком на сумму 2 097 328, 37 руб. (платежное поручение № 354591 от 26.08.2016); 

- по счет-фактуре № 274 от 28.09.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 28.09.2016  и акту о приемке выполненных работ № 4 от 28.09.2016 истцом были выполнены работы на сумму 582 283, 58 руб. (с НДС).  Оплата произведена ответчиком на сумму 524 055, 22  руб. (платежное поручение № 415482 от 30.11.2016). Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила 233 036, 49  руб.;

- по счет-фактуре № 331 от 28.10.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат        № 5 от 28.10.2016, акту о приемке выполненных работ № 5 от 28.10.2016 истцом выполнены работы на сумму 2 272 483,65  руб. (с НДС), стоимость вовлеченных в работы материалов составляет 1 461 446, 05  руб., стоимость работ - 811 037, 60 руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила 81 103, 76 руб. Оплата произведена ответчиком в размере 2 191 379, 89 руб., из которых оплата материалов составляет 1 461 446, 05 руб.  (платежное поручение № 420289 от 12.12.2016); оплата работ  -  729 933, 84 руб. (платежное поручение № 432478  от 28.12.2016); 

- по счет-фактуре № 373 от 28.12.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 28.12.2016, акту о приемке выполненных работ № 6-1  от 28.12.2016 и  № 6-2 от 28.12.2016 истцом выполнены работы на сумму 1 893 595, 82 руб. (с НДС), из которых стоимость вовлеченных в работы материалов составляет 940 955, 86  руб., стоимость работ  - 952 639, 96 руб.) Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила 95 264  руб. Оплата произведена ответчиком в сумме 1 798 331, 82 руб., включающая в себя оплату материалов на сумму 940 955, 86  руб. (платежное поручение № 471200  от 27.02.2017),  оплату работ на сумму 857 375, 96  руб.  (платежное поручение №473127 от 28.02.2017);

- по счет-фактуре № 9 от 28.01.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 28.01.2017 г., акту о приемке выполненных работ № 1 от 28.01.2017 истцом выполнены работы на сумму 358 210, 24  руб. (с НДС).  Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила 35 821, 02 руб. Оплата произведена ответчиком на сумму 322 389, 22  руб. (платежное поручение № 502636 от 28.04.2017); 

- по счет-фактуре № 373 от 28.12.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 8 от 28.01.2017, акту о приемке выполненных работ № 7-1, №7-2, № 7-3 от 28.01.2017 истцом выполнены работы на сумму 28 247 019, 87  руб.  (с НДС), из которых стоимость вовлеченных в работы материалов составляет 17 365 956, 67 руб.,  стоимость работ - 10 881 063, 20 руб. Сумма резерва  (10% от стоимости работ)  составила 1 088 106, 32 руб. Оплата произведена ответчиком в размере 9 792 956, 88  руб. (платежное поручение №502635 от 28.04.2017). В порядке компенсации стоимости за переданные заказчиком для строительства материалов обязательство по оплате вовлеченных в работы материалов исполнена в размере 17 365 956,67 руб. на основании акта № 1 17.04.2017 г. Таким образом, денежное обязательство по оплате выполненных работ исполнено ответчиком в общем размере на сумму 27 158 913, 55 руб.;

- по счет-фактуре № 28 от 28.02.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 28.02.2017, акту о приемке выполненных работ № 2 от 28.02.2017 истцом выполнены работы на сумму 11 944 105, 20  руб. (с НДС), из которых стоимость вовлеченных в работы материалов составляет 7 292 849, 93 руб., стоимость работ - 4 651 255, 27 руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила 465 125, 53  руб. В порядке компенсации стоимости за переданные заказчиком для строительства материалов обязательство по оплате вовлеченных в работы материалов на сумму 7 292 849, 93 руб. исполнено на основании  акта № 2 от 26.05.2017, а также на сумму 4 186 129, 74  руб. на основании акта № 3 от 11.05.2017. При таких обстоятельствах, денежные обязательства ответчика перед истцом прекращены на общую сумму 11 478 979, 67 руб.; 

- по счет-фактуре № 29 от 28.02.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 8 от 28.02.2017, акту о приемке выполненных работ № 8-1, № 8-2, № 8-3 от 28.02.2017 истцом выполнены работы на сумму 22 439 407, 09  руб.  (с НДС), из которых  стоимость вовлеченных в работы материалов составляет 15 584 099, 15 руб., стоимость работ - 6 855 307, 94 руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила 685 530, 79 руб. В порядке компенсации стоимости за переданные заказчиком для строительства материалов денежные обязательства ответчика по оплате работ исполнены на сумму 21 753 876, 30 руб. (на сумму  15 584 099, 15  руб. на основании акта № 1 от 17.04.2017; на сумму 6 169 777, 15 руб.  на основании акта № 3 от 11.05.2017); 

- по счет-фактуре № 51 от 28.03.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 9 от 28.03.2017, акту о приемке выполненных работ № 9-1 и № 9-2 от 28.03.2017 истцом выполнены работы на сумму 14 039 757, 95  руб.  (с НДС), что складывается из стоимости вовлеченных в работы материалов в размере 8 959 047, 29 руб., стоимости выполненных работ в размере 5 080 710, 66 руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила 508 071, 07  руб. Оплата произведена ответчиком на сумму 4 572 639, 59  руб. (платежное поручение № 523156 от 31.05.2017). В порядке компенсации стоимости за переданные заказчиком для строительства материалов денежное обязательство по оплате вовлеченных в выполнение работ материалов исполнено на основании акта от 26.05.2017 № 2 на сумму  8 959 047, 29 руб.;   

- по счет-фактуре № 52 от 28.03.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 28.03.2017, акту о приемке выполненных работ № 3 от 28.03.2017 истцом выполнены работы на сумму 572 271, 68 руб. (с НДС). Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила  57 227, 17  руб. Оплата произведена ответчиком  на сумму 515 044, 51  руб.  (платежное поручение №523157 от 31.01.2017); 

- по счет-фактуре № 61 от 28.04.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат от 28.04.2017 № 4, акту о приемке выполненных работ № 4-1 и № 4-2 от 28.04.2017  истцом выполнены работы на сумму 1 239 772, 66 руб.  (с НДС),  из которых стоимость вовлеченных в работы материалов составляет 559 863, 74 руб., стоимость работ  - 679 908, 92 руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ)  составила 67 990,89  руб. В порядке компенсации стоимости за переданные заказчиком для строительства материалов денежное обязательство по оплате вовлеченных в выполнение работ материалов на сумму 559 863,74  руб.  исполнено на основании акта № 4 от 08.06.2017;               

- по счет-фактуре № 64 от 28.04.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 10 от 28.04.2017., акту о приемке выполненных работ № 10-1 и № 10-2  от 28.04.2017 истцом выполнены работы на сумму 2 022 421 руб. (с НДС), из  которых стоимость вовлеченных в работы материалов составляет 1 462 987, 72 руб., стоимость работ - 559 433, 28 руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила 55 943, 33  руб. В порядке компенсации стоимости за переданные заказчиком для строительства материалов  денежное обязательство по оплате вовлеченных в выполнение работ материалов исполнено на сумму  559 433, 28 руб. на основании № 4 от 08.06.2017. 

По  договору подряда №БП/у/41/17/УКС от 21.02.2017 общая стоимость работ составляет 74 492 028, 79 руб., стоимость фактически выполненных работ по спорной счет-фактуре от 29.05.2018 № 97 на сумму 4 559 746,75 руб.

Окончательные результаты работ истцом не сданы, сторонами не подписаны акты приемки законченных строительством объектов по форме КС-11.

Исполнение сторонами договора подряда №БП/у/41/17/УКС подтверждается следующим:

- по счет-фактуре № 97  от 29.05.2018, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 29.05.2016, акту о приемке выполненных работ №1-1 и №1-2 от 29.05.2016 выполнены работы на сумму 4 559 746, 75 руб., из которых стоимость вовлеченных в работы материалов составляет 3 150 041, 99 руб.; стоимость работ - 1 409 704, 76 руб. Сумма резервирования (10% от стоимости выполненных работ) составляет 140 970, 48 руб. В порядке компенсации стоимости за переданные заказчиком для строительства материалов  денежное обязательство по оплате вовлеченных в выполнение работ материалов  исполнено на сумму  3 150 041,99 руб., о чем между сторонами был составлен акт от № 4 08.06.2017 г. 

По договору подряда №БП/у/107/17/УКС от 06.03.2017 общая стоимость работ составляет 120 317 461, 28 руб. По указанному договору работы выполнены не в полном объеме, стоимость фактически выполненных работ составила 25 086 398, 79 руб. 

Оплата произведена ответчиком на сумму 17 081 257, 05 руб. Сумма резервирования (10% от стоимости выполненных работ) составляет 140 970, 48  руб. 

Окончательные результаты работ истцом не сданы, сторонами не подписаны акты приемки законченных строительством объектов по форме КС-11.

Исполнение сторонами договорных обязательств подтверждается следующим.

- по счет-фактуре №  70 от 28.04.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 28.04.2017, акту о приемке выполненных работ № 1 от 28.04.2017 г. истцом выполнены работы на сумму 5 505 927, 12 руб. (с НДС), из которых стоимость вовлеченных в работы материалов составляет 2 687 481, 25 руб., стоимость работ  - 2 818 445, 87 руб. В порядке компенсации стоимости за переданные заказчиком для строительства материалов денежное обязательство по оплате вовлеченных в выполнение работ материалов исполнено на сумму  2 687 481, 25  руб. на основании акта № 5 от 23.06.2017;

- по счет-фактуре № 96 от 29.05.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 29.05.2017, акту о приемке выполненных работ № 1-1 и №1-2 от 29.05.2017 истцом выполнены работы на сумму 1 388 284, 49 руб. (с НДС), из   которых стоимость вовлеченных в работы материалов  составляет 909 201, 63 руб., стоимость работ - 479 082, 86 руб. Сумма резерва (10% от стоимости  работ) составила 47 908, 29 руб. В порядке компенсации стоимости за переданные заказчиком для строительства материалов  денежное обязательство по оплате вовлеченных в выполнение работ материалов было исполнено на сумму  909 201, 63 руб., о чем между сторонами был составлен акт от № 9 от 26.07.2017; 

- по счет-фактуре № 93 от 29.05.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 29.05.2017, акту о приемке выполненных работ № 2-1 и № 2-2 от 29.05.2017 истцом выполнены работы на сумму 17 893 782, 35 руб. (с НДС), из  которых стоимость вовлеченных в работы материалов  составляет 13 484 574, 17 руб., стоимость работ -  4 409 208, 18 руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила 440 920, 82 руб. В порядке компенсации стоимости за переданные заказчиком для строительства материалов денежное обязательство по оплате вовлеченных в выполнение работ материалов исполнено на сумму 13 484 574,17 руб., о чем между сторонами был составлен акт № 9 от 26.07.2017; 

 - по счет-фактуре № 130 от 30.08.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 30.08.2017, акту о приемке выполненных работ № 3 от 30.08.2017  стоимость выполненных работ составила 298 404, 83 руб. (с НДС), из которых стоимость вовлеченных в работы материалов  -  272 499, 95 руб., стоимость работ  - 25 904, 88 руб. Размер зарезервированных (10% от стоимости работ) денежных средств составил  2 590, 49 руб.                         

По договору подряда от №БП/у/122/17/УКС  от 20.03.2017 общая стоимость работ составляет 408 852 227, 36 руб., работы выполнены подрядчиком в размере  94 055 132, 77  руб. Ответчик произвел оплату выполненных работ в размере 69 072 032, 66 руб.  Сумма резерва (10 % от стоимости работ) составляет 3 976 422, 62 руб. 

Окончательные результаты работ истцом не сданы, сторонами не подписаны акты приемки законченных строительством объектов по форме КС-11. 

Исполнение сторонами договора подряда от №БП/у/122/17/УКС подтверждается следующим:

- по счет-фактуре №  48 от 28.03.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 28.03.2017, акту о приемке выполненных работ № 1-1. от 28.03.2017 истцом выполнены работы на сумму 32 514 507, 96 руб. (с НДС), из которых  стоимость вовлеченных в работы материалов  составляет 18 040 391, 37 руб., стоимость работ - 14 474 116, 59 руб. Размер резерва (10% от стоимости работ) составляет 1 447 411, 66  руб. Оплата произведена ответчиком в размере 13 026 704, 93 руб. (платежное поручение № 523152 от 25.05.2017); 

- по счет-фактуре  №  65 от 28.04.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 28.04.2017, акту о приемке выполненных работ № 2 от 28.04.2017 истцом выполнены работы на сумму 40 468 710, 59  руб.  (с НДС), из которых стоимость вовлеченных в работы материалов составляет  20 902 866, 77  руб., стоимость  работ  - 19 565 843,82 руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила 1 956 584, 38  руб. В порядке компенсации стоимости за переданные заказчиком для строительства материалов   денежное обязательство по оплате вовлеченных в выполнение работ материалов исполнено на сумму  20 902 866, 77 руб., о чем между сторонами был составлен акт от № 6 от 27.06.2017. Оплата произведена ответчиком в размере  17 609 259, 44 руб. (платежным поручением № 549915 от  11.07.2017). В порядке компенсации стоимости за переданные заказчиком для строительства материалов оплата в сумме 5 572 069, 59 руб. исполнена сторонами на основании акта № 7 от 13.07.2018; 

- по счет-фактуре №  112 от 28.07.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 28.07.2017, а также акту о приемке выполненных работ № 3-1 от 28.07.2017 истцом выполнены работы на сумму 19 005 417, 26  руб. (с НДС), из  которых стоимость вовлеченных в работы материалов составляет 14 732 823, 37  руб., стоимость работ – 4 272 593, 89  руб. Размер резерва (10% от стоимости работ) составил  427 259, 39  руб. 

- по счет-фактуре  №  131 от 30.08.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 28.07.2017, акту о приемке выполненных работ № 3-1 от 28.07.2017 г. истцом выполнены работы на сумму 2 066 496, 96 руб. (с НДС), из которых стоимость вовлеченных в работы материалов составляет 1 451 671, 85 руб., стоимость работ - 614 825, 11 руб. Размер резерва  (10% от стоимости работ) составил 145 167, 19  руб. 

По договору подряда №БП/у/136/16/УКС от 30.03.2016 общая стоимость работ составляет 554 464 323, 47 руб. Истцом выполнены работы в размере  105 276 020, 78 руб. Ответчик  произвел оплату выполненных работ  в размере 99 771 859, 44 руб.

Размер неисполненных денежных обязательств заказчиком составляет 5 504 161, 33 руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ) составляет 4 586 222, 07 руб. 

Окончательные результаты работ истцом не сданы, сторонами не подписаны акты приемки законченных строительством объектов по форме КС-11.

Исполнение сторонами договора подряда №БП/у/136/16/УКС подтверждается следующим:

-по счет-фактуре № 194 от 30.03.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.03.2016, акту о приемке выполненных работ № 1 от 30.03.2016 г. истцом выполнены работы на сумму 57 229 123, 79  руб. (с НДС), из которых стоимость вовлеченных в работы материалов составляет 34 180 272, 29  руб., стоимость работ - 23 048 851, 50 руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ) составляет 2 304 885, 15  руб. Оплата произведена ответчиком в размере 54 924 238, 64 руб., из которой стоимость материалов составляет  34 180 272, 29  руб. (платежное поручение № 292893  от 23.05.2016), оплата работ составляет 20 743 966, 35 руб. (платежное поручение № 293989 от 23.05.2016; платежное поручение № 285583 от 12.05.2016); 

- по счет-фактуре №  204 от 28.04.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 28.04.2016, акту о приемке выполненных работ № 2 от 28.04.2016 истцом выполнены работы на сумму 29 783 418, 62  руб. (с НДС), из которых стоимость материалов составляет 17 232 558, 66 руб., стоимость работ  – 12 550 859, 96 руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила 1 255 086  руб. Оплата произведена ответчиком в размере 28 528 332, 62 руб., из которых оплата вовлеченных материалов составляет 17 232 558, 66  руб. (платежное поручение № 303457  от 08.06.2016), оплата работ составляет 11 295 773, 96 руб.  (платежное поручение № 315190 от 27.06.2016); 

- по счет-фактуре №  275  от 28.09.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат №  3  от 28.09.2016, акту о приемке выполненных работ №  3 от 28.09.2016 истцом выполнены работы на сумму 2 205 440, 06 руб.  (с НДС). Сумма резерва (10% от стоимости работ)  составила 220 544, 01  руб. Оплата произведена ответчиком в размере 1 984 896, 05  руб. (платежное поручение №415481 от 28.11.2016);

 - по счет-фактуре №  332 от 28.10.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат №  4 от 28.10.2016 г., акту о приемке выполненных работ №  4 от 28.10.2016 истцом выполнены работы на сумму 3 639 852, 78  руб. (с НДС). Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила 363 985, 28  руб. Оплата работ произведена ответчиком на сумму 3 275 867, 50  руб. (платежное поручение № 432479 от 26.12.2016);    

- по счет-фактуре №  27 от 28.02.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат №  13 от 28.02.2017, акту о приемке выполненных работ №  1-1 и № 1-2 от 28.02.2017 истцом выполнены работы на сумму 4 444 630, 44 руб. (с НДС), из   которых стоимость вовлеченных материалов составляет 2 380 168, 52 руб.,  стоимость работ  - 2 064 461, 92 руб. Сумма  резерва (10% от стоимости работ)  составила  206 446, 19  руб. В порядке компенсации стоимости за переданные заказчиком для строительства материалов денежные обязательства по оплате работ  на сумму 4 238 184,25 рубля исполнены на сумму 2 380 168,52  руб. на основании акта № 1 от 17.04.2018, обязательство по оплате выполненных работ на сумму 1 858 015, 73 руб. исполнено на основании акта № 3 от 11.05.2017;              

- по счет-фактуре №  50 от 28.03.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат №  2 от 28.03.2017, акту о приемке выполненных работ №  2-1 и № 2-2 от 28.03.2017 истцом выполнены работы на сумму 2 274 211, 16  руб.  (с НДС), из  которых стоимость вовлеченных в работы материалов составляет 1 357 565, 92  руб., стоимость работ - 916 645, 24 руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила 91 664, 52  руб. В порядке компенсации стоимости за переданные заказчиком для строительства материалов денежное обязательство по оплате вовлеченных в выполнение работ материалов исполнено на сумму  1 357 565, 92  руб., о чем между сторонами был составлен акт № 2 от  26.05.2017. Оплата произведена ответчиком на сумму 824 980, 72 руб. (платежное поручение № 523155 от 25.05.2017); 

- по счет-фактуре №  49 от  28.03.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат №  5 от 28.03.2017, акту о приемке выполненных работ  от 28.03.2017 истцом выполнены работы на сумму 2 274 211, 16  руб. (с НДС), из   которых стоимость вовлеченных в работы материалов составила 1 371 605, 36 руб., стоимость работ  - 416 065, 64 руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ)  составила  41 606, 56  руб. В порядке компенсации стоимости за переданные заказчиком для строительства материалов    денежное обязательство по оплате вовлеченных в выполнение работ материалов исполнены в размере 1 371 605, 36  руб., о чем между сторонами был составлен акт № 2 от  26.05.2017. Оплата произведена ответчиком в размере  374 459, 08  руб. (платежное поручение № 523154  от 25.05.2017); 

- по счет-фактуре №  94 от 29.05.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат №  6 от 29.05.2017, акту о приемке выполненных работ №  6 от 29.05.2017 г. истцом выполнены работы в размере 3 911 672, 92  руб. (с НДС), из которых стоимость вовлеченных в работы материалов  составляет 2 891 729, 30  руб., стоимость работ  - 1 019 943, 62 руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ)  составляет 101 994, 36  руб. В порядке компенсации стоимости за переданные заказчиком для строительства материалов   денежное обязательство по оплате вовлеченных в выполнение работ материалов исполнено на сумму  2 891 729, 30   руб., о чем между сторонами был составлен акт № 8 от 10.07.2017. 

6. По договору подряда №БП/у/166/16/УКС  от 29.02.2016 общая стоимость работ составляет 296 856 569, 47 руб., работы выполнены истцом на сумму  262 413 183, 43 руб.  Ответчик произвел оплату выполненных работ на сумму 249 268 094, 99   руб. Сумма резерва (10 % от стоимости работ) составляет 7 506 905, 01 руб. 

Окончательные результаты работ истцом не сданы, сторонами не подписаны акты приемки законченных строительством объектов по форме КС-11.

Исполнение сторонами договора подряда №БП/у/166/16/УКС подтверждается следующим: 

- по счет-фактуре  № 206 от 28.04.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 28.04.2016, акту о приемке выполненных работ № 1-1 от 28.04.2016 истцом  выполнены работы на сумму 55 294 888, 62 руб. (с НДС),  из которых стоимость вовлеченных в работы материалов  составляет 33 529 638, 76  руб.; стоимость работ -  21 765 249, 86 руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила 2 176 524, 99 руб. Оплата произведена ответчиком в размере  53 118 363, 63 руб., из которых оплата вовлеченных материалов  составляет 33 529 638, 76 руб. (платёжное поручение № 304458 от 09.06.2016), оплата работ - 19 588 724, 87 руб.  (платежное поручение № 315189 от 27.06.2016);

- по счет-фактуре №  207 от 28.04.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 28.04.2016, акту о приемке выполненных работ № 1-1 от 28.04.2016 истцом выполнены работы на сумму 17 582 275, 79 руб. (с НДС), из которых стоимость вовлеченных в работы материалов составляет  -  11 285 270, 69  руб., стоимость работ  - 6 297 005, 10 руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила 629 700, 51 руб. Оплата произведена ответчиком в размере 16 952 575, 28 руб., из которых оплата вовлеченных материалов на сумму составляет 11 285 270, 69 руб. (платежное поручение № 304457 от 09.06.2016), оплата работ – 5 667 304, 59 руб.  (платежное поручение № 315188 от 27.06.2016);

 - по счет-фактуре №  225 от 30.05.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.05.2016, акту о приемке выполненных работ № 1-1 от 30.05.2016 истцом выполнены работы на сумму 1 578 468, 43 руб. (с НДС), из которых  стоимость вовлеченных в работы материалов составляет 779 657, 99 руб.,  стоимость работ - 798 810, 44  руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила 79 881, 04 руб. Оплата произведена ответчиком в размере 1 498 587, 39 руб., из которых оплата вовлеченных материалов составляет 779 657, 99 руб.  (платежное поручение № 323991 от 08.07.2016);  оплата работ составляет 718 929, 40 руб. (платежное поручение № 340230 от 29.07.2016);

- по счет-фактуре №  226 от 30.05.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 30.05.2016, акту о приемке выполненных работ № 2-1, № 2-2, № 2-3, № 2-4 от 30.05.2016 истцом выполнены работы на сумму 34 321 425, 83 руб. (с НДС), из которой  стоимость вовлеченных в работы материалов  составляет 25 728 243, 39  руб., стоимость материалов - 8 593 182, 44 руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ)  составила 859 318, 24 руб.   Оплата произведена ответчиком в сумме 33 462 107,58 руб., из которых оплата вовлеченных материалов составляет 25 728 243, 38 руб. (платежные поручения № 323992 от 08.07.2016 г., № 325370 от 12.07.2016, № 295138 от 12.07.2016 ), оплата работ составляет 7 733 864, 20 руб. (платежное поручение № 340229 от 29.07.2016);

 - по счет-фактуре №  227 от 30.05.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 30.05.2016, акту о приемке выполненных работ № 2-1, № 2-2, № 2-3 от 30.05.2016 истцом выполнены работы на сумму 77 321 281, 87 руб. (с НДС), из которых стоимость вовлеченных в работы материалов  составляет 62 257 338, 15  руб., стоимость работ  - 15 063 943, 72  руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила 1 506 394, 38 руб. Оплата работ произведена ответчиком в размере 75 814 887, 49 руб., из которых оплата вовлеченных материалов составляет  62 257 338, 15  руб.  (платежные поручения № 325519 от 13.07.2016 г., № 329400 от 15.07.2016, № 329399 от 15.07.2016 г. , № 334637 от 25.07.2016, от № 334247 от 26.07.2016, № 334246 от 27.07.2016), оплата составляет 13 557 549, 34 руб. (платежное поручение №340231 от 29.07.2016); 

- по счет-фактуре  №  240 от 30.06.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 30.06.2016, акту о приемке выполненных работ № 3-1, № 3-2, № 3-3, 3 3-4, № 3-5, № 3-6 от 30.06.2016 истцом выполнены работы на сумму 77 321 281, 87 руб. (с НДС), из которых стоимость вовлеченных в работы материалов  составляет 6 438 963, 88 руб., стоимость работ - 3 688 514, 80 руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ)  составила 368 851, 48 руб.  Оплата произведена ответчиком в сумме 9 758 627, 20 руб., из которых оплата вовлеченных материалов составляет 6 438 963, 88 руб. (платежное поручение № 341393 от 08.08.2016), оплата работ  - 3 319 663, 32 руб.  (платежное поручение № 358882 от 31.08.2016); 

-по счет-фактуре №  330 от 31.10.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 31.10.2016, акту о приемке выполненных работ № 3-1 от 31.10.2016 г. истцом выполнены работы на сумму 2 959 802, 26 руб. (с НДС). Сумма резерва (10% от стоимости работ)  составила 295 980, 23 руб. Оплата произведена ответчиком на сумму 2 663 822, 03 руб. (платежное поручение №415481  от 28.11.2016); 

- по счет-фактуре №  334 от 31.10.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 31.10.2016, акту о приемке выполненных работ № 4 от 31.10.2016  истцом  выполнены работы на сумму 1 142 019, 61 руб.  (с НДС), из которых стоимость вовлеченных в работы материалов составляет 933 302, 39  руб., стоимость работ  - 208 717, 22 руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила 20 871, 72 руб. Оплата произведена ответчиком в сумме 1 121 147,89 руб., из которых оплата вовлеченных материалов составляет 933 302, 39 руб. (платежное поручение  от 13.12.2016), оплата работ  составляет 187 845, 50 руб.  (платежное поручение № 434542 от 28.12.2016);

- по счет-фактуре №  343 от 31.10.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.10.2016, акту о приемке выполненных работ № 1-1, № 1-2, № 1-3 от 31.10.2016 истцом выполнены работы на сумму 1 813 653, 83 руб. (с НДС), из которых стоимость вовлеченных в работы материалов составляет 866 887, 91  руб., стоимость работ  - 946 765, 92 руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила 94 676, 59 руб. Оплата произведена ответчиком в сумме 1 718 977, 24 руб., из которых оплата вовлеченных материалов составляет  866 887, 91 руб. (платежное поручение №421900 от 13.12.2016), оплата работ составляет 852 089, 33 руб.  (платежное поручение от № 434543 от 28.12.2016); 

- по счет-фактуре №  354 от 01.12.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 01.12.2016,  акту о приемке выполненных работ № 5-1 и № 5-2 от 01.12.2016 истцом выполнены работы на сумму 1 322 330, 42  руб. (с НДС).  Сумма резерва (10% от стоимости работ)  составила 132 233, 04 руб. Оплата произведена ответчиком на сумму 1 190 097, 38 руб. (платежное поручение № 456290 от 31.01.2017); 

- по счет-фактуре №  354 от 01.12.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 01.12.2016, акту о приемке выполненных работ № 4 от 01.12.2016 г. истцом выполнены работы на сумму 41 196, 16  руб. (с НДС). Сумма  резерва (10% от стоимости материалов) составила  4 119, 62 руб. Оплата произведена ответчиком на сумму 37 076, 54 руб. (платежное поручение № 456291 от 31.01.2017); 

- по счет-фактуре  №  374 от 23.12.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 23.12.2016, акту о приемке выполненных работ № 6-1, № 6-2 от 23.12.2016 истцом выполнены работы на сумму 4 488 985,41  руб. (с НДС), в стоимость которой  включена  стоимость вовлеченных в работы материалов -  3 537 208, 03   руб., стоимость работ - 951 777, 38  руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила 95 177, 74 руб. Оплата произведена ответчиком в сумме 4 393 807, 67 руб., из которых оплата вовлеченных материалов  составляет 3 537 208, 03 руб. (платежное поручение № 471199 от 27.02.2017), оплата работ - 856 599, 64 руб. (платежное поручение № 471017 от 27.02.2017); 

- по счет-фактуре №  11 от 31.01.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 7 от 31.01.2017, акту о приемке выполненных работ № 7-1, № 7-2, № 7-3, № 7-3, № 7-4, № 7-5, № 7-6, № 7-7, № 7-8, № 7-9 от 31.01.2017 г. истцом выполнены работы на сумму 1 673 712, 24  руб. (с НДС), в стоимость которой  включена  стоимость материалов  в размере 744 324, 18 руб., стоимость работ - 929 388, 06  руб. Сумма резерва (10% от стоимости материалов) составила 92 938, 81  руб. В порядке компенсации стоимости за переданные заказчиком для строительства материалов денежное обязательство по оплате вовлеченных в выполнение работ материалов исполнено на сумму  744 324, 18  руб., о чем между сторонами был составлен акт от № 1 17.04.2017. Оплата произведена ответчиком на сумму 836 449, 25 руб. (платежное поручение № 502637  от 28.04.2017); 

- по счет-фактуре № 10 от 31.01.2017 справке о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 31.01.2017,  акту о приемке выполненных работ № 5 от 31.01.2017 истцом выполнены работы на сумму 974 179, 68  руб.  (с НДС). Сумма резерва (10% от стоимости работ) составил 97 417, 97 руб. В порядке компенсации стоимости за переданные заказчиком для строительства материалов денежные обязательства по оплате работ исполнены на сумму 319 098,85 руб., о чем между сторонами был составлен акт № 3 от 11.05.2017. Оплата произведена ответчиком по платежному поручению № 501293  от 28.04.2017 на сумму 557 662,86 руб.; 

- по счет-фактуре № 30 от 28.02.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 8 от 28.02.2017., акту о приемке выполненных работ № 8-1 от 28.02.2017   истцом выполнены работы на сумму 15 432 067, 91 руб. (с НДС), в стоимость которой  включена  стоимость вовлеченных в работы материалов  -  13 773 131, 87 руб., стоимость работ  - 1 658 936, 04  руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила 165 893, 60 руб. В порядке компенсации стоимости за переданные заказчиком для строительства материалов обязательства по оплате работ исполнены на сумму 13 773 131, 87 руб., о чем между сторонами был составлен акт № 2 от 26.05.2017, а также на сумму 1 493 042, 44 руб. акт № 3 от 11.05.2017; 

- по счет-фактуре № 53 от 28.03.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 9 от 28.03.2017, акту о приемке выполненных работ  № 9-1, № 9-2, № 9-3, № 9-3, № 9-4, № 9-5, № 9-6, № 9-7, № 9-8, № 9-9 от 28.03.2017. истцом выполнены работы на сумму 21 838 270, 77 руб. (с НДС), в стоимость которой  включена  стоимость вовлеченных в работы материалов  -  19 233 668,57 руб., а также стоимость работ - 2 604 602, 20 руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила 260 460, 22 руб. В порядке компенсации стоимости за переданные заказчиком для строительства материалов  денежное обязательство по оплате вовлеченных в выполнение работ материалов исполнено на сумму  19 233 668,57 руб., о чем между сторонами был составлен акт от № 2 26.05.2017. Оплата строительно-монтажных работ произведена ответчиком по платежному поручению № 523153  от 31.05.2017 на сумму 2 344 141, 98 руб.; 

- по счет-фактуре № 69 от 28.04.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 10 от 28.04.2017, акту о приемке выполненных работ № 10-1, № 10-2, № 10-3, № 10-4, № 10-5, № 10-6, № 10-7, № 10-8, № 10-9, № 10-10, № 10-11, № 10-12 от 28.04.2017 истцом выполнены работы на сумму 10 103 302, 99  руб. (с НДС), из которых стоимость вовлеченных в работы материалов  составляет 8 069 237, 87 руб., стоимость работ -  2 034 065, 12 руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ) составила 203 406, 51 руб.  В порядке компенсации стоимости за переданные заказчиком для строительства материалов  денежное обязательство по оплате вовлеченных в выполнение работ материалов исполнено на сумму 8 069 237,87 руб., о чем между сторонами был составлен акт № 4 от 08.06.2017; 

- по счет-фактуре № 72 от 28.04.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 28.04.2017, акту о приемке выполненных работ № 6 от 28.04.2017 г. истцом выполнены работы на сумму 202 490, 69  руб. (с НДС), из которых стоимость вовлеченных в работы материалов составляет 70 717, 73  руб., стоимость работ - 131 772, 96 руб. Сумма резерва (10% от стоимости работ)  составляет  13 177, 30 руб. В порядке компенсации стоимости за переданные заказчиком для строительства материалов денежное обязательство по оплате вовлеченных в выполнение работ материалов исполнено на сумму  70 717, 73 руб. на основании акта № 4 от 08.06.2017; 

- по счет-фактуре № 95 от 29.05.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 11 от 29.05.2017, акту о приемке выполненных работ № 11-1, № 11-2, № 11-3, № 11-4, № 11-5, № 11-6 от 29.05.2017 истцом выполнены работы на сумму 4 195 352,25 руб.(с НДС), из которых стоимость вовлеченных в работы материалов -  96 542,07  руб. ;стоимость  работ  - 4 098 810, 18  руб. Сумма  резерва (10 % от стоимости работ) составляет 409 881, 02 руб. В порядке компенсации стоимости за переданные заказчиком для строительства материалов денежное обязательство по оплате вовлеченных в выполнение работ материалов прекращено на сумму 96 542, 07 руб., о чем между сторонами был составлен акт № 8 от 10.07.2017. 

При таких обстоятельствах, при исполнении денежных обязательств по оплате выполненных истцом работ в рамках шести договоров подряда, сумма гарантийного удержания ответчиком, предусмотренного пунктами 13.3 договоров подряда в размере 10% стоимости работ, составляет 21 825 947 руб. 85 коп.. Также ответчиком не оплачена стоимость работ на сумму 42 020 993 руб. 52 коп.

Рассматриваемые в настоящем деле договоры подряда расторгнуты ответчиком в одностороннем порядке, о чем свидетельствуют уведомления, направленные в адрес истца от 19.10.2017 № 01-04/08417, от 24.10.2017 № 01-04/8554, от 25.10.2017 № 01-04/08556, от 21.03.2018 № 01-04/02424, от 24.10.2017 № 01-04/08557, от 21.03.2018 № 01-04/02422.

Ссылаясь на задолженность по оплате выполненных строительно-монтажных работ по договорам №БП/у/12/16/УКС от 21.01.2016,  №БП/у/41/17/УКС от 21.02.2017, №БП/у/107/17/УКС от 06.03.2017, №БП/у/122/17/УКС от 20.03.2017, №БП/у/136/16/УКС от 30.03.2016, №БП/у/166/16/УКС от 29.02.2016 истец обратился в арбитражный суд с рассматриваемыми требованиями.

Повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта. 

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом. 

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности (статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором (пункт 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Положениями статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Согласно материалам дела, во исполнение обязательств по спорным договорам подрядчиком выполнены, а заказчиком приняты строительно-монтажные работы на общую сумму 68 168 268 руб. 95 коп.  и не оспаривается сторонами.

Как обоснованно указанно судом первой инстанции, сумма задолженности ответчика перед истцом в размере 68 168 268 руб. 95 коп.  состоит из: 21 825 947 руб. 85 коп. – гарантийное удержание в соответствии с  п. 13.3 договоров, 42 020 993 руб. 52 коп. – задолженность за выполненные  и принятые работы по актам КС-2.

 По смыслу пункта 1 статьи 704, пункта 1 статьи 745 Гражданского кодекса Российской Федерации обеспечение строительства выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

Пунктом 3.1.1 договоров подряда предусмотрено, что в общую стоимость работ по договору включается стоимость материалов и оборудования, приобретаемых подрядчиком самостоятельно.

Согласно пункту 13.1.3 договоров, расчет за выполненные работы производится заказчиком в срок не ранее 45 и не позднее 60 календарных дней с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и предоставления подрядчиком надлежаще оформленных счетов-фактур и документов, предусмотренных п.6.63 договора, при условии оплаты подрядчиком материалов, приобретенных у заказчика по договору купли-продажи товарно-материальных ценностей.

Материалами дела подтверждается, что во исполнение договоров подряда сторонами заключены договоры купли-продажи (№ БП/П/87/16/МТС; № БП/У/230/17/УСХ; № БП/У/229/17/УСХ; № БП/П/87/17/УСХ; № БП/П/241/16/МТС; № БП/П/417/16/МТС), в соответствии с которыми заказчиком передавались подрядчику строительные материалы для обеспечения строительства объектов.

Определением Арбитражного суда Архангельской области от 23.05.2018 по делу №А05-4388/2018 включена в реестр требований кредиторов ООО «СтроймонтажТимано-Печора» задолженность  истца перед ответчиком за переданные, но неоплаченные материалы в размере 59 629 951 руб. 

В силу положений статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

При таких обстоятельствах, поскольку обязательство истца по оплате товара, вовлеченного в производство работ по договорам подряда, не исполнено, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в сумме 42 020 993 руб. 32 коп.

На основании изложенного подлежит отклонению довод заявителя о том, что поскольку вся первичная документация со стороны ответчика подписана без замечаний, то в соответствии с п. 13.1.3  договоров подлежит оплате не позднее 60 календарных дней с даты их подписания.

Отказывая в удовлетворении исковых требований в оставшейся сумме, суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

Положениями статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.

В пункте 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Из содержания положений статей 711, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В пункте 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Согласно положениями п. 13.3 договоров заказчик резервирует 10% указанной в пункте 3.1.1 договоров стоимости строительно-монтажных работ, включая стоимость материалов и оборудования, приобретаемых подрядчиком самостоятельно, до завершения строительства объекта. Резервирование осуществляется заказчиком путем оплаты объемов соответствующих строительно-монтажных работ по каждому счету-фактуре за минусом 10% от указанной в ней суммы. Зарезервированные таким образом 10% выплачиваются подрядчику не позднее 30 календарных дней после полного окончания работ (включая устранение выявленных при приемке завершенного строительством объекта дефекты) и подписания заказчиком акта приемки законченного строительством объекта.

Пунктом 12.4 договоров стороны предусмотрели, что приемка законченного строительством объекта осуществляется рабочей комиссией, создаваемой заказчиком, на основании уведомления подрядчика о завершении работ и необходимости создания рабочей комиссии для приемки объекта. Дата проведения приемки рабочей комиссией законченного строительством объекта устанавливается заказчиком после получения уведомления от подрядчика о завершении работ. В состав комиссии включаются уполномоченные представители заказчика, подрядчика, проектировщика и, при необходимости, представители иных приглашенных заказчиком организаций.

При отсутствии недостатков и/или дефектов в выполненных работах, заказчик обязан в течение 10 дней с даты комиссионной приемки объекта подписать акт формы КС-11 (п. 12.5 договоров).

Как правомерно указано судом первой инстанции, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцом не представлены доказательства, подтверждающие исполнение ООО «СтроймонтажТимано-Печора» обязательства по выполнению работ в полном объеме; строительство объектов не завершено, предусмотренные положениями раздела 12 договоров подряда акты приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11 в адрес ответчика не направлялись и сторонами не подписывались.

Материалы дела не содержат доказательств, свидетельствующих о том, что ответчик недобросовестно уклонялся от подписания акта законченного строительством объекта по форме КС-11 или истец обращался к ответчику с требованиями по составлению такого акта.

Оценив представленные в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные сторонами доказательства, с учетом положений заключенных договоров, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу, что сумма гарантийных удержаний в настоящее время оплате не подлежит, так как работы по договорам не завершены, окончательный акт приема-передачи выполненных не подписан.

Довод заявителя о том, что взыскиваемая истцом сумма задолженности за выполненные подрядные работы включается в конкурсную массу и распределяется соразмерно заявленным требованиям кредиторов, в очередности, предусмотренной статьей 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», отклоняется судом апелляционной инстанции.

Как обоснованно указано судом первой инстанции факт возбуждения дела о банкротстве подрядчика не может служить основанием для досрочной оплаты всего объема выполненных работ. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что со дня открытия конкурсного производства считается наступившим срок исполнения возникших до этого денежных обязательств должника. Такие последствия на обязательства контрагентов должника-подрядчика не распространяются. Это означает, что при наличии у должника контрагентов-заказчиков, срок исполнения обязательств которых не наступил, несостоятельный подрядчик имеет возможность реализовать дебиторскую задолженность, получив до ликвидации денежный эквивалент за свой актив. 

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не опровергают выводы суда первой инстанции, а лишь выражают несогласие с ними, не подтверждены отвечающими требованиям главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами, основаны на ином толковании правовых норм, направлены на переоценку выводов суда первой инстанции, сделанных при правильном применении норм материального права, и не могут быть признаны основанием к отмене или изменению решения. Иная оценка подателем жалобы обстоятельств спора не свидетельствует об ошибочности выводов суда. Каких-либо новых обстоятельств, опровергающих выводы суда, апеллянтом не приведено.

Разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда первой инстанции соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену решения, судом первой инстанции допущено не было.

С учетом изложенного решение суда является правильным, нарушений норм материального и процессуального права не допущено, имеющимся в деле доказательствам дана надлежащая правовая оценка. Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены вынесенного судебного акта, не установлено.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы ответчика по уплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы относятся на его счет. 

В связи с предоставлением ООО «СтроймонтажТимано-Печора»  отсрочки по уплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы с него подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственная пошлина (статья 102 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подпункты 4 и 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции 

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 24.10.2018 по делу №А07-13136/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «СтроймонтажТимано-Печора» – без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтроймонтажТимано-Печора» в доход федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе 3 000 руб.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции. 

 

Председательствующий судья                                         Н.В. Махрова

 

Судьи:                                                                               М.В. Лукьянова

 

                                                                                          С.А. Карпусенко