АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, д. 36А, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 

 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск  «11» сентября 2024 года Дело № А19-16065/2024  

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Коломиновой Н.Ю.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску областного государственного  бюджетного учреждения "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО БОХАНСКОМУ РАЙОНУ" (ИНН: 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ-38" (ИНН: 

<

***>) об  обязании выполнить гарантийные обязательства, о взыскании штрафа в размере  50 000 руб.  

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ-38" (ИНН:  

<

***>) в течение месяца со дня вступления решения суда по настоящему делу в  законную силу устранить недостатки работ, выполненных по контракту № 32-2021-КР от  21 июня 2021 года, а именно  

1. Устранить образовавшиеся дефекты асфальтового покрытия на территории:  трещины (продольные и поперечные) от 2 до 8 метров, разрушения асфальтного  покрытия;  

2. Провести ремонтные работы отмостков по периметру здания ; 

3. По фасаду здания: устранить образовавшиеся горизонтальные и вертикальные  трещины до 4 метров);  

4. В здании устранить образовавшиеся трещины на стенах в кабинете 18, кабинете  28;  

5. Выполнить в соответствии с техническим заданием: Линолеум коммерческий  гомогенный "ТАРКЕТТ iQGRANITACOUSTIK", акустический (толщина 5 мм, класс  34/43,пож.безопасностьГ4,ВЗ,РП",Д",Т2)" в объеме 188,1 кв.м.;  

6. Устранить деформацию полового покрытия в кабинете № 26 путем замены  фанеры;  

7. Провести замену ограждения забора, выполнить из металлической трубы  140*140*6мм,согласно ПСД;  

8. Провести замену ворот и калитки выполнить из металлической трубы  180*180*8мм,согласно ПСД;  

9. Провести замену деревянных брусков секций ограждения на металлические трубы  357,9 п.м. (=119,03п.м*3),согласно ПСД;  

10. Выполнить замену металлического профиля согласно проектно-сметной  документации (ПСД) с применением профнастила оцинкованного с полимерным  покрытием С8-1150 0,7 по объему 276,4 кв.м;  

11. Выполнить окраску металлических огрунтованных поверхностей эмалью -ПФ115 в объеме -233,3 кв.м..  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ-38" (ИНН:  

<

***>) в пользу областного государственного бюджетного учреждения  "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ ПО БОХАНСКОМУ РАЙОНУ" (ИНН: 

<

***>) 50 000 руб. штрафа.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ-38" (ИНН:  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере  8 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Иркутской области в течение одного месяца со дня его принятия.  

Судья Н.Ю. Коломинова