4567/2023-213107(2) 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-107132/2022

12 апреля 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 30 марта 2023 года. Полный текст решения изготовлен 12 апреля 2023 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:  судьи Новиковой Е.В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Барминой А.А.  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЕ" (195030, Г.  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЖЕВКА, ХИМИКОВ  УЛ., Д. 28, ЛИТЕРА АС, ПОМЕЩ. 1-Н, КОМ. 1206, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 25.11.2020, ИНН: 

<

***>, КПП: 780601001);  

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАМЕТР"  (119435, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ХАМОВНИКИ, БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ ПЕР., Д. 11, ПОМЕЩ. 21/3/5,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 28.07.2015, ИНН: 

<

***>,  КПП: 770401001);  

о взыскании 

при участии - от истца: ФИО1 по доверенности - от ответчика: не явился (извещен) 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Поле» (далее - истец) обратилось в  Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым  заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Параметр» (далее -ответчик)  о взыскании 5398173 руб. 95 коп. оставшейся стоимости выполненных работ по  договору подряда № 10/21-П от 10.03.2021, 1929950 руб. оплаты за выполненные работы  по дополнительному соглашению от 28.02.2022 к договору подряда № 10/21-П от  10.03.2021, 876816 руб. 40 коп. оставшейся стоимости выполненных работ по договору  подряда № 11/21-П от 10.03.2021, 416500 руб. оплаты за выполненные работы по  дополнительному соглашению от 28.02.2022 к договору подряда № 11/21-П от  10.03.2021, пени по договору подряда № 10/21-П от 10.03.2021 в размере 51669 руб. 64  коп., пени договору подряда № 11/21-П от 10.03.2021 в размере 9303 руб. 99 коп.  

В настоящем судебном заседании истец заявленные требования поддержал в  полном объеме.  

 Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения  дела, в судебное заседание не явился, представил ходатайство об отложении судебного  заседания, для примирения сторон.  

Истец возможность примирения не подтвердил. 

Судом указанное ходатайство отклонено. Сторонами не представлено проекта  мирового соглашения и не заявлено о применении процедуры медиации. При этом суд  отмечает, что примирение сторон возможно на любой стадии судопроизводства в том  числе на и стадии исполнительного производства.  

Арбитражный суд, в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, признав надлежащим уведомление ответчика, полагает возможным  завершить предварительное судебное заседание и рассмотреть дело по существу.  

Как следует из материалов дела между ООО «Поле» (субподрядчик) и ООО  «Параметр» (подрядчик) заключен договор подряда № 10/21-П от 10.03.2021 (далее  договор № 1) на поставку материалов, выполнение работ по монтажу оборудования для  строительства объекта (работы).  

Срок выполнения работ - 30.11.2021 (согласно дополнительному соглашению от  29.09.2021).  

По состоянию на дату подачи искового заявления истцом исполнены обязательства  по выполнению работ в полном объеме, кроме того, выполнен дополнительный объем  работ.  

Ответчиком работы оплачены частично, задолженность по оплате составила  7328123 руб. 95 коп.  

Согласно п. 2.1., 7.1.1. договора № 1, подрядчик обязуется принять результат  выполненных работ и оплатить их в порядке, предусмотренном условиями договора.  

Согласно п.8.3. договора, приемка работ подрядчиком осуществляется  оформленными и подписанными Актом о приемке выполненных работ (Форма № КС-2)  и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3).  

Истец надлежащим образом выполнил работы по договору, что подтверждается  двусторонне подписанными Актами о приемке выполненных работ (Форма № КС-2),  Справками о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3): № 1 от  30.05.2021, № 2 от 31.07.2021, № 3 от 31.07.2021, № 9 от 30.08.2021, № 8 от  31.08.2021, № 7 от 01.09.2021, № 10 от 28.10.2021, № 11 от 01.04.2022, № 13 от  01.04.2022, № 14 от 01.04.2022, № 16 от 01.04.2022, № 17 от 01.04.2022.  

А также актами выполненных работ на дополнительные работы по  дополнительному соглашению от 28.02.2022 к договору № 1: № 12 от 28.02.2022, № 25  от 28.02.2022, № 26 от 28.02.2022.  

Акты, подтверждающие выполнение работ переданы ответчику и приняты  последним по акту приема-передачи 20.07.2021, 15.10.2021, 31.03.2022, 22.08.2022.  Указанные акты также направлялись по электронной почте на почтовый ящик  подрядчика, указанный в разделе 18 договора № 1.  

Договором срок рассмотрения и подписания первичных учетных документов не  регламентирован.  

Ответчик против принятия указанных работ не возражал, каких-либо  мотивированных возражений по срокам, качеству и объему выполненных работ не  предъявлял.  

В соответствии с п.2 ст. 314 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не  содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок  исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно  

быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его  исполнении.  

Согласно Определению Верховного Суда РФ от 25.09.2017 № 306-ЭС17-12853 по  делу № А55-5794/2016, если договором подряда не установлен конкретный срок для  подписания акта выполненных работ, то заказчик при отсутствии возражений обязан  подписать указанный акт в течение 7 (семи) дней и вернуть его подрядчику.  

Мотивированного отказа в приемке работ с учетом разумных сроков сдачи-приемки работ в адрес субподрядчика от подрядчика не поступило, соответственно  работы считаются принятыми в полном объеме, и подлежат оплате.  

Согласно п. 5.2. договора, расчеты по договору осуществляются платежными  поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет  субподрядчика, указанный в договоре.  

Таким образом, по состоянию на 30.09.2022 обязательство по оплате за  выполненные работы по договору № 1 в размере 5398173 руб. 95 коп. и оплаты за  выполненные работы по дополнительному соглашению от 28.02.2022 к договору  подряда № 10/21-П от 10.03.2021 в размере 1929950 руб., ответчиком не выполнено.  

В адрес ответчика направлены претензии исх. № 241 от 11.04.2022, № 256 от  18.08.2022, которые оставлены без ответа. Возражений по обстоятельствам, указанным в  претензиях также не представлено.  

Согласно п.9.5. договора № 1 субподрядчик вправе начислить подрядчику пени за  задержку расчетов в размере 1% в день от неоплаченной в срок суммы, но не более 10%  от неоплаченной в срок суммы.  

Размер пени, подлежащей оплате подрядчиком за период с 28.07.2021 по  30.03.2022: составляет 51669 руб. 64 коп.  

Расчет проверен судом и признан правильным. 

Также согласно материалам дела между ООО «Поле» (субподрядчик) и ООО  «Параметр» (подрядчик) заключен договор подряда № 11/21-П от 10.03.2021 (далее  договор № 2) на поставку материалов, выполнение работ по монтажу оборудования для  строительства объекта (работы).  

Срок выполнения работ - 31.08.2021. 

По состоянию на текущую дату истцом исполнены обязательства по выполнению  работ в полном объеме, кроме того, выполнен дополнительный объем работ.  Задолженность ответчика составляет 1293316 руб. 40 коп.  

Согласно п. 2.1., 7.1.1. договора № 2, подрядчик обязуется принять результат  выполненных работ и оплатить их в порядке, предусмотренном условиями договора.  

Согласно п. 8.3. договора, приемка работ подрядчиком осуществляется  оформленными и подписанными Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2)  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).  

Исполнитель надлежащим образом выполнил работы по договору, что  подтверждается двусторонне подписанными актами о приемке выполненных работ  (форма № КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3):   № 1 от 30.08.2021, № 2 от 30.08.2021, № 15 от 01.04.2022, № 16 от 01.04.2022. А также  актами выполненных работ на дополнительные работы по дополнительному  соглашению от 28.02.2022 к договору № 2: № 11 от 28.02.2022, № 12 от 28.02.2022,   № 13 от 28.02.2022, № 14 от 28.02.2022.  

Акты, подтверждающие выполнение работ переданы ответчику и приняты  последним по акту приема-передачи 15.10.2021, 22.08.2022.  

В договоре срок рассмотрения и подписания первичных учетных документов не  регламентирован.  

В соответствии с п.2 ст. 314 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не  

содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок  исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно  быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его  исполнении.  

Согласно Определению Верховного Суда РФ от 25.09.2017 № 306-ЭС 17-12853 по  делу № А55-5794/2016, если договором подряда не установлен конкретный срок для  подписания акта выполненных работ, то Заказчик при отсутствии возражений обязан  подписать указанный акт в течение 7 (Семи) дней и вернуть его подрядчику.  

Мотивированного отказа в приемке работ с учетом разумных сроков сдачи-приемки работ в адрес субподрядчика от подрядчика не поступило, соответственно,  работы считаются принятыми в полном объеме, и подлежат оплате.  

Согласно п. 5.2. договора, расчеты по договору осуществляются платежными  поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет  субподрядчика, указанный в договоре.  

Таким образом, по состоянию на 30.09.2022 обязательство по оплате за  выполненные работы по договору № 2 в размере 876816 руб. 40 коп. и оплаты за  выполненные работы по дополнительному соглашению от 28.02.2022 к договору  подряда № 11/21-П от 10.03.2021 в размере 416500 руб. ответчиком не выполнено.  

В адрес ответчика направлены претензии исх. № 241 от 11.04.2022, № 257 от  18.08.2022. Претензии оставлены ответчиком без ответа, каких-либо мотивированных  возражений в адрес истца не направлялось.  

Согласно п.9.5. договора № 2 субподрядчик вправе начислить подрядчику пени за  задержку расчетов в размере 1% в день от неоплаченной в срок суммы, но не более 10%  от неоплаченной в срок суммы.  

Размер пени, подлежащей оплате подрядчиком за период с 23.10.2021 по  30.03.2022 составляет 9303 руб. 99 коп.  

Расчет пени проверен судом и признан правильным. 

 Заслушав доводы представителя истца, изучив материалы настоящего дела, оценив  собранные по делу доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу  об удовлетворении иска.  

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК Р

<

Ь),  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких  условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми  требованиями.  

В силу статьи 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,  предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми  актами.  

На основании пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять  результат работы и оплатить его.  

В соответствии с ч.1 с.746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ  производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке,  которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии  соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в  соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.  

Согласно статье 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена  предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан  

уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов  работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный  срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

Частью 1 статьи 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле,  должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих  требований и возражений.  

Доказательств неисполнения или ненадлежащего исполнения работ, а также  направления возражений в адрес истца ответчиком в материалы дела не представлено.  

Пунктом 1 статьи 753 ГК РФ установлено, что заказчик, получивший сообщение  подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного  подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ,  обязан немедленно приступить к его приемке.  

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и  приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, при  отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт  подписывается другой стороной.  

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан  судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта  признаны им обоснованными.  

По смыслу указанных норм основанием для оплаты выполненных работ является  фактическое выполнение предусмотренных договором подряда работ и их передача  заказчику.  

Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения  недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в  договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или  заказчиком (пункт 6 статьи 753 ГК РФ).  

При этом каких-либо доказательств свидетельствующих об основании для отказа в  приемке работ ответчиком в материалы дела не представлено.  

Таким образом, суд считает доказанным факт исполнения истцом работ по  договорам № 10/21-П от 10.03.2021, дополнительных работ по дополнительному  соглашению от 28.02.2022 к договору подряда № 10/21-П, договору подряда 11/21-П от  10.03.2021 и дополнительных работ по дополнительному соглашению от 28.02.2022 к  договору подряда № 11/21-П от 10.03.2021.  

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате  неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

На основании ст. 330 ГК РФ и п.9.3 указанных договоров суд считает возможным  взыскать заявленную судом неустойку по договорам подряда № 10/21-П от 10.03.2021 и  11/21-П от 10.03.2021. Расчет пени проверен судом и признан арифметически верным.  

В силу пункта 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,  участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны.  

Истцу при подаче искового заявления была предоставлена отсрочка в уплате  государственной пошлины в размере 66412 руб., которая подлежит взысканию с  ответчика в доход федерального бюджета.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области  

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Параметр» (ИНН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Поле» (ИНН  

<

***>) денежные средства в общем размере 8682413 руб. 98 коп., из которых  

5398173 рубля 95 копеек оставшейся стоимости выполненных работ по договору  подряда № 10/21-П от 10.03.2021г., 1929950 рублей 00 копеек оплаты за выполненные  работы по дополнительному соглашению от 28.02.2022г. к Договору подряда № 10/21-П  от 10.03.2021г., 876816 рублей 40 копеек оставшейся стоимости выполненных работ по  договору подряда № 11/21-П от 10.03.2021г., 416500 рублей 00 копеек оплаты за  выполненные работы по дополнительному соглашению от 28.02.2022г. к Договору  подряда № 11/21-П от 10.03.2021г., пени по Договору подряда № 10/21-П от 10.03.2021г.  в размере 51669 руб. 64 коп., пени Договору подряда № 11/21-П от 10.03.2021г. в  размере 9303 руб. 99 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Параметр» (ИНН  

<

***>) в доход федерального бюджета 66412 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия Решения.  

Судья Новикова Е.В. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 13.03.2023 11:45:00

 Кому выдана Новикова Елена Владимировна